203/2023-11556(1) 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 17 января 2023 года 

по делу А33-16088/2021 Красноярск

«17» января 2023 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования краевого государственного учреждения здравоохранения «Манская  районная больница» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Амарт» (ИНН 

<

***> , ОГРН  

<

***>, г. Красногорск) в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в  законную силу по настоящему делу устранить недостатки выполненных работах по  контракту от 25.06.2020 «Поставка, установка и сборка модульного здания врачебной  амбулатории модульного типа в п. Камарчага, Манского района Красноярского края для  нужд КГБУЗ «Манская РБ» в рамах государственной программы «Развитие  здравоохранения»» № 0119200000120004897, а именно:  

- обеспечить строительные конструкции здания врачебной амбулатории модульного типа  в п. Камарчига, Манского района Красноярского края в соответствии с разделом VII  приложения № 1 «Техническое задание» к контракту от 25.06.2020 «Поставка, установка и  сборка модульного здания врачебной амбулатории модульного типа в п. Камарчага,  Манского района Красноярского края для нужд КГБУЗ «Манская РБ» в рамах  государственной программы «Развитие здравоохранения»» № 0119200000120004897,  учитывая требования раздела I приложения № 1 «Техническое задание» к контракту от  25.06.2020 № 0119200000120004897,  

- произвести маркировку конструктивных элементов здания несмываемой краской с  помощью трафаретов или штампов, которые должны содержать: товарный знак  предприятия-изготовителя, шифр или код здания (системы), марку изделия, массу изделия,  дату изготовления, штамп ОТК;  

- выполнить выравнивание и уплотнение щебеночной подготовки основания  фундамента;  

- провести сварные соединения в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012,  ГОСТ 23118-2019;  

- выполнить отвод воды от основания здания; - устранить выявленные дефекты покрытия пола; - устранить коррозионные изменения на радиаторах отопления; 

- перенести площадку для твердых бытовых отходов не менее чем на 15 метров от  здания амбулатории, установить навес;  

- в помещении для хранения уборочного инвентаря, в помещении для временного  хранения отходов и санитарной комнате сделать устройство систем кондиционирования для  обеспечения оптимальных уровней параметров микроклимата в соответствии с  требованиями СП 2.1.3678-20;  

- предоставить сопроводительную документацию в соответствии с разделом XIV  приложения № 1 «Техническое задание» к контракту от 25.06.2020 «Поставка, установка и  сборка модульного здания врачебной амбулатории модульного типа в п. Камарчага,  Манского района Красноярского края для нужд КГБУЗ «Манская РБ» в рамах  государственной программы «Развитие здравоохранения»» № 0119200000120004897.  

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «Амарт» (ИНН 

<

***> ,  ОГРН 

<

***>, г. Красногорск) в доход федерального бюджета 1 800 руб.  государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья О.А. Антропова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 8:04:57Кому выдана Антропова Ольга Анатольевна