Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

23. 08. 2023 года.                                                                                     Дело № А40-96353/23-43-768

Резолютивная часть решения объявлена 17. 08. 2023 года.

Решение изготовлено в полном объеме 23. 08. 2023 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " Олл СБ " (ОГРН 

<

***>) к ООО " ПЭТРУСКо " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1 533 274  руб. 61 коп. – долга,

с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность б/н от 16.08.2023 г., от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 1 533 274  руб. 61 коп. – долга, на основании статей 309, 310, 702, 708-709, 711, 720, 740, 746, 753 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, представил истребованные судом документы, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Из материалов дела усматривается, что между ООО «ПЭТРУСКо» (Заказчик) и ООО «Олл СБ» (Подрядчик) были заключены следующие договоры подряда, а именно:

20 августа 2019г. между ООО «ПЭТРУСКо» (Заказчиком) и ООО «Олл СБ» (Подрядчиком) заключен договор подряда № К-СМР/2019/20-08/01.

В соответствии с п. 1.1 договора Подрядчик обязался выполнить комплекс строительно-монтажных работ (СМР) по устройству: систем холодоснабжения и отопления здания на Объекте: «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей» в соответствии с проектной документацией и условиями настоящего договора и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

Местонахождение Объекта (место выполнения работ): 

<

...>.

Пунктом 3.1. договора установлено, что общая максимальная стоимость работ по настоящему договору согласована сторонами в приложении № 1.1. и Приложении № 1.2. к настоящему договору. Максимальная стоимость работ по настоящему договору составляет 29 983 313,58 руб., в том числе НДС 20% - 4 997 218,93 рублей.

Пунктом 1.7 договора предусмотрен срок исполнения работ определяется Приложением № 5 графика производства работ: начало работ - с даты подписания договора, окончание работ - по 20.11,2020г включительно.

Дополнительным соглашением № 1 от 05 ноября 2019г. к договору подряда № К- СМР/2019/20-08/01 от 20 августа 2019г. стороны согласовали комплекс дополнительных строительно-монтажных работ на сумму 307 113,07 руб., в т.ч. НДС 20% - 51 185, 51 рублей (п.2 дополнительного соглашения).

Дополнительным соглашением № 2 от 17 февраля 2020г. к договору подряда № К- СМР/2019/20-08/01 от 20 августа 2019г. стороны согласовали комплекс дополнительных строительно-монтажных работ на сумму 156 415,15 руб., в т.ч. НДС 20% - 26 069,19 рублей (п.2 дополнительного соглашения).

Дополнительным соглашением № 3 от 26 мая 2020г. к договору подряда № К- СМР/2019/20-08/01 от 20 августа 2019г. стороны согласовали комплекс дополнительных строительно-монтажных работ на сумму 226 168,45 руб., в т.ч. НДС 20% - 37 964,74 рублей (п.2 дополнительного соглашения).

Дополнительным соглашением № 4 от 29 мая 2020г. к договору подряда № К- СМР/2019/20-08/01 от 20 августа 2019г. стороны изложили п.3.1, договора в следующей редакции: «3.1. Ориентировочная стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении №1.1 и Приложении № 1.2 к настоящему Договору и составляет 27 867 668,87 рублей руб., в т.ч. НДС 20% 4 644 611,48 руб. Общая стоимость Работ по настоящему Договору складывается из общей стоимости всех принятых Заказчиком Работ и материалов на основании актов по форме КС-2, КС-3» (п.1 дополнительного соглашения).

Дополнительным соглашением № 5 от 21 августа 2020г. к договору подряда № К- СМР/2019/20-08/01 от 20 августа 2019г. стороны согласовали комплекс дополнительных строительно-монтажных работ на сумму 333 566,52 руб., в т.ч. НДС 20% - 55 594,42 рублей (п.2 дополнительного соглашения).

Дополнительным соглашением № 6 от 06 октября 2020г. к договору подряда № К- СМР/2019/20-08/01 от 20 августа 2019г. стороны изложили п.3.1, договора в следующей редакции: «3.1. Ориентировочная стоимость Работ по настоящему Договору согласована Сторонами в Приложении №1.1 и Приложении № 1.2 к настоящему Договору и составляет 26 477 423,92 рублей, в т.ч. НДС 20%. Общая стоимость Работ по настоящему Договору складывается из общей стоимости всех принятых Заказчиком Работ и материалов на основании актов по форме КС-2, КС-3» (п.1 дополнительного соглашения).

Дополнительным соглашением № 7 от 05 октября 2020г. к договору подряда № К- СМР/2019/20-08/01 от 20 августа 2019г. стороны согласовали комплекс дополнительных строительно-монтажных работ на сумму 513 377,46 руб., в т.ч. НДС 20% (п.2 дополнительного соглашения).

Дополнительным соглашением № 8 от 12 ноября 2020г. к договору подряда № К- СМР/2019/20-08/01 от 20 августа 2019г. стороны изложили п.3.1, договора в следующей редакции: «3.1. Ориентировочная стоимость Работ по настоящему Договору согласована Сторонами в Приложении №1.1 и Приложении № 1.2 к настоящему Договору и составляет 29 069 415,13 руб., в т.ч. НДС 20%. Общая стоимость Работ по настоящему Договору складывается из общей стоимости всех принятых Заказчиком Работ и материалов на основании актов по форме КС-2, КС-3» (п.1 дополнительного соглашения).

Дополнительным соглашением № 9 от 09 апреля 2021г. к договору подряда № К- СМР/2019/20-08/01 от 20 августа 2019г. стороны изложили п.3.1, договора в следующей редакции: «3.1. Ориентировочная стоимость Работ по настоящему Договору согласована Сторонами в Приложении №1.1 и Приложении № 1.2 к настоящему Договору и составляет 27 555 801,42 руб., в т.ч. НДС 20%. Общая стоимость Работ по настоящему Договору складывается из общей стоимости всех принятых Заказчиком Работ и материалов на основании актов по форме КС-2, КС-3» (п.1 дополнительного соглашения).

На основании выполненного Подрядчиком объема работ Заказчик принял работы на основании справки о стоимости работ по форме КС-3 и акта КС-2, а именно:

№ 1 от 25.09.2019г. за отчетный период с 20.08.2019г. по 25.09.2019г. работы на сумму 2 674 450,49 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 445 741,75 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 133 722,52 рублей.

№ 1 от 17.12.2019г. за отчетный период с 05.11.2019г. по 17.12.2019г. работы на сумму 307 113,07 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 51 185,51 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 15 355,65 рублей.

№ 2 от 25.10.2019г. за отчетный период с 26.09.2019г. по 25.10.2019г. работы на сумму 2 563 261,48 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 427 210,25 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ-128 163,07 рублей.

№ 3 от 25.11.2019г. за отчетный период с 26.10.2019г. по 25.11.2019г. работы на сумму 3 327 315,73 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 554 552,62 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 166 365,79 рублей.

№ 4 от 25.12.2019г. за отчетный период с 26.11.2019г. по 25.12.2019г. работы на сумму 2 729 195,52 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 454 865,92 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ -136 459,78 рублей.

№ 5 от 25.01.2020г. за отчетный период с 26.12.2019г. по 25.01.2020г. работы на сумму 533 651,99 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 88 942,00 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ -26 682,60 рублей.

№ 1 от 25.02.2020г. за отчетный период с 12.12.2019г. по 25.02.2020г. работы на сумму 156 415,15 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 26 069,19 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ -7 820,76 рублей.

№ 6 от 25.02.2020г. за отчетный период с 26.01.2020г. по 25.02.2020г. работы на сумму 2 163 051,89 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 216 051,89 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 108 152,60 рублей.

№ 7 от 25.03.2020г. за отчетный период с 26.02.2019г. по 25.03.2020г. работы на сумму 1 361 923,64 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 226 987, 27 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 68 096,18 рублей.

№ 8 от 25.04.2020г. за отчетный период с 26.03.2019г. по 25.04.2020г. работы на сумму 1 375 932,50 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 229 332,09 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 68 796,63 рублей.

№ 1 от 06.06.2020г. за отчетный период с 17.02.2020г. по 06.06.2020г. работы на сумму 226 168,45 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 37 694,74 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 11 308,42 рублей.

№ 9 от 08.06.2020г. за отчетный период с 26.04.2019г. по 31.05.2020г. работы на сумму 916 090,03 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 152 681,68 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 45 804,50 рублей.

№ 10 от 25.06.2020г. за отчетный период с 01.06.2020г. по 25.06.2020г. работы на сумму 586 211,72 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 97 701,95 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 29 310,59 рублей.

№ 11 от 25.07.2020г. за отчетный период с 26.06.2020г. по 25.07.2020г. работы на сумму 1 887 930,69 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 314 655,12 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 94 396,53 рублей.

№ 12 от 25.08.2020г. за отчетный период с 26.07.2020г. по 25.08.2020г. работы на сумму 250 065,50 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 41677,59 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 12 503,28 рублей.

№ 13 от 25.09.2020г. за отчетный период с 26.08.2020г. по 25.09.2020г. работы на сумму 948 346,63 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 158 057,77 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ-47 417,33 рублей.

№ 1 от 30.08.2020г. за отчетный период с 21.08.2020г. по 30.08.2020г. работы на сумму 333 566,52 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 55 594,42 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ-16 678,33 рублей.

№ 1 от 15.11.2020г. за отчетный период с 05.11.2020г. по 15.11.2020г. работы на сумму 513 377,46 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 85 562,91 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 25 668,87 рублей

№ 14 от 25.11.2020г. за отчетный период с 26.09.2020г. по 25.11.2020г. работы на сумму 1 586 825,04 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 264 470,84 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 79 341,25 рублей.

№ 15 от 25.12.2020г. за отчетный период с 26.11.2020г. по 25.12.2020г. работы на сумму 1 773 568,13 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 295 594,69 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 88 678,41 рублей.

№ 16 от 25.01.2021г. за отчетный период с 26.12.2020г. по 25.01.2021г. работы на сумму 633 484,14 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 105 580,69 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ-31 674,21 рублей.

№ 17 от 25.02.2021г. за отчетный период с 26.01.2021г. по 25.02.2021г. работы на сумму 1 392 403,63 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 232 067,27 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 69 620,18 рублей.

№ 18 от 09.04.2021г. за отчетный период с 26.02.2021г. по 09.04.2021г. работы на сумму 803 998,64 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 133 999,77 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ-40 199,93 рублей.

№ 19 от 30.04.2021г. за отчетный период с 01.04.2021г. по 30.04.2021г. работы на сумму 48 093,99 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 8 015,66рублей

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 2 404,70 рублей.

Итого Заказчиком по договору было принято работ на общую сумму 29 092 442,03 руб., в т.ч. НДС 20% - 4 848 740,34 рублей.

Итого: Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ по договору - 1 454 622,10 рубля.

Пунктом 3.6. договора предусмотрено, что сумма гарантийного обеспечения качества выполненных работ в размере 5% от стоимости работ, выполненных Подрядчиком за отчетный период, Подрядчик может предъявить Заказчику по истечении 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ по настоящему договору в полном объеме и/или акта выполненных работ по договору за последний отчетный период, подписанного сторонами, но не ранее чем, по истечении 30 календарных дней с даты ввода объекта в эксплуатацию.

15 июля 2022г. Подрядчик уведомил Заказчика письмом за исх. № 538 от 15.07.2022г. об истечении срока гарантийных обязательств по договору подряда № К- СМР/2019/20-08/01 от 20.08.2019г., что подтверждается описью вложения в ценное письмо за трек-номером № 10706172027629.

09 июня 2021г. между ООО «ПЭТРУСКо» (Заказчиком) и ООО «Олл СБ» (Подрядчиком) заключен договор подряда № К-СМР/2021/09-06/01.

В соответствии с п. 1.1 договора Подрядчик обязался выполнить комплекс строительно-монтажных работ (СМР) по устранению недостатков системы холодоснабжения, отопления, теплоснабжения, наружного кислородапровода, выявленных в процессе эксплуатации указанного оборудования на Объекте: «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей» в соответствии с условиями настоящего договора и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

Местонахождение Объекта (место выполнения работ): 

<

...>.

Пунктом 3.1. договора установлено, что общая стоимость работ по договору согласована сторонами в Смете № 1 (Приложении № 1 и к договору) и составляет 305 160,00 руб., в том числе НДС 20%.

Пунктом 1.6. договора предусмотрен срок исполнения работ, который определяется: начало работ - с даты подписания договора, окончание работ - по 20.06.2021г включительно.

На основании выполненного Подрядчиком объема работ Заказчик принял работы на основании справки о стоимости работ по форме КС-3 и акта КС-2, а именно:

- № 1 от 20.06.2021г. за отчетный период с 10.06.2021г. по 20.06.2021г. работы на сумму 305 160,00 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 50 860,00 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 15 258,00 рублей.

Итого Заказчиком по договору было принято работ на общую сумму 305 160,00 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 50 860,00 рублей.

Итого: Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ по договору - 15 258,00 рублей.

Пунктом 3.6. договора предусмотрено, что сумма гарантийного обеспечения качества выполненных работ в размере 5% от стоимости работ, выполненных Подрядчиком за отчетный период, Подрядчик может предъявить Заказчику по истечении 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ по настоящему договору в полном объеме.

10 ноября 2020г. между ООО «ПЭТРУСКо» (Заказчиком) и ООО «Олл СБ» (Подрядчиком) заключен договор подряда № К-СМР/2020/10-11/01.

В соответствии с п. 1.1 договора Подрядчик обязался выполнить комплекс строительно-монтажных работ (СМР) по монтажу системы аварийного выброса гелия на Объекте: «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей» в соответствии с проектной документацией и условиями настоящего договора и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

Местонахождение Объекта (место выполнения работ): 

<

...>.

Пунктом 3.1. договора установлено, что общая стоимость работ по договору согласована сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору и составляет 638 701,70 руб., в том числе НДС 20%.

Пунктом 1.7. договора предусмотрен срок исполнения работ, который определяется: начало работ - с даты подписания договора, окончание работ - по 30.11.2020г включительно.

На основании выполненного Подрядчиком объема работ Заказчик принял работы на основании справки о стоимости работ по форме КС-3 и акта КС-2, а именно:

- № 1 от 30.11.2020г. за отчетный период с 10.11.2020г. по 30.11.2020г. работы на сумму 563 960,40 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 93 993,40 рубля.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 28 198,02 рублей.

Итого Заказчиком по договору было принято работ на общую сумму 563 960,40 руб., в том числе НДС 20% - 93 993,40 рубля.

Итого: Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ по договору - 28 198,02 рублей.

Пунктом 3.6. договора предусмотрено, что сумма гарантийного обеспечения качества выполненных работ в размере 5% от стоимости работ, выполненных Подрядчиком за отчетный период, Подрядчик может предъявить Заказчику по истечении 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ по настоящему договору в полном объеме и/или акта выполненных работ по договору за последний отчетный период, подписанного сторонами, но не ранее чем, по истечении 30 календарных дней с даты ввода объекта в эксплуатацию.

30 июля 2020г. между ООО «ПЭТРУСКо» (Заказчиком) и ООО «Олл СБ» (Подрядчиком) заключен договор подряда № К-СМР/2020/30-07/01.

В соответствии с п. 1.1. договора Подрядчик обязался выполнить комплекс строительно-монтажных работ (СМР) по устройству: наружного кислородапровода здания на Объекте: «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей» в соответствии с проектной документацией и условиями настоящего договора и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

Местонахождение Объекта (место выполнения работ): 

<

...>.

Пунктом 3.1. договора установлено, что общая стоимость работ по договору согласована сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору и составляет 703 929,70 руб., в том числе НДС 20%.

Пунктом 1.7. договора предусмотрен срок исполнения работ, который определяется: начало работ - с даты подписания договора, окончание работ - по 31.08.2020г включительно.

На основании выполненного Подрядчиком объема работ Заказчик принял работы на основании справки о стоимости работ по форме КС-3 и акта КС-2, а именно:

№ 1 от 25.09.2020г. за отчетный период с 30.07.2020г. по 25.09.2020г. работы на сумму 291 353,98 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 58 270,80 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 14 567,70 рублей.

№ 2 от 25.02.2020г. за отчетный период с 26.09.2020г. по 25.02.2021г. работы на сумму 225 812,52 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 45 162,50 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 11 290,63 рублей.

№ 3 от 09.04.2021г. за отчетный период с 26.02.2021г. по 09.04.2021г. работы на сумму 186 763,20 рублей, в т.ч. НДС 20 % - 31 127,20 рублей.

Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ - 9 338,16 рублей.

Итого Заказчиком по договору было принято работ на общую сумму 703 929,70 руб., в том числе НДС 20%. - 117 321,62 рубль.

Итого: Гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ по договору - 35 196,49 рублей.

Пунктом 3.6. договора предусмотрено, что сумма гарантийного обеспечения качества выполненных работ в размере 5% от стоимости работ, выполненных Подрядчиком за отчетный период, Подрядчик может предъявить Заказчику по истечении 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ по настоящему договору в полном объеме и/или акта выполненных работ по договору за последний отчетный период, подписанного сторонами, но не ранее чем, по истечении 30 календарных дней с даты ввода объекта в эксплуатацию.

Все гарантийное обеспечение качества выполненных работ 5% от объема выполненных работ по всем четырем вышеуказанным договорам составило 1 533 274, 61 руб.

Двусторонним актом сверки взаимных расчетов за период с 01.08.2019-15.07.2022 подтверждается наличие задолженности ООО «ПЭТРУСКо» перед ООО «Олл СБ» на сумму 1 533 274, 61 руб.

15 июля 2022г. Подрядчик уведомил Заказчика письмом за исх. № 538 от 15.07.2022г. об истечении срока гарантийных обязательств по договору подряда № К- СМР/2019/20-08/01 от 20.08.2019г., что подтверждается описью вложения в ценное письмо за трек-номером № 10706172027629.

Ответчик до настоящего момента не выполнил своих обязательств по договору, а именно, не произвел возврат гарантийного удержания.

В адрес Ответчика была направлена претензия за исх. № 544 от 02.03.2023г., которая была оставлена Ответчиком без внимания, что подтверждается распечаткой с официального сайта почты России - отчетом об отслеживании отправления за трек- номером № 10756479014488.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Требование истца о взыскании долга в сумме 1 533 274 руб. 61 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в соответствии со ст.ст. 106, 110, 112 АПК РФ.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " ПЭТРУСКо " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " Олл СБ " (ОГРН 

<

***>) 1 533 274  руб. 61 коп.  – долга и расходы по уплате госпошлины в сумме 28 333 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья

ФИО1