АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Дело №А27-14880/2023

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

именем Российской Федерации

 

24 октября 2023 г.                                                                                                 г. Кемерово

Резолютивная часть объявлена 18 октября 2023 г.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе 

 

судьи

Ерохина Я.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем 

ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителя

истца по доверенности от 07.08.2023 № 100                             ФИО2,

исковое заявление акционерного общества «Электросеть» (ИНН 

<

***>) 

к акционерному обществу «Почта России» (ИНН 

<

***>) 

о расторжении договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.08.2012 № 1208-115-п, № 1208-117-п, № 1208-120-п, № 1208-122-п и взыскании неустойки

у с т а н о в и л:

Акционерное общество «Электросеть» (далее – АО «Электросеть», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Почта России» (далее – АО «Почта России», ответчик) о расторжении договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.08.2012 № 1208-115-п, от 17.08.2012  № 1208-117-п, от 17.08.2012 № 1208-120-п, от 17.08.2012 № 1208-122-п, взыскании неустойки в размере 4 528,80 руб.

Ответчик надлежащим образом извещен, явку представителя не обеспечил. Суд, руководствуясь положениями статьи 156 АПК РФ, провел судебное заседание в отсутствие ответчика.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчик представил отзыв, в котором против расторжения договоров по существу не возражал, заявил о применении срока исковой давности в части неустойки.

Выслушав представителя истца, исследовав представленные доказательства, суд установил следующее.

17.08.2012 между АО «Электросеть» и АО «Почта России» заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 1208-115-п, № 1208-117-п, № 1208-120-п, № 1208-122-п (далее Договоры). Указанные договоры аналогичны по содержанию, различая только в части адресов подключаемых объектов. Объектами являются почтовые отделения, расположенные по адресам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>.

В соответствии с условиями договора СО приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: почтового отделения, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, регулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

1.1.1 Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 (кВт);

1.1.2. Категория надежности – 3

1.1.3 класс напряжения электрических сетей – 0,38(ав)

1.4.1 Срок действия технических условий составляет 2 года

1.5 Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 6 месяцев.

3.1 Размер платы за технологическое присоединение – 550 руб.

Техническими условиями предусмотрен выполнение мероприятий только для заявителя. Для сетевой организации мероприятия не предусмотрены. Со слов представителя истца на момент заключения договоров у сетевой организации имелась необходимая инфраструктура для подключения.

Пунктами 5.4 Договоров установлено, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Дополнительными соглашениями срок действия договоров от 17.08.2012 № 1208-115-п, от 17.08.2012  № 1208-117-п, от 17.08.2012 № 1208-120-п, от 17.08.2012 № 1208-122-п и технических условий неоднократно продлялись. Последний раз 25.01.2018 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срок действия технических условий продлены до 31.03.2018.

По окончанию указанного срока мероприятия, предусмотренные вышеуказанными договорами и техническими условиями, ответчиком не выполнены.

В ноябре 2022 года, в мае 2023 года истцом в адрес ответчика направлены претензии о расторжении договоров от 17.08.2012 № 1208-115-п, от 17.08.2012  № 1208-117-п, от 17.08.2012 № 1208-120-п, от 17.08.2012 № 1208-122-п и уплате неустойки.

В связи с отсутствием ответов на претензии истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Порядок заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора, в силу п. 1 ст. 26 Закона N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Далее - Закон N 35-ФЗ), устанавливаются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (далее - Правила). Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом (пункт 6 Правил). Указанный договор является публичным.

Срок действия технических условий по договорам от 17.08.2012 № 1208-115-п, от 17.08.2012  № 1208-117-п, от 17.08.2012 № 1208-120-п, от 17.08.2012 № 1208-122-п (в редакции дополнительных соглашений) до 31.03.2018.

Согласно п. 24 Правил, Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 6 лет. По договорам от 17.08.2012 № 1208-115-п, от 17.08.2012  № 1208-117-п, от 17.08.2012 № 1208-120-п, от 17.08.2012 № 1208-122-п продление срока действия технических условий невозможно в связи с истечением предельно допустимых сроков, установленных действующим законодательством.

На основании п. 16.5. Правил, нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Согласно пункту 1 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу пункта 1 статьи 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона (пункт 2 статьи 451 ГК РФ).

Таким образом, обязательства в рамках Договоров ответчиком не исполнены, мероприятия по технологическому присоединению в срок до 31.03.2018, а также на текущий момент не выполнены, что свидетельствует о существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договоров, и является основанием для их расторжения в соответствии с положениями статьи 451 ГК РФ.

На основании изложенного требование о расторжении договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.08.2012 № 1208-115-п, от 17.08.2012  № 1208-117-п, от 17.08.2012 № 1208-120-п, от 17.08.2012 № 1208-122-п подлежит удовлетворению.

В связи с нарушением ответчиков сроков выполнения мероприятий, установленных договорами от 17.08.2012 № 1208-115-п, от 17.08.2012  № 1208-117-п, от 17.08.2012 № 1208-120-п, от 17.08.2012 № 1208-122-п истец на основании п. 5.4 договоров начислил неустойку в размере 1 132,20 руб. (0,014х8%х550х1838, г. 0,014 – доля от ставки рефинансирования ЦБ РФ, 8% - ставка рефинансирования ЦБ РФ на момент заключения договора, 550 – плата за технологическое присоединение, 1 838 – количество дней просрочки с 01.04.2018 по 12.04.2023). 

Всего неустойка по четырем договорам составляет 4 528,80 руб. ( 1 132,20х4).

Ответчиком заявлено о применении срока исковой давности.

Согласно статье 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса

Пунктами 1, 2 статьи 200 ГК РФ установлено, что течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Срок действия договора технологического присоединения, имеющего особую правовую природу, зависит от срока действия технических условий, поскольку прекращение действия последних влечет прекращение обязательств по договору на технологическое присоединение.

Срок действия технических условий по договорам от 17.08.2012 № 1208-115-п, от 17.08.2012  № 1208-117-п, от 17.08.2012 № 1208-120-п, от 17.08.2012 № 1208-122-п (в редакции дополнительных соглашений) до 31.03.2018. 

Соответственно срок исковой давности о взыскании неустойки начал течь с 01.04.2018. 

Принимая во внимание, что исковое заявление подано после истечения срока исковой давности, о применении которого заявлено ответчиком, исковые требования о взыскании неустойки в размере 4 528, 80 руб. не подлежат удовлетворению.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 АПК РФ распределяются между сторонами следующим образом, на ответчика относится 24 000 руб. (в части требования о расторжении четырех договоров), 2 000 руб. на истца (в части требования о взыскании неустойки.

Руководствуясь статьями 110, 167–171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Растогнуть договор от 17.08.2012 № 1208-115-п об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между акционерным обществом «Электросеть» (ИНН 

<

***>) и акционерным обществом «Почта России» (ИНН 

<

***>).

Растогнуть договор от 17.08.2012  № 1208-117-п об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между акционерным обществом «Электросеть» (ИНН 

<

***>) и акционерным обществом «Почта России» (ИНН 

<

***>).

Растогнуть договор от 17.08.2012 № 1208-120-п об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между акционерным обществом «Электросеть» (ИНН 

<

***>) и акционерным обществом «Почта России» (ИНН 

<

***>).

Растогнуть договор от 17.08.2012 № 1208-122-п об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между акционерным обществом «Электросеть» (ИНН 

<

***>) и акционерным обществом «Почта России» (ИНН 

<

***>).

В удовлетворении исковых требований акционерого общества «Электросеть» (ИНН 

<

***>) к акционерному обществу «Почта России» (ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 4 528,80 руб. отказать.

Взыскать с акционерного общества «Почта России» (ИНН 

<

***>) в пользу акционерого общества «Электросеть» (ИНН 

<

***>) 24 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области, принявший решение в первой инстанции.

 

Судья                                                                                                                Я.Н. Ерохин