Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Волгоград                                                                                            Дело №А12-32473/2018

«6» ноября 2018 года

Резолютивная часть решения оглашена 30 октября 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 6 ноября 2018 г.  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л. В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гостевой З.Б.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  индивидуального предпринимателя  ФИО1 (ИНН 

<

***>,                          ОГРНИП 317344300094012) к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-промышленное объединение "ОРТЕХ-ЖКХ" (ИНН3460008942,  ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности по договору от 22.11.2017 г. № 8-17-5 в размере                            211 294 руб. 21 коп., неустойки в размере 498 654 руб. 13 коп., 

при участии в заседании:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 10.09.2018 г., 

от ответчика – не явился, извещён;

В Арбитражный суд Волгоградской области обратился индивидуальный предприниматель  ФИО1 (далее – истец) к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-промышленное объединение "ОРТЕХ-ЖКХ" (далее – ответчик) с иском о взыскании задолженности по договору от 22.11.2017 г. № 8-17-5 в размере  211 294 руб. 21 коп., неустойки в размере 498 654 руб. 13 коп. с учётом уточнения суммы иска в порядке ст. 49 АПК РФ.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал. 

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил. 

Изучив основания исковых требований, исследовав письменные доказательства, арбитражный суд

установил:

Между истцом (Исполнитель) и ответчиком (Заказчик) заключен договор от 22.11.2017 г. № 8-17-5 (далее – Договор) на выполнение строительных, монтажных, сварочных работ по установке и обвязке насосов на водоочистных сооружениях Краснооктябрьского района г. Волгограда по адресу: г. Волгоград, ул. Химическая -3А. 

Общая стоимость  работ  по Договору составляет 422 588 руб. 21 коп. 

Срок окончания работ выполнения работ – не позднее 31.12.2017 г. 

Условия оплаты: 30% - предоплата, 70% - в течение 10 дней с момента окончания выполнения работ (Спецификация к Договору). 

Приёмка-сдача работ сторонами по Договору произведена путём подписания акта  выполненных работ от 26.02.2018 г. на сумму 422 588 руб. 21 коп. 

С учётом частичного погашения ответчиком долга истцом к взысканию заявлена задолженность в размере 211 294 руб. 21 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно положениям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (пункт 2 статьи 720 ГК РФ). 

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика суммы основного долга в размере 211 294 руб. 21 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Согласно п. 6.3. Договора за просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает пени в размере 0,5 % от суммы общей цены Договора за каждый день просрочки по день фактической выплаты. 

На основании данного пункта Договора истцом заявлена к взысканию с ответчика неустойка за период с 11.01.2018 г. по 03.08.2018 г. (205 дней) в размере 433 152 руб. 92 коп., за период с 04.08.2018 г. по 04.10.2018 г. (62 дня) в размере 65 501 руб. 21 коп. на общую сумму 498 руб. 654 руб. 13 коп. согласно представленному расчёту.     

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Проверив расчёт неустойки, суд не соглашается с первым периодом её начисления в связи с тем, что, что акт выполненных работ сторонами подписан  26.02.2018 г. 

В судебном заседании представитель истца пояснил, что работы следует считать сданными с установленный Договором срок выполнения работ (до 31.12.2017 г.), та как в акте указано, что работы (услуги) выполнены полностью и в срок. 

Между тем, суд не соглашается с данной позицией истца, а исходит из того, что датой сдачи-приёмки работ является дата подписания акта выполненных работ. Доказательств направления (вручения) акта выполненных работ ответчику в срок до 31.12.2017 г. истцом в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено.   

Таким образом, взысканию с ответчика подлежит неустойка в размере 378 216 руб. 49 коп. из расчёта 312 715 руб. 28 коп. за период с 09.03.2018 г. по 03.08.2018 г. (148 дней)  и 65 501 руб. 21 коп. за период с 04.08.2018 г. по 04.10.2018 г. (62 дня). 

В силу ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Иск удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Научно-промышленное объединение "ОРТЕХ-ЖКХ" (ИНН3460008942,  ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя  ФИО1 (ИНН 

<

***>,  ОГРНИП 317344300094012) 589 510 руб. 70 коп., из которых 211 294 руб. 21 коп. основного долга, 378 216 руб. 49 коп. неустойки, а также 14 282 руб. 2 коп. в счёт возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Выдать индивидуальному предпринимателю  ФИО1 (ИНН 

<

***>,  ОГРНИП 317344300094012) справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 4 606 руб. 3 коп. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                     Л.В. Напалкова