АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-24995/2023

город Новосибирск

04 апреля 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Красько А.А., рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью строительная компания «Союз военных строителей» (ОГРН  1095401012277), г. Новосибирск,  

к Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства новосибирской  области (ОГРН 1195476079149), г. Новосибирск,  

при участии в деле третьих лиц: 1) ППК «Фонд развития территорий» (ИНН  7704446429), 2) Министерства строительства Новосибирской области, 3) общества с  ограниченной ответственностью «Партнер» (ИНН 5405447928), 4) ЖСК  «Закаменский-11», г. Новосибирск, 5) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (ОГРН 1127746554320), 6)  Министерство финансов Российской Федерации (ОГРН 1037739085636), г. Москва, 7)  ГБУ НСО «ГВЭ НСО» (ОГРН 1075406003298), г. Новосибирск,  

при участии Прокуратуры Новосибирской области, г. Новосибирск, о внесении изменений в договор. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

изменить пункт 5.1 Договора генерального подряда № 18 на выполнение  строительно-монтажных работ на Объекте незавершенного строительства ЖСК  «Закаменский-11» от 09 июня 2022 года, определив, что цена Договора составляет  987 208 433 (девятьсот восемьдесят семь миллионов двести восемь тысяч четыреста  тридцать три) рубля 38 копеек, в том числе НДС 20 % - 197 441 686 (сто девяносто  семь миллионов четыреста сорок одну тысячу шестьсот восемьдесят шесть) рублей 67  

копеек.  

Изменить пункт 7.2 Договора генерального подряда № 18 на выполнение  строительно-монтажных работ на Объекте незавершенного строительства ЖСК  «Закаменский-11» от 09 июня 2022 года, определив, что дата завершения работ - не  позднее 752 (семисот пятидесяти двух) календарных дней с момента подписания  Договора.  

Изменить пункт 7.3 Договора генерального подряда № 18 на выполнение  строительно-монтажных работ на Объекте незавершенного строительства ЖСК  «Закаменский-11» от 09 июня 2022 года, определив, что дата представления  Генеральным подрядчиком полного комплекта Исполнительной документации по  Объекту в целом и устранения замечаний по документации - не позднее 752 (семисот  пятидесяти двух) календарных дней с момента подписания Договора.  

Изменить пункт 7.4 Договора генерального подряда № 18 на выполнение  строительно-монтажных работ на Объекте незавершенного строительства ЖСК  «Закаменский-11» от 09 июня 2022 года, определив, что дата получения ЗОС  Застройщиком - не позднее 767 (семисот шестидесяти семи) календарных дней с  момента подписания Договора.  

Взыскать с Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства  Новосибирской области (ОГРН 1195476079149) в пользу общества с ограниченной  ответственностью Строительная Компания «Союз военных строителей» (ОГРН  1095401012277) расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере  24000 рублей.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина