Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-4803/2020

г. Хабаровск

02 июня 2020 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 02.06.2020 г.

 

Арбитражный  суд  Хабаровского  края  в  составе  судьи Е.Е. Яцышиной,

при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 620075, 

<

...>)

к        акционерному обществу «Ванинский морской торговый порт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 682860, 

<

...>)

о       взыскании 2 732 989 руб. 20 коп.

при  участии:

от истца – ФИО2 по доверенности №1 от 25.10.2019,       

установил:

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Центр»  обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к акционерному обществу «Ванинский морской торговый порт» о взыскании 2 732 989 руб. 20 коп., в том числе: задолженность по договору подряда №244DPD-2109 от 03.09.2019 в размере 2 724 000 руб., неустойка за нарушение сроков оплаты за период с 11.02.2020 по 14.03.2020 в размере 8 989 руб. 20 коп., а также неустойки в 15.03.2020 по день фактического исполнения обязательства по оплате долга в сумме 2 724 000 руб.

       Ответчик, надлежащим образом уведомленный о месте и времени  судебного заседания, явку  своего представителя не обеспечил, представил отзыв на исковое заявление, согласно которому возражает относительно заявленных требований, также заявлено ходатайство в порядке ст. 333 ГК РФ о снижении размера неустойки.

      В судебном заседании представитель истца настаивает на удовлетворении исковых требований в полном объеме.

      Исследовав  материалы  дела,   суд  установил  следующее.

      03.09.2019 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда №244DPD-2109, согласно которому          подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работу, предусмотренную договором, а заказчик обязуется принять ее результат и оплатить в соответствии с условиями договора (п.1.1).

      Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: изготовление стальной дымовой трубы на центральную котельную Порта. Перечень и состав работ, требования к результату работ указаны в приложении № 1 к договору, являющимся его неотъемлемой частью (п.1.2).

      Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.2. договора, качественно и в сроки, указанные в п. 2.1.2. договора. Подрядчик обязуется действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для обеспечения интересов заказчика (п.1.2). 

       В соответствии с пунктом 2.2.2 договора  заказчик обязуется оплатить общую стоимость работ (работ но соответствующему этапу) подрядчику в размерах и в сроки, установленные договором.

       Согласно пункту 3.1 договора сдача-приемка выполненных работ (работ по соответствующему этапу) оформляется актом выполненных работ по форме, установленной в приложении №2 к договору, после окончания работ (работ по соответствующему этапу) подрядчиком. В течение 5 рабочих дней с момента завершения выполнения работ по договору (работ по соответствующему этапу) подрядчик передает заказчику подписанный со своей стороны акт в двух экземплярах. Заказчик обязан подписать акт в течение 10 рабочих дней со дня получения акта от подрядчика или предоставить мотивированный отказ от подписания акта. В случае предоставления мотивированного отказа в приемке выполненных подрядчиком работ (работ по соответствующему этапу) заказчик обязан указать на допущенные недостатки, а также срок для их исправления. В случае не подписания заказчиком  акта или не направления мотивированного отказа в его подписании в срок, указанный настоящем пункте, работы (работы по соответствующему этапу) будут считаться принятыми заказчиком без замечаний и подлежат оплате.

       Работы по договору (работы по соответствующему этапу) считаются выполненными подрядчиком надлежащим образом и принятыми заказчиком с даты подписания обеими сторонами акта, а также, если акт не подписан заказчиком по истечении 10 рабочих дней с даты получения акта заказчиком в соответствии с п. 3.1, за исключением случая, когда заказчик представляет подрядчику мотивированный отказ от подписания акта в течение указанного срока. (п.3.3).

       В течение 5 календарных дней с даты выполнения работ (п. 3.3. договора), но не позднее 3 (третьего числа) календарного месяца, следующего за отчетным, подрядчик выставляет заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации (п.3.5).

         Общая стоимость работ по договору составляет: 2 724 000 руб., в том числе НДС (20%) - 454 000 руб., и включает компенсацию всех расходов подрядчика, возникших в связи с исполнением договора, и причитающееся ему вознаграждение (п.4.1).

         Оплата по договору осуществляется на основании подписанного обеими сторонами акта и счета подрядчика в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами акта, получения заказчиком счета (п.4.2).

         Оплата осуществляется заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в статье 9 договора. Работы считаются оплаченными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка заказчика в целях зачисления денежных средств на счет подрядчика (п.4.3).

         В соответствии с пунктом 5.1 договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязуется оплатить заказчику все расходы и убытки, включая штрафные санкции пограничных, таможенных и других органов государственного контроля, предъявленные заказчику в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, в том числе предусмотренных п. 2.1.7 договора, в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования от заказчика.

        Согласно пункту 5.3 договора       в случае несоблюдения заказчиком сроков оплаты работ заказчик уплачивает подрядчику пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ по договору.

       Истец поставил ответчику товар по универсальному передаточному документу № 2 от 09.01.2020  на сумму 2 724 000 руб., подписанному ответчиком без возражений и заверенные оттиском его печати. На оплату ответчику выставлен счет №1 от 09.01.2020. Ответчиком обязательство по оплате товара не исполнено.

       Изложенные  обстоятельства  послужили  основанием  обращения  с претензией исх.№0239/13 от 21.02.2020 об оплате задолженность по договору,  которая оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием обращения в суд.

       Правоотношения сторон по данному договору регулируются нормами § 1 и 3 гл. 30 ГК РФ (Купля-продажа). 

     Статьей 516 ГК РФ установлена обязанность покупателя по оплате поставляемых товаров с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

      В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

       В соответствии с частью 1 статьи 66 АПК РФ, участвующие в деле, обязаны представлять доказательства. Эта обязанность основана на статье 65 АПК РФ, согласно которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

      Истцом представлены надлежащие доказательства наличия у ответчика задолженности в заявленной в иске сумме, а именно - подписанные ответчиком договор, универсальный передаточный документ.  От ответчика  возражений не поступило, поэтому требование о взыскании долга, документально подтвержденное истцом, при отсутствии доказательств оплаты и возражений со стороны ответчика подлежит удовлетворению.

       Статьей  329  ГК РФ  установлена  возможность  обеспечения  исполнения обязательств  неустойкой.

      Обязанность по уплате неустойки  предусмотрена статьей 330 ГК РФ и пунктом 5.3 договора.

         Истцом в соответствии с условиями пункта 5.3 договора произведено начисление  неустойки за период с 11.02.2020 по 14.03.2020, что составило 8 989 руб. 20 коп. Расчет признается судом арифметически верным и обоснованным.

      Поскольку материалами дела подтверждается нарушение ответчиком срока  оплаты, требование о взыскании  неустойки, согласованное за данное нарушение при заключении договора, рассчитанное с учетом периода нарушения, является обоснованным и  подлежащим  удовлетворению. 

       В абзаце первом пункта 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

        Поэтому также подлежит удовлетворению требование о взыскании неустойки в 15.03.2020 по день фактического исполнения обязательства по оплате долга в сумме 2 724 000 руб., рассчитанной по ставке 0.01% от цены задолженности за каждый день, но не более 272 400 руб.

      Расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на ответчика в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, при  этом  судом  учитывается, что истцом государственная пошлина при  обращении в  суд перечислена в доход федерального бюджета в полном объеме.

      Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 682860, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 620075, 

<

...>):

- 2 732 989 руб. 20 коп., в том числе: долг в сумме 2 724 000 руб. и неустойка в сумме 8 989 руб. 20 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 36 665 руб.,

- неустойку в 15.03.2020 по день фактического исполнения обязательства по оплате долга в сумме 2 724 000 руб., рассчитанную по ставке 0.01% от цены задолженности за каждый день, но не более 272 400 руб.

     Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

      Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

                Судья                                                        Е.Е. Яцышина