АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А84-2496/2021

17 декабря 2021 г.

г. Севастополь

 

  Резолютивная часть решения оглашена 10 декабря 2021 года.

        Решение изготовлено в полном объеме 17 декабря 2021 года.

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи Смолякова А.Ю., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «ИДАС СТРОЙ», ОГРН 

<

***>

к Государственному унитарному предприятию города Севастополя  «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-2», ОГРН 

<

***>,

о взыскании задолженности,

и по встречному иску о взыскании неустойки, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – Департамент городского хозяйства города Севастополя,

при участии представителя от истца – ФИО2 по доверенности от 02.08.2021, в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания, установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «ИДАС СТРОЙ» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к Государственному унитарному предприятию города Севастополя «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-2» (далее – предприятие) о взыскании 1 980 000 рублей задолженности.

Определением от 24.06.2021 к рассмотрению принят встречный иск предприятия к обществу о взыскании 102 600 рублей штрафа и 43 238,25 рублей пени.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, суд привлек Департамент городского хозяйства города Севастополя.

К началу судебного заседания от ответчика поступило ходатайство об отложении  судебного разбирательства в связи с занятостью представителя в другом процессе, с целью предоставления дополнительных доказательств.

Поскольку ходатайство не мотивировано необходимостью предоставления конкретных доказательств, а также не подтверждено документально, суд не находит оснований для его удовлетворения.

По правилам части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд, изучив материалы дела и оценив представленные доказательства, по существу заявленных требований приходит к следующему.   

Как видно из материалов дела, предприятие (заказчик) и общество (подрядчик) заключили договоры от 15.07.2019 на разработку проектно-сметной документации на схожих условиях по объектам:

 1.

<

...> д, 7. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 27 от 17.02.2020, подписанным сторонами без замечаний.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021

2.

<

...> д. 9. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 28 от 17.02.2020, подписанным сторонами без замечаний.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

3.

<

...> д.19,19а, 21, I. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 29 от 17.02.2020, подписанным сторонами без замечаний.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

4.г. Севастополь, ул. Адмирала ФИО3, д. 22. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 30 от 17.02.2020, подписанным сторонами без замечаний.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

5.г. Севастополь, ул. Фадеева, д.40. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 31 от 17.02.2020, подписанным сторонами без замечаний.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021 г.

6.г. Севастополь, ул. Фадеева, д, 36. Во исполнение условий Контракта Истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 32 от 17.02.2020, подписанным сторонами без замечаний.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

7.г. Севастополь, ул. Косарева, д, 7, 13,15. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 33 от 17.02.2020, подписанным сторонами без замечаний.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021 г.

8.г. Севастополь, пр-т. Октябрьской Революции, д, 59. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 52 от 05.03.2020, подписанным сторонами без замечаний.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

9.г. Севастополь, пр-т. Октябрьской Революции, д.40/12. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 49 от 05.03.2020, подписанными сторонами без замечаний.

В соответствии с пунктом 2.4.2 контракта оплата выполненных работ производится в течение 150 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 в части пункта 2 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акт\г выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

10.г. Севастополь, пр-т. Октябрьской Революции, д.26. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 50 от 05.03.2020, подписанными сторонами без замечаний.

В соответствии с пунктом 2.4.2. контракта оплата выполненных работ производится течение 150 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 в части пункта 2 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту1 выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

11. г. Севастополь, пр-т. Октябрьской Революции, д.57. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 35 от 17.02.2020 подписанными сторонами без замечаний.

В соответствии с пунктом 2.4.2  контракта оплата выполненных работ производится в течение 150 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 в части пункта 2 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

12.г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, д.45. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 37 от 17.02.2020, подписанными сторонами без замечаний.

В соответствии с пунктом 2.4.2 контракта оплата выполненных работ производится в течение 150 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 в части пункта 2 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

13.г. Севастополь, ул. Шевченко, д.39/ул. Маринеско, д. 25. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 38 от 17.02.2020 подписанным сторонами без замечаний.

В соответствии с пунктом 2.4.2 контракта оплата выполненных работ производится течение 150 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

В соответствии дополнительным соглашением от 12.11.2020 в части пункта 2 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

14.

<

...> д.16. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 39 от 17.02.2020 года подписанными сторонами без замечаний.

В соответствии с пунктом 2.4.2  указанного Контракта оплата выполненных работ производится в течение 150 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 в части пункта 2 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01,04.2021.

15.г. Севастополь, пр-т. Октябрьской Революции, д.40/8. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 43 от 18.02.2020 года подписанными сторонами без замечаний.

В соответствии с пунктом 2.4.2. указанного Контракта оплата выполненных работ производится в течение 150 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 в части пункта 2 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

16.г. Севастополь, пр-т. Октябрьской Революции, д.26. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 51 от 05.03.2020, подписанными сторонами без замечаний.

В соответствии с пунктом 2.4.2. указанного Контракта оплата выполненных работ производится в течение 150 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 в части пункта 2 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

17.г. Севастополь, ул. Колобова, д.21. Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 42 от 17.02.2020 подписанными сторонами без замечаний.

В соответствии с пунктом 2.4.2. указанного Контракта оплата выполненных работ производится в течение 150 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 в части пункта 2 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

18.Контракт от 26.12.2019 года на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по комплексному благоустройству по адресу: г. Севастополь, пр-т. Октябрьской Революции, д.67.

Во исполнение условий указанного контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 74 от 26.05.2020, подписанными сторонами без замечаний.

В соответствии с пунктом 2.4.2. указанного Контракта оплата выполненных работ производится в течение 150 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11,2020 в части пункта 2 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

19.Контракт от 26.12.2019 года на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по комплексному благоустройству по адресу: г. Севастополь, ул. Молодых строителей, д.4. 

Во исполнение условий указанного контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 90 от 05.06.2020, подписанными сторонами без замечаний.

В соответствии с пунктом 2.4.2. указанного Контракта оплата выполненных работ производится и течение 150 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 в части пункта 2 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту1 выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

20.Контракт от 26.12.2019 года на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по комплексному благоустройству по адресу: г, Севастополь, ул. Косарева, д.6, 8,

Во исполнение условий контракта истец выполнил работы на сумму 99 000,00 рублей, что подтверждается актом выполненных работ № 81 от 28.05.2020, подписанным сторонами без замечаний.

В соответствии с пунктом 2.4.2. указанного Контракта оплата выполненных работ производится в течение 150 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.11.2020 в части пункта 2 оплата производится на основании пописанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации по двухстороннему акту (акту выполненных работ) в 2021 году в срок до 01.04.2021.

В соответствии с пунктами 3.1 контрактов, приложениями № 1 к контрактам (техническое задание) подрядчик обязался выполнить работы в установленные контрактом сроки.

По контрактам от 15.07.2019 срок выполнения работ установлен до 30.10.2019, по контрактам от 26.12.2019 – до 02.03.2020.

В соответствии с пунктами 6.1 контрактов за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта на основании статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

В приложениях № 1 к контрактам от 15.07.2019  (техническое задание) установлена обязанность подрядчика:

предоставить предварительный проект документации заказчику для согласования с собственниками жилых помещений (представителями общественности) не позднее 01 октября 2019 г.

окончательный вариант проектно-сметной документации должен быть изготовлен и передан заказчику до 30 октября 2019 г.

передать заказчику на бумажных носителях в 2-х экземплярах до получения положительного заключения проверки достоверности сметной стоимости строительномонтажных работ и в 2-х экземплярах после его получения.

Согласно приложениям № 1 к контрактам от 26.12.2019 (техническое задание) подрядчик обязан:

предоставить предварительный проект документации заказчику для согласования с собственниками жилых помещений (представителями общественности) не позднее 17 февраля 2020г.

окончательный вариант проектно-сметной документации должен быть изготовлен и передан заказчику до 02 марта 2020г.

Согласно пунктам 6.4 контрактов за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 1 800 руб.

В нарушение условий контрактов и дополнительных соглашений оплата не произведена, общая задолженность предприятия составляет 1 980 000 рублей.

В целях досудебного урегулирования спора общество направило предприятию досудебную претензию от 05.04.2021 № 05-04/1, в которой указало на необходимость погашения задолженности в размере 1 980 000 рублей.

Уклонение ответчика от исполнения договорных обязательств послужило основанием для обращения истца с иском в суд.

В связи с просрочкой выполнения работ предприятие заявило встерчные требования о взыскании неустойки.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В статье 310 Кодекса установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

Условиями договоров предусмотрено обязательство подрядчика предоставить документацию для согласования заказчику.

Обязанность по согласованию документации с жильцами на подрядчика условиями договоров не возложена. 

С учетом этого и принятия ответчиком исполнения по договорам суд считает необходимым взыскать задолженность за выполненные и принятые работы в отсутствие возражений по их качеству и применимости.

При этом не находит достаточных оснований для применения к подрядчику штрафов за отсутствие согласования документации с жильцами.

В то же время пеня за просрочку исполнения договорных обязательств подлежит начислению подрядчику в соответствии с договорными условиями. 

При таких обстоятельствах суд считает, что заявленные исковые требования надлежит удовлетворить, встречный иск – удовлетворить в части взыскания пени.

На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

взыскать с Государственного унитарного предприятия города Севастополя  «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-2», ОГРН 

<

***>, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИДАС СТРОЙ», ОГРН 

<

***>, 1 980 000 рублей задолженности и 32 800 рублей расходов на оплату государственной пошлины.

Встречный иск удовлетворить в части.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИДАС СТРОЙ», ОГРН 

<

***>, в пользу Государственного унитарного предприятия города Севастополя  «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-2», ОГРН 

<

***>, 43 238,25 руб. пени за просрочку исполнения обязательств и 1593,58 руб. расходов на оплату государственной пошлины.

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать.

В результате зачета материально-правовых встречных требований взыскать с Государственного унитарного предприятия города Севастополя  «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-2», ОГРН 

<

***>, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИДАС СТРОЙ», ОГРН 

<

***>, 1 936 761,75 руб. задолженности.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.      

 

Судья 

А.Ю. Смоляков