950/2023-193090(1) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А40-243675/22

г. Москва

14 июля 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июля 2023 года  Постановление изготовлено в полном объеме 14 июля 2023 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

Председательствующего судьи: Гармаева Б.П., Судей: Гончарова В.Я., Левиной Т.Ю., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Госкорпорации "Росатом" на  решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2023 по делу № А40-243675/22 по иску  Госкорпорации "Росатом" к ФГУП "ФЭО" о взыскании пени,  

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 12.05.2023, от ответчика: ФИО3 по доверенности от 06.07.2023, 

У С Т А Н О В И Л:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"  обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФЕДЕРАЛЬНОМУ  ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" о взыскании пени в размере 2 229 250 руб.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2023 в удовлетворении иска отказано.  

Не согласившись с указанным решением, истец обратился в Девятый арбитражный  апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемый судебный акт  отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.  

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца поддержал  доводы апелляционной жалобы.  

Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил  решение суда первой инстанции оставить без изменения.  

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 269, 271 АПК РФ, изучив материалы дела, суд  апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.  

В обоснование исковых требований истец указывает, что между Госкорпорацией  «Росатом» (Государственный заказчик, Истец) и ФГУП «ФЭО» (Исполнитель, Ответчик)  заключен государственный контракт от 26.03.2021 № Д.4U.244.20.21.1036, согласно которому  Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с условиями Контракта  и своевременно сдать Государственному заказчику в порядке, установленном Контрактом, а  Государственный заказчик обязуется принять и оплатить работу по теме: «Подготовка к выгрузке  и выгрузка отработавшего ядерного топлива из баков сухого хранения на объекте в губе ФИО4,  подготовка его к транспортировке на переработку на федеральное государственное унитарное  предприятие «Производственное объединение «Маяк» (3-й этап)» (далее - Работы).  

В соответствии с Техническим заданием и Календарным планом по этапу № 5 установлены  следующие сроки выполнения Работ: дата начала - с даты завершения этапа № 4; дата окончания15.08.2022.  

Истец указывает, что в нарушение условий Контракта работы по этапу № 5,  соответствующие требованиям Технического задания, представлены к приемке 21.09.2022, что  подтверждается письмом от 21.09.2022 № 1-2.9/112685-дсп. 21.09.2022 Государственным  заказчиком подписан акт сдачи-приемки работ № 17706413348210000260/5 и просрочка  исполнения обязательств составила 37 дней (с 16.08.2022 по 21.09.2022).  

С учетом изложенного, истцом на основании п. 9.4 контракта начислена неустойка в  размере 2 229 250 руб. за период с 16.08.2022 по 21.09.2022.  

Поскольку ответчик в добровольном порядке требование не удовлетворил, истец  обратился с настоящим иском в суд.  

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно  предъявляемыми требованиями.  

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная  законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки  исполнения.  

Исходя из представленных в материалы дела доказательств, суд апелляционной инстанции  установил, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об отказе в удовлетворении  иска, поскольку суд применил положения о списании неустойки, предусмотренные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783.  

Отклоняя доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции отмечает  следующее.  

Согласно п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783  списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по  контрактам, обязательства по которым исполнены.  

Согласно п. 4 данного постановления списание начисленных и неуплаченных сумм  неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих  документальное подтверждение. Заказчик в целях списания начисленных и неуплаченных сумм  неустоек (штрафов, пеней) обеспечивает сверку расчетов с поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней).  

Согласно п. 5 постановления при наличии документа о подтвержденных сторонами  контракта расчетах по начисленной и неуплаченной сумме неустоек (штрафов, пеней) основанием  для принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней)  является:  

а) в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 3 настоящих Правил, - исполнение  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (за исключением гарантийных  обязательств) по контракту в полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным  документом;  

б) в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 3 настоящих Правил, в дополнение к  документам, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, - информация администратора  доходов бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) о  зачислении уплаченных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сумм неустоек (штрафов,  пеней) в бюджет (бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) (если  начисленная и неуплаченная сумма неустоек (штрафов, пеней) возникла перед государственным  (муниципальным) заказчиком) или информация о зачислении средств, уплаченных поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) на счет заказчика, автономного учреждения или юридического лица  (если начисленная и неуплаченная сумма неустоек (штрафов, пеней) возникла перед бюджетным  учреждением, государственным, муниципальным унитарным предприятием, а также автономным  учреждением в случаях осуществления им закупок в соответствии с частью 4 или юридического  лица в случаях осуществления им закупок в соответствии с частями 4(1) и 5 статьи 15  

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд");  

Поскольку в данном случае сумма неустойки составляет менее 5% и обязательства по  контракту выполнены, суд первой инстанции правомерно применил положения о списании  неустойки.  

Вопреки доводам апелляционной жалобы 30.11.2022 работы по Госконтракту выполнены в  полном объеме, что подтверждается актом сдачи–приемки выполненной работы от 30.11.2022,  согласно которому Государственным заказчиком приняты работы по 6 этапу работ (последний  этап).  

Суд апелляционной инстанции отмечает, что в пункте 40 Обзора судебной практики  применения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом  Верховного Суда РФ 28.06.2017 года, разъяснено, что списание, начисленных поставщику  (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней), в связи с ненадлежащим  исполнением государственного контракта является обязанностью государственного заказчика,  поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по  государственным контрактам.  

При таких обстоятельствах, в случае наличия оснований для списания неустоек (штрафов,  пеней), предусмотренных Правилами, заказчик обязан выполнить такое списание.  

В соответствии с правовой позицией Судебной коллегии по экономическим спорам  Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 14.08.2018 № 305-ЭС18-5712 по делу № А40179525/2017, указанный порядок списания начисленных сумм неустоек направлен на  установление действительного размера задолженности и урегулирование споров между  сторонами.  

При этом наличие спора относительно начисленной неустойки не может трактоваться как  условие, препятствующее списанию или предоставлению отсрочки уплаты неустоек, поскольку  подобные антикризисные меры были установлены специально для защиты поставщиков  (подрядчиков, исполнителей) по государственным контрактам.  

При таких обстоятельствах, доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда  первой инстанции. Основания для переоценки выводов суда первой инстанции у суда  апелляционной инстанции отсутствуют.  

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что  при принятии обжалуемого решения судом первой инстанции правильно применены нормы  процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим  обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи с чем апелляционная жалоба  по изложенным в ней доводам является необоснованной и удовлетворению не подлежит.  

Руководствуясь ст. ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд  

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2023 по делу № А40-243675/22  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со  дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления  постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.  

Председательствующий судья Б.П. Гармаев  

Судьи В.Я. Гончаров 

 Т.Ю. Левина