Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-53028/2018

02 октября 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  20 сентября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  02 октября 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение здравоохранения "КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 10 - КЛИНИКА ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ" (адрес:  Россия 194021, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТЕР А, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "РУСТАЛ. СЕВЕРО-ЗАПАД" (адрес:  Россия 191123, Санкт-Петербург, ЧАЙКОВСКОГО УЛ 69/ЛИТ.А/4-Н/3, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 15 036 руб. 46 коп.

 

при участии

- от истца: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом;

- от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом, 

 

установил:

СПБ ГБУЗ «КВД № 10 - КЛИНИКА ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ" предъявило иск к ООО "РУСТАЛ. СЕВЕРО-ЗАПАД" о взыскании 14 790 руб. 00 коп. штрафа на основании контракта №93/2017 от 17.10.10 и 246 руб. 46 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Ответчик отзыв не предоставил.

Определением от 26.06.18 суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства.

Дело рассматривается без участия сторон на основании ст. 156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен контракт №93/2017 от 17.10.17.

Согласно п.1.1 контракта заказчик – истец поручает, а исполнитель – ответчик  принимает на себя обязательства на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на благоустройство территории заказчика в 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пархоменко. Участок 44 (Юго-Западнее дома 29, литера А по пр. Пархоменко).

Цена контракта составляет 147 900 руб. 00 коп.

Срок выполнения работ – 50 рабочих дней с момента начала выполнения работ.

Дополнительным соглашением №1 от 30.10.17 срок выполнения работ был уменьшен до 45 рабочих дней с момента начала работ.

В установленный срок (до 20.12.17) работы в полном объеме ответчиком не выполнены.

Уведомлением от 20.12.17 исх. №973 заказчик заявил об одностороннем отказе от исполнения договора.

В соответствии с п.7.3.4 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель обязан уплатить штраф в размере 10% цены контракта, что составляет 14 790 руб. 00 коп.

Указанный штраф подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 246 руб. 46 коп. удовлетворению не подлежит, так как начисление процентов на сумму штрафа действующим законодательством не предусмотрено.

Расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РУСТАЛ. СЕВЕРО-ЗАПАД" в пользу Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 10 - КЛИНИКА ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ" 14 790 руб. 00 коп. штрафа и 2 000 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.