Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«13» августа 2018 г.  Дело № А12-10970/18  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены  Викторовны,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой Викторией  Александровой,  

при участии в судебном заседании: 

от муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 333  Дзержинского района Волгограда» - ФИО1, доверенность от 07.06.2018;  

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению  муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 333  Дзержинского района Волгограда» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу  с ограниченной ответственностью «Монолит-2» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  об обязании устранить недостатки;  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

обязать общество с ограниченной ответственностью «Монолит-2» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) безвозмездно в течение тридцати календарных дней с  момента вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по  устранению выявленных недостатков при проведении работ по контракту от 10.05.2017   № 661007 по капитальному ремонту конструкций здания муниципального дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 333 Дзержинского района Волгограда» по  улице Танкистов, 14 в Волгограде, а именно:  

 №№ 

Наименование 

Единица измерения  

 Количество  

1 

2 

3 

4 

3 

Разработка грунта вручную в траншеях  

100 м3 поверхности 

глубиной до 2 м без креплений с откосами,  

группа грунтов: 

2 

4 

Засыпка вручную траншей, пазух  

100 м3 поверхности   

 5,56 

котлованов и 

ям, группа грунтов: 1  

5 

Уплотнение грунта  

100 м3 поверхности   

 5,56 

пневматическими  

трамбовками, группа грунтов: 1-2  

6 

о

Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая  

100 м2 поверхности   

 8,34 

клеенная по выровненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя  

7 

Устройство оснований из песка толщиной 151 

 000 м2 поверхности   

 0,36 

см однослойных 

8 

Устройство оснований из щебня толщиной 101  

 000 м2 поверхности   

 0,36 

см из щебня фракции 40-70 мм при укатке  

каменных материалов с пределом прочности  

на сжатие до 68.6 МПа (700 кгс/см2):  

однослойных 

9 

Укладка сетки арматурной диаметром 8-10 мм 

 тн   

 1,46 

10 

Устройство покрытий: бетонных толщиной 7 0   

 100 м2 поверхности   

 3,54 

мм В 12,5 

Крыльца (бетон В15)  

11 

Демонтаж крылец бетонных 

м3   

 11,2 

 № 1 

12 Раз 

работка грунта вручную в траншеях глубиной 

 100 м3   

 0,05 

до 2 м без креплений с откосами, группа 

грунтов: 2 

13 

Устройство основания под фундаменты:  

м3   

 1,02 

песчанного 

14 

 Устройство оснований из щебня 

 100 м2 поверхности  

0,045 

толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 

мм при укатке каменных материалов с 

пределом прочности на сжатие до 68,6 

МПа (700 кгс/см2): однослойных  

15 

Устройство фундаментных плит  

100 м3 

0,045 

железобетонных: плоских  

 № 2 

16 

Разработка грунта вручную в траншеях 

 100 м3  

 0,0204 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2 

17 

Устройство основания под фундаменты:  

м3 

1,36 

песчаного 

18 

Устройство оснований из щебня толщиной  

100 м2 поверхности  

0,05 

10 см из щебня фракции 40-70 мм при  

укатке каменных материалов с пределом  

прочности на сжатие до 68,6 МПа (700  

кгс/см2): однослойных  

19 

Устройство фундаментных плит  

100 м3 

0,018 

железобетонных: плоских  

 № 3 

20 

Разработка грунта вручную в траншеях 

 100 м3 

0,03 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2 

21 

Устройство основания под фундаменты:  

м3 

1 

песчаного 

22 

Устройство оснований из щебня толщиной 

 100 м2 поверхности  

0,045 

10 см из щебня фракции 40-70 мм при 

укатке каменных материалов с пределом 

прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 

кгс/см2): однослойных 

23 

Устройство фундаментных плит  

100 м3 

0,028 

железобетонных: плоских 

 № 4 

24 

Разработка грунта вручную в   

100 м3 

0,04 

с 

траншеях глубиной до 2 м без креплений 

с откосами, группа грунтов: 2  

25 

Устройство основания под фундаменты:  

м3 

1  

песчаного 

26 

 Устройство оснований из щебня 

 100 м2 поверхности  

0,05 

толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 

мм при укатке каменных материалов с 

пределом прочности на сжатие до 68.6 

МПа (700 кгс/см2): однослойных  

27 

Устройство фундаментных плит  

100 м3 

0.028 

железобетонных: плоских  

 № 5 

28 

Разработка грунта вручную в 

 100 м3 

0,05 

траншеях глубиной до 2 м без креплений 

с откосами, группа грунтов: 2 

29 

Устройство основания под фундаменты:  

м3 

1,2 

песчаного 

30 

Устройство оснований из щебня 

 100 м2 поверхности  

0,04 

толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 

мм при укатке каменных материалов с 

пределом прочности на сжатие до 68,6 

МПа (700 кгс/см2): однослойных  

31 

Устройство фундаментных плит  

100 м3 

0,058 

железобетонных: плоских  

32 

Установка в жилых и общественных 

100 м2 поверхности  

1,75 

зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, 

поворотнооткидных) с площадью проема  

более 2 м2 двухстворчатых 

33 

Установка в жилых и общественных 

 100 м2 поверхности  

0,23 

зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, 

поворотнооткидных) с площадью проема 

до 2 м2 двухстворчатых 

Кровля 

34 

Демонтаж рулонного покрытия  

100 м2 

0,05 

поверхности 

35 

Устройство рулонного покрытия 2 слоя 

100 м2 

0,07 

поверхности 

Полы 

36 

Разборка и устройство плинтусов из ПВХ 

 100 п.м. 

2,1 

37 

Разборка и устройство покрытий полов:  

100 м2 

3,8 

поверхности 

из линолеума и релина  

38 

Разборка и устройство покрытий из ОСП  

100 м2 

3,8 

поверхности 

39 

Устройство стяжек цементных толщиной  

100 м2 

3,8 

поверхности 

20 мм 

Отделочные работы  

40 

с 

Очистка вручную поверхности от красок: 

 100 м2 

4,13 

поверхности 

земли и лесов 

41 

г п 

Покрытие поверхностей грунтовкой 

 100 м2 

4,13 

 поверхности 

лубокого проникновения: за 1 раз 

отолков 

42 

Окраска поливинилацетатными  

100 м2 

4,13 

поверхности 

водоэмульсионными составами  

улучшенная: по штукатурке потолков  

43 

Разборка облицовки стен: из 

 100 м2 

0,17 

поверхности 

керамических глазурованных плиток  

44 

Гладкая облицовка стен, столбов, 

 100 м2 

0,62 

 поверхности 

пилястр и откосов (без карнизных, 

плинтусных и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного гарнитура 

на цементном растворе: по кирпичу и 

бетону 

45 

Окраска поливинилацетатными 

 100 м2 

6,17 

 поверхности 

водоэмульсионными составами 

улучшенная: по штукатурке стен 

46 

Окраска поливинилацетатными 

 100 м2 

0,9 

 поверхности 

водоэмульсионными составами 

улучшенная: по сборным конструкциям 

откосов, подготовленным под окраску  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Монолит-2» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 333 Дзержинского района Волгограда»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы на проведение экспертизы в размере  

20 000 рублей. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Монолит-2» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 рублей  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение  месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Волгоградской области.  

СУДЬЯ Е.В. Пономарева