АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

02 июня 2025 года

Дело № А33-8892/2025

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 171, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о снижении размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации - отказать. 

Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течении 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу в соответствии с договором № 20.2400.5801.20 от 27.11.2020 выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, а именно: 

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством. 

- запроектировать и построить ТП 10 кВ. Тип и мощность трансформатора определить проектом; 

- от ВЛ-10кВ ф. 27-07 до проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ. Номер отпаечной опоры, марку и сечение ЛЭП определить проектом; 

- от проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; 

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ- 10кВ ф. 27-07. Тип и место установки разъединителя определить проектом; - выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442); 

- обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности; 

- разместить в личном кабинете заявителя – индивидуального предпринимателя ФИО1 Рафика (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) акт допуска прибора учета в эксплуатацию; 

- составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя – индивидуального предпринимателя ФИО1 Рафика (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения; 

- уведомить заявителя – индивидуального предпринимателя ФИО1 Рафика (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 Рафика (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 161 690,07 руб. неустойки за период с 28.05.2021 по 24.02.2025 (за исключением периода моратория с 01.04.2022 по 01.10.2022) нарушения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, а также неустойку с 25.02.2025 по день фактического исполнения обязательств из расчёта 136,33 руб. за каждый день просрочки, а также 28 085 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

В случае неисполнения решения суда в течении 10 дней с момента вступления в законную силу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 Рафика (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 700 руб. судебной неустойки, подлежащей исчислению со дня, следующего за днем, установленным судом для исполнения обязательства, по день его фактического исполнения.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО2