22/2023-43578(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-3960/2023

город Саранск

27 июля 2023 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  товарищества собственников жилья "Попова, 64 А корпус 4"  

к акционерному обществу Специализированному застройщику "Мордовская  ипотечная корпорация"  

с привлечением в дело в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с  ограниченной ответственностью «Жилкомбыт-1»,  

об устранении недостатков выполненных работ, при участии представителей: 

от истца: ФИО2, по доверенности от 21.06.2023, председателя ТСЖ  ФИО3,  

от ответчика: ФИО4, по доверенности № 22 от 13.06.2023, от третьего лица: не явились, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить недостатки входных групп  и отмостки многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>, выполнив в течение трех месяцев со дня вступления решения в  законную силу следующие виды работ:  

разборка бетонного основания пандуса и площадок для вывоза мусора –  

4,5м3; разборка бетонных ступеней – 46,8м; 

разборка подпорных стенок из кирпича – 17,6м3;  демонтаж металлического ограждения пандуса и лестниц – 48,8м;  

разборка фундамента железобетонного – 6,04м3;  

устройство столбчатых бетонных фундаментов под подпорные стенки –  

6,4м3; 

устройство ленточных армированных фундаментов под подпорные  

стенки – 6,4м3; 

устройство гидроизоляции фундамента – 21м2;  кирпичная кладка подпорных стенок – 17,6м3;  

устройство бетонного покрытия под площадки для вывоза мусора и  

пандусы – 48,8м2; устройство армированных бетонных ступеней – 46,8м; 

покрытие ступеней цементной плиткой – 35,3м2;  штукатурка с окраской кирпичных подпорных стенок – 110,2м2;  

монтаж металлического ограждения пандуса и лестниц – 48,8м2;  демонтаж асфальтобетонной отмостки – 6,5м;  

подсыпка щебнем в местах провалов – 6м3; монтаж новой асфальтобетонной отмостки – 130м2. 

Взыскать с акционерного общества "Мордовская ипотечная корпорация"  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу товарищества  

собственников жилья "Попова 64А корпус 4" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

1326215331) расходы по оплате госпошлины в сумме 6000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  

суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  

вынесения решения. 

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  

Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  

решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья Ю.А. Кшняйкин Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.03.2023 5:12:00

Кому выдана Кшняйкин Юрий Анатольевич