АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

22 марта 2021 года

Дело № А33-32778/2020

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании  15 марта 2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 22 марта 2021 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Горбатовой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (ИНН 2465142996, ОГРН 1162468067541, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью «СВС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Воткинск Удмуртской Республики)

о взыскании неустойки,

в присутствии:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности №270 от 01.09.2020 (срок действия до 31.01.2023) (юридическое образование подтверждено дипломом), личность установлена паспортом, 

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 12.10.2020 (срок действия до 12.10.2023) (юридическое образование подтверждено дипломом), личность установлена паспортом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к  обществу с ограниченной ответственностью «СВС» (далее – ответчик) о взыскании 3 026 658,31 руб. неустойки за просрочку поставки товара. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 13.11.2020 возбуждено производство по делу.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 11 час. 20 мин. 15.03.2021, о чем вынесено протокольное определение. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на сайте «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет.

Судебное заседание после перерыва продолжено 15.03.2021 в 11 час. 23 мин. с участием представителей истца и ответчика.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

В письме от 24.10.2018 №РНВ-41380 истец сообщил ответчику, что последний признан победителем по итогам проведения закупки на заключение договора поставки и между истцом (покупатель) и ответчиком (поставщик) подписан договор поставки материально-технических ресурсов (прейскурантный) от 24.09.2018 №В060318/2288Д (далее – договор), по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки согласно условиям договора, приложений, отгрузочных разнарядок, а покупатель - принять и оплатить товар (пункт 1.1).

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что одновременно с подписанием договора стороны подписывают прейскурант цен (приложение № 1), в который войдут цены товара, предложенные поставщиком в рамках проведенной закупочной процедуры (далее - закупочная процедура). 

Номенклатурные позиции, подлежащие поставке по договору, определены в прейскуранте цен (пункт 3.1 договора).

В силу пункта 3.4 договора, точное количество товара, поставляемого в каждом конкретном периоде поставки, а также номенклатура, сроки поставки и реквизиты грузополучателей определяются следующим образом: покупатель нарочным или заказным письмом направляет поставщику отгрузочную разнарядку по форме приложения № 2 к договору. Покупатель вправе направить отгрузочную разнарядку по электронной почте на адрес, указанный в разделе 20 договора, при этом оригинал вышеуказанной отгрузочной разнарядки должен быть направлен нарочным или заказным письмом не позднее 5 дней с даты направления отгрузочной разнарядки по электронной почте. Отгрузочная разнарядка, направленная по электронной почте, имеет полную юридическую силу как указано в пункте 18.4 договора, и считается полученной поставщиком в дату, указанную в подтверждении о доставке, позволяющем достоверно установить, что документ был доставлен адресату. Цена и стоимость товара, указываемая в отгрузочной разнарядке, рассчитывается в соответствии   со статьей 2 договора с использованием прейскуранта цен действующего в момент направления отгрузочной разнарядки. 

Отгрузочная разнарядка подписывается покупателем в одностороннем порядке и становится неотъемлемой частью договора. Отгрузочная разнарядка может быть направлена покупателем в любой момент в течение срока действия договора количество отгрузочных разнарядок не ограничено (пункт 3.4.2 договора).

Пунктом 3.4.3 договора предусмотрено, что срок поставки товара, предусмотренный в отгрузочной разнарядке, не может быть меньше базового срока поставки товара, предусмотренного в прейскуранте цен для соответствующей номенклатурной позиции (группы позиций) (далее - базовый срок поставки) за исключением случаев, прямо предусмотренных договором. Базовый срок поставки является согласованным сторонами минимальным сроком с даты получения поставщиком отгрузочной разнарядки покупателя, в который возможно изготовление и поставка товара.

Пунктом 3.5 договора предусмотрено, что качество товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также техническим требованиям покупателя на данный вид товара, которые указываются в приложении № 3 к договору и дополнениях к нему.

В силу пункта 3.8 договора, поставщик обязуется в сроки, предусмотренные договором и отгрузочными разнарядками, но в любом случае не позднее даты прибытия товара в пункт назначения, передать покупателю все необходимые документы, относящиеся к товару, отсутствие которых не позволяет осуществлять приемку и/или монтаж и/или эксплуатацию и/или дальнейшую передачу товара третьим лицам и/или иные действия в отношении товара, и перечень которых установлен в пункте 7.1 договора, а также в соответствующих приложениях к договору. В случае выявления отсутствия указанных документов, покупатель вправе не осуществлять приемку товара и, поместив товар на ответственное хранение, потребовать предоставить такие документы в течение 5 дней с даты получений поставщиком соответствующего уведомления покупателя. Не предоставление указанных документов приравнивается к поставке некомплектного товара и обязательства поставщика по поставке товара считаются неисполненными. Возмещение поставщиком расходов покупателя, понесенных в связи с принятием товара на ответственное хранение, не освобождает поставщика от уплаты неустойки за просрочку поставки товара. В целях фиксации факта исполнения обязательства по предоставлению документов, документы должны быть предоставлены по адресу грузополучателя/получателя товара вместе с актом приема-передачи документов, подписанным уполномоченным представителем поставщика. Копии документов и акта приема-передачи документов должны быть направлены покупателю посредством электронной почты/факсимильной связи по реквизитам, указанным в разделе 20 договора. Акт приема-передачи документов, указанный в настоящем пункте, должен соответствовать требованиям, приведенным в пункте 7.3 договора.

В силу пункта 4.1 договора, график и сроки поставки, отгрузочные реквизиты, а также иные условия поставки определяются покупателем в отгрузочных разнарядках, составляемых по форме приложения № 2 к настоящему договору и направляемых в адрес поставщика в соответствии с пунктом 3.4 договора.

Пунктом 4.1.1 договора предусмотрено, что срок поставки товара является существенным условием договора, поскольку только при соблюдении данного срока покупатель/заказчик сможет осуществить доставку поставленного товара до месторождения с учетом возможностей сезонного завоза: автомобильным транспортом (зимний завоз) либо речным транспортом (летний завоз). В случае если в результате просрочки поставщиком исполнения обязательств, покупатель (получатель/грузополучатель/заказчик) будет вынужден осуществлять доставку товара до месторождения воздушным транспортом (вертолет) и/или иными видами транспорта. Поставщик, помимо уплаты пени за просрочку поставки, предусмотренной договором, обязуется возместить все убытки покупателя (получателя/грузополучателя/заказчика), вызванные просрочкой поставки (включая, но не ограничиваясь: разницу между стоимостью транспортировки автомобильным/речным транспортом и стоимостью транспортировки воздушным транспортом и/или иными видами транспорта по более высокой цене). В случае, если у покупателя есть разумные основания полагать, что поставщик просрочит поставку товара, в связи с чем покупатель будет вынужден осуществлять доставку воздушным транспортом, покупатель имеет право потребовать, а поставщик обязуется обеспечить за свой счет (без увеличения стоимости товара) усиление конструкций товара для обеспечения возможности перевозки воздушным транспортом. В случае просрочки поставки товара и не выполнения поставщиком обязательства по усилению конструкций товара как описано выше, поставщик обязан возместить покупателю все убытки, вызванные необходимостью усиления конструкций товара своими силами или силами третьих лиц. В случае, если усиление конструкций товара было выполнено поставщиком не в соответствии с требованиями Инструкции по транспортированию грузов на внешней подвеске вертолетов   (Приложение 5Г к договору), в результате чего товар был поврежден/уничтожен при транспортировке воздушным транспортом, поставщик обязуется возместить все убытки, связанные с ремонтом или заменой такого товара.

Согласно пункту 4.2 договора, поставка товара по договору может осуществляться на следующих условиях:

- базис поставки «Пункт назначения»: датой поставки является дата, проставленная в оригинале железнодорожной, товаротранспортной, транспортной, авиационной или товарной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии товара в пункт назначения. Обязанность поставщика по поставке товара считается исполненной с момента проставления отметки в оригинале железнодорожной, товаротранспортной, транспортной, авиационной или товарной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии товара в пункт назначения. Под пунктом назначения понимается: при поставке товара железнодорожным транспортом - станция назначения по реквизитам грузополучателя/получателя товара, указанным в отгрузочных разнарядках, при поставке товара автомобильным транспортом - склад грузополучателя/получателя по реквизитам, указанным в отгрузочных разнарядках, при поставке товара авиатранспортом - аэропорт места назначения по реквизитам грузополучателя/получателя товара, указанным в отгрузочных разнарядках. Поставщик несет все расходы по транспортировке товара до пункта назначения,

- базис поставки - «DAP (Инкотермс 2010)»: датой поставки является дата, когда товар, прошедший все таможенные формальности для экспорта товара, предоставлен в распоряжение покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовым к разгрузке, в согласованном пункте назначения. Право собственности и риск случайной гибели переходит к покупателю с даты поставки на указанных условиях. Покупатель в течение 7 рабочих дней с даты поступления товара на станцию назначения передает поставщику копию железнодорожной накладной с отметкой о прибытии груза. Поставщик несет все расходы, относящиеся к товару, до момента его поставки в пункт назначения, все расходы, связанные с выполнением таможенных формальностей, взимаемых при вывозе, оплатой всех пошлин, налогов и иных сборов, взимаемых при вывозе товара, а также расходы по транспортировке по транспортировке через любую страну до поставки в пункт назначения, любые расходы по разгрузке в месте назначения, которые относятся по договору перевозки на поставщика. В цену товара включены расходы по перевозке товара; по погрузке товара на транспортное средство перевозчика; по перегрузке товара в пути следования до пункта назначения; по креплению товара на транспортном средстве; по возврату порожних контейнеров, собственных или арендованных железнодорожных цистерн или вагонов; стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, которые несет поставщик до момента поставки товара и которые не подлежат возмещению покупателем.

Пунктом 7.1 договора предусмотрено, что поставщик обязан одновременно с товаром направить покупателю документы: копию сертификата соответствия на товар, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверен нотариально, сертификат качества, паспорт на каждую единицу товара, в случае если поставляемый товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя, копию накладной на товар (ТОРГ-12), документ, подтверждающий гарантийные обязательства на товар, упаковочный лист, Инструкции по эксплуатации и хранению Товара, разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор РФ) на применение товара. 

В целях информирования покупателя о статусе выполнения обязательств по договору и подтверждения выполнения обязательств по поставке товара поставщик обязуется предоставить следующие документы в указанные сроки: копию транспортной накладной, подтверждающей отгрузку товара с указанием планируемой даты прибытия товара на станцию назначения - в течение 3 рабочих дней с даты отгрузки товара, копию счета-фактуры - в течение 1 рабочего дня с момента выставления счета-фактуры, при поставке автомобильным транспортом - копию товаротранспортной накладной в течение 2 рабочих дней с даты отгрузки товара (пункт 7.2 договора).

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что приемка товара по качеству, количеству и комплектности производится покупателем в одностороннем порядке в течение 5 дней с даты поставки на основании данных указанных в документах, перечень которых установлен в пункте 7.1 договора, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, а также железнодорожных, товаротранспортных, авианакладных и иных товарных накладных или актах приема-передачи, оформляемых при передаче товара в мете нахождения склада покупателя (грузополучателя/получателя) товара. Грузополучатель/получатель товара, указанный в соответствующих отгрузочных разнарядках к договору, является полномочным представителем покупателя при осуществлении приемки и проверки товара на соответствие условиям договора и приложениям к нему.

В силу пункта 5.2 договора, в случае выявления несоответствия товара условиям договора и приложений к нему о качестве и/или количестве и/или комплектности и/или сборке товара и/или ассортименте, а также выявлении несоответствия товара товаросопроводительным документам, покупатель (грузополучатель/получатель) вправе закончить разгрузку поступившего товара на отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество, и в течение 5 рабочих дней с момента выявления недостатков обеспечить вызов представителя поставщика и с его участием обеспечить составление акта о выявленных недостатках товара по форме М-7 согласно формату приложения № 10 к договору. Уведомление о вызове представителя поставщика должно быть направлено (передано) ему по телеграфу (факсу) и должно содержать информацию о выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых покупателем. Поставщик обязан в течение 1 рабочего дня после получения вызова покупателя (грузополучателя/получателя) сообщить по телеграфу (факсу) о направлении им представителя для участия в составлении акта о выявленных недостатках товара. В случае неявки представителя поставщика в срок, установленный договором, акт о выявленных недостатках товара составляется покупателем (грузополучателем\получателем) в одностороннем порядке с участием двух представителей общественности. Указанный акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности товара условиям договора и приложений к нему. Акт о выявленных недостатках, составленный при участии представителей обеих сторон, должен быть подписан всеми лицами, принимавшими участие в его составлении, отказ от подписания акта не допускается. Если лицо, принимавшее участие в составлении акта не согласно с изложенными в акте доводами, выводами и т.д., оно обязано подписать акт, изложив при этом свое особое мнение по соответствующему вопросу. В том случае, если одна из сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись и он считается надлежаще составленным.

В случае несоответствия количества поставленного  товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, обязательства поставщика в части поставки отсутствующего количества товара считаются неисполненными и поставщик несет ответственность за просрочку поставки товара в соответствии с пунктом 8.1 договора. В случае несоответствия товара условиям договора и приложений к нему о качестве и/или о комплектности и/или о сборке и/или ассортименте, подтвержденного актом о выявленных недостатках товара, указанным в пункте 5.2 договора, покупатель имеет право отказаться от приемки такого товара и поместить его на ответственное хранение до момента устранения недостатков и/или замены и/или доукомплектования и/или сборки товара. В этом случае обязательства поставщика считаются неисполненными, товар считается не поставленным и поставщик несет ответственность за просрочку поставки товара в соответствии с пунктом 8.1 договора (пункт 5.3 договора).

Пунктом 5.5 договора предусмотрено, что дата устранения недостатков в товаре (в том числе выполнение обязательств по сборке товара) подтверждается актом об устранении недостатков, подписанным поставщиком и покупателем. В случае если для устранения недостатков товара/сборки товар вывозился поставщиком, датой устранения недостатков/сборки будет дата доставки товара после устранения недостатков/сборки, подтвержденная транспортными документами. Дата допоставки и доукомплектования товара подтверждается в порядке аналогичном порядку подтверждения первоначальной поставки (в зависимости от базиса поставки, определенного в отгрузочной разнарядке). 

В случае помещения товара на хранение/ответственное хранение покупатель в течение 5 рабочих дней, следующих за днем фактического поступления товара, направляет в адрес поставщика уведомление о причинах помещения товара на хранение/ответственное хранение (досрочная поставка товара и/или несоответствие поступившего товара условиям договора и/или иные) с приложением акта приема-передачи товара на хранение по форме МХ-1 в двух экземплярах (пункт 5.6 договора).

Согласно пункту 6.1 договора, оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по реквизитам, указанным в статье 20 договора. Оплата за поставленный товар осуществляется в течение 60, но не ранее, чем через 45 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке товара и получения покупателем документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления оригинала счета-фактуры и товарной накладной не позднее, чем за 10 дней до наступления последнего дня срока оплаты. Если счет-фактура получена покупателем позднее, чем за 10 дней до наступления последнего дня срока оплаты, оплата за поставленный товар осуществляется в течение 10 дней с даты получения покупателем оригинала счета-фактуры без применения к покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату

Пунктом 8.1.1 договора предусмотрено, что в случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных в договоре и отгрузочных разнарядках к нему, в том числе в случае несоответствия количества поставленного товара сопроводительным документам, поставщик уплачивает покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от стоимости непоставленного в срок товара. При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока поставки до даты исполнения поставщиком обязательств по поставке.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения покупателя (если поставщик - резидент). Досудебный порядок разрешения споров является обязательным: для этого сторона, у которой возникли требования к другой стороне, обязана направить ей письменную претензию с приложением всех подтверждающих документов, изложенных в претензии требований и материалов. Срок ответа на претензию составляет 30  календарных дней со дня ее получения (пункт 11.1 договора).

Согласно годовой отгрузочной разнарядке ММ № 1013242310, поставщик обязался поставить в адрес покупателя «Блок-бокс хранения пожарного инвентаря» - 1 шт., «Блок обогрева вахтенного персонала БОВ-2» - 3 комплекта, «Здание теплого склада 173917/00461Д-125-905386.7-ТХ-ТТ-01» - 1 комплект. Общая стоимость товара составила             10 333 220,35 руб., в том числе с НДС. Товар должен быть поставлен в апреле 2019 года.

Письмом № РНВ-44470 от 14.11.2018 истец обратился с просьбой к ответчику о разработке и предоставлении конструкторской документации.

С письмами от 17.10.2019 №6156, от 24.10.2019 №6176, от 06.11.2019 №6180 ответчик направил на согласование конструкторскую документацию.

Письмом № РНВ-39098 от 29.10.2019 истец согласовал конструкторскую документацию на «Блок-бокс хранения пожарного инвентаря» и «Здание теплого склада 173917/00461Д-125-905386.7-ТХ-ТТ-01», письмом № РНВ-41128 от 14.11.2019 - на «Блоки обогрева вахтового персонала БОВ-2».

По товарной накладной № ЦБ-87 от 28.01.2020 «Блок-бокс хранения пожарного инвентаря» на сумму 5 236 271,18 руб. поставлен 10.02.2020, документы на товар переданы 02.02.2020 по описи от 28.01.2020, а также переданы покупателю, согласно квитанции курьерской службы №72570395, 10.02.2020.

Согласно транспортным накладным № 167 от 13.02.2020, №168 от 13.02.2020, груз на склад грузополучателя по товарной накладной № ЦБ-167 от 13.02.2020, от 13.02.2020 №168 поступил 19.02.2020 и 21.02.2020, соответственно.

По товарным накладным № ЦБ-167 и ЦБ-168 от 13.02.2020 «Блок обогрева вахтенного персонала БОВ-2», паспорта на товар в количестве 2 комплектов на сумму 2 367 457,64 руб., согласно квитанции курьерской службы ТН 74168874, поступили в адрес покупателя 25.02.2020.

По товарной накладной № ЦБ-245 от 27.02.2020 «Блок обогрева вахтенного персонала БОВ-2» поставлен товар на сумму 1 183 728,82 руб. 

По товарной накладной № ЦБ-244 от 27.02.2020 на сумму 1 545 762,71 руб. поставлено «Здание теплого склада 173917/00461Д-125-905386.7-ТХ-ТТ-01».

По транспортным накладным № 244/245 от 27.02.2020 груз прибыл на склад грузополучателя 03.03.2020. По результатам приемки выявлены недостатки товара, о чем составлен акт от 07.03.2020.  Недостатки товара устранены поставщиком  согласно акту осмотра от 27.04.2020. 

Платежными поручениями № 604 от 14.04.2020, № 641 от 22.04.2020, № 642 от 22.04.2020, № 445 от 22.05.2020, № 22 от 14.05.2020, № 446 от 22.05.2020 покупателем произведена оплата поставленного товара в сумме 5 236 271,18 руб., 1 183 728,82 руб., 1 183 728,82 руб., 1 183 728,82 руб., 1 199 838,15 руб., 345 924,56 руб., соответственно.

В претензии от 03.08.2020 №ВНВ-28238 истец просил ответчика оплатить 3 026 658,31 руб. неустойки за просрочку поставки товара. Претензия направлена в адрес ответчик 04.08.2020, согласно списку внутренних почтовых отправлений №118.

Ссылаясь на нарушение срока поставки товара, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением о взыскании 3 026 658,31 руб. неустойки.

В отзыве на иск ответчик отклонил требования истца, ссылаясь на следующее:

- срок поставки 30.04.2019 не согласован сторонами, т.к. наступает по истечении 60 дней с момента согласования сторонами конструкторский документации,

- вся документация на товар была направлена одновременно с товаром,

- истец не обеспечил вызов представителя ответчика в соответствии с пунктом 5.2 договора для составления акта М-7 от 07.03.2020. Указанный акт был составлен без участия ответчика. Истец сообщил о недостатках товара 17.04.2020,

- с учетом положений пункта 4 договора, сроки поставки по товарным накладным № ЦБ-87 от 28.01.2020, № ЦБ-167 и ЦБ-168 от 13.02.2020, № ЦБ-245 от 27.02.2020, № ЦБ-244 от 27.02.2020 – 10.02.20202, 19.02.2020, 21.02.2020, 03.03.2020, 03.03.2020, соответственно

- неустойка подлежит снижению на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец отклонил доводы ответчика, ссылаясь на следующее:

- по результатам проведения процедуры запроса предложений истец направил ответчику для подписания проект договора, в том числе приложение №12 (отгрузочная разнарядка ММ №1013242310), в котором указан срок поставки – апрель 2019 г. таким образом, проект договора в качестве акцепта истцом оферты на иных условиях являлась согласно статье 443 Гражданского кодекса Российской Федерации новой офертой,

- исходя из момента предоставления ответчиком в полном объеме документации на товар, сроки поставки по товарным накладным № ЦБ-87 от 28.01.2020, № ЦБ-167 и ЦБ-168 от 13.02.2020, № ЦБ-245 от 27.02.2020, № ЦБ-244 от 27.02.2020 – 10.02.20202, 25.02.2020, 27.04.2020 и 27.04.2020,

- основания для снижения неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 123 Конституции Российской Федерации, статьям 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации способами.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса  Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных  правовых актов, а при  отсутствии таких - условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Возникшие между сторонами отношения по договору поставки материально-технических ресурсов (прейскурантный) от 24.09.2018 №В060318/2288Д регулируются главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик – продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя. В случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке. Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки (пункты 1, 2 статьи 509 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 510 Гражданского кодекса Российской Федерации, доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях.

Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

Согласно годовой отгрузочной разнарядке ММ № 1013242310 (приложение №12 к договору), поставщик обязался поставить в адрес покупателя «Блок-бокс хранения пожарного инвентаря» - 1 шт., «Блок обогрева вахтенного персонала БОВ-2» - 3 комплекта, «Здание теплого склада 173917/00461Д-125-905386.7-ТХ-ТТ-01» - 1 комплект. Общая стоимость товара составила 10 333 220,35 руб., в том числе с НДС. Товар должен быть поставлен в апреле 2019 года, то есть не позднее 30.04.2019.

Судом не принимает довод ответчика о несогласованности сторонами указанной даты в качестве даты поставки товара.

Как следует из материалов дела, договор был заключен сторонами по результатам проведения истцом процедуры закупки - запроса предложений, согласно документации о закупке по лоту №81785, в ходе которого истец собирал оферты потенциальных исполнителей, чтобы иметь возможность акцептовать одну из них.

В соответствии со статьей 443 Гражданского кодекса Российской Федерации ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой.

Согласно пункту 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

По результатам проведения процедуры истец направил ответчику для подписания проект договора, включающий приложение № 12 -  отгрузочную разнарядку ММ № 1013242310,  в которой определен срок поставки  - апрель 2019 года. 

Таким образом, проект договора в качестве акцепта истцом оферты на иных условиях, являлась согласно статьи 443 Гражданского кодекса Российской Федерации новой офертой на условиях, указанных в проекте договора, направленном истцом в адрес ответчика, согласно которому срок поставки  - апрель 2019 года. 

Подписание ответчиком договора с приложениями на указанных условиях свидетельствует об осведомленности об условиях сделки и позволяет считать согласованный сторонами срок поставки – апрель 2019 года, согласно отгрузочной разнарядке ММ № 1013242310. 

Направление ответчиком писем о согласовании конструкторской документации после наступления срока поставки товара не свидетельствует об изменении сроков поставки товара.

В силу положений статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ссылаясь на нарушение срока поставки товара, истец обратился в суд с требованиями о взыскании 3 026 658,31 руб. неустойки, с учетом предусмотренного пунктом 8.1.1 договора ограничения в размере 30% стоимости товара, согласно расчету:

- 1 497 573,56 руб. за период с 01.05.2019 по 10.02.2020 на сумму 5 236 271,18 руб.

- 355 118,65 руб. за период с 01.05.2019 по 25.02.2020 на сумму 1 183 728,82 руб.,

- 355 118,65 руб. за период с 01.05.2019 по 25.02.2020 на сумму 1 183 728,82 руб.,

- 355 118,65 руб. за период с 01.05.2019 по 27.02.2020 на сумму 1 183 728,82 руб.,

- 463 728,81 руб. за период с 01.05.2019 по 27.04.2020 на сумму 1 545 762,71 руб. 

В подтверждение поставки товара в материалы дела представлены транспортные накладные от 13.02.2020 №№167, 168, от 28.01.2020 №87, от 27.02.2020 №244/245, а также товарные накладные № ЦБ-87 от 28.01.2020, № 167 от 13.02.2020, № ЦБ-244 от 27.02.2020, № ЦБ-245 от 27.02.2020.

По товарной накладной № ЦБ-87 от 28.01.2020 «Блок-бокс хранения пожарного инвентаря» на сумму 5 236 271,18 руб. поставлен 10.02.2020, документы на товар переданы 02.02.2020 по описи от 28.01.2020, а также переданы покупателю, согласно квитанции курьерской службы №72570395, 10.02.2020. Получение истцом товара по указанной накладной 10.02.2020 сторонами не оспорено.

Согласно транспортным накладным № 167 от 13.02.2020, №168 от 13.02.2020, груз на склад грузополучателя поступил 19.02.2020 и 21.02.2020, соответственно.

Ответчик ссылается на то, что вся документация на товар была передана одновременно с товаром. При этом, соответствующие доказательства в подтверждение данного довода в материалы дела не представлены. По описи от 13.02.2020, представленной ответчиком, истцу переданы товарные накладные №167, №168, и комплекты ключей. Иных доказательств передачи предусмотренного пунктами 7.1, 7.2 комплекта документов в полном объеме одновременно с передачей товара в материалы дела не представлено.

Судом установлено, что по товарным накладным № ЦБ-167 и ЦБ-168 от 13.02.2020, паспорта на товар в количестве 2 комплектов на товар на сумму 2 367 457,64 руб., согласно квитанции курьерской службы ТН 74168874, поступили в адрес покупателя 25.02.2020. Иного ответчиком не доказано.

Таким образом, рассмотрев представленные в материалы дела доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил, что обязательства по поставке товара по товарным накладным № ЦБ-167 и ЦБ-168 от 13.02.2020, исполнены ответчиком 25.02.2020, с учетом исполнения обязательства по передаче полного предусмотренного пунктами 7.1, 7.2 договора комплекта документов, поскольку согласно условиям договора, непредставление предусмотренного договором комплекта документов приравнивается к непоставке товара.

По товарной накладной № ЦБ-245 от 27.02.2020 поставлен товар «Блок обогрева вахтенного персонала БОВ-2» на сумму 1 183 728,82 руб. 

По товарной накладной № ЦБ-244 от 27.02.2020 на сумму 1 545 762,71 руб. поставлено «Здание теплого склада 173917/00461Д-125-905386.7-ТХ-ТТ-01».

Согласно транспортной накладной № 244/245 от 27.02.2020 указанный груз прибыл на склад грузополучателя 03.03.2020. 

Как следует из материалов дела и пояснений истца, по результатам приемки товара были  выявлены недостатки, о чем составлен акт (форма № М-7)  от 07.03.2020. Недостатки товара устранены поставщиком, согласно акту осмотра от 27.04.2020. 

Между тем, суд соглашается с доводом ответчика о несоблюдении истцом предусмотренного договором порядка выявления и устранения недостатков передаваемого товара. Истец не обеспечил извещение ответчика о выявленных недостатках товара в предусмотренном пунктом 5.2 договора порядке. Иного материалами дела не доказано. В связи с изложенным, суд считает принятым товар по указанным товарным накладным 03.03.2020.

С учетом изложенного, обоснованно начисленная неустойка, согласно расчету суда, с учетом предусмотренного пунктом 8.1.1 договора ограничения в размере 30% стоимости товара, составляет 3 026 658,31 руб.:

- 1 497 573,56 руб. за период с 01.05.2019 по 10.02.2020 на сумму 5 236 271,18 руб. (транспортная накладная №87),

- 355 118,65 руб. за период с 01.05.2019 по 25.02.2020 на сумму 1 183 728,82 руб. (транспортная накладная №167),

- 355 118,65 руб. за период с 01.05.2019 по 25.02.2020 на сумму 1 183 728,82 руб. (транспортная накладная №168),

- 355 118,65 руб. за период с 01.05.2019 по 03.03.2020 на сумму 1 183 728,82 руб. (транспортная накладная 224/245),

- 463 728,81 руб. за период с 01.05.2019 по 03.03.2020 на сумму 1 545 762,71 руб. (транспортная накладная 244/245).

Ответчик заявил о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снижении размера обоснованно предъявленной неустойки.

Рассмотрев ходатайство ответчика, арбитражный суд отказывает в его удовлетворении на основании следующего.

Согласно пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В пунктах 69, 71, 73 - 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление Пленума ВС РФ N 7) разъяснено, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). При наличии в деле доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. Поскольку в силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение заявления ответчика о снижении неустойки представить доказательства, свидетельствующие о том, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего в гражданском обороте разумно и осмотрительно при сравнимых обстоятельствах, в том числе основанные на средних показателях по рынку (изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов и т.д.).

Исходя из пунктов 74 - 75 Постановления Пленума ВС РФ N 7, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.

Следовательно, для установления баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, законодательством суду предоставлена возможность снижать размер неустойки, подлежащей взысканию с нарушителя. Основанием для снижения размера неустойки служит ее явная несоразмерность последствиям нарушения обязательства, в том числе, - слишком высокий размер процента, на основании которого определяется неустойка. Суд вправе уменьшить размер неустойки только при наличии соответствующего ходатайства ответчика. При этом ответчику, в обосновании данного ходатайства, необходимо представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

Как следует из содержания статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Являясь профессиональным субъектом предпринимательской деятельности, основанной на определенной доле риска, реализуя основные принципы гражданско-правовых отношений, в том числе в части свободы усмотрения при определении контрагента договора и условий заключаемого договора, ответчик имел возможность предусмотреть негативные последствия заключения спорных договоров с выбранным контрагентом на согласованных сторонами условиях.

Доводы ответчика подлежат отклонению, поскольку ответчиком не подтверждено несоответствие размеру допущенного нарушения обязательств по договору. Основываясь на принципе свободы договора, суд считает, что заключая спорный договор, ответчик должен предвидеть негативные последствия в виде наступления ответственности и начисления истцом  неустойки в соответствии с условиями договоров. 

Кроме того, ответчиком не подтверждена чрезмерность заявленной и обоснованной суммы неустойки. Размер неустойки 0,1% за каждый день просрочки поставки не считается чрезмерно высоким. Данный размер неустойки является обычно принятым в деловом обороте. Кроме того, размер неустойки ограничен 30% от стоимости товара. 

При таких условиях, исходя из конкретных обстоятельств настоящего дела, учитывая нарушение срока поставки ответчиком товара, суд признает разумной и соразмерной последствиям нарушения обязательств меру ответственности размере 3 026 658,31 руб. и отклоняет ходатайство ответчика об уменьшении размера неустойки.

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в заявленном размере. 

Согласно части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СВС» (ИНН 

<

***>, г.Воткинск Удмуртской Республики) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (ИНН 

<

***>, г. Красноярск) 3 026 658,31 руб. неустойки, а также 38 133руб. судебных расходов по государственной пошлине.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.А. Горбатова