Арбитражный  суд  Брянской  области

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации   

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А09-5540/2021

город Брянск

15 февраля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 08 февраля 2022 года.

В полном объеме решение изготовлено 15 февраля 2022 года.

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Матвеевой Н.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания        ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ТоЛК», г. Брянск,

к обществу с ограниченной ответственностью «Экспорт Сервис Групп», г. Брянск,

о взыскании 1 517 693 руб. 41 коп.,

при участии в судебном заседании:     

от истца: ФИО2, директор, приказ №8/1 от 29.05.2021;

от ответчика: не явились;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ТоЛК» (далее – ООО «ТоЛК»), г. Брянск, обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Экспорт Сервис Групп» (далее – ООО «Экспорт Сервис Групп»), г. Брянск, о взыскании 1 517 693 руб. 41 коп. долга за выполненные работы по договору подряда №209ПМ от 09.07.2019.

В судебном заседании 08 февраля 2022 года истец не возражал против рассмотрения дела по существу в отсутствие ответчика, поддержал исковые требования в полном объеме, просил суд взыскать с ответчика 1 517 693 руб. 41 коп. долга и 28 177 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Ответчик отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований не представил, в судебное заседание 08 февраля 2022 года не явился.

Дело рассмотрено по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в отсутствие ответчика.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующее.

09.07.2019 между ООО «ТоЛК» (подрядчиком) и ООО «Экспорт Сервис Групп» (заказчиком) заключен договор подряда №209ПМ (л.д.10-16), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по проектированию, строительству и монтажу автоматизированной блочной котельной установки (далее – БКУ) номинальной производительностью 4,5 кВт, представляющей собой модульное здание из профильного металлопроката со смонтированным технологическим оборудованием, по адресу: 

<

...> (пункт 1.1).

Согласно пункту 1.2 договора подрядчик производит работы по комплектации, изготовлению, поставке котельной установки согласно «Спецификации оборудования» (Приложение №1) на строительную площадку заказчика, включая проведение необходимых испытаний, проверок, оформление необходимой технической и сдаточной документации согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ.

В соответствии с пунктом 1.4 договора подрядчик выполняет пуско-наладочные работы, по завершению которых предъявляет результат своей работы заказчику и инспекции Ростехнадзора. Выполнение пусконаладочных работ, оформление и сдача результатов работ заказчику производится подрядчиком в присутствии уполномоченного  представителя заказчика и сотрудника инспекции Ростехнадзора. 

Общая стоимость работ по договору определяется расчетом договорной цены (Приложение №1) и составляет 9 980 000 руб., в том числе НДС 20% 1 663 333 руб. 30 коп. (пункт 2.1 договора).

Пунктом 2.3 договора предусмотрено, что в случае выявления необходимости выполнения дополнительных работ, ранее не оговоренных сторонами и не предусмотренных договором, стороны оформляют дополнительное соглашение к договору о включении в перечень дополнительных работ с составлением сметы дополнительных расходов.

В соответствии с пунктом 2.4 договора порядок расчетов осуществляется согласно графика финансирования, включенного в Приложение №2, после подписания обеими сторонами актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 ежемесячно для ведения бухгалтерской отчетности, не позднее 30-ти календарных дней с момента подписания вышеуказанных форм и выставления подрядчиком счета и предоставления счет-фактуры.

Согласно пункту 3.1 договора начало выполнения работ – не позднее 10 июля 2019 года; окончание работ – не позднее 23 октября 2019 года.

Заказчик в срок, установленный договором, обязан принять результат работ по результатам выполнения каждого этапа работ, с участием подрядчика, о чем составляется соответствующий акт приемки-передачи. Заказчик оплачивает результаты работ по промежуточным актам приемки-передачи по форме КС-2, КС-3 в течение 10 рабочих дней с момента их подписания (пункты 5.1, 5.3 договора).

27.11.2019 ООО «ТоЛК» (подрядчик) и ООО «Экспорт Сервис Групп» (заказчик) заключили дополнительное соглашение №1 к договору №209ПМ от 09.07.2019 (л.д.17), по условиям которого подрядчик выполнит в связи с инициативой заказчика услуги, относящиеся к строящейся котельной установки номинальной производительностью 4,5 кВт, по адресу: 

<

...>: проведение корректировки ранее выполненной проектной документации ООО «НПЦ «СиК» №0806-2019 в связи с введением новых дополнительных технических условий ТУ №605 от 14.11.2019; выполнение топосъемки для проектирования участка прокладки газопроводов наружных на территории заказчика в масштабе 1:500 по адресу: 

<

...>; проведение полной корректировки ранее выполненной исполнительной технической документации по строительству БКУ-4,5 кВт в связи с инициативой заказчика ввести новые (дополнительные) технические условия ТУ №605 от 14.11.2019 и последующего согласования проекта №0806-2019 с АО «Газпром газораспределение Брянск» (пункт 1.1 дополнительного соглашения).

Стоимость поручаемых подрядчику работ определена и составляет 35 000 руб., в том числе НДС – 5 833 руб. 33 коп. Оплата выполненных работ осуществляется сторонами на основании акта выполненных работ (пункты 2.1, 2.3 соглашения).

09.01.2020 ООО «ТоЛК» (подрядчик) и ООО «Экспорт Сервис Групп» (заказчик) заключили дополнительное соглашение №2 к договору №209ПМ от 09.07.2019 (л.д.18-20), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по проектированию, строительству и монтажу автоматизированной блочной котельной установки (далее – БКУ) номинальной производительностью 4,5 кВт, представляющей собой модульное здание из профильного металлопроката со смонтированным технологическим оборудованием, по адресу: 

<

...>: закупить необходимые материалы и оборудование и произвести его монтаж; выполнить строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и электроснабжения; выполнить пуско-наладочные работы, предъявить результат своей работы инспекции Ростехнадзора (пункт 1.1 дополнительного соглашения).

Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость работ определяется расчетом договорной цены (Приложение №1) и составляет 486 193 руб. 41 коп., в том числе НДС 20% - 81 032 руб. 24 коп. Оплата выполненных работ осуществляется сторонами на основании акта выполненных работ (пункт 2.3 соглашения).

Во исполнение условий заключенного договора №209ПМ от 09.07.2019 общество «ТоЛК» выполнило работы на общую сумму 9 953 193 руб. 41 коп., что подтверждается актами формы КС-2 №1 (отчетный период с 09.07.2019 по 12.12.2019) и справкой формы КС-3 №1 (отчетный период с 09.07.2019 по 12.12.2019) на сумму 8 785 000 руб., №№1-6 (отчетный период с 01.01.2020 по 31.01.2020) и справкой формы КС-3 №1 (отчетный период с 01.01.2020 по 31.01.2020) на сумму 486 193 руб. 41 коп., актом формы КС-2 №7 (отчетный период с 01.01.2020 по 31.01.2020) и справкой формы КС-3 №2 (отчетный период с 01.01.2020 по 31.01.2020) на сумму 682 000 руб., подписанными со стороны заказчика без замечаний к объему и качеству выполненных работ, скрепленными печатями организаций (л.д.23-51).

Также во исполнение условий заключенного договора №209ПМ от 09.07.2019 общество «ТоЛК» выполнило проектные работы автоматизированной блочной котельной установки на сумму 300 000 руб., о чем подписан акт №388 от 30.09.2019 (л.д.21).

Во исполнение условий дополнительного соглашения №1 от 27.11.2019 общество «ТоЛК» выполнило корректировку исполнительной документации согласно новым техническим условиям на сумму 35 000 руб., о чем подписан акт №579 от 31.12.2019 (л.д.22).

Общая стоимость выполненных работ по договору №209ПМ от 09.07.2019 и заключенным к нему дополнительным соглашениям составила 10 288 193 руб. 41 коп.

26.12.2019 приемочной комиссией в составе заказчика (ООО «Экспорт Сервис Групп»), подрядчика (ООО «ТоЛК»), проектной организации (ГИП ООО «НПЦ «СиК»), территориального органа Ростехнадзора составлен акт приемки по завершении строительных и монтажных работ сети газопотребления для проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования по объекту – Техническое перевооружение ОПО – «Сеть газопотребления ООО «Экспорт Сервис Групп» по адресу: 

<

...>. Установка блочной котельной 4,5 МВт (БКУ-4,5 МВт)» (л.д.106).

Из указанного акта усматривается, что строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с инструкциями изготовителя и требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и иными техническими регламентами. Предъявленное к приемке газоиспользующее оборудование считается принятым с 26.12.2019 для проведения пуско-наладочных работ и комплексного опробования. Акт приемки считается основанием для разрешения пуска газа для проведения пуско-наладочных работ. 

31.05.2021 ООО «ТоЛК» направило обществу «Экспорт Сервис Групп» досудебную претензию с требованием оплатить задолженность по договору №209ПМ от 09.07.2019 в сумме 1 517 693 руб. 41 коп. (л.д.8-9, 77-78).

Направленная ответчику претензия оставлена без ответа, изложенные в ней требования ответчиком в добровольном порядке не исполнены, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Заключенный между сторонами договор №209ПМ от 09.07.2019, по своей правовой природе, является договором подряда, в связи с чем правоотношения сторон по такому договору подлежит регулированию нормами главы 37 ГК РФ (далее – ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В силу пункта 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Обязательства по выполнению работ, предусмотренных договором №209ПМ от 09.07.2019 и дополнительными соглашениями №1 от 27.11.2019 и №2 от 09.01.2020, на общую сумму 10 288 193 руб. 41 коп. исполнены подрядчиком надлежащим образом, результат работ принят заказчиком, что подтверждается представленными в материалы дела актами  о приемке выполненных работ формы КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, актами №579 от 31.12.2019 и №388 от 30.09.2019, подписанными без замечаний.

Ответчик факт выполнения истцом работ не оспорил, возражений по качеству, объему и стоимости выполненных работ не заявил.

В ходе рассмотрения дела ответчик мотивированного отзыва на исковое заявление с изложением возражений относительно предъявленных к нему требований суду не представил. Присутствовавший в судебном заседании 11 ноября 2021 года представитель ООО «Экспорт Сервис Групп» ФИО3 возражений по существу предъявленных исковых требований не заявлял (протокол судебного заседания от 11 ноября 2021 года, л.д.112).

Также в ходе рассмотрения дела истцом было представлено письмо ООО «Экспорт Сервис Групп» от 12.01.2022 №02 (л.д.120), из которого усматривается, что между сторонами велись переговоры о заключении мирового соглашения, одним из условий которого является частичное погашение долга в сумме 500 000 руб. до 30.01.2022. При этом, общество «Экспорт Сервис Групп» гарантировало обществу «ТоЛК» частичную оплату на сумму 500 000 руб. до 30.01.2022. В свою очередь, ответчик просил истца согласовать остальные условия мирового соглашения, в том числе представить график выполнения оставшихся объемов работ по пуско-наладке и ввода котельной в эксплуатацию.

В судебном заседании 08 февраля 2022 года истец пояснил, что оплата в сумме 500 000 руб. от ответчика ему не поступила, в связи с чем мировое соглашение между сторонами не заключено. В отношении невыполнения пуско-наладочных работ истцом дано пояснение, что газовая инспекция Ростехнадзора 26.12.2019 приняла выполнение строительно-монтажных работ по монтажу блочной котельной установки и прокладке газопровода и выдала разрешение на проведение пуско-наладочных работ. Вместе с тем, пуско-наладочные работы не могли быть выполнены, так как между ответчиком и ресурсоснабжающей организацией (АО «Газпром газораспределение Брянск») не заключен договор на поставку газа, отсутствовало разрешение на использование газа в виде топлива для проведения  пуско-наладочных работ (л.д.93). 

Из представленных в материалы дела актов формы КС-2 усматривается, что истцом не выполнялись и не предъявлялись ответчику к оплате пуско-наладочные работы. 

Согласно сведениям истца сумма задолженности за выполненные по договору №209ПМ от 09.07.2019 работы составляет 1 517 693 руб. 41 коп. 

В рассматриваемом случае расчет суммы задолженности представлен только истцом и не оспорен ответчиком путем представления соответствующего контррасчета. Каких-либо возражений относительно ошибочности расчета суммы задолженности, составленного истцом, ответчиком также не представлено. 

В тоже время письмо ответчика от 12.01.2022 №02 о заключении мирового соглашения и график платежей истцу на общую сумму 1 517 693 руб. 41 коп.(погашение общей задолженности по договору) свидетельствуют о признании ответчиком суммы долга перед истцом в заявленном по иску размере (л.д. 120-121).

На день принятия окончательного судебного акта по делу суду не представлено доказательств, подтверждающих погашение заявленной к взысканию задолженности полностью или в какой-либо части.

При таких обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 1 517 693 руб. 41 коп. долга по оплате выполненных работ договору №209ПМ от 09.07.2019 подлежат удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии с подп.1 п.1 ст.333.21 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)  госпошлина при цене иска 1 517 693 руб. 41 коп. составляет 28 177 руб. 

При подаче в арбитражный суд иска истец уплатил в доход федерального бюджета 28 177 руб. госпошлины по платежному поручению №415 от 09.07.2021 (л.д.7).

В связи с удовлетворением исковых требований в полном объеме, с ответчика подлежат взысканию в пользу истца 28 177 руб. в качестве компенсации понесенных судебных расходов по уплате госпошлины при подаче в арбитражный суд иска.

Руководствуясь ст.ст. 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

Р  Е  Ш  И  Л :

Исковые требования удовлетворить в сумме 1 517 693 руб. 41 коп.

        Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Экспорт Сервис Групп», г. Брянск, в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТоЛК», 

<

...> 517 693 руб. 41 коп. долга, а также 28 177 руб. расходов по государственной пошлине, уплаченной  по иску.

       Решение может быть обжаловано в течение месяца в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Тула.

        Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области.

 

       Судья                                                                                               Н.И. Матвеева