АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А63-22781/2023

г. Ставрополь

08 апреля 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Каговой А.А., рассмотрев в  судебном заседании исковое заявление министерства жилищно-коммунального хозяйства  Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1152651000512, ИНН 2636206829,  

к обществу с ограниченной ответственностью «СК-Гипродор», г. Нальчик, ОГРН  1190726004842, ИНН 0725027507,  

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по  государственному контракту от 28.12.2021 № 0121200004721001200, за периоды с  17.02.2022 по 10.05.2023, с 02.08.2022 по 07.11.2023, с 02.11.2022 по 07.11.2023 в размере  1 263 252 руб.,  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК-Гипродор», г.  Нальчик, ОГРН 1190726004842, ИНН 0725027507, в пользу министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1152651000512,  ИНН 2636206829, неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному  контракту от 28.12.2021 № 0121200004721001200, за периоды с 17.02.2022 по 10.05.2023,  с 02.08.2022 по 07.11.2023, с 02.11.2022 по 07.11.2023 в размере 1 153 404 руб.  

 В удовлетворении остальной части требований отказать. 

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

  Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК-Гипродор», г.  Нальчик, ОГРН 1190726004842, ИНН 0725027507, в доход федерального бюджета  24534 руб. государственной пошлины.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина