Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А54-1077/2021

г. Рязань

17 января 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 10 января 2022 года. 

Полный текст решения изготовлен 17 января 2022 года17 января 2022 года.

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Кураксиной О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-21" (ОГРН 

<

***>; 

<

...>)

к администрации города Рязани (ОГРН 

<

***>; 

<

...>)

третье лицо Управление капитального строительства администрации города Рязани (ОГРН 

<

***>; 390046, 

<

...>)

об обязании исполнить пункты 3.3.2 и 3.3.4 договора о развитии застроенной территории №03/1/1-16-01 от 27.01.2016,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 - представитель по доверенности от 11.01.2021 № 01/01 (срок действия доверенности по 31.12.2021), предъявлен диплом о высшем образовании, 

от ответчика: не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом,

от третьего лица: не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-21" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к Администрации города Рязани с требованием об обязании исполнить пункты 3.3.2 и 3.3.4 договора о развитии застроенной территории №03/1/1-16-01 от 27.01.2016.

Определением суда от 19.02.2021, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление капитального строительства Администрации города Рязани.

Ответчик и третье лицо в судебное заседание не явились, явку представителя не обеспечили. В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей ответчика и третьего лица, извещенных о месте и времени судебного разбирательства в порядке ст.ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежащим образом.

В судебном заседании 09.12.2021 истцом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлено об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит  внести в договор о развитии застроенной территории №03/1/1-16-01 от 27.01.2016 следующие изменения:

"изложить пункт 3.1.6 в следующей редакции: Осуществить строительство на застроенной территории, подлежащей развитию, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории не позднее 11 (одиннадцати) лет с момента заключения договора",

"изложить пункт 5.1 в следующей редакции: Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором, но не более 11 (одиннадцати) лет".

Обязать администрацию горда Рязани, устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО "ЖЭУ-21", исполнив пункты 3.3.2 и 3.3.4 договора о развитии застроенной территории №03/1/1-16-01 от 27.01.2016.

Судом уточнение исковых требований принято.

Из материалов дела судом установлено, что  27 января 2016 года между Администрацией города Рязани (администрация) и обществом с ограниченной ответственностью "ЖЭУ - 21" (застройщик) заключен договор о развитии застроенной территории №03/1/1-16-01, предметом которого является развитие застроенной территории ориентировочной площадью 0,3 га, расположенной в границах улицы Электрозаводская, в районе дома 54б, в Советском районе города Рязани, решение о развитии которой принято в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 07.10.2015 №4649 "О развитии застроенной территории в границах улицы Электрозаводская, в  районе дома 54б, в Советском районе города Рязани" (пункт 1.1 договора, том 1 л.д. 11-15).

Пунктом 3.1.2 договора установлена обязанность застройщика подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, подлежащей развитию, в соответствии с градостроительными регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования, не позднее 6 месяцев с момента заключения договора.

Согласно пункту 3.3.1 договора, администрация города Рязани обязалась создать необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии с пунктами 3.3.2-3.3.4 и оказывать застройщику необходимое содействие.

В соответствии с пунктом 3.3.2 договора администрация обязуется утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, подлежащей развитию, в соответствии с градостроительным регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования, не позднее чем через пятнадцать дней со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления подготовленного проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, подлежащей развитию, протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и заключения о результатах публичных слушаний главе администрации города Рязани. 

В соответствии с пунктом 3.3.4. договора администрация города Рязани обязалась предоставить без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, подлежащей развитию, земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, после выполнения Застройщиком обязательств по пп.3.1.2 - 3.1.4 Договора не позднее 2 (двух) месяцев с момента документального подтверждения выполнения обязательств.

Согласно пункту 5.1 договора - договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором, но не более 5 лет.

Письмом №01/01 от 11.01.2021 ООО "ЖЭУ-21" обратилось к Администрации города Рязани с просьбой о продлении срока договора о развитии застроенной территории на 3 года с целью исполнения сторонами взятых обязательств. В обоснование указано на длительные судебные процессы (том 1 л.д. 16).

Письмом №05/1-14-351/Исх от 03.02.2021 Администрация города Рязани отказала истцу в продлении срока  действия договора (том 1 л.д. 17-18). В обоснование отказа указано на не утверждение проекта планировки застроенной территории и  нарушение сроков по передаче в  муниципальную собственность благоустроенного жилого помещения по адресу: 

<

...>, общей площадью 48,4 кв.м.

Письмом №254/06 от 30.06.2020 ООО "ЖЭУ-21" обратилось к Администрации города Рязани с просьбой о сообщении сроках предоставления без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, подлежащей развитию, земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности в соответствии с пунктом 3.3.4 договора (том 1 л.д. 19).

Письмом №05/1-14-2738/Исх от 24.07.2020 администрация сообщила обществу о необходимости конкретизации испрашиваемого земельного участка без проведения торгов (том 1 л.д. 20).

Письмом №05/1-14-3262/Исх от 17.09.2020 администрация сообщила обществу о том, что проект планировки застроенной территории была подготовлена ООО "ЖЭУ-21" и передана на рассмотрение в администрацию города 04.07.2016. Документация была рассмотрена структурным подразделением администрации города Рязани, замечания УЗРИО  были направлены обществу. Исправленная по замечаниям документация повторно передана ООО "ЖЭУ-21" на рассмотрение в администрацию города 28.07.2016. Документация по планировке территории не направлялась на публичные слушания в связи с отсутствием необходимого обращения от застройщика в соответствии с нормами ГрК РФ (ч.9 статьями 45 ГрК РФ в редакции от 03.07.2016) - том 1 л.д. 22-23.

Администрация города Рязани с исковыми требованиями не согласилась, в обоснование указала на  нарушение сроков перечисления денежных средств за изымаемое помещение, нарушение сроков передачи жилого помещения в муниципальную собственность и отсутствие заявление ООО "ЖЭУ-21".

Ссылаясь на существенные нарушения договора со стороны Администрации и невозможность исполнения последующих обязательств со стороны ООО "ЖЭУ-21", общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд считает требования подлежащими удовлетворению  частично по следующим основаниям. 

27 января 2016 года между Администрацией города Рязани (администрация) и обществом с ограниченной ответственностью "ЖЭУ - 21" (застройщик) заключен договор о развитии застроенной территории №03/1/1-16-01, предметом которого является развитие застроенной территории ориентировочной площадью 0,3 га, расположенной в границах улицы Электрозаводская, в районе дома 54б, в Советском районе города Рязани, решение о развитии которой принято в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 07.10.2015 №4649 "О развитии застроенной территории в границах улицы Электрозаводская, в  районе дома 54б, в Советском районе города Рязани" (пункт 1.1 договора, том 1 л.д. 11-15).

Согласно пункту 5.1 договора - договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором, но не более 5 лет.

Согласно части 1 Статьей 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации по договору о развитии застроенной территории одна сторона обязуется в установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 3-6 части 3 настоящей статьи, а другая сторона (орган местного самоуправления) обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии с пунктами 7-9 части 3 этой статьи. Договором могут быть предусмотрены иные обязательства сторон в соответствии с частью 4 этой статьи.

Договор заключается органом местного самоуправления с победителем открытого аукциона на право заключить такой договор или иным лицом в соответствии с частями 25 и 28 статьи 46.3 этого Кодекса (часть 2 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации). В соответствии с частью 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации существенными условиями договора являются, в том числе: обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с градостроительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования (при их отсутствии – в соответствии с утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры); максимальные сроки подготовки таких документов; обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, создать либо приобрести, а также передать в государственную или муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальные сроки выполнения указанного обязательства; обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 этой части; максимальные сроки выполнения указанного обязательства; обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории; максимальные сроки осуществления строительства; обязательство органа местного самоуправления после выполнения лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления, обязательств, предусмотренных пунктами 3- 5 этой части, предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена (если распоряжение такими земельными участками осуществляется органом местного самоуправления) и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам; максимальные сроки выполнения указанного обязательства; срок договора; ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора

В силу части 26 статьи 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. При заключении договора изменение условий аукциона на основании соглашения сторон такого договора или по требованию одной из его сторон не допускается. 

Соответственно, исходя из положений части 26 статьи 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, запрет на изменение условий аукциона на основании соглашения сторон такого договора или по требованию одной из его сторон установлен в момент заключения договора. Из содержания этой нормы не следует запрета на продление срока действия договора применительно к уже заключенному договору о развитии застроенной территории

В этой связи довод Администрации о невозможности изменения срока действия договора в силу положений части 26 статьи 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежит отклонению, как основанный на неверном толковании закона.

В качестве правового основания своих требований истец ссылается на положения статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и указывает на существенное нарушение договора со стороны Администрации, выразившееся в длительном неисполнении последней своих первичных обязательств, в установленные договором сроки.

А именно истец ссылается на не утверждение Администрацией города Рязани проекта планировки территории, что повлекло невозможность ООО "ЖЭУ-21" исполнить свои последующие обязательства по договору.

Истец указывает, что ООО "ЖЭУ-21" письмом №295/07 от 04.07.2016 направило в адрес администрации города Рязани готовую проектную документацию, в том числе проект планировки территории; 28.07.2016 ООО "ЖЭУ-21" письмом №364/07 направило в адрес Администрации исправленную документацию, в соответствии с указанными в письме №05/3-11-2877/Исх от 12.07.2016 замечаниями. В конце июня 2020 года, обществу стало известно, что проект планировки застроенной территории до настоящего времени не утвержден. Ознакомившись с направленной ранее документацией, общество установило, что дополнительных замечаний не имеется (все замечания устранены в 2016 году), общество возвратило документацию в администрацию.

Согласно пункту 1 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

В соответствии с разделом 3 договора №03/1/1-16-01 от 27.01.2016, общество обязалось:

- в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 3.1.2-3.1.7.

- подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, подлежащей развитию, в соответствии с градостроительными регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования, не позднее 6 (Шести) месяцев с момента заключения Договора.

- создать либо приобрести и передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения по согласованию с уполномоченным структурным подразделением администрации города Рязани для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, расположенных в многоквартирном доме, указанном в п. 1.2 Договора, в соответствии с установленными нормами предоставления площади жилого помещения, не позднее 1 (Одного) года с момента заключения Договора.

- уплатить возмещение за изымаемые на основании постановления администрации города Рязани, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, подлежащей развитию, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с п. 3.1.3 Договора, не позднее 5 рабочих дней с момента подписания соглашения о выкупе земельного участка и жилого помещения либо вступления в силу решения суда об определении размера возмещения.

- осуществить строительство и (или) реконструкцию и последующую безвозмездную передачу в муниципальную собственность объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения застроенной территории, подлежащей развитию, перечень которых определяется в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке застроенной территории не позднее окончания срока действия Договора.

- осуществить строительство на застроенной территории, подлежащей развитию, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории не позднее 5 (Пяти) лет с момента заключения Договора.

- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Администрации отчет об исполнении своих обязательств по Договору.

В свою очередь Администрация приняла обязательства:

- создать необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии с пунктами 3.3.2-3.3.4 Договора и оказывать Застройщику необходимое содействие по вопросам, входящим в компетенцию Администрации, в том числе обеспечивать подготовку распорядительных документов и обращений (ходатайств) в органы государственной власти.

- утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, подлежащей развитию, в соответствии с градостроительными регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования, не позднее чем через пятнадцать дней со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления подготовленного проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, подлежащей развитию, протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и заключения о результатах публичных слушаний главе администрации города Рязани.

- принять в установленном порядке постановление администрации города Рязани об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, не позднее 12 (Двенадцати) месяцев с момента признания в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, подлежащей развитию.

- предоставить без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, подлежащей развитию, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, после выполнения Застройщиком обязательств по пп.3.1.2 - 3.1.4 Договора не позднее 2 (Двух) месяцев с момента документального подтверждения выполнения обязательств.

Таким образом, исполнение обязательств ООО "ЖЭУ-21" по осуществлению строительства на территории подлежащей развитию в срок, установленный договором, находится в зависимости от исполнения обязательств Администрацией.

ООО "ЖЭУ-21" письмом №295/07 от 04.07.2016 направило в адрес администрации города Рязани готовую проектную документацию (том 1 л.д. 74), в том числе проект планировки территории; 28.07.2016 ООО "ЖЭУ-21" письмом №364/07 направило в адрес Администрации исправленную документацию, в соответствии с указанными в письме №05/3-11-2877/Исх от 12.07.2016 замечаниями. В конце июня 2020 года, обществу стало известно, что проект планировки застроенной территории до настоящего времени не утвержден. Ознакомившись с направленной ранее документацией, общество установило, что дополнительных замечаний не имеется (все замечания устранены в 2016 году), общество возвратило документацию в администрацию.

Доказательств того, что на 2016 год проектная документация имела недостатки, подлежащие исправлению, Администрацией города Рязани в материалы дела не представлено. Таким образом суд приходит к выводу о том, что на протяжении около 4-х лет Администрация не предпринимала мер к утверждению проекта планировки застроенной территории.

Относительно  довода ответчика о перечислении истцом денежных средств за изымаемые помещения в декабре 2018 год, суд считает необходимым отметить, что денежные средства перечислены в короткий срок после принятие  решений Советским районным судом г.Рязани об изъятии и выселении, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями (том 1).

Так же суд считает необходимым отметить, что  Решением Арбитражного суда рязанской области от 03.07.2020 по делу №А54-10092/2019 на Администрацию города Рязани возложена обязанность по приему в муниципальную собственность жилого помещения.

Таким образом, изложенное подтверждает нарушение существенных условий договора со стороны Администрации, и свидетельствует о том, что установленный договором срок исполнения застройщиком обязательств, по договору, недостаточен для развития указанной территории. 

Судебной коллегией также принято во внимание, что согласно пункту 3 статьи 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 

В данном случае договор №03/1/1-16-01 от 27.01.2016 содержит прямое указание (пункт 5.1) на то, что договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором, но не более пяти лет. 

Соответственно, по истечении 5-ти летнего срока Администрация будет не вправе совершать какие-либо действия по исполнению своих обязательств по данному договору, что в свою очередь может повлечь для истца убытки в виде понесенных затрат на исполнение данного договора. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований истца об изменении условий пунктов договора о развитии застроенной территории №03/1/1-16-01 от 27.01.2016:

"изложить пункт 3.1.6 в следующей редакции: Осуществить строительство на застроенной территории, подлежащей развитию, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории не позднее 11 (одиннадцати) лет с момента заключения договора",

"изложить пункт 5.1 в следующей редакции: Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором, но не более 11 (одиннадцати) лет".

Относительно установления 11-ти летнего периода суд исходил из сведений ООО "Гражданпроект" относительного обоснованности сроков выполнения работ по разработке нового проекта либо возможности внесения изменений в ранее разработанный проект (том 2 л.д. 4-5, 17-18).

В удовлетворении требования об обязании администрации горда Рязани, устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО "ЖЭУ-21", исполнив пункты 3.3.2 и 3.3.4 договора о развитии застроенной территории №03/1/1-16-01 от 27.01.2016 следует отказать, поскольку в условиях спорного договора и настоящего спора отсутствуют обязательства, обязывающие ответчика досрочно произвести исполнение настоящих пунктов. Кроме того, с учетом изменений условий пунктов договора, истцом  не представлено доказательств не исполнения указанных пунктов договора ответчиком.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в договор о развитии застроенной территории №03/1/1-16-01 от 27.01.2016 ориентировочной площадью 0,3 га, расположенной в границах улицы Электрозаводская, в районе дома 54б, в Советском районе города Рязани:

изложить пункт 3.1.6 в следующей редакции: Осуществить строительство на застроенной территории, подлежащей развитию, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории не позднее 11 (одиннадцати) лет с момента заключения договора,

изложить пункт 5.1 в следующей редакции: Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором, но не более 11 (одиннадцати) лет.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

2. Взыскать с администрации города Рязани (ОГРН 

<

***>; 

<

...>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-21" (ОГРН 

<

***>; 

<

...>) судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

Судья О.В. Кураксина