Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-86784/2018

18 сентября 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сергеева О.Н.,

 

рассмотрев дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС" (адрес:  Россия 191167, 

<

...> пом.7-Н,оф.1, ОГРН:  

<

***>);

ответчик:  общество с ограниченной ответственностью "МАЛИКОМ"; (адрес:  Россия 191025, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/А/1-Н ОФИС 5; Россия 191014, Санкт-Петербург, ФИО1 д.5, лит.А, пом.5Н, ОГРН:  

<

***>; 

<

***>);

о взыскании 785 750 руб. 90 коп.

установил:

ООО "ФЕНИКС" предъявило иск о взыскании с ООО "МАЛИКОМ" 260 001 руб. 00 коп. неосновательного обогащения и 525 749 руб. 90 коп. неустойки на основании договора строительного подряда №15-2017 от 27.03.17.

Ответчик отзыв не предоставил.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании ст.ст. 226-229 АПК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор строительного подряда №15-2017 от 27.03.17 на выполнение работ по объекту ВМА им ФИО2 по адресу: Сакнт-Петербург, ул. Комиссара ФИО3, д.8, и три дополнительных соглашения к нему.

Общая стоимость работ – 4 795 837 руб. 50 коп.

Истец – подрядчик перечислил ответчику – субподрядчику в качестве предоплаты 5 030 000 руб. 00 коп. 

Ответчик выполнил работы на общую сумму 4 769 999 руб. 00 коп.

Письмом от 05.03.18 исх. №29 истец уведомил об отказе от исполнения договора в связи с нарушением сроков исполнения работ.

Учитывая изложенное, на стороне ответчика образовалось неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса в размере 260 001 руб. 00 коп.

В соответствии с п.5.3. договора ответчику начислена неустойка за нарушение сроков производства работ по состоянию на 05.03.18 в сумме 525 749 руб. 90 коп.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МАЛИКОМ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС" 785 750 руб. 90 коп., из них: 260 001 руб. 00 коп. неосновательного обогащения и 525 749 руб. 90 коп. неустойки начисленной по состоянию на 05.03.18, а также 18 715 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине. 

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.