АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-10716/2022

г. Белгород

28 февраля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 февраля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 28 февраля 2023 года.

 

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Дробышева Ю. Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Карнауховой И.П., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению МКУ "Управление социального строительства Яковлевского района Белгородской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "ЭЛИТСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании исполнить гарантийные обязательства,   

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.  

 

УСТАНОВИЛ:

МКУ "Управление социального строительства Яковлевского района Белгородской области" (истец) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО "ЭЛИТСТРОЙПРОЕКТ" (ответчик) об обязании ответчика в течении 30 дней после вступления решения в законную силу устранить недостатки выполненных работ, а именно: восстановить озеленение и разрушенное покрытие, устранить неровности на поверхности тротуарной плитки, закрепить надлежащим образом оборудование на дворовой территории расположенной по адресу: 

<

...>.

В ходе рассмотрения дела, представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, указанным в иске, представленных документах. В судебное заседание не явился, извещен в порядке ст. 123, 156 АПК РФ. 

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.

В силу ст. 121 АПК РФ, информационного письмом ВАС РФ от 19.09.2006г. № 113 Постановления Пленума ВАС РФ №12 от 17.02.2011г, сведения о дате, времени и месте судебного заседания по делу № А08-10716/2022 размещены арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.

Учитывая, что стороны, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии со ст. ст. 121, 123, 156 АПК РФ, дело рассмотрено  в отсутствие представителей сторон по имеющимся в деле доказательствам, при отсутствии заявлений и возражений относительно рассмотрения дела в их отсутствие. 

Исследовав материалы дела, в ходе рассмотрения дела, оценив в силу статей 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, суд находит исковые требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 18.12.2020. в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", между МКУ «Управление социального строительства Яковлевского городского округа» (далее-Заказчик) и ООО «ЭлитСтройПроект» (далее-Подрядчик) был заключен муниципальный контракт № 0826600012220000156 на выполнение работ по объекту: Благоустройство дворовой территории по адресу: 

<

...> Яковлевского городского округа (далее-Контракт).

Согласно п. 1.1 ст.1 Контракта, Подрядчик обязуется в соответствии со сметной документацией выполнить подрядные работы по объекту Благоустройство дворовой территории по адресу: 

<

...> Яковлевского городского округа.

Согласно Акта работы по строительству были приняты. Оплата выполненных работ произведена.

16.08.2022 г. Комиссия в составе сотрудников МКУ УСС Яковлевского городского округа произвела осмотр дворовых территорий расположенного по адресу: Яковлевский городской округ 

<

...>

В ходе визуального осмотра было выявлено, что не восстановлено озеленение, на резиновом покрытии в местах установки игрового оборудования имеются участки с разрушенным покрытием, часть оборудования закреплена не в соответствии с техническими нормами паспорта, на поверхности тротуарной плитки наличие неровностей.

В адрес ответчика 16.08.2022 г. было направлено требование об устранении нарушений, которое осталось без удовлетворения.

Обращение истца с иском ответчику, обосновано тем, что по результатам выполненных работ  по данному договору установлены недостатки, где в претензионном порядке урегулирования спора, ответчик, не преступил к исполнению гарантийных обязательств, со дня приемки выполненных работ по             договору. В связи с чем, истец обратился в суд с настоящим иском об устранении недостатков   по выполненным работам по договору, по результатам претензионного порядка урегулирования спора.  

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу, сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно п. 1 ст.721 ГК РФ  качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В силу пункта 3 статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течении гарантийного срока.

Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда составляет пять лет и возможность его уменьшения законом не предусмотрена (ст. 756 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору требовать от подрядчика: 

-безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

-соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (ст. 397 ГК РФ).

В соответствии со статьями 307, 309 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом. По общему правилу только надлежащее исполнение прекращает обязательство (статья 408 ГК РФ). 

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Сторонами  не оспаривается, что выполненные работ по договору были приняты и оплачены заказчиком.

Согласно п. 4.4 контракта ответчик обязался выполнить обустройство строительной площадки. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, за исключением оборудования, поставляемого Заказчиком.

По результатам проведенной проверки Подрядчик обязуется устранить выявленные нарушения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования либо в иной срок по согласованию с Заказчиком (п. 6.5).

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать эти работы, обеспечив их надлежащее качество (п. 6.8) .

Согласно п. 8.1 Контракта Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в соответствии со сметной и технической документацией, государственными стандартам, техническими регламентами, СНиП, иными обязательными правилами и действующими нормативными актами в полном объеме, надлежащим качеством и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

- надлежащее функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

Гарантийный срок на все виды работ и примененные материалы по настоящему контракту устанавливается в соответствии со статьями 755, 756 Гражданского кодекса Российской Федерации и составляет 5 лет с даты ввода Объекта в эксплуатацию, а также: по основанию дорожной одежды - 6 лет; по нижнему слою покрытия - 5 лет; по верхнему слою покрытия - 6 лет; по водоотводным сооружениям - 6 лет; тротуарная плитка с основанием - 5 лет, бортовые камни - 5 лет, резиновое покрытие детских площадок - 2 года, малые архитектурные формы - 1 год, озеленение территории (посев газонной травы) - 5 лет (при соблюдении агротехнических мероприятий), при этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания актов формы № КС-3, КС-2.

Подписание Акта о приемке законченного строительством объекта осуществляется только после предоставления Генеральным подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по контракту согласно требованиям настоящего Контракта.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченным им третьим лицом (п. 8.2 контракта).

Если в период гарантийного срока в процессе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Подрядчик осуществляет устранение дефектов за свой счет, если эти дефекты не являются следствием некачественной сметной документации. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика (п. 8.3).

Судом установлен факт, что спорные работы относятся к работам по договору, в том числе подтвержденные видами работ по форме КС2, где в отношении завлечённых видов работ имеются обстоятельства  их ненадлежащего исполнения ответчиком,  подтвержденные Акт осмотра благоустройства дворовых территорий от 16.08.2022 г в части наличия недостатков, и отсутствия результатов их устранения в порядке претензионного урегулирования спора.

В связи с этим, истцом правомерно заявлено требование об обязании ответчика, устранить выявленные недостатки.

Из материалов следует, что ответчик, к устранению недостатков в перечне  работ подлежащих устранению поименованных в иске, не приступил, мотивированных причин отказа в устранении недостатков, после получения уведомления, проведенного обследования, а также относительно выявленных недостатков, истцу не представил. Обратного суду в порядке ст. 65, 67, 68, 75 АПК РФ не представлено. Правом проведения экспертизы стороны с позиции ст. ст. 9, п.3.1 ст. 70, 65, 67, 68, 75 АПК РФ не воспользовались. 

Материалы дела не содержат допустимых и достоверных доказательств в порядке ст. 65, 67, 68, 75 АПК РФ  того, что возникшие дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации ( п.2 ст. 755 ГК РФ) 

Поскольку ответчик, не выполнил работы по устранению недостатков работ, суд считает требования истца законными и обоснованными и на основании ст.ст. 307-309, 310, 314, 702, 721-723, 740, ГК РФ подлежащими удовлетворению в полном объеме

Дело возникло по вине ответчика, на которого суд относит расходы по оплате государственной пошлины.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Иск МКУ "Управление социального строительства Яковлевского городского округа" удовлетворить.

Обязать ООО "ЭлитСтройПроект" в 30-дневный срок после вступления решения в законную силу устранить недостатки  по результатам работ по муниципальному контракту  № 0826600012220000156 от 18.12.2020, а именно: 

- восстановить озеленение и разрушенное покрытие, устранить неровности на поверхности тротуарной плитки;

- закрепить надлежащим образом оборудование на дворовой территории расположенной по адресу: Белгородская обл., Яковлевский городского округа. 

<

...>.

Взыскать с ООО "ЭлитСтройПроект" в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины. 

Исполнительнее листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

 

Судья

Ю.Ю. Дробышев