АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075  

http://fasuo.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ Ф09-1219/17 

Екатеринбург

17 мая 2017 г.

Дело № А76-1822/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 11 мая 2017 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 мая 2017 г. 

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Беляевой Н.Г.,

судей Рябовой С.Э., Лазарева С.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества финансово-строительная компания «Западный луч» (далее – общество ФСК «Западный луч») на решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.10.2016 по делу № А76-1822/2016 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2016 по тому же делу.

Представители лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа, в судебное заседание не явились.

Общество с ограниченной ответственностью «Геотранс» (далее – общество «Геотранс») обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу ФСК «Западный луч» о взыскании задолженности в сумме 5 645 009 руб. и пени за несвоевременное исполнение обязательств в сумме 1 136 519 руб. 85 коп. (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом первой инстанции в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Общество ФСК «Западный луч» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области со встречным исковым заявлением к обществу «Геотранс» о взыскании договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договорам подряда в сумме 5 039 969 руб. 85 коп. и штрафов за непредставление обществом «Геотранс» исполнительной документации по договорам подряда в сумме 66 000 руб. Встречное исковое заявление принято судом для совместного рассмотрения с исковым заявлением общества «Геотранс».

На основании ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Союз» (далее - общество «Союз»), общество с ограниченной ответственностью «Трейд-Пром» (далее - общество «Трейд-Пром»), общество с ограниченной ответственностью «УралСпецДеталь» (далее - общество «УралСпецДеталь»), общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» (далее - общество «Комфорт»), общество с ограниченной ответственностью «Эталон» (далее - общество «Эталон») и общество с ограниченной ответственностью «Фагот» (далее – общество «Фагот»).

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 21.10.2016 (судья Костарева И.В.) первоначальные исковые требования общества «Геотранс» удовлетворены, суд взыскал с общества ФСК «Западный луч» задолженность в сумме 5 645 009 руб. и пени за несвоевременное исполнение обязательств в сумме 1 136 519 руб. 85 коп. Встречные исковые требования общества ФСК «Западный луч» удовлетворены частично, с общества «Геотранс» взыскана неустойка в сумме 155 854 руб. 46 коп.; после проведенного зачета, суд взыскал в пользу общества «Геотранс» денежные средства в сумме 6 678 814 руб. 31 коп. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2016 (судьи Арямов А.А., Плаксина Н.Г., Малышев М.Б.) решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество ФСК «Западный луч», ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемое решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить. Общество ФСК «Западный луч» указывает, что порядок приемки работ, согласованный сторонами в договорах подрядов, предусматривает обязанность подрядчика при нарушении сроков выполнения работ представить заказчику одновременно с актом формы КС-2 объяснительную о причинах нарушения. По мнению заявителя, ни один из подрядчиков не был лишен возможности согласовать с заказчиком иные условия договора, исходя из собственных возможностей и интересов, при этом заказчик предъявил неустойку только за конечный срок выполнения работ по договору.  Общество ФСК «Западный луч» отмечает, что доказательства отсутствия волеизъявления сторон при заключении договоров в материалах дела отсутствуют, кроме того, подписывая договор, стороны выразили согласие с размером предусмотренной неустойки и с самой формулой ее исчисления, исходя из суммы за каждый день просрочки. Заявитель отмечает, что требования об уплате неустойки заявлены только за нарушение конечного срока выполнения работ, в связи с чем начисление неустойки на всю сумму договора является обоснованным. Общество ФСК «Западный луч» полагает, что признание судом условия сделки о неустойке недействительным, является нарушением принципа законности и равноправия сторон. В обоснование необходимости снижения суммы начисленной неустойки заявитель указывает, что сумма долга по договору между истцом и ответчиком, как и сумма неустойки, является незначительной; истец выкупил долги у иных подрядчиков по цене ниже, чем сумма основного долга; подрядчики не предъявляли пени к уплате, долг продали по цене ниже суммы основного обязательства. Заявитель полагает, что при расчете неустойки истец неверно определил начало просрочки, рассчитав срок для оплаты с даты составления актов выполненных работ, а не с даты фактической приемки работ. Общество ФСК «Западный луч» считает, что согласно условиям договоров 5% сумм, подлежащих оплате подрядчикам, составляли сумму гарантийного удержания, которая и была правомерно удержана заказчиком в соответствии с условиями договора.

В соответствии со ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в обжалуемой части исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществом «Геотранс» (подрядчик) и обществом ФСК «Западный луч» (заказчик) заключен договор строительного подряда от 12.08.2014 № ЖД2-392.06.14 на ведение работ на эксплуатируемом многоквартирном жилом доме по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, в соответствии с условиями которого срок выполнения работ: начало работ - 15.08.2014, окончание работ - 25.08.2014 (п. 2.1. договора). Стоимость работ по локальному сметному расчету составляет 10 430 руб. 20 коп. (п. 3.1. договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Представленный обществом «Геотранс» акт выполненных работ по указанному договору от 12.08.2014 подписан обществом ФСК «Западный луч» 04.09.2014.

В установленный договором срок оплата выполненных работ обществом ФСК «Западный луч» не произведена в полном объеме, в связи с чем общество «Геотранс» начислило пени в соответствии с п. 11.14 договора на всю сумму задолженности за период с 05.10.2014 по 19.10.2016 (746 дней), сумма пеней составила 1783 руб. 10 коп.

Между обществом «Союз» (цедент) и обществом «Геотранс» (цессионарий) заключен договор уступки права требования от 11.08.2014 № 31, в соответствии с которым цедентом уступлено право требования с должника - общества ФСК «Западный луч» исполнения денежного обязательства по договору подряда от 30.04.2013 № ЖД2-206-30-04/13. Сумма переданной задолженности составила 199 003 руб. 35 коп. Пунктом 2 этого договора передача прав цедента состоялась в том объеме и на тех условия, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда от 30.04.2013 № ЖД2-206-30-04/13, подрядчик (общество «Союз») обязался осуществить работы по отделке четырех квартир в 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, Центральный район, ул. Труда, а заказчик (общество ФСК «Западный луч») обязался принять и оплатить эти работы (п. 1.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за объем работ, фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний, в течение 30 дней с момента подписания акты формы КС-2 и справки формы КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п. 2.2.3 договора (п. 2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиком всей исполнительной документации (п. 2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ по договору подряда  от 30.04.2013 № ЖД2-206-30-04/13 предоставлен обществом «Союз» 02.04.2014 и подписан обществом ФСК «Западный луч» 07.05.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 07.06.2014.

Переданная по договору цессии задолженность заказчика по указанному договору подтверждена актом сверки за период с 30.04.2013 по 25.09.2014, подписанным обществом «Союз» и обществом ФСК «Западный луч».

Уведомлением, полученным обществом ФСК «Западный луч» 28.08.2014, общество «Союз» уведомило должника о состоявшейся уступке права требования.

В связи с неисполнением обществом ФСК «Западный луч» обязанности по оплате стоимости выполненных работ в размере 199 003 руб. 35 коп., общество «Геотранс» в соответствии с п. 5.5 договора от 30.04.2013 № ЖД2-206-30-04/13 начислило пени за период с 08.06.2014 по 19.10.2016, сумма которых составила 22 956 руб. 92 коп.

Между обществом «Союз» (цедент) и обществом «Геотранс» (цессионарий) заключен договор уступки права требования от 11.08.2014 № 32, в соответствии с которым цедентом уступлено право требования с должника - общества ФСК «Западный луч» исполнения денежного обязательства по договору подряда от 17.05.2013 № ЖД2-233-17-05/13. Сумма переданной задолженности составила 208 627 руб. 54 коп. Пунктом 2 договора предусмотрена передача прав цедента в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда от 17.05.2013 № ЖД2-233-17-05/13 подрядчик (общество «Союз») обязался выполнить отделку помещений на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за объем работ, фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний, в течение 30 дней с момента подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п. 2.2.3 договора (п. 2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиком всей исполнительной документации (п. 2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен обществом «Союз» 02.04.2014 и подписан заказчиком 07.05.2014, в связи с чем сроком оплаты выполненных работ  является 07.06.2014.

Переданная по договору цессии задолженность заказчика по указанному договору подтверждена актом сверки за период с 17.05.2013 по 25.09.2014, подписанным обществом «Союз» и обществом ФСК «Западный луч».

Уведомлением, полученным обществом ФСК «Западный луч» (должник) 28.08.2014, общество «Союз» уведомило должника о состоявшейся цессии.

Поскольку задолженность общества ФСК «Западный луч» в сумме 208 627 руб. 54 коп.  не погашена, общество «Геотранс» в соответствии с п. 5.5 договора от 17.05.2013 № ЖД2-233-17-05/13 начислило пени за период с 08.06.2014 по 19.10.2016, сумма которых составила 80 804 руб. 26 коп.

Между обществом «Союз» (цедент) и обществом «Геотранс» (цессионарий) заключен договор уступки права требования от 11.08.2014 № 33, в соответствии с которым цедентом уступлено право требования с должника - общества ФСК «Западный луч» исполнения денежного обязательства по договору подряда от 22.05.2013 № ЖД2-236-22-05/13. Сумма переданной задолженности составляет 90 694 руб. 10 коп. Пункт 2 договора предусматривает передачу прав цедента в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда от 22.05.2013 № ЖД2-236-22-05/13, подрядчик (общество «Союз») обязался выполнить отделку помещений на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, Центральный район, ул. Труда, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за объем работ, фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний, в течение 30 дней с момента подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п. 2.2.3 договора (п. 2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиком всей исполнительной документации (п. 2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен обществом  «Союз» 01.11.2013 и подписан заказчиком 27.11.2013, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 27.12.2013.

Переданная по договору цессии задолженность подтверждена актом сверки за период с 22.05.2013 по 11.08.2014, подписанным обществом «Союз» и обществом ФСК «Западный луч».

Уведомлением, полученным обществом ФСК «Западный луч» 28.08.2014,  общество «Союз» уведомило должника о состоявшейся цессии.

Поскольку задолженность в сумме 90 694 руб. 10 коп. обществом ФСК «Западный луч» не погашена, общество «Геотранс» в соответствии с п. 5.5 договора  от 22.05.2013 № ЖД2-236-22-05/13 начислило пени за период с 28.12.2013 по 19.10.2016  в сумме  21 345 руб. 24 коп.

Между обществом «Союз», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч», заключено соглашение от 11.08.2014 о передаче прав и обязанностей по договору подряда  от 09.01.2014 № ЖД2-367.01.14, в силу которого общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору от 09.01.2014 № ЖД2-367.01.14, заключенному между обществом «Союз» (подрядчик) и обществом ФСК «Западный луч» (заказчик).

В соответствии с договором подряда  от 09.01.2014 № ЖД2-367.01.14, подрядчик (общество «Союз») обязался выполнить отделку помещений на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 130 004 руб. 14 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 15.02.2014 и подписан заказчиком 13.03.2014, в связи с чем срок оплаты наступил 13.04.2014.

На дату подписания соглашения от 11.08.2014 задолженность общества ФСК «Западный луч» составила 28 861 руб. 84 коп., что подтверждено актом сверки за период с 15.02.2014 по 11.08.2014, подписанным обществом «Союз» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 14.04.2014 по 19.10.2016 начислило пени в соответствии с п. 11.14 договора от 09.01.2014 № ЖД2-367.01.14, сумма которых составила  6085 руб. 04 коп.

Между обществом «Союз», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч» заключено соглашение от 19.08.2015 о передаче прав и обязанностей по договору подряда от 25.07.2014 № ЖД2-391.05.14, в силу которого общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору подряда от 25.07.2014 № ЖД2-391.05.14.

В соответствии с договором подряда от 25.07.2014 № ЖД2-391.05.14, подрядчик (общество «Союз») обязался выполнить восстановление отделки помещений на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 34 778 руб.14 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 25.07.2014 и подписан заказчиком 25.08.2014, в связи с чем срок оплаты наступил 25.09.2014.

На дату подписания соглашения от 19.08.2015 задолженность общества ФСК «Западный луч» составила 34 655 руб. 89 коп., что подтверждено актом сверки за период с 25.07.2014 по 19.08.2015, подписанным обществом «Союз» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 26.09.2014 по 19.10.2016 начислило пени в соответствии с п. 11.14 договора от 25.07.2014 № ЖД2-391.05.14, сумма которых составила 5996 руб. 19 коп.

Между обществом «Союз», обществом  «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч» заключено соглашение от 19.08.2015 о передаче прав и обязанностей по договору подряда от 15.08.2014 № ЖД2-392.07.14, в силу которого общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору от 15.08.2014 № ЖД2-392.07.14.

В соответствии с договором подряда от 15.08.2014 № ЖД2-392.07.14, подрядчик (общество «Союз») обязался выполнить отделочные работы на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 487 744 руб. 74 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ по договору предоставлен подрядчиком 01.09.2014 и подписан заказчиком 17.09.2014, в связи с чем срок оплаты - 17.10.2014.

На дату подписания соглашения от 19.08.2015 задолженность общества ФСК «Западный луч» составила 487 133 руб. 49 коп., что подтверждено актом сверки за период с 15.08.2014 по 19.08.2015, подписанным обществом «Союз» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 18.10.2014 по 19.10.2016 начислило пени в соответствии с п. 11.14 договора от 15.08.2014 № ЖД2-392.07.14, сумма которых составила 81 828 руб. 28 коп.

Между обществом «Комплексные поставки» (цедент) и обществом «Геотранс» (цессионарий) заключен договор уступки права требования от 30.06.2014 № 1, в соответствии с которым цессионарию перешло право требования от должника – общества ФСК «Западный луч» исполнения денежного обязательства по дополнительному соглашению ДС1 от 01.02.2013 к договору подряда от 15.10.2012 № ЖД2-15-10/12 в размере 1 230 070 руб. 35 коп. Пункт 2 договора цессии предусматривает передачу прав цедента в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда  от 15.10.2012 № ЖД2-15-10/12 в редакции дополнительного соглашения ДС1 от 01.02.2013, общество «Комплексные поставки» (подрядчик) обязалось выполнить отделочные работы на объекте общества «Западный луч»  (заказчик) - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 5 605 474 руб. 50 коп. (п. 2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за объем работ, фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний, в течение 30 дней с момента подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п. 2.2.3 договора (п. 2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиком всей исполнительной документации (п. 2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен обществом «Комплексные поставки» 13.02.2014 и подписан заказчиком 13.03.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 13.04.2014.

На дату подписания договора цессии от 30.06.2014 задолженность общества ФСК «Западный луч» составила 1 230 070 руб. 35 коп., что подтверждено актом сверки за период с 01.01.2014 по 30.06.2014, подписанным обществом «Комплексные поставки» и обществом ФСК «Западный луч».

Уведомлением, полученным обществом ФСК «Западный луч» 08.08.2014, общество «Комплексные поставки» уведомило должника о состоявшейся цессии.

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» начислило пени за период с 14.04.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 5.5 договора от 15.10.2012 № ЖД2-15-10/12, сумма которых составила 259 339 руб. 83 коп.

Между обществом «Комплексные поставки», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч», заключено соглашение от 11.07.2014 о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда  от 18.11.2013 № ЖД2-319.09.13, в силу которого общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору от 18.11.2013 № ЖД2-319.09.13.

В соответствии с договором подряда  от 18.11.2013 № ЖД2-319.09.13, подрядчик (общество «Комплексные поставки») обязался выполнить работы по демонтажу-монтажу отделки на объекте заказчика - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 94 527 руб. 23 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты работ заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 28.01.2014 и подписан заказчиком 05.02.2014, в связи с чем срок оплаты - 05.03.2014.

На дату подписания соглашения от 11.07.2014 задолженность общества ФСК «Западный луч» составила 59 527 руб. 23 коп., что подтверждено актом сверки за период с 30.12.2013 по 11.07.2014, подписанным обществом «Комплексные поставки» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности заказчиком не произведена, общество «Геотранс» за период с 06.03.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 11.14 договора от 18.11.2013 № ЖД2-319.09.13 начислило пени, сумма которых составила 13 082 руб. 35 коп.

Между обществом «Комплексные поставки», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч» заключено соглашение от 11.07.2014 о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда  от 20.12.2013 № ЖД2-347.11.13/1 с дополнительным соглашением ДС1 от 12.05.2014, в соответствии с которым общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору от 20.12.2013 № ЖД2-347.11.13/1.

В соответствии с договором подряда от 20.12.2013 № ЖД2-347.11.13/1 (в редакции дополнительного соглашения ДС1 от 12.02.2014), подрядчик обязался выполнить работы по демонтажу-монтажу отделки на объекте заказчика - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 390 340 руб. 46 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 20.05.2014 и подписан заказчиком 30.05.2014, в связи с чем срок оплаты наступил 30.06.2014.

На дату подписания соглашения от 11.07.2014 задолженность общества ФСК «Западный луч» составила 176 559 руб. 78 коп., что подтверждено актом сверки за период с 14.02.2014 по 11.07.2014, подписанным обществом «Комплексные поставки» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, обществом «Геотранс» за период с 01.07.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 11.14 договора  от 20.12.2013 № ЖД2-347.11.13/1 начислены пени, сумма которых составила 34 068 руб. 68 коп.

Между обществом «Трейд-Пром» (цедент) и обществом «Геотранс» (цессионарий) заключен договор уступки права требования от 30.06.2014 № 14, в соответствии с которым цедентом передано право требования к должнику - обществу ФСК «Западный луч» исполнения денежного обязательства на сумму 143 486 руб. 24 коп. по договору подряда от 04.03.2013 № ЖД2-158-04.03/13, с учетом дополнительных соглашений ДС1 от 18.04.2013, ДС2 от 15.07.2013. Пункт 2 договора предусматривает передачу прав цедента в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда  от 04.03.2013 № ЖД2-158-04.03/13 (в редакции дополнительных соглашений ДС1 от 18.04.2013, ДС2 от 15.07.2013), общество «Трейд-Пром» (подрядчик) обязалось выполнить отделочные работы на объекте общества ФСК «Западный луч» (заказчик) - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 3 842 007 руб. 25 коп. (п. 2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за объем работ, фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний, в течение 30 дней с момента подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п. 2.2.3 договора (п. 2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 5 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиком всей исполнительной документации (п. 2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен обществом  «Трейд-Пром» 05.05.2014 и подписан заказчиком 03.06.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ – 09.06.2014.

Сумма переданной по договору цессии задолженности подтверждена актом сверки за период с 04.03.2013 по 30.06.2014, подписанным обществом «Трейд-Пром» и обществом ФСК «Западный луч».

Уведомлением, полученным обществом ФСК «Западный луч» 08.08.2014, общество «Трейд-Пром» уведомило должника о состоявшейся цессии.

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 09.06.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 5.5 договора начислило пени, сумма которых составила 80 551 руб. 39 коп.

Между обществом «Трейд-Пром», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч» заключено соглашение от 09.07.2014 о передаче прав и обязанностей и уступке права требования, в силу которого общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору  от 16.09.2013 № ЖД2-288.08.13.

В соответствии с договором подряда  от 16.09.2013 № ЖД2-288.08.13, подрядчик (общество «Трейд-Пром») обязался выполнить работы по отделке помещений на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик  обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 1 520 000 руб. 48 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за объем работ, фактически выполненный и принятый в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ по договору предоставлен подрядчиком 20.02.2014 и подписан заказчиком 12.03.2014, в связи с чем срок оплаты - 13.04.2014.

На дату подписания соглашения от 09.07.2014 задолженность общества ФСК «Западный луч» составила 794 940 руб. 47 коп., что подтверждено актом сверки за период с 01.01.2014 по 09.07.2014, подписанным обществом «Трейд-Пром» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 13.04.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 11.14 договора начислило пени, сумма которых составила 167 782 руб. 12 коп.

Между обществом «УралСпецДеталь» (цедент) и обществом «Геотранс» (цессионарий) заключен договор уступки права требования от 30.06.2014 № 2, по которому цедентом передано право требования к должнику - обществу ФСК «Западный луч» исполнения денежного обязательства в сумме 188 075 руб. 94 коп. по договору подряда от 01.05.2013 № ЖД2-182-01-05/13. Пункт 2 договора предусматривает передачу прав цедента в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда  от 01.05.2013 № ЖД2-182-01-05/13 общество «УралСпецДеталь» (подрядчик) обязалось выполнить работы по устройству плитки полов мест общего пользования на объекте общества  ФСК «Западный луч» (заказчик) - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 1 558 749 руб. 89 коп. (п. 2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за объем работ, фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний, в течение 30 дней с момента подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п. 2.2.3 договора (п. 2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиком всей исполнительной документации (п. 2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен обществом «УралСпецДеталь» 28.05.2014 и принят заказчиком 02.06.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 02.07.2014.

На момент заключения договора цессии от 30.06.2014 задолженность общества ФСК «Западный луч» составила 188 075 руб. 94 коп., что подтверждается актом сверки за период с 28.06.2013 по 30.06.2014, подписанным обществом «УралСпецДеталь» и обществом ФСК «Западный луч».

Уведомлением, полученным обществом ФСК «Западный луч» 08.08.2014, общество «УралСпецДеталь» уведомило должника о состоявшейся цессии.

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 14.09.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 5.5 договора  от 01.05.2013 № ЖД2-182-01-05/13 начислило пени, сумма которых составила 33 058 руб. 26 коп.

Между обществом «УралСпецДеталь» (цедент) и обществом «Геотранс» (цессионарий) заключен договор уступки права требования от 30.06.2014 № 1, по которому цедентом передано право требования к должнику - обществу ФСК «Западный луч» задолженности на сумму 43 474 руб. 98 коп. по договору подряда от 22.03.2013 № ЖД2-181-22-03/13 (с учетом дополнительных соглашений ДС от 05.06.2013, ДС1 от 08.07.2013, ДС2 от 18.06.2013). Пункт 2 договора № 1 предусматривает передачу прав цедента в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда  от 22.03.2013 № ЖД2-181-22-03/13 (в редакции дополнительных соглашений ДС от 05.06.2013, ДС1 от 08.07.2013, ДС2 от 18.06.2013) общество «УралСпецДеталь»  (подрядчик) обязалось выполнить работы по устройству плитки полов мест общего пользования на объекте общества ФСК «Западный луч» (заказчик) - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, Центральный район, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 1 885 190 руб. 44 коп. (п. 2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за объем работ, фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний, в течение 30 дней с момента подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п. 2.2.3 договора (п. 2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 5 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиком всей исполнительной документации (п. 2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен обществом «УралСпецДеталь» 22.06.2013 и подписан заказчиком 02.08.2013, в связи с чем срок оплаты выполненных работ – 08.08.2013.

Сумма задолженности на момент заключения договора цессии от 30.06.2014 составила 43 474 руб. 98 коп., что подтверждено актом сверки за период с 03.04.2013 по 30.06.2014, подписанным обществом «УралСпецДеталь» и обществом ФСК «Западный луч».

Уведомлением, полученным обществом ФСК «Западный луч»  08.08.2014, общество «УралСпецДеталь» сообщило должнику о состоявшейся цессии.

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 13.09.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 5.5 договора  от 22.03.2013 № ЖД2-181-22-03/13 начислило пени в сумме 7651 руб. 42 коп.

Между обществом  «УралСпецДеталь», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч» заключено соглашение от 08.07.2014 о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда  от 16.12.2013 № ЖД2-335.10.13, в соответствии с которым общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по указанному договору подряда.

В соответствии с договором подряда  от 16.12.2013 № ЖД2-335.10.13 подрядчик (общество  «УралСпецДеталь») обязался выполнить работы по восстановлению поврежденной плитки в помещениях на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик (общество ФСК «Западный луч») обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 117 939 руб. 69 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 05.05.2014 и подписан заказчиком 03.06.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 03.07.2014.

На дату подписания соглашения от 08.07.2014 задолженность общества ФСК «Западный луч» составила 117 539 руб. 12 коп., что подтверждено актом сверки за период с 05.05.2014 по 08.07.2014, подписанным между обществом «УралСпецДеталь» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 04.07.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 11.14 договора от 16.12.2013 № ЖД2-335.10.13 начислило пени в сумме 22 599 руб. 34 коп.

Между обществом «УралСпецДеталь», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч» заключено соглашение от 08.07.2014 о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда от 10.03.2014 № ЖД2-377.03.14 , в силу которого общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору указанному договору подряда.

В соответствии с договором подряда  от 10.03.2014 № ЖД2-377.03.14, подрядчик («УралСпецДеталь») обязался выполнить работы по устранению дефектов укладки плитки полов в помещениях на объекте заказчика (общество  - ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 17 292 руб. 09 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 18.04.2014 и подписан заказчиком 08.05.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 09.06.2014.

На дату подписания соглашения от 08.07.2014 задолженность общества ФСК «Западный луч» по указанному договору составила 17 292 руб. 90 коп., что подтверждено актом сверки за период с 18.04.2014 по 08.07.2014, подписанным обществом «УралСпецЦеталь» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 10.06.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 11.14 договора  от 10.03.2014 № ЖД2-377.03.14 начислило пени в сумме 3420 руб. 30 коп.

Между обществом «Комфорт» (цедент) и обществом «Геотранс» (цессионарий) заключен договор уступки права требования от 30.06.2014 № 11, в соответствии с которым цедент уступил право требования задолженности по договору подряда  от 20.04.2013 № ЖД2-198-20.04/13 на сумму 235 267 руб. 49 коп. Пункт 2 договора предусматривает передачу прав цедента в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда от 20.04.2013 № ЖД2-198-20.04/13, общество «Комфорт» (подрядчик) обязалось выполнить работы по устройству межкомнатных перегородок на объекте общества ФСК «Западный луч»  (заказчик) - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 897 756 руб. 90 коп. (п. 2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за объем работ, фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний, в течение 30 дней с момента подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п. 2.2.3 договора (п. 2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиком всей исполнительной документации (п. 2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен обществом «Комфорт» 04.11.2013 и подписан заказчиком 26.11.2013, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 26.12.2013.

На момент заключения договора от 30.06.2014 сумма задолженности общества ФСК «Западный луч» по указанному договору подряда составила 235 267 руб. 49 коп., что подтверждается актом сверки за период с 01.01.2014 по 30.06.2014, подписанным обществом «Комфорт» и обществом ФСК «Западный луч».

Уведомлением, полученным обществом ФСК «Западный луч» 08.08.2014, общество «Комфорт» сообщило должнику о состоявшейся цессии.

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 27.12.2013 по 19.10.2016 в соответствии с п. 5.5 договора  от 20.04.2013 № ЖД2-198-20.04/13 начислило пени в сумме 55 425 руб. 10 коп.

Между обществом «Комфорт», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч» заключено соглашение от 11.07.2014 о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда  от 01.02.2014 № ЖД2-284.07.13. В соответствии с соглашением общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по указанному договору подряда.

В соответствии с договором подряда от 01.02.2014 № ЖД2-284.07.13, подрядчик (общество «Комфорт») обязался выполнить работы по устройству межкомнатных перегородок на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 44 223 руб. 73 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 02.04.2014 и подписан заказчиком 07.05.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ - 07.06.2014.

На дату подписания соглашения от 11.07.2014 задолженность общества ФСК «Западный луч»  составила 10 921 руб. 78 коп., что подтверждено актом сверки за период с 02.04.2014 по 11.07.2014, подписанным обществом «Комфорт» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 08.06.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 11.14 договора  от 01.02.2014 № ЖД2-284.07.13 начислило пени в сумме 10 921 руб. 78 коп.

Между обществом «Комфорт», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч» заключено соглашение от 11.07.2014 о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда  от 20.10.2013 № ЖД2-330/339.10.13, в силу которого общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору от 20.10.2013 № ЖД2-330/339.10.13.

В соответствии с договором подряда  от 20.10.2013 № ЖД2-330/339.10.13, подрядчик (общество «Комфорт») обязался выполнить работы по отделке квартир на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 1 295 001 руб. 22 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 02.04.2014 и подписан заказчиком 07.05.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 07.06.2014.

На дату подписания соглашения от 11.07.2014 задолженность общества ФСК «Западный луч»  составила 762 192 руб. 95 коп., что подтверждено актом сверки за период с 02.04.2014 по 11.07.2014, подписанным обществом «Комфорт» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 08.06.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 11.14 договора  от 20.10.2013 № ЖД2-330/339.10.13 начислило пени в сумме 151 088 руб. 87 коп.

Между обществом «Комфорт», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч» заключено соглашение от 19.08.2015 о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда от 23.07.2014 № ЖД2-373.03.14, в силу которого общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по указанному договору подряда.

В соответствии с договором подряда  от 23.07.2014 № ЖД2-373.03.14, подрядчик (общество «Комфорт») обязался выполнить работы по устранению дефектов после затопления помещений на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик  обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 7241 руб. 66 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 05.08.2014 и подписан заказчиком 29.08.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 29.09.2014.

На дату подписания соглашения от 19.08.2015 задолженность общества ФСК «Западный луч»  составила 7119 руб. 41 коп., что подтверждено актом сверки за период с 23.07.2014 по 19.08.2015, подписанным обществом «Комфорт» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 30.09.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 11.14 договора  от 23.07.2014 № ЖД2-373.03.14 начислило пени в сумме 1225 руб. 28 коп.

Между обществом «Комфорт», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч», заключено соглашение от 11.07.2014 о передаче прав и обязанностей и уступке права требования по договору подряда  от 10.04.2014 № ЖД2-379/380.03.14, в силу которого общество  «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору № ЖД2-379/380.03.14.

В соответствии с договором подряда  от 10.04.2014 № ЖД2-379/380.03.14, подрядчик (общество «Комфорт») обязался выполнить дополнительные работы по отделке помещений на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик  обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 145 796 руб. 80 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 20.04.2014 и подписан заказчиком 08.05.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 08.06.2014.

На дату подписания соглашения от 11.07.2014 задолженность общества ФСК «Западный луч»  составила 145 392 руб. 18 коп., что подтверждено актом сверки за период с 01.01.2014 по 11.07.2014, подписанным обществом «Комфорт» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 09.06.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 11.14 договора от 10.04.2014  № ЖД2-379/380.03.14 начислило пени в сумме 28 787 руб. 65 коп.

Между обществом «Фагот» (цедент) и обществом «Геотранс» (цессионарий) заключен договор уступки права требования от 25.09.2014 № 1, в соответствии с которым цедент передал права требования по договору подряда  от 13.05.2013 № ЖД2-242-13-05/13 с дополнительным соглашением № 2 от 15.10.2013 на сумму 44 934 руб. 20 коп. Пунктом 2 договора от 25.09.2014 № 1 предусмотрена передача прав цедента в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода данного права.

В соответствии с договором подряда  от 13.05.2013 № ЖД2-242-13-05/13, общество «Фагот» (подрядчик) обязалось выполнить работы по устройству перегородок на объекте общества ФСК «Западный луч»  (заказчик) - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору (с учетом дополнительного соглашения от 15.10.2013 № 2) составляет 225 273 руб. 60 коп. (п. 2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний объем работ, в течение 30 дней с момента подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п. 2.2.3 договора (п. 2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 15 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиков все исполнительной документации (п. 2.2.3 договора). Пунктом 5.5 указанного договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Последний акт о приемке выполненных работ предоставлен обществом  «Фагот» 07.11.2013 и подписан заказчиком 21.11.2013, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 05.12.2013.

Сумма задолженности на момент заключения договора от 25.09.2014 составила 44 934 руб. 20 коп., что подтверждено актом сверки за период с 13.05.2013 по 25.09.2014, подписанным обществом «Фагот» и обществом ФСК «Западный луч».

Уведомлением, полученным обществом ФСК «Западный луч»  08.10.2014 общество «Фагот» сообщило должнику о состоявшейся цессии.

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 06.12.2013 по 19.10.2016 в соответствии с п. 5.5 договора  от 13.05.2013 № ЖД2-242-13-05/13 начислило пени в сумме 10 801 руб. 99 коп.

Между обществом «Фагот», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч»  заключено соглашение от 19.08.2015 о передаче прав и обязанностей по договору подряда от 23.07.2014 № ЖД2-384.03.14, в соответствии с которым общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору № ЖД2-384.03.14.

В соответствии с договором подряда  от 23.07.2014 № ЖД2-384.03.14, подрядчик (общество «Фагот») обязался выполнить дополнительные работы по устранению дефектов после затопления помещений на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 56 342 руб. 64 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 01.08.2014 и подписан заказчиком 02.09.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 03.10.2014.

На дату подписания Соглашения от 19.08.2015 задолженность общества ФСК «Западный луч»  составила 56 342 руб. 64 коп., что подтверждено актом сверки за период с 23.07.2014 по 19.08.2015, подписанным обществом «Фагот» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 04.10.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 11.14 договора № ЖД2-384.03.14 от 23.07.2014 начислило пени в сумме 9645 руб. 15 коп.

Между обществом «Эталон», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч», заключено соглашение от 05.03.2015 о передаче прав и обязанностей по дополнительному соглашению  от 29.10.2013 № 1 к договору подряда  от 01.05.13 № ЖД2-215-01.05/13, в соответствии с которым общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по указанному дополнительному соглашению.

В соответствии с договором подряда  от 01.05.2013 № ЖД2-215-01.05/13, общество «Эталон» (подрядчик) обязалось выполнить работы по устройству черновых полов на объекте общества ФСК «Западный луч»  (заказчик) - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за объем работ, фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний, в течение 30 дней с момента подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п. 2.2.3 договора (п. 2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиком всей исполнительной документации (п. 2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Дополнительным соглашением  от 29.10.2013 № 1 к указанному договору стороны согласовали выполнение дополнительных работ на сумму 144 290 руб. 40 коп. (п. 3), а также установили, что окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 30 дней с момента подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 (п. 5.2.2).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 24.12.2013 и подписан заказчиком 16.01.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 16.02.2014.

На дату подписания соглашения 05.03.2015 задолженность общества ФСК «Западный луч»  составила 33 452 руб. 31 коп., что подтверждено актом сверки за период с 01.05.2013 по 05.03.2015, подписанным обществом «Эталон» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 17.02.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 5.5 договора  от 01.05.2013 № ЖД2-215-01.05/13 начислило пени в сумме 7482 руб. 17 коп.

Между обществом «Эталон», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч» заключено соглашение от 05.03.2015 о передаче прав и обязанностей по договору подряда от 22.08.2014 № ЖД2-388.04.14, в силу которого общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по договору от 22.08.14 № ЖД2-388.04.14.

В соответствии с договором подряда от 22.08.2014 № ЖД2-388.04.14, подрядчик обязался выполнить работы на объекте заказчика - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик (общество ФСК «Западный луч») обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 01.09.2014 и подписан заказчиком 30.09.2014, в связи с чем, срок оплаты выполненных работ наступил 30.10.2014.

На дату подписания соглашения от 05.03.2015 задолженность общества ФСК «Западный луч» составила 30 991 руб. 52 коп., что подтверждается актом сверки за период с 22.08.2014 по 05.03.2015, подписанным обществом «Эталон» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 31.10.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 11.14 договора от 22.08.14 № ЖД2-388.04.14 начислило пени в сумме 5113 руб. 60 коп.

Между обществом «Эталон», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч» заключено соглашение от 05.03.2015 о передаче прав и обязанностей по договору подряда от 05.02.2014 № ЖД2-366.01.14, в соответствии с которым общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по указанному договору.

В соответствии с договором подряда от 05.02.2014 № ЖД2-366.01.14, подрядчик (общество «Эталон») обязался выполнить работы по устройству гидроизоляции полов на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик  обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 05.05.2014 и подписан заказчиком 06.06.2014, в связи с чем срок оплаты наступил 06.07.2014.

На дату подписания соглашения от 05.03.2015 задолженность общества ФСК «Западный луч»  составила 86 090 руб.76 коп., что подтверждено актом сверки за период с 05.02.2014 по 05.03.2015, подписанным обществом «Эталон» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 07.07.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 11.14 договора  от 05.02.14 №  ЖД2-366.01.14 начислило пени в сумме 16 493 руб. 55 коп.

Между обществом «Эталон», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч» заключено соглашение от 05.03.2015 о передаче прав и обязанностей по договору подряда  от 11.02.2013 № ЖД2-11-02/13, с учетом дополнительного соглашения  от 29.10.2013 № 2, в силу которого общество «Геотранс» принимает на себя все права и обязанности подрядчика по указанному договору.

В соответствии с договором подряда  от 11.02.2013 № ЖД2-11-02/13 (с учетом дополнительного соглашения  от 29.10.2013 № 2), общество «Эталон» (подрядчик) обязалось выполнить работы по устройству облицовки на объекте общества ФСК «Западный луч»  (заказчик) - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 160, а заказчик обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ по договору составляет 335 274 руб. 58 коп. (п. 2.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый по акту выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ без замечаний объем работ, в течение 30 дней с момента подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3, с удержанием 5% от суммы, подлежащей оплате, которая будет выплачена подрядчику при окончательном расчете согласно п. 2.2.3 договора (п. 2.2.2 договора). Окончательный расчет с подрядчиком за выполненные работы заказчик производит в течение 15 дней со дня ввода объекта в эксплуатацию, подписания сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ на предусмотренный договором весь объем работ и представления подрядчиком всей исполнительной документации (п. 2.2.3 договора). Пунктом 5.5 этого договора предусмотрена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты в виде пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 24.12.2013 и подписан заказчиком 16.01.2014, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 31.01.2014.

На дату подписания соглашения от 05.03.2015 задолженность общества ФСК «Западный луч» составила 104 635 руб. 86 коп., что подтверждено актом сверки за период с 11.02.2013 по 05.03.2015, подписанным обществом «Эталон» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 01.02.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 5.5 договора от 11.02.2013 № ЖД2-11-02/13 начислило пени в сумме 23 787 руб. 21 коп.

Между обществом «Эталон», обществом «Геотранс» и обществом ФСК «Западный луч» заключено соглашение от 05.03.2015 о передаче прав и обязанностей по договору подряда  от 01.10.2013 № ЖД2-316.09/13, в силу которого общество «Геотранс» приняло на себя все права и обязанности подрядчика по указанному договору подряда.

В соответствии с договором подряда от 01.10.2013 № ЖД2-316.09/13, подрядчик (общество «Эталон») обязался выполнить работы по устройству гидроизоляции полов на объекте заказчика (общество ФСК «Западный луч») - 25-этажном жилом доме № 2 по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 158, а заказчик  обязался принять и оплатить работы (п. 1.1 договора). Общая стоимость работ – 81 834 руб.18 коп. (п. 3.1 договора). Расчет с подрядчиком производится за фактически выполненный и принятый объем работ в следующие сроки: 95% от стоимости принятых работ - в течение 20 дней с даты подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3 на данный объем работ; оставшиеся 5% на данный объем работ - при окончательном расчете по договору. Окончательный расчет по договору производится в течение 30 дней, исчисляемых от наиболее поздней даты из следующих: дата подписания сторонами акта об устранении подрядчиком всех недостатков в работе; дата передачи подрядчиком заказчику документации, которую подрядчик обязан передать заказчику по договору; дата подписания сторонами последнего акта формы КС-2 и последней справки формы КС-3 к нему (п. 5.1 договора). За нарушение сроков оплаты заказчик уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день (п. 11.14 договора).

Акт выполненных работ предоставлен подрядчиком 01.11.2013 и подписан заказчиком 02.12.2013, в связи с чем срок оплаты выполненных работ наступил 02.01.2014.

На дату подписания соглашения от 05.03.2015 задолженность общества ФСК «Западный луч»  составила 21 834 руб. 18 коп., что подтверждено актом сверки за период с 01.10.2013 по 05.03.2015, подписанным обществом «Эталон» и обществом ФСК «Западный луч».

Поскольку оплата указанной задолженности не произведена, общество «Геотранс» за период с 03.01.2014 по 19.10.2016 в соответствии с п. 11.14 договора  от 01.10.2013 № ЖД2-316.09/13 начислило пени в сумме 5108 руб. 74 коп.

Общество «Геотранс», ссылаясь на неисполнение обществом ФСК «Западный луч» обязательств по оплате выполненных работ по договорам подряда, обратилось в арбитражный суд с исковыми требованиями о взыскании задолженности и неустойки.

Общество ФСК «Западный луч», ссылаясь на нарушение обществом «Геотранс» сроков выполнения работ, а также на не предоставление исполнительной документации по договорам подряда № ЖД2-215-01.05/13, ЖД2-11-02/13, ЖД2-198-20.04/13, ЖД2-215-01.05/13, ЖД2-388.01.14, ЖД2-366.01.14, ЖД2-316.09.13, ЖД2-11-02/13, ЖД2-335.10.13, ЖД2-377.03.14, ЖД2-319.09.13, ЖД2-347.11.13/1, ЖД2-288.08.13, ЖД2-284.07.13, ЖД2-330/339.10.13, ЖД2-373.03.15, ЖД2-379/380.03.14, ЖД2-267.01.14, ЖД2-392.07.14, ЖД2-384.03.2014, обратилось в арбитражный суд со встречными исковыми требованиями о взыскании неустойки и штрафа.

Удовлетворяя первоначальные исковые требования в полном объеме, суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. 

В соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы.

На основании п. 2 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ.

В силу п. 1 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приёмке. 

В п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приёмка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нём делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 

Право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона (п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 1 ст. 384 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам, предусмотренным ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе договоры подряда и договоры цессии, принимая во внимание, что заключенность и действительность указанных договоров участвующими в деле лицами не оспариваются, установив факт выполнения подрядчиками работ в соответствии с условиями договоров, факт приемки этих работ заказчиком, а также учитывая, что оплата указанных работ обществом ФСК «Западный луч» не произведена, доказательства обратного в материалы дела не представлены (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для взыскания с общества ФСК «Западный луч» в пользу общества «Геотранс», с учетом заключенных договоров цессии, задолженности по оплате произведенных работ в сумме 5 645 009 руб.

Нарушение ответчиком обязательств по срокам оплаты выполненных работ влечет обоснованность требований общества «Геотранс» о взыскании договорной неустойки.

Согласно ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. По правовой природе неустойка является мерой имущественной ответственности.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу ст. 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Из материалов дела усматривается, что условиями договоров подряда предусмотрена договорная неустойка за нарушение заказчиком сроков оплаты выполненных работ в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы просрочки за каждый день.

Оценив представленный обществом «Геотранс» расчет неустойки и установив, что периоды просрочки по оплате заказчиком выполненных работ определены верно, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для взыскания с общества ФСК «Западный луч» договорной неустойки за несвоевременное исполнение обязательств в сумме 1 136 519 руб. 85 коп.

При исследовании обстоятельств настоящего спора судами установлено, что общество ФСК «Западный луч» заявило о снижении суммы неустойки, в связи с ее несоразмерностью допущенному нарушению обязательства.

На основании п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. 

Согласно п. 77 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление Пленума от 24.03.2016 № 7) снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пп. 1, 2 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 73 постановления Пленума от 24.03.2016 № 7, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. 

Вместе с тем в силу п. 75 постановления Пленума от 24.03.2016 № 7 при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пп. 3, 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определениях от 22.04.2004 № 154-О, от 21.12.2000 № 263-О, при применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности (неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Предоставляя суду право уменьшить размер неустойки, закон не определяет критерии, пределы ее соразмерности. Определение несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства осуществляется судом по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Из положений п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. 

На основании изложенного, учитывая принцип соразмерности гражданско-правовой ответственности последствиям нарушения обязательства, установив, что предъявленная обществом «Геотранс» ко взысканию неустойка соразмерна последствиям допущенных обществом ФСК «Западный луч» нарушений обязательств по оплате выполненных подрядных работ, с учетом периода просрочки оплаты, при этом учитывая, что иные доказательства несоразмерности заявленной истцом неустойки, а также направленности исковых требований на получение кредитором необоснованной выгоды, общество ФСК «Западный луч» в материалы дела не представило (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суды первой и апелляционной инстанций сделали верный вывод об отсутствии оснований для снижения размера неустойки.

Кроме того, судом апелляционной инстанции правомерно отмечено, что приобретение обществом «Геотранс» прав и обязанностей подрядчиков по договорам подряда за стоимость ниже стоимости выполненных работ (с дисконтом), не является обстоятельством, свидетельствующим о несоразмерности заявленной ко взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства, при отсутствии иных доказательств несоразмерности начисленной неустойки.

При рассмотрении встречных исковых требований общества ФСК «Западный луч» о взыскании неустойки судами установлено, что условиями договоров подряда предусмотрена ответственность подрядчиков за нарушение сроков выполнения работ по договорам в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств, при этом договорами установлены сроки окончания работ: №ЖД2-206-30- 04/13 – 30.05.2013 (фактически работы выполнены 07.05.2014); №ЖД2-233-17- 05/13 – 30.06.2013 (фактически работы выполнены 07.05.2014); №ЖД2-236-22- 05/13 – 10.07.2013 (фактически работы выполнены 27.11.2013); №ЖД2- 267.01.14 – 15.02.2014 (фактически работы выполнены 13.03.2014); №ЖД2- 384.03.14 – 05.08.2014 (фактически работы выполнены 02.09.2014); №ЖД2-242- 13-05/13 – 10.06.2013 (фактически работы выполнены 21.11.2013); №ЖД2-215- 01.15/13 – 25.05.2013 (фактически работы выполнены 16.01.2014); №ЖД2- 388.01.14 – 01.09.2014 (фактически работы выполнены 30.09.2014); №ЖД2- 366.01.14 – 15.02.2014 (фактически работы выполнены 06.06.2014); №ЖД2- 316.09.13 – 21.10.2013 (фактически работы выполнены 02.12.2013); №ЖД2-181- 22-03/13 – 30.04.2013 (фактически работы выполнены 02.08.2013); №ЖД2-182- 01-05/13 – 10.07.2013 (фактически работы выполнены 02.06.2014); №ЖД2- 335.10.13 – 15.01.2013 (фактически работы выполнены 03.06.2014); №ЖД2- 377.03.14 – 18.03.2014 (фактически работы выполнены 08.05.2014); №ЖД2-15- 10/12 – 31.03.2012 (фактически работы выполнены 13.03.2014); №ЖД2- 319.09.13 – 30.11.2013 (фактически работы выполнены 05.02.2014); №ЖД2- 347.11.13/1 – 15.01.2014 (фактически работы выполнены 30.05.2014); по дополнительному соглашению № 3 к договору № ЖД2-158-04.03/13 – 05.12.2013 (фактически работы выполнены 03.06.2014); №ЖД2-288.08.03 – 15.10.2013 (фактически работы выполнены 12.03.2014); №ЖД2-284.07.13 – 15.02.2014 (фактически работы выполнены 07.05.2014); №ЖД2-330/339.10.13 – 30.11.2013 (фактически работы выполнены 07.05.2014). Даты фактического выполнения работ указаны с учетом дат подписания актов приемки выполненных работ.

Согласно п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам, предусмотренным ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив факт нарушения подрядчиками сроков выполнения работ по указанным договорам подряда на момент передачи прав и обязанностей подрядчиков обществу «Геотранс», суды первой и апелляционной инстанций сделали вывод о наличии оснований для взыскания с общества «Геотранс» договорной неустойки. 

С учетом изложенного, оценив представленный обществом ФСК «Западный луч» расчет договорной неустойки за нарушение сроков выполнения работ и установив, что сумма неустойки рассчитана в соответствии с условиями договоров подряда, исходя из общей цены договоров и без учета стоимости работ, выполненных в установленный срок, суды первой и апелляционной инстанций признали его ошибочным.

Вместе с тем, оценив представленный обществом «Геотранс» контррасчет неустойки за нарушение сроков выполнения работ и установив, что расчет произведен исходя из стоимости работ, выполненных с нарушением срока без учета стоимости объема работ по договорам подряда, выполненных в установленный срок, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно признали его верным, в связи с чем, учитывая, что доказательств несоразмерности начисленной неустойки в указанной части в материалы дела не представлено, пришли к правильному выводу о наличии оснований для взыскания с общества «Геотранс» неустойки за нарушение сроков выполнения работ в сумме 155 854 руб. 46 коп.

Кроме того, судами первой и апелляционной инстанций обоснованно принят во внимание правовой подход, изложенный в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2014 №5467/14, согласно которому начисление неустойки на общую сумму договора без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному п.1 ст.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому в такой ситуации причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом. Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции.

При таких обстоятельствах, суды первой и апелляционной инстанций правомерно взыскали в пользу общества ФСК «Западный луч» неустойку в сумме 155 854 руб. 46 коп.

Выводы судов в части отказа в удовлетворении встречных исковых требований относительно взыскания штрафа за не предоставление истцом исполнительной документации по договорам подряда не обжалуются, в связи с чем законность судебных актов в данной части судом кассационной инстанции не проверяется (ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании изложенного, осуществив зачет первоначальных и встречных исковых требований, с учетом требований ч. 5 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды первой и апелляционной инстанций правомерно взыскали с общества ФСК «Западный луч» денежные средства в сумме 6 678 814 руб. 31 коп. 

Ссылка заявителя кассационной жалобы на необоснованный отказ судов в снижении суммы неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ, отклоняется, поскольку суды первой и апелляционной инстанций, с учетом соблюдения баланса интересов сторон, а также, руководствуясь принципами добросовестности, разумности и справедливости, установив отсутствие доказательств несоразмерности заявленной истцом неустойки и направленности исковых требований на получение кредитором необоснованной выгоды, определили размер неустойки, достаточный для обеспечения восстановления нарушенных прав истца и не ущемляющий имущественные права ответчика.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции отмечает, что в силу абз. 3 п. 72 постановления Пленума от 24.03.2016 № 7 основаниями для отмены в кассационном порядке судебного акта в части, касающейся уменьшения неустойки по правилам ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации могут являться нарушение или неправильное применение норм материального права, к которым, в частности, относятся нарушение требований п. 6 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, когда сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства снижена ниже предела, установленного п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, или уменьшение неустойки в отсутствие заявления в случаях, установленных п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции не вправе снизить размер взысканной неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойки по мотиву несоответствия ее последствиям нарушения обязательства, а равно отменить или изменить решение суда первой инстанции или постановление суда апелляционной инстанции в части снижения неустойки с направлением дела на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, поскольку определение судом конкретного размера неустойки не является выводом о применении нормы права (ч. 3 ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что при расчете истцом неустойки начало просрочки исполнения обязательств по оплате работ следует исчислять с даты фактической приемки работ, отклоняется, как противоречащий материалам дела, при этом периоды просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных работ исчислены обществом «Геотранс», исходя из дат подписания актов о приемке выполненных работ.

Довод общества ФСК «Западный луч» о правомерности гарантийного удержания из стоимости работ в размере 5%, рассмотрен и обоснованно отклонен судом апелляционной инстанции.

Установив, что указанная сумма гарантийного удержания является частью оплаты работ по договорам подряда, подлежащей выплате после уплаты основной стоимости работ – при окончательном расчете, при этом учитывая, что договорами подряда установлены сроки окончательного расчета, которые поставлены в зависимость от составления актов о приемке выполненных работ, и такие акты сторонами сделок были составлены в указанные выше сроки, суды обоснованно указали, что у общества ФСК «Западный луч» возникла соответствующая обязанность по уплате стоимости работ в полном объеме без гарантийного удержания.

Доводы общества ФСК «Западный луч», изложенные в кассационной жалобе, повторяют доводы апелляционной жалобы ответчика, при этом являлись предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций и получили надлежащую правовую оценку, по существу направлены на переоценку доказательств и сделанных на их основании выводов судов, что не относится к полномочиям суда кассационной инстанции (ч. 1, 3 ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При рассмотрении спора имеющиеся в материалах дела доказательства исследованы судами по правилам, предусмотренным ст. 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, им дана надлежащая правовая оценка согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции не вправе переоценивать доказательства и устанавливать иные обстоятельства, отличающиеся от установленных судами нижестоящих инстанций, в нарушение своей компетенции, предусмотренной ст. 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.03.2013 № 13031/12, а также в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2016 № 308-ЭС16-4570, от 16.02.2017 № 307-ЭС16-8149.

Нарушений норм материального или процессуального права, влекущих отмену решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции (ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 21.10.2016 по делу № А76-1822/2016 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу закрытого акционерного общества финансово-строительная компания «Западный луч»  – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Председательствующий						Н.Г. Беляева

Судьи						С.Э. Рябова

                                             					С.В. Лазарев