АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

18 марта 2025 года

Дело № А33-15733/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 04.03.2025. В полном объёме решение изготовлено 18.03.2025.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Медведевой О.И., рассмотрев в судебном заседании, посредством онлайн-заседания,

дело по иску акционерного общества «Национальная башенная компания»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), Московская обл. г. Красногорск,

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск,

об обзании осуществить действия,

при участии в судебном заседании:

от истца: до перерыва - ФИО1, представителя по доверенности от 01.01.2025 № Дов-370,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Корниенко Д.В.,

установил:

акционерное общество «Национальная башенная компания (далее – АО «НБК»; истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь»; ответчик) об обязании не позднее 5 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя в отношении следующих объектов:

- в соответствии с техническими условиями № 8000515194 и договором № 20.2400.8207.22, - объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Азовская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100191:745;

- в соответствии с техническими условиями № 8000559350 и договором № 20.2400.5897.23, - объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, в границах з/у с кадастровым номером 24:50:0100219:6, расположенный по адресу пер. Телевизорный, 3;

- в соответствии с техническими условиями № 8000567727 и договором № 20.2400.7939.23, - объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Рыбинский муниципальный округ, городское поселение, 

<

...> м юго-восточнее дома по улице Репина 14, в пределах кадастрового квартала 24:48:0108009;

- в соответствии с техническими условиями № 8000573474 и договором № 20.2400.9348.23, - объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: 

<

...> в 6 метрах от земельного участка с кадастровым номером 24:57:0000005:3124, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

<

...>, кадастровый номер квартала 24:57:0000005;

- в соответствии с техническими условиями № 8000554194 и договором № 20.2400.4585.23, - объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Красноярский край, Курагинский район, поселок городского типа Курагино, 74 км автодороги Минусинск-Артемовск, кадастровый квартал: 24:23:4610002;

- в соответствии с техническими условиями № 8000551823 и договором № 20.2400.4028.23, - объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Ястынская, в границах кадастрового квартала 24:50:0400071;

- в соответствии с техническими условиями № 8000568765 и договором № 20.2400.8153.23, - объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: г. Красноярск, Ленинский район, ул. Львовская, 32, в границах кадастрового квартала 24:50:0500299.

Определением от 31.05.2024 исковое заявление принято к производству суда; предварительное и судебное заседания назначены на 09.07.2024.

Протокольным определением от 09.01.2025 судебное заседание отложено на 25.02.2025.

В судебное заседание 25.02.2025 представитель ответчика, извещённый надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не явился. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в его отсутствие.

Представитель  истца поддержал исковые требования в полном объеме со ссылкой на доказательства, приложенные к иску; пояснил, что документы, предложенные судом, не подготовлены; заявил ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании для уточнения исковых требований.

От ответчика какие-либо дополнительные документы, пояснения и возражения в материалы дела не поступили.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с необходимостью представления истцом дополнительных документов и пояснений по делу судом объявлен перерыв в судебном заседании до 10 час. 50 мин. 04.03.2025, о чем вынесено протокольное определение.

После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие лиц, участвующих в деле.

От истца в материалы дела поступило заявление об уточнении исковых требований с учетом осуществления технологического присоединения по двум объектам (с приложением подтверждающих документов); просит обязать ответчика в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца в отношении следующих объектов:

- в соответствии с техническими условиями № 8000515194 и договором № 20.2400.8207.22, - объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Азовская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100191:745;

- в соответствии с техническими условиями № 8000559350 и договором № 20.2400.5897.23, - объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, в границах з/у с кадастровым номером 24:50:0100219:6, расположенный по адресу пер. Телевизорный, 3;

- в соответствии с техническими условиями № 8000567727 и договором № 20.2400.7939.23, - объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Рыбинский муниципальный округ, городское поселение, 

<

...> м юго-восточнее дома по улице Репина 14, в пределах кадастрового квартала 24:48:0108009;

- в соответствии с техническими условиями № 8000551823 и договором № 20.2400.4028.23, - объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Ястынская, в границах кадастрового квартала 24:50:0400071;

- в соответствии с техническими условиями № 8000568765 и договором № 20.2400.8153.23, - объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: г. Красноярск, Ленинский район, ул. Львовская, 32, в границах кадастрового квартала 24:50:0500299.

На основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные документы приобщены судом к материалам дела.

От ответчика возражения против принятия данного уточнения иска,  какие-либо дополнительные документы и пояснения в материалы дела не поступили.

Судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение исковых требований истцом. Иск рассматривается с учетом произведенных изменений.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы сторон, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном порядке. При этом указанное лицо вправе использовать способы защиты гражданских прав, предусмотренные статьей 12 ГК РФ.

В соответствии со статьей  8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Из материалов дела следует, что основанием для обращения в суд послужило неисполнение ПАО «Россети Сибирь» обязательств по технологическому присоединению в рамках договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.8207.22, № 20.2400.5897.23, № 20.2400.7939.23, № 20.2400.9348.23, № 20.2400.4585.23, № 20.2400.4028.23, № 20.2400.8153.23, а именно: энергопринимающих устройств объектов «Базовая станция/оборудование сотовой связи» по адресам:

- Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Азовская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100191:745;

- Красноярский край, г. Красноярск, в границах з/у с кадастровым номером 24:50:0100219:6, расположенный по адресу пер. Телевизорный, 3;

- Красноярский край, Рыбинский муниципальный округ, городское поселение, 

<

...> м юго-восточнее дома по улице Репина 14, в пределах кадастрового квартала 24:48:0108009;

- 

<

...> в 6 метрах от земельного участка с кадастровым номером 24:57:0000005:3124, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенный за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

<

...>, кадастровый номер квартала 24:57:0000005;

- Красноярский край, Курагинский район, поселок городского типа Курагино, 74 км автодороги Минусинск-Артемовск, кадастровый квартал: 24:23:4610002;

- Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Ястынская, в границах кадастрового квартала 24:50:0400071;

- Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Львовская, 32, в границах кадастрового квартала 24:50:0500299.

Следовательно, отношения сторон регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроснабжении», а также Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила № 861).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003  «Об электроснабжении» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил № 861, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу пункта 4 Правил № 861 любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом (пункт 6 Правил № 861).

Пунктом 7 Правил № 861 предусмотрена процедура технологического присоединения, включающая в себя подачу заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; фактический прием (подача) напряжения и мощности; составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил № 861 договор должен содержать следующие существенные условия:

- срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В пункте 14 Правил № 861 содержатся требования к оформлению заявки на технологическое присоединение, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В соответствии с пунктом 15 Правил № 861 в адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13, 14 Правил, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, а также уведомляет о возможности временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VII настоящих Правил.

Из материалов дела следует, что между АО «НБК» (заявитель) и ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №/№ 20.2400.8207.22, 20.2400.5897.23, 20.2400.7939.23, 20.2400.9348.23, 20.2400.4585.23, 20.2400.4028.23, 20.2400.8153.23, согласно которым сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договоров (пункт 2 договоров).

В силу пункта 5 договоров технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Пунктом 6 договоров предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

В силу пункта 24 договоров они считаются заключенными со дня оплаты заявителем счета.

Согласно пункту 11 договора № 20.2400.8207.22 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.12.2021г № 99-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 04.02.2022г № 5-э, от 25.02.2022г № 9-э, от 10.06.2022 № 23-э, и составляет 22 388,38 руб., в том числе НДС 20% - 3 731,40 руб.

Согласно пункту 11 договора № 20.2400.5897.23 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022 №82-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 02.12.2022г № 113-э, от 12.01.2023г № 2-э, от 09.02.2023г № 4-э, от 04.05.2023г № 10-э, от 01.06.2023г № 12-э, и составляет 551 446,33 руб., в том числе НДС 20% - 91 907,72 руб.

Согласно пункту 11 договора № 20.2400.7939.23 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022 №82-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 02.12.2022г № 113-э, от 12.01.2023г № 2-э, от 09.02.2023г № 4-э, от 04.05.2023г № 10-э, от 01.06.2023г № 12-э, и составляет 190 853,28 руб., в том числе НДС 20% - 31 808,88 руб.

Согласно пункту 11 договора № 20.2400.9348.23 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022 №82-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 02.12.2022г № 113-э, от 12.01.2023г № 2-э, от 09.02.2023г № 4-э, от 04.05.2023г № 10-э, от 01.06.2023г № 12-э, от 05.09.2023г № 30-э, от 26.09.2023г № 43-э, и составляет 547 342,95 руб., в том числе НДС 20% - 91 223,82 руб.

Согласно пункту 11 договора № 20.2400.4585.23 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022 №82-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 02.12.2022г № 113-э, от 12.01.2023г № 2-э, от 09.02.2023г № 4-э, от 04.05.2023г № 10-э, и составляет 313178,16 руб., в том числе НДС 20% - 52 196,36 руб.

Согласно пункту 11 договора № 20.2400.4028.23 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022 №82-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 02.12.2022г № 113-э, и составляет 40568,41 руб., в том числе НДС 20% - 6 761,40 руб.

Согласно пункту 11 договора № 20.2400.8153.23 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022 №82-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 02.12.2022г № 113-э, от 12.01.2023г № 2-э, от 09.02.2023г № 4-э, от 04.05.2023г № 10-э, от 01.06.2023г № 12-э, и составляет 286 414,65 руб., в том числе НДС 20% - 47 735,77 руб.

Истцом произведена оплата за технологическое присоединение.

В соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям (Приложение № 1 к договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №/№ 20.2400.8207.22, 20.2400.5897.23, 20.2400.7939.23, 20.2400.9348.23, 20.2400.4585.23, 20.2400.4028.23, 20.2400.8153.23,), подписанными сторонами:

1) сетевая организация осуществляет:

- подготовку технических условий на технологическое присоединение;

- обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

- выполнение проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 0,4 кВ;

- выполнение монтажа комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442);

2)  в обязанности заявителя входит:

- ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП;

- фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности);

- разработка проектной документации в границах земельного участка заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;

- при разработке проектной документации согласно п. 11.1 ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством;

- после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

В ходе судебного разбирательства истец осуществил технологическое присоединение по двум объектам:

- 04.09.2024 - к электрическим сетям подключен объект по адресу: 

<

...> в 6 метрах от земельного участка с кадастровым номером 24:57:0000005:3124, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка согласно техническим условиям

№ 8000573474;

- 15.08.2024 - к электрическим сетям подключен объект по адресу: Красноярский край, Курагинский район, поселок городского типа Курагино, 74 км автодороги Минусинск-Артемовск, кадастровый квартал: 24:23:4610002 согласно техническим условиям № 8000554194.

Поскольку после обращения в суд ответчиком добровольно выполнены обязательства в части подключения объектов заявителя согласно техническим условиям №/№ 8000573474, 8000554194, истцом уточнены исковые требования; данные объекты исключены из числа мероприятий по технологическому присоединению.

Вместе с тем, мероприятия, предусмотренные техническими условиями №/№ 8000515194, 8000559350, 8000567727, 8000551823, 8000568765 для сетевой организации, ПАО «Россети Сибирь» не выполнены, что подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком.

Таким образом, материалами дела, пояснениями сторон подтверждается факт невыполнения ответчиком в установленный срок мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №/№ 20.2400.8207.22, 20.2400.5897.23, 20.2400.7939.23, 20.2400.4028.23, 20.2400.8153.23, что нарушает права истца, как стороны, не получившей исполнение по данным договорам.

При этом ПАО «Россети Сибирь» не представлены доказательства, подтверждающие принятие необходимых и достаточных мер по соблюдению законодательства, либо свидетельствующие о наличии препятствий по исполнению договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №№ 20.2400.8207.22, 20.2400.5897.23, 20.2400.7939.23, 20.2400.4028.23, 20.2400.8153.23 и Правил № 861.

Необходимость выполнения требуемых мероприятий, их сроки и стоимость должны учитываться ПАО «Россети Сибирь» при осуществлении своей деятельности как профессиональным участником рынка оказания услуг по осуществлению технологического присоединения.

При таких обстоятельствах обоснованным являются требования истца об обязании ответчика в качестве сетевой организации исполнить обязательства по договорам об осуществлении технологического присоединения №№ 20.2400.8207.22, 20.2400.5897.23, 20.2400.7939.23, 20.2400.4028.23, 20.2400.8153.23 в соответствии с техническими условиями №№ 8000515194, 8000559350, 8000567727, 8000551823, 8000568765.

При этом суд считает разумным установление срока для выполнения указанных мероприятий с целью исполнения принятых обязательств ответчиком в течение одного месяца с момента вступления в силу решения суда, что обеспечивает исполнимость настоящего судебного акта с учетом характера мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных техническими условиями к договору.

Ответчик ссылается на то, что у него отсутствуют возможности исполнить решение в установленный 30-тидневный срок: сложное финансовое положение; несоразмерная стоимость работ цене по договору; удорожание материалов и отсутствие обеспечения инвестиционных программ; необходимость строительства объектов.

Вместе с тем, данный довод не принимается судом, поскольку ответчиком в материалы дела не представлены доказательства наличия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующие исполнению спорных обязательств. В силу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации к числу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств не относятся нарушение обязанностей контрагентами должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Ссылка ответчика на наличие у него обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору технологического присоединения, а также оснований для установления иного срока исполнения решения, носят голословный характер, поскольку не подтверждены документально сведениями, свидетельствующими о наличии каких-либо объективных препятствий для исполнения условий договора.

Более того, указанные ответчиком обстоятельства представляют собой нормальный риск хозяйственной деятельности, и не могут служить основанием для освобождения от исполнения обязательства и ответственности лица, которое сознательно избрало для себя предпринимательскую деятельность. Заключая возмездный договор, порядок исполнения которого предусмотрен императивными нормами права, в качестве профессионального участника рынка, ответчик принял на себя все риски его исполнения, исходя из статуса сторон по договору, а также с учетом того, что такие риски в силу пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации являются неотъемлемо частью коммерческой деятельности сетевой организации.

Исходя из материалов дела, ответчик является сетевой организацией, т.е. специализированной организацией в области электроснабжения, длительное время оказывающей услуги по технологическому присоединению, по передаче электроэнергии, оперативно-техническому управлению. Так, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица с 04.07.2005, основными видом его деятельности являются передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям.

Учитывая указанную специфику, осведомленность о процедуре технологического присоединения, а также о наличии связанных с нею вопросов (привлечение подрядных организаций, проведение торгов, согласование с надзорными органами и т.д.), ответчик мог и должен был предусмотреть риск возникновения проблем при исполнении договоров; с учетом этого выстроить свою модель поведения при исполнении обязательств.

При таких обстоятельствах требование истца об обязании ответчика осуществить фактическое присоединение к электрическим сетям спорных объекта (с учетом уточнения исковых требований) в течение одного месяца является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В то же время ответчик просит увеличить срок исполнения мероприятий до 6 месяцев.

При этом доказательства исполнения своих обязательств по договорам ответчиком в материалы дела не представлены, а с учетом длительности неисполнения им обязательств по договорам, суд считает обоснованным требование истца в части срока выполнения мероприятий - в течение одного месяца после вступления в законную силу решения суда (с учетом уточнения исковых требований).

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации  судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В связи с удовлетворением исковых требований (5 неимущественных требований), добровольного выполнения мероприятий по 2-м неимущественным требованиям после обращения истца в суд (23.05.2024) на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины в сумме 42 000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств акционерного общества «Национальная башенная компания»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в отношении следующих объектов:

- в соответствии с техническими условиями № 8000515194 и договором № 20.2400.8207.22, объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Азовская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100191:745;

- в соответствии с техническими условиями № 8000559350 и договором № 20.2400.5897.23, объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, в границах з/у с кадастровым номером 24:50:0100219:6, расположенного по адресу пер. Телевизорный, 3;

- в соответствии с техническими условиями № 8000567727 и договором № 20.2400.7939.23, объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Рыбинский муниципальный округ, городское поселение, 

<

...> м юго-восточнее дома по улице Репина 14, в пределах кадастрового квартала 24:48:0108009;

- в соответствии с техническими условиями № 8000551823 и договором № 20.2400.4028.23, объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Ястынская, в границах кадастрового квартала 24:50:0400071;

- в соответствии с техническими условиями № 8000568765 и договором № 20.2400.8153.23, объект «Базовая станция/оборудование сотовой связи», расположенный по адресу: г. Красноярск, Ленинский район, ул. Львовская, 32, в границах кадастрового квартала 24:50:0500299.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Национальная башенная компания»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 42 000 руб.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.И. Медведева