63/2020-92286(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-8879/2020

город Вологда

21 сентября 2020 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

внести в договор на выполнение строительно-монтажных работ на  объекте «Замена участка канализационного коллектора d=600мм по ул. Гоголя  в районе перекрестка с ул. Комсомольской» от 27.04.2020 № 32009056158/5- ЭК-2020 изменение, изложив пункт 4.1 договора в следующей редакции:  

«4.1. Сроки выполнения работ по договору: с момента заключения  договора до 08.09.2020».  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Е.В. Дегтярева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2020 5:34:41

 Кому выдана Дегтярева Елена Викторовна