РЕШЕНИЕ

Именем

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-207012/15-74-404

г. Москва

26 марта 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена 13.02.2020

Решение изготовлено в полном объеме  26.03.2020

Арбитражный суд города Москвы в составе:

 судьи Никифорова С.Л.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Астафуровой А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»

к ответчику - ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный»

третьи лица Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России), Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

о взыскании 537 664 280, 87 руб. – долга,

при участии:

- истца - не явился, извещен,

- представителей ответчика – ФИО2 (паспорт, доверенность № 2 от 10.01.2020 г.), ФИО3 (паспорт, доверенность № 4 от 09.01.2020 г.),

- представителя третьего лица – ФИО4 (паспорт, доверенность № 438/19 от 23.12.2019 г.).

УСТАНОВИЛ:

Иск  заявлен о взыскании задолженности за выполненные по Государственному контракту  №873-ИВ004/13/217 от 11.07.2013 работы (КС-3 №№ 5-13) в размере  537 664 280,87 руб. и расходов по оплате госпошлины в сумме 200 000 руб.

В настоящее судебное заседание истец, будучи извещенными о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, своих представителей не направил. Дело рассматривается в соответствии со ст.ст. 156,158 АПК РФ.

Представитель  ответчика против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в письменных отзывах.

Исследовав письменные доказательства, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле,  суд установил, что  иск не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Согласно части 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Как следует из материалов дела, 11.07.2013 между ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» (Генподрядчик), Федеральным космическим агентством (Роскосмос) (Государственный Заказчик) и Федеральным казенным учреждением «Дирекция космодрома «Восточный» (Заказчик-застройщик) был заключен Государственный контракт №873-ИВ004/13/217 на выполнение работ для федеральных государственных нужд «Космодром «Восточный». Строительство железных дорог космодрома (1-я очередь) II - этап. Амурская обл., Свободненский район, ЗАТО Углегорск».

В соответствии с контрактом Генподрядчик обязался осуществить работы, необходимые для ввода Объекта - Космодрома «Восточный», строительство железных дорог космодрома (1-я очередь) 2 этап, Амурская обл., Свободненский район, ЗАТО Углегорск, в эксплуатацию в соответствии с проектной и рабочей документацией и другими условиями контракта. Генподрядчик обязался выполнить работы в соответствии с условиями настоящего контракта на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами в срок до 30 июня 2015 года.

Согласно п. 4.4. контракта оплата выполненных генподрядчиком строительно-монтажных работ производится заказчиком ежемесячно в течение 20 банковских дней после подписания заказчиком оформленных генподрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

Акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) заполняются на основании данных о фактически выполненных в отчетном месяце работах (п. 4.5.).

Пунктом 4.10. контракта установлено, что ежемесячное подписание форм №КС-2 и №КС-3 является промежуточной приемкой выполненных работ за отчетный месяц.

Обеспечение финансирования работ в соответствии с условиями контракта является обязанностью заказчика (п. 6.2.1. гос. контракта).

В соответствии с ч. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (п. 2 ст. 720 ГК РФ).

Согласно п. 4 ст. 753 ГК сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно ч. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Как указывает истец, он за исх. №3/924 от 17.02.2015г. направил в адрес ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный»:

- счет №71 от 09.02.2015 г. на сумму 364 560,15 руб. на оплату выполненных работ по справке КС-3 №5 от 09.02.2015 г.; 

- счет №72 от 09.02.2015 г. на сумму 195 662 317,70 руб. на оплату выполненных работ по справке КС-3 №6 от 09.02.2015 г.; 

- счет №73 от 09.02.2015 г. на сумму 26 342 793,19 руб. на оплату выполненных работ по справке КС-3 №7 от 09.02.2015г.

За исх. №3/2745 от 23.04.2015 г. (получено 27.04.2015 г.) в адрес ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» были направлены:

- счет №211 от 07.04.2015 г. на сумму 10 146 824,37 руб. на оплату выполненных работ по справке КС-3 №8 от 07.04.2015 г.; 

- счет №212 от 07.04.2015 г. на сумму 50 028 758,94 руб. на оплату выполненных работ по справке КС-3 №9 от 07.04.2015г.; 

- счет №213 от 07.04.2015 г. на сумму 215 534 817,24 руб. на оплату выполненных работ по справке КС-3 №10 от 07.04.2015 г.

За исх. №3/3738 от 29.05.2015 г. (получено 05.06.2015 г.) ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» были направлены:

-  счет №319 от 20.05.2015 г. на сумму 22 292 857,12 руб. на оплату выполненных работ по справке КС-3 №11 от 20.05.2015 г.; 

- счет №320 от 20.05.2015 г. на сумму 9 127 519,49 руб. по справке КС-3 №12 от 20.05.2015 г.; 

- счет №321 от 20.05.2015 г. на сумму 8 163 832.67 руб. по справке КС-3 №13 от 20.05.2015г.

Все указанные выше справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, а также подтверждающие факт выполнения работ соответствующие акты приемки выполненных работ КС-2, подписаны ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» без каких-либо замечаний по качеству, объемам.

Вместе с тем, в нарушение условий гос. контракта, оплата за выполненные работы по спорным формам КС-2, КС-3 до настоящего времени заказчиком не произведена.

Всего по спорным формам КС-2, КС-3 №№ 5-13 ответчиком не оплачено 537 664 280,87 руб.

В связи с неоплатой денежных средств в адрес ответчика была направлена претензия №4/4752 от 09.07.2015 г., которая оставлена без удовлетворения.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, при этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Как указывает ответчик в своем отзыве, к контракту были заключены дополнительные соглашения.

Дополнительным соглашением №2 от 15.09.2014 г. сторона «Государственный заказчик» была исключена из сторон контракта, функции государственного заказчика в полном объеме его прав и обязанностей, установленных условиями контракта, переданы «Заказчику-застройщику» (ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный»), именуемому в дальнейшем «Заказчик».

Дополнительными соглашениями № 1 от 08.11.2013, № 3 от 26.12.2014, № 4 от 15.04.2015 вносились изменения в размеры величин финансирования по годам:

Изменение сумм по годам по сравнение с

суммой контракта руб.

Доп. соглашение № 1 от 08.11.2013

Доп.соглашение №3 от 26.12.2014

Доп.соглашение №4 от 15.04.2015

-

-

2012-488.917.270,00

2013-481.600.000,00

2013 -488.917.270,00

2013 -488.917.270,00

2013 -1.160.238.298,43

2014-1.403.300.000,00

2014-1.395.982.730,00

2014-1.505.242.856,00

-

2015-2.227.500.000,00

-

2015 -2.118.239.874,00

2015 -2.463.244.431,57

Определением Арбитражного суда города Москвы по делу А40-41993/2019-63-403 от 27.05.2019 было утверждено  мировое соглашение  заключенное между Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление №6» (ИНН 

<

***>) и Федеральным казенным учреждением «Дирекция космодрома «Восточный»  (ИНН 

<

***>) о расторжении Государственного контракта от 11.07.2013г. № 873-ИВ002/13/217

При этом в ходе исполнения данного госконтракта между сторонами были  подписаны Акты сверки взаимных расчетов:

- в Акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2014 сторонами подтверждено погашение стоимости выполненных работ по КС-3 №№ 1-4, в результате чего задолженность в пользу  ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный»  составила 1 055 676 184,96 руб.;

- из Акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2015 следует, что задолженность в пользу  ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» составляет 23 620 698,82 руб.

Из представленных ответчиком документов следует:

Ms

Оплата

Выполнение

Аванс (№ п/п, рублей)

Фактическая оплата (п/п, рублей)

КС-3 №№, дата

Сумма (рублей)

1

1299340 от 30.07.2013 - 481.600.000,0

2

1601694 от 03.12.2013 - 7.317.270,00

3

604206 от 30.12.2014-744.802.730,00

603927 от 30.12.2014 по КС-3 № 1 -37.031.750,15

1 от 18.12.2014

52.902.500,21

4

604210 от 30.12.2014 по КС-3 № 2 -971.219,82

2 от 25.12.2014

1.387.456,89

603926 от 30.12.2014 по КС-3 № 3 -305.649.519,82

3 от 25.12.2014

436.642.171,18

5

604212 от 30.12.2014 по КС-3 №4-71.783.078,64

4 от 25.12.2014

102.547.255,19

Всего по КС-3 №№ 1 - 4

593.479.383,47

6

188042 от 31.12.2015-936.286.900,00

5 от 09.02.2015

520.800,22

бот 09.02.2015

279.517.596,72

7 от 09.02.2015

37.632.561,70

8 от 07.04.2015

14.495.463,38

9 от 07.04.2015

71.469.655,63

10 от 07.04.2015

307.906.881,77

11 от 20.05.2015

148.619.047,51

12 от 20.05.2015

60.850.129,95

13 от 20.05.2015

54.425.551,16

327593 от 19.12.2016 по КС-3 №5-31 -201.807.679,16

ВСЕГО по КС-3 №№ 5-13

975.437.688,04

ВСЕГО по КС-3 №№ 1-13

1 .568.917. 071,51

ИТОГО: 2.170.006.900,00

ИТОГО: 617.243.247,59

Таким образом, сумма авансовых платежей и фактической оплаты по КС-3 №№ 1-31 составляет 2.787.250.147,59 руб. (2.170.006.900,00 + 617.243.247,59), а стоимость выполненных работ – 1.568.917.071,51 руб.

С учетом изложенного суд считает, что работы по Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с № 5 по № 13, о взыскании стоимости  которых заявлено истцом, являются оплаченными, а поэтому оснований для  удовлетворения иска не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 10, 309, 310, 330, 702, 708, 763 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 65, 123, 156, 167, 170, 171, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия.

Судья                                                                          С.Л. Никифоров