РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-83218/19-110-733

26 сентября 2019 года

город Москва

Резолютивная часть решения объявлена 11 сентября 2019 года 

Решение в полном объеме изготовлено 26 сентября 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "АСВ СТРОЙ" (129336 Москва город улица Джамгаровская 5 , ОГРН: 

<

***>)  к акционерному обществу "СТРОЙКОМ" (143421, Московская область, район Красногорский, автодорога Балтия, территория 26 км бизнес-центр Рига-Ленд, строение а, помещение 23,2 этаж, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 7 718 708,9 руб.,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов.  от  09.01.2019, ФИО3 по дов.  от  09.01.2019,

от ответчика- ФИО4 по дов.  от  01.04.2019 №01/04, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "АСВ СТРОЙ" обратилось с иском к акционерному обществу "СТРОЙКОМ" о взыскании (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) 5 688 585,86 руб. задолженности по Договору поставки №1 от 15.12.2017, 2 267 721,53 руб. неустойки, неустойки на сумму 5 688 585,86 руб. исходя из  0,1% за каждый день просрочки, за период с  11.09.2019  по день фактической оплаты.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства с целью подачи встречного иска.

Суд, руководствуясь ст. ст. 156, 158 АПК РФ, не находит оснований для удовлетворения  ходатайства, как необоснованного и не соответствующего ст. ст. 156, 158 АПК РФ. При этом суд учитывает, что исковое заявление поступило в суд 02.04.2019, у Ответчика имелось достаточно времени для подготовки  и предъявления встречных исковых требований.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между ООО «АСВ Строй» (Поставщик) и АО «СтройКом» (Покупатель) был заключен договор поставки от 15.12.2017г. №1 (далее – Договор) на поставку балок пролетного строения на Объект: «Путепровод транспортной развязки на пересечении с Новоуглическим шоссе».

Согласно п. 1.1. Договора Поставщик обязуется изготавливать и поставлять ж.б. продукцию (Товар), а Покупатель принимать и оплачивать. 

В соответствии с п. 1.2. Договора: количество, цена и сроки поставки Товара определены спецификацией (приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Срок поставки балок перенесен с апреля 2018г на август 2018г дополнительным соглашением к договору от 02.07.2018г.

Срок действия договора с 15.12.2017г  по 31.12.2018г., а в части взаимных расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств (п. 8.1, 8.2 Договора).

Из пунктов 2.5 и 2.6 Договора, а также положений спецификации следует, что отгрузка Товара производится после 100%- ой оплаты Покупателем.

Оплата товара производится Покупателем в соответствии с п.2.6 Договора, п.5 Спецификации от 02.07.2018г. №1 к дополнительному соглашению к договору поставки от 02.07.2018г, а именно: в течение 2 рабочих дней с момента подписания комиссией Акта приемки балок.

Комиссионная приемка балок состоялась 28.07.2018г. и 30.08.2018г. в соответствии с Актами комиссионного освидетельствования балок.

Таким образом, крайняя дата исполнения обязательства по оплате за Товар – 03.09.2018г.

Поставщиком договорные обязательства были исполнены в полном объеме, весь Товар согласно Спецификации и товарно-транспортным накладным поставлен Покупателю, в сроки согласно Договору и письмам Покупателя о сроках поставки от 27.07.2018г. №234, от 24.08.2018г. №71,  всего на общую сумму 36 686 300 рублей, в т.ч. НДС-18%, что подтверждается товарно-транспортными накладными.

Покупателем была произведена оплата по Договору в сумме 30 997 714,14 рублей (платежные поручения прилагаются), т.е. договорные обязательства Покупателем по оплате не исполнены. За Покупателем числится основной долг  в размере 5 688 585,86 рублей.

Данный договор был заключен в рамках исполнения государственного контракта: Строительство объекта капитального строительства «Проектируемая улица № 1 «Большое кольцо» («Западный объезд г. Сергиев Посад») (1,2,3 этап)». «Строительство Проектируемой улицы №1 «Большое кольцо» («Западный объезд г. Сергиев Посад») (3 этап)» от 17.07.2017г № Ф.2017.286425, № Контракта на сайте закупок 2502415352717000030.

Согласно информации, находящейся в открытом доступе, а именно на официальном сайте госзакупок, заказчик работ по настоящему госконтракту - ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС", подрядчик - АО "СИБАГРОПРОМСТРОЙ". Субподрядчиком по данному госконтракту является Ответчик по данному судебному спору - АО «СтройКом».

Согласно спецификации №1 к Договору поставки и накладным, ООО «АСВ Строй» отгрузило АО «СтройКом» 50 балок, а именно: Б 1500.140.123-Н№54314-М (A3) - 10 шт; Б 1800.140.123-К №54192-М -10шт; Б 2400.140.123-К №54168-М (A3) - 10 шт; Б2400.140.123-Н№54166-М - 10 шт; Б 3300.140.153-Н №54172-М (A3) - 10 шт; Всего: 50 балок.

Согласно п. 4 Спецификации Объект поставки: «Путепровод транспортной развязки на пересечении с Новоугличским шоссе».

Все указанные и поставленные ООО «АСВ Строй» 50 балок были предусмотрены «Ведомостью объемов и стоимости работ» (приложение №1) к вышеназванному государственному контракту от 07.07.2017г. на Путепроводе транспортной развязки на пересечении с Новоугличским шоссе (строки Ведомости: 2200, 2207, 2214, 2218, 2221, 2225).

Согласно актам о приемке выполненных работ Заказчиком по государственному контракту еще в 2018году были приняты балки и работы по монтажу всех пятидесяти поставленных ООО «АСВ Строй» балок пролетных строений, что подтверждается следующими документами: КС-2 от 16.05.2018г №6 раздел ОС №02-06 «Путепровод транспортной развязки на пересечении с Новоугличским шоссе», ЛС №02-06-03, строки 2102 и 2109: Б 1800.140.123-К №54192-М -10 шт   и Б 2400.140.123-Н №54166-М - 10 шт; КС-2 от 31.08.2018г №10 раздел ОС №02-06 «Путепровод транспортной развязки на пересечении с Новоугличским шоссе», ЛС №02-06-03, строка 2095: Б 1500.140.123-Н №54314-М (A3) - 10 шт; КС-2 от 24.10.2018г №13 раздел ОС №02-06 «Путепровод транспортной развязки на пересечении с Новоугличским шоссе», ЛС №02-06-03, строки: 80 и 83: Б2400.140.123-К№54168-М (АЗ)-10 шт   и Б3300.140.153-Н №54172-М (АЗ)-10 шт.

Таким образом, согласно документации, размещенной на сайте госзакупок по указанному государственному контракту от 17.07.2017г, работы по монтажу балок пролетных строений, поставленных ООО «АСВ Строй» выполнены с надлежащим качеством и приняты Заказчиком. Указанные акты о приемке работ заверены подписями, печатями Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль.

В соответствие со ст. 309 ГК РФ, обязательство должно исполняться надлежащим образом. Согласно ст. 310 ГК РФ. односторонний отказ от исполнения обязательства не допускаются.

При указанных обстоятельствах иск   в этой части  подлежит удовлетворению.

При  этом суд считает доводы ответчика несостоятельными,  поскольку они противоречат представленным доказательствам и не подтверждены документально.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В случае, если  Покупатель не исполняет обязательство по оплате Товара в установленный срок, Поставщик  вправе потребовать уплаты  неустойки в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки (п. 9 Спецификации от 02.07.2018г №1).

Таким образом, с Ответчика в пользу Истца подлежит уплате неустойка за период с 03.09.2018 по 10.09.2019 в размере 2 267 721,53 руб.

Кроме того, с ответчика подлежит взысканию неустойка на сумму 5 688 585 руб. 86  коп. ,  исходя из  0,1% за каждый день просрочки, за период с  11.09.2019  по день фактической оплаты.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства об отложении судебного разбирательства  отказать. 

Взыскать с  акционерного общества "СТРОЙКОМ"  в пользу общества с ограниченной ответственностью "АСВ СТРОЙ" 5 688 585 руб. 86  коп.  задолженности,  2 267 721 руб.  53  коп. неустойки, неустойку на сумму 5 688 585 руб. 86  коп. ,  исходя из  0,1% за каждый день просрочки, за период с  11.09.2019  по день фактической оплаты, 61 594 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Взыскать с  акционерного общества "СТРОЙКОМ"  в федеральный бюджет госпошлину в размере 1 188 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В. Мищенко