АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

01.04.2021Дело № А62-589/2021

Резолютивная часть решения оглашена 25.03.2021

Мотивированный текст решения изготовлен 01.04.2021

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Регион-эксплуатация» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

об обязании безвозмездно устранить недостатки по муниципальному контракту № 044 от 25.06.2019

при участии:

от истца: ФИО2, представитель (доверенность, копия диплома); 

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом;

У С Т А Н О В И Л :

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Регион-эксплуатация» о безвозмездном устранении недостатков по муниципальному контракту № 044 от 25.06.2019, а именно заменить узел коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в здании, расположенном по адресу: 

<

...>.

Как следует из материалов дела, по итогам проведенного электронного аукциона между Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (Заказчик) и ООО «Регион - эксплуатация» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 044 от 25.06.2019.

Общество с ограниченной ответственностью «Регион-эксплуатация» приняло на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту согласно проекту «Узел тепловой энергии и теплоносителя» в здании по адресу: 

<

...>.

Дата начала работ определяется датой подписания контракта, т. е. 25.06.2019, дата окончания работ – 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания контракта (пункты 3.2, 3.3 контракта).

В соответствии с пунктом 8.1 контракта гарантийный срок на материалы и выполненные работы должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2).

Согласно пункту 8.2 контракта если в течение гарантийного срока выявится, что работы имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям контракта, то заказчик и эксплуатирующая организация совместно с подрядчиком составляют рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Течение срока исковой давности начинается с составления рекламационного акта и вручения его подрядчику.

Пунктом 8.3 контракта стороны согласовали, что для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения эксплуатирующей организации и/или заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

Вышеперечисленные работы ответчиком были сданы в срок, установленный муниципальным контрактом.

Однако, при получении допуска узла учета тепловой энергии были выявлены существенные недостатки выполненных ответчиком работ, что подтверждается актом допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя № 12/20 от 15.10.2020.

Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в адрес ООО «Регион - эксплуатация» направлено уведомление от 19.10.2020 г. № 02-10/7101, в котором сообщалось о выявленных недостатках, а также просьба в срок до 23.10.2020 направить своего представителя для составления рекламационного акта, которое было получено ответчиком, что подтверждается уведомлением о вручении.

На составление рекламационного акта ответчик не явился и не направил своего представителя, соответственно данный акт был составлен в отсутствие ответчика, о чем была сделана соответствующая пометка. Срок устранения выявленных недостатков, согласно, рекламационного акта был установлен до 10.11.2020, но в указанный срок ответчик не исполнил взятые на себя обязательства.

В адрес ООО «Регион - эксплуатация» 20.11.2021 направлена претензия о безвозмездном устранении выявленных недостатков, которая получена ответчиком, что подтверждается уведомлением о вручении, но обязательство по устранению выявленных недостатков по муниципальному контракту не исполнены, что явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчиком  отзыв (возражения) на исковое заявление не представлен, в судебное заседание представитель ответчика не явился, о дате, времени и месте судебного заседания в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ уведомлен надлежащим образом.

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской  Федерации все имеющиеся в   материалах дела документы, заслушав доводы представителя истца, суд приходит к следующему.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. 

Пунктом 1 статьи 722 ГК РФ установлено, что в случае, когда договором подряда предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 724 ГК РФ, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

Как следует из материалов дела, недостатки работ были обнаружены истцом в пределах гарантийного срока.

По спору о ненадлежащем исполнении подрядчиком гарантийных обязательств бремя предоставления доказательств отсутствия вины подрядчика в возникновении недостатков, в том числе посредством доказывания причин образования спорных дефектов (отсутствия причинно-следственной связи), относится на подрядчика как лицо, принявшее на себя обязательство обеспечить соответствие результата выполненных работ требованиям качества (статьи 721, 722, 724, 755 ГК РФ). 

Так, если договором подряда предусмотрен гарантийный срок, то результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 722 ГК РФ). Под гарантийным сроком в договорах подряда понимается период времени, в течение которого подрядчик гарантирует стабильность показателей качества результата произведенных работ в процессе его использования по назначению при условии соблюдения заказчиком установленных правил использования. Содержание гарантийного обязательства включает право заказчика требовать от подрядчика обеспечения надлежащего качества результата выполненных работ и корреспондирующую ему обязанность подрядчика обеспечивать его с момента приемки и до окончания действия гарантийного срока. Распространяя свое действие на период после приемки выполненных работ, гарантийное обязательство превращает отношения сторон по договору подряда в длящиеся. 

Подразумевается, что при обычной надлежащей эксплуатации предмета, явившегося результатом работ, недостаток, появившийся в течение гарантийного срока, возникает ввиду ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по выполнению работ. Следовательно, при разрешении исковых требований, связанных с применением последствий нарушения требований о качестве выполненных работ в гарантийный срок, заказчик обязан доказать факт возникновения недостатка в работе подрядчика. Подрядчик должен подтвердить, что причина возникновения недостатка не связана с его работой. 

Таким образом, в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ. 

В рассматриваемом случае недостатки обнаружены заказчиком в пределах гарантийного срока, поэтому обязанность доказывания причин их возникновения, исключающих ответственность подрядчика, возлагается на последнего.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно пункту 8.1 контракта гарантийный срок на материалы и выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2).

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, при получении допуска узла учета тепловой энергии выявлены существенные недостатки выполненных ответчиком работ, что подтверждается актом допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя № 12/20 от 15.10.2020.

Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в адрес ООО «Регион - эксплуатация» направлено уведомление от 19.10.2020 г. № 02-10/7101, в котором сообщалось о выявленных недостатках, однако Общество на составление рекламационного акта своего представителя не направило.

 26.10.2020 Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области составлен рекламационный акт об обнаружении дефектов и недостатков в выполненных подрядчиком работах в течение гарантийного срока муниципального контракта от 25.06.2019 № 044 на выполнение работ по капитальному ремонту согласно проекту «Узел коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в здании по адресу: 

<

...>.

Таким образом, поскольку факт ненадлежащего выполнения ответчиком работ по контракту  подтвержден материалами дела,  требования истца об  обязании устранить дефекты, выявленные в пределах гарантийного срока обязательства,  являются обоснованными и подлежат удовлетворению.   

При этом в соответствии с частью 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации ответчики признаются плательщиками государственной пошлины в случае, если решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от ее уплаты.

Поскольку истцом при предъявлении иска не оплачивалась государственная пошлина в связи с тем, что истец освобожден от ее уплаты, по результатам рассмотрения настоящего дела с ответчика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 6 000 рублей.

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Регион-эксплуатация» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в течение тридцати календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки по муниципальному контракту № 044 от 25.06.2019 – заменить узел коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в здании, расположенном по адресу: 

<

...>.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регион-эксплуатация» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

Исполнительный лист о взыскании государственной пошлины выдать после вступления решения в законную силу.

В остальной части в соответствии с частью 3 статьи  319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья                 В.А. Печорина