ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А55-25455/2023

город Самара

18 июля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июля 2024 года.  Постановление в полном объеме изготовлено 18 июля 2024 года.  

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  председательствующего судьи Кузнецова С.А., судей Колодиной Т.И., Сафаевой Н.Р.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Новиковой С.А., с участием: от истца: представитель ФИО1 (доверенность от  16.03.2023), от ответчика: представитель ФИО2 (доверенность от 07.06.2024 №  1-Ю), от третьего лица: представитель ФИО3 (доверенность от 10.08.2023   № 61), рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью «Строй Гарант» на решение Арбитражного суда  Самарской области от 08.05.2024 (судья Михайлова М.В.) по делу № А55-25455/2023  по иску общества с ограниченной ответственностью «Юнитстрой» к обществу с  ограниченной ответственностью «Строй Гарант» о взыскании неустойки, третье лицо:  некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд  капитального ремонта»,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Юнитстрой" (далее – ООО  "Юнитстрой", истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к  обществу с ограниченной ответственностью "Строй Гарант" (далее – ООО "Строй  Гарант", ответчик) о взыскании 1 448 821 руб. 98 коп. штрафа, 6 394 424 руб. 70 коп.  неустойки.  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, привлечена некоммерческая организация  «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (далее –  НО "ФКР", третье лицо).  

Решение Арбитражного суда Самарской области от 08.05.2024 иск удовлетворен.  

Ответчик обжаловал судебный акт суда первой инстанции в порядке,  предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее – АПК РФ).  

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней ответчик просит решение  Арбитражного суда Самарской области от 08.05.2024 отменить, в иске отказать.  

Апелляционная жалоба и дополнения к ней мотивированы неполным выяснением  и недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, несоответствием  изложенных в обжалуемом судебном акте выводов обстоятельствам дела, нарушением  и неправильным применением норм материального и процессуального права.  

Истец в отзыве на апелляционную жалобу просит оставить обжалуемый судебный  акт без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется  Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, предусмотренном  главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Исследовав материалы дела, оценив доводы, изложенные в апелляционной  жалобе, объяснения лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной  инстанции считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по  следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между  ООО «ЮнитСтрой» и ООО «Строй Гарант» заключен договор от 08.04.2021 №  08/04/2021, по условиям которого субподрядчик обязуется по поручению подрядчика  выполнить работы по ремонту кровли многоквартирных домов, расположенных по  адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>;  

<

...>; 

<

...>.  

В правоотношениях между лицами, участвующими в настоящем деле, основным  заказчиком выступала некоммерческая организация «Региональный оператор  Самарской области «Фонд капитального ремонта», подрядчиком являлось ООО  «ЮнитСтрой», субподрядчиком выступило ООО «Строй Гарант».  

Согласно п. 3.2. заключенного между истцом и ответчиком договора срок  выполнения работ определен сторонами с момента его заключения и не позднее  30.10.2021.  

Суд первой инстанции установил, что предусмотренные договором работы  субподрядчиком не выполнены. Доказательств выполнения ремонта кровли  многоквартирных домов по адресам 

<

...>;  

<

...>; 

<

...>; 

<

...>, ответчик не представил.  

При этом, оценивая доводы ответчика, изложенные в отзыве и дополнениях к  отзыву на иск, суд первой инстанции признал их необоснованными в связи со  следующим.  

Обосновывая причины неисполнения принятых на себя обязательств по ремонту  кровли многоквартирных домов, ответчик указал на отсутствие авансирования работ со  стороны истца (подрядчика), что послужило причиной для последующего направления  субподрядчиком подрядчику уведомления об одностороннем расторжении договора с  01.10.2021 (исх. № 08/09-1 от 08.09.2021).  

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.  Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его  условий не допускаются.  

Как указано в п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный  срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Согласно п. 1.2.2 договора от 08.04.2021 № 08/04/2021 субподрядчик  подтверждает, что полностью понимает и осознает характер и объемы работ по  договору и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить  

выполнение работ по договору, и принимает на себя все расходы, риски и трудности,  связанные с выполнением работ по договору.  

Пунктом 1.4. договора установлено, что работы, предусмотренные настоящим  договором, выполняются субподрядчиком из его материалов, его силами и средствами.  

В силу п. 10.1 договора оплата выполненных работ по объекту производится на  основании предоставленных субподрядчиком и подписанных в порядке, установленном  договором, актов КС-2, справок КС-3, акта сдачи-приемки оказанных услуг и (или)  выполненных работ.  

Указанным положениям корреспондирует п. 5.2.3 договора, по условиям которого  субподрядчик вправе требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых  подрядчиком работ в соответствии с настоящим договором.  

Пунктом 10.4 договора от 08.04.2021 № 08/04/2021 стороны предусмотрели, что  заказчиком допускается выплата предварительной оплаты (аванса) в размере, не  превышающем 30-ть % от цены договора.  

Таким образом, своим соглашением стороны предусмотрели не обязанность, а  право подрядчика на выплату аванса субподрядчику.  

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом  принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.  Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем  сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.  

В свою очередь буквальное толкование вышеприведенных условий договора в их  совокупности свидетельствует об отсутствии у истца обязанности авансировать  выполняемые ответчиком работы и, как следствие, необоснованности требования  подрядчика о выплате аванса.  

Согласно п. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими  законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от  договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено  управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора  (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного  уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами,  иными правовыми актами или договором.  

Следовательно, ст. 450.1 ГК РФ предусматривает, что право на односторонний  отказ от исполнения договора может быть предоставлено стороне законом или  договором.  

Суд первой инстанции установил, что из содержания писем от 23.07.2021 исх. №  21, от 23.07.2021 исх. № 23, от 08.09.2021 исх. № 08/09-1, приложенных к отзыву  ответчика на иск, следует, что мотивом отказа субподрядчика от исполнения договора  явилось именно неперечисление авансовых платежей.  

Заключенный между сторонами договор не предусматривает права  субподрядчика на односторонний отказ от его исполнения по указанным ответчиком  основаниям (отсутствие авансирования). Законом также не предусмотрены подобные  основания для отказа субподрядчика от исполнения договора.  

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 12 постановления Пленума Верховного  Суда РФ от 22.11.2016 № 54 "О некоторых вопросах применения общих положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" если  односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его  условий совершены тогда, когда это не предусмотрено законом, иным правовым актом  или соглашением сторон или не соблюдены требования к их совершению, то по  общему правилу такой односторонний отказ от исполнения обязательства или  

одностороннее изменение его условий не влекут юридических последствий, на которые  они были направлены.  

Таким образом, уведомление ответчика от 08.09.2021 исх. № 08/09-1 о  расторжении договора совершено субподрядчиком в отсутствие на то правовых  оснований, не породило юридических последствий, на которые оно было направлено, в  связи с чем вопреки доводам ответчика 01.10.2021 договор не был расторгнут и  продолжал действовать.  

В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно  к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что  окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от  исполнения договора и потребовать возмещения убытков.  

Пунктом 12.1 договора от 08.04.2021 № 08/04/2021 предусмотрено, что он может  быть расторгнут по соглашению сторон, в одностороннем порядке в случаях,  предусмотренных договором, или по решению суда в порядке, предусмотренном  действующим законодательством.  

В силу п. 12.4 договора подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть  договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случаях:  

систематического (2 раза и более) нарушения субподрядчиком сроков  выполнения работ (п. 12.4.1);  

нарушения субподрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью  более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов (п. 12.4.6).  

В соответствии с п. 12.5 договора при принятии подрядчиком решения о  расторжении договора в соответствии с п. 12.4 договора, подрядчик направляет  субподрядчику соответствующее уведомление не позднее чем за 15 рабочих дней до  предполагаемой даты расторжения.  

Суд первой инстанции установил, что 22.06.2023 истец направил ответчику  уведомление об одностороннем расторжении договора от 08.04.2021 № 08/04/2021.  Договор расторгнут по истечении 15 рабочих дней с даты направления уведомления  (т.е. с 14.07.2023).  

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная  законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в  случае просрочки исполнения.  

Согласно п. 12.6. договора в случае расторжения договора в одностороннем  порядке по основаниям, указанным в п. 12.4., субподрядчик уплачивает подрядчику  штраф в размере 10 % от стоимости договора. Указанный штраф уплачивается помимо  средств, которые субподрядчик обязан возместить подрядчику в качестве причиненных  убытков.  

Стоимость договора согласована сторонами в размере 14 488 219,80 рублей (разд.  2 договора).  

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что субподрядчиком подлежит  оплате штраф за расторжение договора в размере 1 448 821,98 рублей (14 488 219,80 *  10 %).  

Кроме этого, п. 11.1. договора предусмотрено, что за невыполнение и/или  ненадлежащее исполнение субподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ  на многоквартирном доме в соответствии со сроками, установленными графиком  выполнения работ, иных сроков, установленных договором, субподрядчик обязан  уплатить подрядчику неустойку в размере 1/130 действующей на день уплаты ставки  рефинансирования ЦБ РФ от подлежащей уплате суммы по указанному  многоквартирному дому за каждый день просрочки неисполненного обязательства,  

начиная со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства,  включая срок исполнения его этапа.  

Согласно п. 3.2. договора срок выполнения работ определен сторонами с момента  его заключения и не позднее 30.10.2021.  

К указанному сроку работы по ремонту кровли четырёх из пяти многоквартирных  домов субподрядчиком не выполнены.  

Следовательно, начиная с 31.10.2021, субподрядчик считается просрочившим.  Общий период начисления неустойки с 31.10.2021 (первый день просрочки сдачи  работ) по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 14.07.2023 (дата расторжения договора)  составляет 438 дней.  

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что размер  подлежащей уплате ответчиком неустойки за просрочку выполнения работ составляет  6 394 424,70 рублей, из которых:  

- в отношении МКД по адресу 

<

...> 159 275,40 р. х 16 % / 130 х 438 = 1 703 092,46 рублей.  

- в отношении МКД по адресу 

<

...>: 2 626 416,00 р. х 16 % / 130 х 438 = 1 415 840,26 рублей. - в отношении МКД по адресу 

<

...>: 2 742 584,40 р. х 16 % / 130 х 438 = 1 478 463,96 рублей. - в отношении МКД по адресу 

<

...>: 3 333 528,00 р. х 16 % / 130 х 438 = 1 797 028,02 рублей. 

Суд первой инстанции отклонил довод ответчика о необходимости исчисления  неустойки с 02.10.2022 и основанный на нем контррасчет ввиду следующего.  

Контррасчет ответчика основан на том обстоятельстве, что конечные сроки  выполнения работ по ремонту кровли многоквартирных домов, предусмотренные  договорами между ООО «ЮнитСтрой» (подрядчиком, истцом) и НО «ФКР»  (заказчиком, 3-им лицом), были смещены соответствующими дополнительными  соглашениями на более позднюю дату относительно срока, согласованного в договоре  субподряда с ООО «Строй Гарант» (субподрядчиком, ответчиком).  

В свою очередь срок выполнения работ по договору между подрядчиком (истцом)  и субподрядчиком (ответчиком) остался неизменным - 30.10.2021 (п. 3.2. договора).  

По смыслу ст. 309, 310 ГК РФ обязательство должно исполняться в соответствии  с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от  исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.  

В силу п. 1 ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет  определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть  исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в  любой момент в пределах такого периода.  

Пунктом 1 ст. 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы.  

Срок выполнения работ субподрядчиком согласован в п. 3.2. договора от  08.04.2021 № 08/04/2021: с момента заключения настоящего договора и не позднее  30.10.2021.  

При этом п. 3.7. договора предусмотрено, что сроки начала и окончания работ в  соответствии с настоящим договором являются исходными для определения неустоек и  штрафных санкций в порядке, установленном договором, в случае нарушения  субподрядчиком сроков выполнения работ.  

Согласно п. 3 ст. 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей для лиц, не  участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).  

Таким образом, изменение заказчиком и подрядчиком на основании  соответствующих дополнительных соглашений сроков сдачи работ в договорах между  собой не повлекло за собой автоматического переноса указанного срока для  субподрядчика, согласованного в договоре субподряда.  

Соответствующее дополнительное соглашение (о переносе срока) между истцом  и ответчиком не заключалось. Ответчик не представил доказательств обращения к  истцу с предложением о внесении соответствующих изменений в договор от 08.04.2021   № 08/04/2021. Суд первой инстанции указал на отсутствие намерения у субподрядчика  выполнить работы, что выразилось в направлении им 09.09.2021 одностороннего отказа  от договора, т.е. до даты изменения сроков завершения работ заказчиком. В этой связи  перенос сроков выполнения работ конечным заказчиком подрядчику не имеет  правового значения для договора, заключенного между истцом и субподрядчиком.  

Изложенный истцом в заявлении об уточнении исковых требований расчет пени  произведен в соответствии с условиями договора и с учетом действия моратория,  установленного постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 (из расчета  исключены 184 дня просрочки).  

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что начисление  неустойки с 31.10.2021 по 14.07.2023 правомерно, поскольку ответчик не являлся  стороной дополнительных соглашений между заказчиком (Фондом) и подрядчиком  (ООО «ЮнитСтрой») и соответствующие изменения не были внесены в договор №  08/04/2021 от 08.04.2021.  

Кроме того, истец заявил требование о взыскании штрафа в сумме 1 448 821 руб.  98 коп.  

В силу статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная  законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в  случае просрочки исполнения.  

Согласно ст. 421 ГК РФ стороны свободны в заключении договора. 

Условия Договора, в том числе в отношении размера возмещаемых арендодателю  затрат, неустойки, сторонами согласованы, договор подписан ответчиком без  протокола разногласий.  

Расчет штрафа судом первой инстанции проверен и признан арифметически  верным.  

Ответчик ходатайствовал о снижении размера неустойки и штрафа на основании  статьи 333 ГК РФ в связи с их несоразмерностью последствиям нарушения  обязательств.  

В силу пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  подлежащая уплате неустойка может быть уменьшена судом, если она явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства.  

В соответствии с пунктом 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  24.03.2016 № 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности  выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность  выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков  кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства,  значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 АПК РФ).  

Предоставляя суду право уменьшить размер неустойки, закон не определяет  критерии и пределы ее соразмерности. Определение несоразмерности неустойки  последствиям нарушения обязательства осуществляется судом по своему внутреннему  убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании имеющихся в деле доказательств.  

Ненадлежащее исполнение обязательства ответчиком установлено в ходе  судебного разбирательства в суде первой инстанции, то есть истец доказал наличие  оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности.  

Ответчик, добровольно приняв на себя соответствующие обязательства, должен  нести риск наступления ответственности за их ненадлежащее исполнение в  соответствии с условиями заключенного с истцом договора.  

Доказательств, свидетельствующих о несоразмерности взыскиваемой неустойки,  ответчик в суд первой инстанции не представил, в связи с чем суд первой инстанции  пришел к выводу о том, что предъявленная к взысканию неустойка не является  завышенной и соответствует последствиям нарушенного обязательства.  

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии  оснований для снижения размера неустойки в соответствии со ст. 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации.  

Довод ответчика о непередаче истцом технической документации на  многоквартирные дома отклонен судом первой инстанции, поскольку по условиям  договора вся подготовительная работа, предшествующая ремонту многоквартирных  домов (в том числе получение домов по акту приема-передачи от управляющей  компании), а также сам процесс производства работ, находились исключительно в зоне  ответственности ответчика (п. 5.1.21, 5.1.26, 5.1.27, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.30, 5.1.32, 5.1.33,  5.1.34 договора).  

Принимая во внимание указанные обстоятельства, руководствуясь статьями 308,  309, 310, 314, 330, 333, 421, 431, 450.1, 708, 711, 715 Гражданского кодекса Российской  Федерации, статьями 65, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пункте 12 постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 "О некоторых  вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации  об обязательствах и их исполнении", в пункте 73 постановления Пленума Верховного  Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств", суд первой инстанции правомерно и обоснованно  удовлетворил иск.  

Суд апелляционной инстанции отклоняет ссылки ответчика и третьего лица на  условия договора между третьим лицом и истцом, и на отношения третьего лица и  истца в рамках данного договора, поскольку ответчик стороной заключенного между  истцом и третьим лицом договора не является, в связи с чем его условия не создают для  ответчика ни прав, ни обязанностей (п. 3 ст. 308 ГК РФ)  

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе и в дополнениях к ней, являлись  предметом исследования суда первой инстанции, который дал им надлежащую  правовую оценку. Суд апелляционной инстанции не находит оснований для  переоценки выводов суда первой инстанции.  

В апелляционной жалобе и в дополнениях к ней не приведено доводов,  опровергающих выводы суда первой инстанции.  

При указанных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные статьей 270  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для  изменения или отмены судебного акта суда первой инстанции.  

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела в суде апелляционной  инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации относятся на заявителя апелляционной жалобы.  

Руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Самарской области от 08.05.2024 по делу № А5525455/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть  обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев, в Арбитражный суд Поволжского  округа.  

Председательствующий судья С.А. Кузнецов  

Судьи Т.И. Колодина  

 Н.Р. Сафаева