РЕШЕНИЕ

Дело № А11-6649/2024

г. Владимир

08 августа 2025 года

Резолютивная часть оглашена 25.07.2025.

Полный текст решения изготовлен 08.08.2025.

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Смагиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело № А11-6649/2024 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ФИО2 Спец Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к закрытому акционерному обществу «Муром» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 11 282 527 руб. 35 коп.,

при участии:

от истца – не явились, извещены.

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 01.01.2025 №39д сроком действия по 31.12.2025,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ФИО2 Спец Строй» (далее – ООО «ФИО2 Спец Строй», истец) обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Муром» (далее – ЗАО «Муром», ответчик) о взыскании задолженности по договорам от 02.08.2022 №4/2022/М, №5/2022/М в размере 11 282 527 руб. 35 коп.

Ответчик в отзывах на исковое заявление считал заявленные требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению, пояснив, что цена работ по договору подряда от 02.08.2022 № 5/2022/М определена пописанными актами приемки выполненных работ, составленными на основании исполнительной документации, подтверждающей фактические объемы выполненных работ, и составляет 55 227 488 руб. 31 руб. в т.ч. НДС. Цена работ по договору генерального подряда 02.08.2022 № 4/2022/М определена пописанными актами приемки выполненных работ, составленными на основании исполнительной документации, подтверждающей фактические объемы выполненных работ, и составляет 58 170 446 руб. 44 коп., в т.ч. НДС. Общая цена работ по договору генерального подряда № 4/2022/М и договору подряда № 5/2022/М выполненных ООО «ФИО2 Спец Строй» в размере94 498 028 руб. без НДС также зафиксирована в акте № 1 приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 от 31.10.2021, согласованном и подписанном обеими сторонами указанных договоров. Общая цена по договорам составила113 397 934 руб. 75 коп. в т.ч. НДС. Указанная сумма оплачена ЗАО «Муром» в полном объеме в соответствии с договорными сроками. Какие-либо иные документы, обосновывающие размер предъявленных ко взысканию требований, истцом в материалы дела не представлены, вследствие чего, размер исковых требований установленными действующим законодательством средствами доказывания не подтвержден. Ответчик указывает, что стоимость работ, подлежащих возмещению исполнителю в цене договора определяется в смете, согласованной сторонами договора. Иные издержки покрываются за счет предусмотренного сметой вознаграждения подрядчика. Более того, после приемки работ по спорным договорам, путем заключения дополнительного соглашения, подписанного сторонами без замечаний и возражений, стороны определили стоимость работ по спорным договорам. 

Определением суда от 19.09.2024 производство по рассматриваемому делу приостановлено в связи с назначением судебной экспертизы, проведение которой поручено АНО «Московский областной центр судебных экспертиз». Определением суда от 04.04.2025 производство по рассматриваемому делу возобновлено.

В судебном заседании 23.07.2025 представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований в полном объеме. Арбитражный суд, руководствуясь статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявил перерыв в судебном заседании до 25.07.2025. После перерыва представитель ответчика поддержал доводы оглашенные ранее. 

Арбитражный суд, всесторонне проанализировав и оценив в совокупности все представленные в материалы дела доказательства, пояснения сторон, а также результаты судебной экспертизы, приходит к следующему выводу.

Как следует из материалов дела, 02.08.2022 между истцом (генеральный подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор генерального подряда № 4/2022/М (далее – генеральный договор), в соответствии с пунктом 2.1 которого генеральный подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора и утверждённой проектно-сметной документацией, по заданию заказчика построить объект «Новое строительство железнодорожных путей необщего пользования ЗАО «Муром», расположенный по адресу: Владимирская область, округ Муром, 

<

...>, с предоставлением всей необходимой для ввода объекта в эксплуатацию и открытия движения поездов исполнительной и разрешительной документации, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Перечень и объёмы работ по настоящему договору определяются сводной ведомостью локальных смет (приложение №1 к договору) и входящих в её состав локальных смет (приложения №1.1 - 1.6 к договору), являющихся неотъемлемой частью договора (пункт 2.2 генерального договора).

Из пункта 2.3 генерального договора следует, что технические, экономические и другие требования к результату работ должны соответствовать требованиям документации, ГОСТ, СНиП, СП и других действующих на момент строительства нормативных актов, а также техническому зданию (приложение №2 к договору).

Работа выполняется иждивением генерального подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (пункт 2.4 генерального договора).

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств (пункт 3.1 генерального договора).

В пункте 3.2 генерального договора стороны согласовали сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 08.08.2022, окончание строительно-монтажных работ – 28.12.2022, окончания работ по договору и ввод в эксплуатацию – 01.02.2023.

Согласно пункту 3.3 генерального договора сроки выполнения промежуточных этапов работ согласовываются заказчиком и генеральным подрядчиком в календарном графике работ (приложение №3 к договору).

В силу пункта 4.1 генерального договора цена работ по настоящему договору составляет сумму в размере 59 955 324 руб., в том числе НДС - 9 992 554 руб. по ставке, предусмотренной законодательством РФ и определяется сводной ведомостью локальных смет (приложение №1 к договору) и входящих в её состав локальных смет (приложения №1.1 - 1.6 к договору), являющихся неотъемлемой частью договора.

Стоимость работ включает все затраты генерального подрядчика на производство работ из материалов генерального подрядчика, расходы на работу техники, конструкции, коммуникации и оснастки, работы сторонних организаций, вовлекаемых в процесс выполнения работ, лабораторные и иные виды испытаний, командировочные и транспортные расходы, гарантийные обязательства, налоговые отчисления и иные затраты, касающиеся генерального подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору, является твердой и изменению не подлежит (пункт 4.1 генерального договора).

В соответствии с пунктом 4.3 генерального договора если в ходе выполнения работ по вине генерального подрядчика, по независящим от заказчика причинам, потребовались дополнительные затраты материалов либо замена на более дорогостоящие материалы, механизмы, или потребовался больший объём работ, чем предусмотрено договором, то такие затраты и работы выполняются без увеличения стоимости договора.

В пункте 4.4 генерального договора сторонами согласован порядок оплаты выполненных работ: заказчик оплачивает авансовый платёж в размере 15 750 000 руб., по истечении 5 рабочих дней с момента подписания договора и предоставления генеральным подрядчиком счёта на оплату. Генеральный подрядчик обязан предоставить счёт на оплату аванса в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Генеральный подрядчик обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения аванса предоставить счёт-фактуру на сумму полученного аванса, оформленный в соответствии со ст. 169 НК РФ (пункт 4.4.1 генерального договора); промежуточные платежи заказчик осуществляет по истечении 15 календарных дней с момента подписания сторонами соответствующих актов о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ на основании предоставленного генеральным подрядчиком счета на оплату, но не более 30 календарных дней с момента подписания сторонами указанных актов и справки. Оплата принятых работ производится за вычетом доли аванса, уплаченного в соответствии с п. 4.4.1. настоящего договора, рассчитанного пропорционально выполненному объёму работ, и гарантийного удержания в размере 5 % от стоимости работ, указанных в акте о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Гарантийное удержание выплачивается в соответствии с подпунктом 4.4.3. настоящего договора. Генеральный подрядчик обязан предоставить заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания заказчиком акта о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации счёт-фактуру и счёт (пункт 4.4.2 генерального договора); гарантийное удержание в размере 5 % от общей стоимости работ по договору является обеспечением выполнения обязательств по договору генеральным подрядчиком. Гарантийное удержание заказчик оплачивает по истечении 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, на основании предоставленного генеральным подрядчиком счета на оплату (пункт 4.4.3 генерального договора).

Права и обязанности сторон содержатся в разделе 5 генерального договора.

Из пункта 7.1 генерального договора следует, что сдача и приёмка работ по настоящему договору оформляется ежемесячно в следующем порядке: генеральный подрядчик передаёт заказчику не позднее 10-го числа следующего за отчётным месяца результат выполненных работ по акту о приёмке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ с обязательным предоставлением заказчику комплекта исполнительной документации на выполненный объём работ, подписанный ответственными представителями заказчика и генерального подрядчика (пункт 7.1.1 генерального договора); заказчик обязан при условии предоставления полного комплекта документов, перечисленных в подпункте 7.1.1 настоящего договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать указанные акты и вернуть один экземпляр генеральному подрядчику. В случае несогласия заказчика с актом о приёмке выполненных работ он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней направить генеральному подрядчику по электронной почте или факсу мотивированный отказ от приёмки выполненных работ и подписания этих актов с указанием сроков устранения недостатков выполненных работ. При отсутствии в мотивированном отказе заказчика срока устранения недостатков выполненных работ, генеральный подрядчик обязан устранить недостатки в разумный срок (пункт 7.1.2 генерального договора); генеральный подрядчик обязуется исправить недостатки за свой счёт. После устранения недостатков подрядчик повторно направляет заказчику исправленные акт о приёмке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ, после получения вышеуказанных документов заказчик действует в соответствии с подпункта 7.1.2 настоящего договора (пункт 7.1.3 генерального договора).

Окончательная приёмка выполненных работ по договору производится на основании подписанного сторонами акта приемки законченного строительством объекта и полного комплекта исполнительной документации, предоставленного генеральным подрядчиком (пункт 7.2 генерального договора).

Стороны 21.11.2022 заключили дополнительное соглашение № 1, согласно которому цена работ по настоящему договору составляет сумму в размере 59 424 787 руб. 20 коп., в том числе НДС – 9 904 131 руб. 20 коп. по ставке, предусмотренной законодательством РФ и определяется сводной ведомостью локальных смет (приложение № 1 к договору), и входящих в ее состав локальных смет (приложение № 1.1-1.6 к договору). являющихся неотъемлемой частью договора. Заказчик оплачивает авансовые платежи: в размере 15 750 000 руб. – по истечении 5 рабочих дней с момента подписания договора и предоставления генеральным подрядчиком счета на оплату. Генеральный подрядчик обязан предоставить счет на оплату аванса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора; в размере 10 000 000 руб. – в течение 5 рабочих дней с момента предоставления генеральным подрядчиком счета на оплату; в размере 800 000 руб. – не позднее 30.11.2022 при условии предоставления генеральным подрядчиком счета на оплату.

Между сторонами 20.12.2022 заключено дополнительное соглашение № 2, согласно условиям которого заказчик обязуется возместить затраты генерального подрядчика, понесенные на оплату услуг по сопровождению производства работ службами ОАО «РЖД» при строительстве объекта «Новое строительство железнодорожных путей необщего пользования ЗАО «Муром» в размере 278 357 руб. 86 коп., в том числе НДС – 46 392 руб. 97 коп. по ставке, предусмотренной законодательством РФ. Заказчик осуществляет оплату по настоящему дополнительному соглашению по истечении 15 календарных дней с момента предоставления генеральным подрядчиком счета на оплату с предоставлением комплекта документов согласно п. 1.3 настоящего дополнительного соглашения, подтверждающих понесенные затраты и на основании предоставленного генеральным подрядчиком счета на оплату. 

Дополнительным соглашением от 15.03.2023 № 3 стороны согласовали, что цена работ но настоящему договору составляет сумму в размере 59 424 787 руб. 20 коп., в том числе НДС - 9 904 131 руб. 20 коп. по ставке, предусмотренной законодательством РФ и определяется сводной ведомостью локальных смет (приложение №1 к договору) и входящих в ее состав локальных смет (приложения №1.1 - 1.6 к договору), являющихся неотъемлемой частью договора. Заказчик оплачивает авансовые платежи: в размере 15 750 000 руб. - по истечении 5 рабочих дней с момента подписания договора и предоставления генеральным подрядчиком счета на оплату. Генеральный подрядчик обязан предоставить счет на оплату аванса в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора; в размере 10 000 000 руб. - в течение 5 рабочих дней с момента предоставления генеральным подрядчиком счета на оплату; в размере 8 000 000 руб. - не позднее 30.11.2022 при условии предоставления генеральным подрядчиком счета на оплату; в размере 3 800 380 руб. - не 3 рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего дополнительного соглашения. Промежуточные платежи заказчик осуществляет после по истечении 15 календарных дней с момента подписания сторонами соответствующих актов о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ на основании предоставленного генеральным подрядчиком счета на оплату, но не более 30 календарных дней с момента подписания сторонами указанных актов и справки. Оплата принятых работ производится за вычетом 100% авансовых платежей и за вычетом гарантийного удержания в размере 5% от стоимости работ, указанных в акте о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. Гарантийное удержание выплачивается в соответствии с подпунктом 4.4.3 настоящего договора. Генеральный подрядчик обязан предоставить заказчику в течение 3 рабочих дней с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации счет-фактуру и счёт. Настоящим дополнительным соглашенном стороны согласовали срок предоставления объекта в состоянии технической готовности - 25.04.2023.

Стороны 13.10.2023 заключили дополнительное соглашение № 4, из условий которого следует, что цена работ по настоящему составляет сумму в размере 59 99 998 руб. 73 коп., в т.ч. НДС (20%) 9 999 999 руб. 79 коп. и определяется «сводным сметным расчетом» (приложение №1 к настоящему договору) и входящих в её состав локальных смет (приложения №1.1 - 1.11 к настоящему договору), являющихся неотъемлемой частью договора, а также «резервом средств на непредвиденные работы и затраты», определенным пунктом 12 «сводного сметного расчета» (приложение №1 к настоящему договору). Денежные средства по п.12 «сводного сметного расчета» (приложение №1 к настоящему договору) - «резерв средств на непредвиденные работы и затраты» является собственностью заказчика и используется заказчиком исключительно для компенсации дополнительных затрат, связанных с уточнением объемов работ по рабочим чертежам, ошибками в сметах включая арифметические, выявленными после утверждения рабочей документации; изменениями проектных решений в рабочей документации и оплаты дополнительных работ. При расчетах за выполненные работы указанные расходы полностью расшифровываются с оформлением актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), составленных по принципам ценообразования, принятым в локальных сметах на основные работы. Оплата по статье «резерв средств на непредвиденные работы и затраты» производится на основании следующих документов: акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), подписанного сторонами; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанной сторонами. Расходы должны быть подтверждены соответствующими актами, с обоснованием необходимости возникших дополнительных расходов. Неиспользуемый остаток средств по статье «резерв средств на непредвиденные работы и затраты» приложения № 1 к договору к моменту выполнения всех работ по договору будет считаться экономией заказчика и не будет подлежать выплате в адрес подрядчика. Цена работ по настоящему договору является ориентировочной. Итоговая стоимость работ определяется на основании фактически выполненных работ, подтвержденных актами сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанными сторонами в пределах суммы, определённой «сводным сметным расчётом» (приложение №1 к настоящему договору)». Действовавшие до подписания настоящего дополнительного соглашения приложение №1, приложения № 1.1 - № 1.6 к договору генерального подряда № 4/2022/м от 02.08.2022г аннулируются. Корректировка стоимости ранее выполненных работ производится путем подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), исключающих объёмы ранее подтвержденных работ по приложениям №1.1 - №1.6 к договору генерального подряда № 4/2022/М от 02.08.2022 действовавших до подписания настоящего дополнительного соглашения, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2) по приложениям №1.1 - 1.11 в редакции данного дополнительного соглашения, подписанием справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на разницу между исключаемыми и вновь процентуемыми работами.

Между сторонами 13.10.2023 заключено дополнительное соглашение № 5, согласно условиям которого в связи с уточнением объемов работ по рабочим чертежам и изменениями проектных решений в рабочей документации, а также выявлением ошибок в проектной документации, обнаруженных после выдачи рабочей документации в производство работ, возникла необходимость выполнения работ, не учтенных «сводным сметным расчетом» (приложение №1 к договору генерального подряда №4/2022/м от 02.08.2022) и «локальными сметными расчётами» (приложениями №1.1 - 1.11 к договору генерального подряда №4/2022/м от 02.08.2022), превышающих «резерв средств на непредвиденные работы и затраты», определенный пунктом 12 «сводного сметного расчета» (приложение №1 к договору генерального подряда № 4/2022/м от 02.08.2022). Стоимость дополнительных работ, указанных в п. 1.1. настоящего дополнительного соглашения, определена в приложении №1 «реестр локальных смет на дополнительные работы» и локальных сметных расчётах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего дополнительного соглашения и договора генерального подряда № 4/2022/М от 02.08.2022, и составляет6 258 183 руб. 70 коп., включая НДС (20%) в сумме 1 043 030 руб. 62 коп.

Стороны в дополнительном соглашении от 31.10.2023 № 6 согласовали, что итоговая пена договора складывается из суммы стоимостей: фактически выполненных работ, подтверждённых актами приемки выполненных работы (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) в размере 54 733 212 руб. 77 коп., в т.ч. НДС (20%) 9 122 202 руб. 13 коп., составленных на основании и в пределах сметных расчетов, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям № 4 от 13.10.2023 и № 5 от 13.10.2023 к договору генерального подряда от 02.08.2022 № 4/2022/М; компенсации затрат на оплату услуг по сопровождению производства работ службами ОАО «РЖД» в размере 278 357 руб. 86 коп., в т.ч. НДС (20%) 46 392 руб. 98 коп. в соответствии с Дополнительным соглашением №2 к договору генерального подряда № 4/2022/М от 02.08.2022; вознаграждения генерального подрядчика за услуги по организации строительства в размере 5,8 % от стоимости выполненных работ от стоимости фактически выполненных работ, указанной в п 1.2.1. настоящего дополнительного соглашения, что составляет 3 158 875 руб. 81 коп., в т.ч. НДС (20%) 526 479 руб. 30 коп. Оплата работ по настоящему дополнительному соглашению производится в течении 3-х (трех) рабочих дней после предоставления генеральным подрядчиком полного комплекта подписанных соответствующим образом оригиналов следующих документов по всему договору: актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; журнал учета выполненных работ но форме № КС-6а; акта приемки законченного строительством объекта по унифицированной форме КС-11; счёт-фактур и корректировочных счёт-фактур; налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость с отражением в разделах 9 «сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» всех счетов-фактур, выставленных в адрес заказчика в рамках выполнения работ по настоящему договору с отметкой налогового органа.

Во исполнение условий генерального договора, истец выполнил соответствующие работы, в подтверждение чего, в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные сторонами без каких-либо замечаний и возражений по объему, качеству и стоимости выполненных работ.

Стороны 31.10.2023 подписали акт приемки законченного строительством объекта № 1 по генеральному договору.

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) 02.08.2022 заключен договор подряда № 5/2022/М (далее – договор), в соответствии с пунктом 2.1 которого подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора и утверждённой проектно-сметной документацией, по заданию заказчика выполнить верхнее строение пути, устройство железнодорожного переезда, сигнализацию и оповещение при строительстве объекта «Новое строительсти железнодорожных путей необшего пользования ЗАО «Муром», расположенного по адресу: Владимирская область, округ Муром, 

<

...>, с предоставлением всей необходимой для ввода объекта в эксплуатацию и открытия движения поездов исполнительной и разрешительной документации, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Согласно пункту 2.2 договора перечень и объёмы работ по настоящему договору определяются сводной ведомостью локальных смет (приложение № 1 к договору) и входящих в её состав локальных смет (приложения № 1.1 - 1.2 к договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Из пункта 2.3 договора следует, что технические, экономические и другие требования к результату работ должны соответствовать требованиям документации, ГОСТ, СНиП, СП и других действующих на момент строительства нормативных актов, а также техническому зданию (приложение №2 к настоящему договору).

Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (пункт 2.4 договора).

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств (пункт 3.1 договора).

Сторонами в пункте 3.2 договора согласованы сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 23.09.2022; окончание строительно-монтажных работ – 28.12.2022; окончание работ по договору и ввод в эксплуатацию – 01.02.2023.

В силу пункта 3.3 договора сроки выполнения промежуточных этапов работ согласовываются заказчиком и подрядчиком в календарном графике работ (приложение №3 к договору).

Согласно пункту 4.1 договора цена работ по настоящему договору составляет сумму в размере 45 039 675 руб. 60 коп., в том числе НДС - 7 506 612 руб. 60 коп. по ставке, предусмотренной законодательством РФ и определяется сводной ведомостью локальных смет (приложение №1 к договору) и входящих в ее состав локальных смет (приложения №1.1 - 1.2 к договору), являющимися неотъемлемой частью договора.

Стоимость работ включает все затраты подрядчика на производство работ из материалов подрядчика, расходы на работу техники, конструкции, коммуникации и оснастки, работы сторонних организаций, вовлекаемых в процесс выполнения работ, лабораторные и иные виды испытаний, командировочные и транспортные расходы, гарантийные обязательства, налоговые отчисления и иные затраты, касающиеся подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору, является твёрдой и изменению не подлежит (пункт 4.2 договора).

В соответствии с пунктом 4.3 договора если в ходе выполнения работ по вине подрядчика, по независящим от заказчика причинам, потребовались дополнительные затраты материалов либо замена на более дорогостоящие материалы, механизмы, или потребовался больший объём работ, чем предусмотрено договором, то такие затраты и работы выполняются без увеличения стоимости договора.

В пункте 4.4 договора стороны согласовали порядок оплаты выполненных работ: заказчик оплачивает авансовый платеж в общем размере, не превышающем 15 750 000 руб. на приобретение материалов на основании заявки подрядчика и предоставления подрядчиком счета на оплату. Оплата авансового платежа может осуществляться частями, срок оплаты - в течение 5 рабочих дней с момента предоставления подрядчиком заявки и счета на оплату. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения аванса предоставить счет-фактуру на сумму полученного аванса, оформленный в соответствии со статьей 169 НК РФ (пункт 4.4.1 договора); промежуточные платежи заказчик осуществляет по истечении 15 календарных дней с момента подписания сторонами соответствующих актов о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ на основании предоставленного подрядчиком счета на оплату, но не более 30 календарных дней с момента подписания сторонами указанных актов и справки. Оплата принятых работ производится за вычетом доли аванса, уплаченного в соответствии с п.4.4.1. настоящего договора, рассчитанного пропорционально выполненному объему работ, и гарантийного удержания в размере 5 % от стоимости работ, указанных в акте о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Гарантийное удержание выплачивается в соответствии с подпунктом 4.4.3. настоящего договора. Подрядчик обязан предоставить заказчику в течение 3 рабочих дней с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации счёт-фактуру и счёт (пункт 4.4.2 договора); гарантийное удержание в размере 5 % от общей стоимости работ по договору является обеспечением выполнения обязательств по договору подрядчиком. Гарантийное удержание заказчик оплачивает по истечении 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, на основании предоставленного подрядчиком счета на оплату (пункт 4.4.3 договора).

Права и обязанности сторон содержатся в разделе 5 договора.

В пункте 7.1 договора стороны согласовали, что сдача и приемка работ по настоящему договору оформляется ежемесячно в следующем порядке: подрядчик передаёт заказчику не позднее 10-го числа следующего за отчётным месяца результат выполненных работ по акту о приёмке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ с обязательным предоставлением заказчику комплекта исполнительной документации на выполненный объём работ, подписанный ответственными представителями заказчика и подрядчика (пункт 7.1.1 договора); заказчик обязан при условии предоставления полного комплекта документов, перечисленных в подпункте 7.1.1 договора в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать указанные акты и вернуть один экземпляр подрядчику. В случае несогласия заказчика с актом о приёмке выполненных работ он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней направить подрядчику по электронной почте или факсу мотивированный отказ от приёмки выполненных работ и подписания этих актов с указанием сроков устранения недостатков выполненных работ. При отсутствии в мотивированном отказе заказчика срока устранения недостатков выполненных работ, подрядчик обязан устранить недостатки в разумный срок (пункт 7.1.2 договора); подрядчик обязуется исправить недостатки за свой счёт. После устранения недостатков подрядчик повторно направляет заказчику исправленные акт о приёмке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ, после получения вышеуказанных документов заказчик действует в соответствии с подпункта 7.1.2 настоящего договора (пункт 7.1.3 договора).

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует полного исполнения обязательств по нему (пункт 11.2 договора).

Стороны 08.12.2022 заключили дополнительное соглашение № 1, согласно условиям которого цена работ но настоящему договору составляет сумму в размере 47 377 557 руб. 60 коп., в том числе НДС - 7 896 259 руб. 60 коп. по ставке, предусмотренной законодательством РФ и определяется сводной ведомостью локальных смет (приложение №1 к договору) и входящих в её состав локальных смет (приложения №1.1 - 1.2 к договору), являющимися неотъемлемой частью договора.

Между сторонами 20.01.2023 заключено дополнительное соглашение № 2, из условий которого следует, что заказчик оплачивает авансовые платежи: в размере 15 750 000 руб. - по истечении 5 рабочих дней с момента подписания договора и предоставления подрядчиком счёта на оплату. Подрядчик обязан предоставить счёт на оплату аванса в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора; в размере 1 729 000 руб. - в течение 5 рабочих дней с момента предоставления подрядчиком счета на оплату. По требованию заказчика подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения аванса предоставить счет-фактуру на сумму полученного аванса, оформленный в соответствии со ст. 169 НК РФ.

Согласно дополнительному соглашению от 02.02.2023 № 3 заказчик оплачивает авансовые платежи: в размере 15 750 000 руб. - по истечении 5 рабочих дней с момента подписания договора и предоставления подрядчиком счета на оплату. Подрядчик обязан предоставить счет на оплату аванса в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора; в размере 1 729 000 руб. - в течение 5 рабочих дней с момента предоставления подрядчиком счета на оплату; в размере 6 218 690 руб. - в течение 5 рабочих дней с момента предоставления подрядчиком счета на оплату. По требованию заказчика подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения аванса предоставить счет-фактуру на сумму полученного аванса, оформленный в соответствии со статьей 169 НК РФ.

Стороны 13.10.2023 заключили дополнительное соглашение № 4, согласно которому цена работ но настоящему составляет сумму в размере 51 269 801 руб. 42 коп., в т.ч. НДС (20%) 8 544 966 руб. 90 коп. и определяется «сводным сметным расчётом» (приложение №1 к настоящему договору) и входящих в её состав локальных смет (приложения №1.1 - 1.2 к настоящему договору), являющихся неотъемлемой частью договора, а также «резервом средств на непредвиденные работы и затраты», определенным пунктом 3 «сводного сметного расчета» (приложение №1 к настоящему договору). Денежные средства по п.3 «сводного сметного расчета» (приложение №1 к настоящему договору) - «резерв средств на непредвиденные работы и затраты» является собственностью заказчика и используется заказчиком исключительно для компенсации дополнительных затрат, связанных с уточнением объемов работ по рабочим чертежам, ошибками в сметах включая арифметические, выявленными после утверждения рабочей документации; изменениями проектных решений в рабочей документации и оплаты дополнительных работ. При расчетах за выполненные работы указанные расходы полностью расшифровываются с оформлением актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), составленных но принципам ценообразования, принятым в локальных сметах на основные работы. Оплата по статье «резерв средств на непредвиденные работы и затраты» производится на основании следующих документов: акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), подписанного сторонами; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанной сторонами; расходы должны быть подтверждены соответствующими актами, с обоснованием необходимости возникших дополнительных расходов. Неиспользуемый остаток средств по статье «резерв средств на непредвиденные работы и затраты» приложения № 1 к договору к моменту выполнения всех работ по договору будет считаться экономией заказчика и не будет подлежать выплате в адрес подрядчика. Цена работ по настоящему договору является ориентировочной. Итоговая стоимость работ определяется на основании фактически выполненных работ, подтверждённых актами сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанными сторонами в пределах суммы, определённой «сводным сметным расчетом» (приложение №1 к настоящему договору)». Действовавшие до подписания настоящего дополнительного соглашения приложение №1, приложения №1.1 - №1.2 к договору подряда № 5/2022/М от 02.08.2022 аннулируются. Корректировка стоимости ранее выполненных работ производится путём подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2), исключающих объемы ранее подтвержденных работ по приложениям №1.1 - №1.2 к договору подряда № 5/2022/М от 02.08.2022 действовавших до подписания настоящего дополнительного соглашения, подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (форма №КС-2) по приложениям №1.1 -1.2 в редакции данного дополнительного соглашения, подписанием справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на разницу между исключаемыми и вновь процептуемыми работами.

Стороны заключили дополнительное соглашение № 5, согласно условиям которого в связи с уточнением объемов работ по рабочим чертежам и изменениями проектных решений в рабочей документации, а также выявлением ошибок в проектной документации, обнаруженных после выдачи рабочей документации в производство работ, возникла необходимость выполнения работ, не учтённых «сводным сметным расчетом» (приложение №1 к договору подряда №5/2022/м от 02.08.2022) и «локальными сметными расчётами» (приложениями №1.1 - 1.2 к договору подряда №5/2022/М от 02.08.2022г), превышающих «резерв средств на непредвиденные работы и затраты», определённый пунктом 3 «сводного сметного расчета» (приложение №1 к договору подряда №5/2022/М от 02.08.2022). Стоимость дополнительных работ, указанных в п. 1.1. настоящего дополнительного соглашения, определена в приложении №1 «реестр локальных смет на дополнительные работы» и локальных сметных расчётах, являющихся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения н Договора подряда № 5/2022/М от 02.08.2022, и составляет 2 828 129 руб. 02 коп., в т.ч. НДС 20% 471 354 руб. 84 коп.

Дополнительным соглашением от 31.10.2023 № 6 стороны согласовали, что итоговая цена договора от 02.08.2022 № 5/2022/М с учетом настоящего дополнительного соглашения составляет 55 227 488 руб. 31 коп., в т.ч. НДС (20%) 9 204 581 руб. 39 коп. Итоговая цепа договора складывается из суммы стоимостей: фактически выполненных работ, подтвержденных актами приемки выполненных работы (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) в размере 52 348 330 руб. 15 коп., в т.ч. НДС (20%) 8 724 721 руб. 69 коп., составленных на основании и в пределах сметных расчетов, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям от 13.1.02023 № 4 и от 13.10.2023 № 5, к договору подряда от 02.08.2022 № 5/2022/М. Вознаграждения подрядчика за услуги по организации строительства в размере 5.5% от стоимости выполненных работ от стоимости фактически выполненных работ, указанной в п. 1.2.1 настоящего дополнительного соглашения, что составляет 2 879 158 руб. 16 коп., в т.ч. НДС (20%) 479 859 руб. 69 коп. Оплата работ по настоящему дополнительному соглашению производится в течении 3-х рабочих дней после предоставления подрядчиком полного комплекта подписанных соответствующим образом оригиналов следующих документов по всему договору: актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а; акта приемки законченного строительством объекта по унифицированной форме КС-11; счет-фактур и корректировочных счет-фактур; налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость с отражением в разделах 9 «сведения из киши продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» всех счетов-фактур, выставленных в адрес заказчика в рамках выполнения работ но настоящему договору с отметкой налогового органа.

Во исполнение условий договора, истец выполнил соответствующие работы, в подтверждение чего, в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные сторонами без каких-либо замечаний и возражений по объему, качеству и стоимости выполненных работ.

Стороны 25.08.2023 подписали акт приемки в постоянную эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования ЗАО «Муром».

Ответчик по платежным поручениям, представленным в материалы дела, полностью оплатил выполненные истцом работы.

Как указывает истец, с учетом выполнения дополнительных работ, применения современных материалов, вознаграждения генерального подрядчика за услуги по организации строительства 5,8 %, с учетом вознаграждения подрядчика за услуги по организации строительства 5,5 %, на основании подписанных дополнительных соглашений общая стоимость работ по спорным договорам составила 124 313 800 руб. 30 коп.

С учетом произведенной ответчиком оплаты выполненных работ, за последним образовалась задолженность в размере 11 282 527 руб. 35 коп.

Истцом в адрес ответчика направлено досудебное требование (претензия) от 17.04.2024 об оплате задолженности по спорным договорам. Указанная претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Неисполнение ответчиком обязательства по оплате выполненных работ послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В силу статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. 

Согласно пункту 5 статьи 709 ГК РФ если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов (пункт 6 статьи 709 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику и обосновать необходимость немедленных действий в интересах заказчика.

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 данной статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства (пункт 4 статьи 743 ГК РФ). По смыслу названных норм под дополнительными работами понимаются работы, необходимость проведения которых обнаруживается подрядчиком в ходе проведения строительных работ и которые отсутствуют в технической документации, то есть таких работ, без проведения которых продолжение строительства невозможно.

В частности, дополнительными могут быть признаны только те работы, которые не были учтены в технической документации, но должны были быть учтены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступить к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата работ.

Согласно пункту 5 статьи 743 ГК РФ при согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком, также могут быть отнесены исключительно те работы, которые, исходя из имеющейся информации на момент подготовки документации и заключения контракта объективно не могли быть учтены в технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

По смыслу приведенных норм в случае, если заказчик согласовал действия по проведению дополнительных работ, необходимых для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их результата, последующий отказ в оплате дополнительных работ создавал бы возможности для извлечения им преимуществ из своего недобросовестного поведения, что противоречит пункту 4 статьи 1 ГК РФ.

Как указывает истец, с учетом выполнения дополнительных работ, применения современных материалов, вознаграждения генерального подрядчика за услуги по организации строительства 5,8 %, с учетом вознаграждения подрядчика за услуги по организации строительства 5,5 %, на основании подписанных дополнительных соглашений общая стоимость работ по спорным договорам составила 124 313 800 руб. 30 коп. 

Согласно правовой позиции, приведенной в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Претензий по качеству выполненных работ ответчиком в досудебном порядке не заявлялось, уведомление о недостатках выполненных работ в адрес подрядчика не направлялось. Какие-либо акты о выполнении работ с нарушением условий спорного контракта о качестве работ заказчиком и строительным контролем не оформлялись, в адрес истца не направлялись, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (пункт 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены договоры, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные сторонами без каких-либо возражений и замечаний по объему, качеству и стоимости выполненных работ.

Поскольку между сторонами возникли разногласия относительно объема, стоимости, качества выполненных работ, определением суда от 19.09.2024 производство по рассматриваемому делу приостановлено в связи с назначением судебной экспертизы, проведение которой поручено автономной некоммерческой организации «Московский областной центр судебных экспертиз».

Согласно заключению эксперта от 16.06.2025 № 456/2024 общая стоимость качественно выполненных и подтвержденных исполнительной документацией ООО «ФИО2 Спец Строй» дополнительных работ по договору генерального подряда от 02.08.2022 № 4/2022/М с учетом дополнительного соглашения от 13.10.2025 № 5 и от 31.10.2023 № 6 составляет без учета НДС 5 215 153 руб. 08 коп., с учетом НДС – 6 258 183 руб. 70 коп. При определении стоимости дополнительных работ не учитывались компенсации затрат на оплату услуг по сопровождению производства работ службами ОАО «РЖД» в размере 278 357 руб. 86 коп., а также вознаграждение генерального подрядчика в размере 3 158 875 руб. 81 коп. Выполнение дополнительных работ, отраженных в КС-2 № 21-28 от 15.10.2023 являлось необходимым и было оговорено сторонами по договору в связи уточнением объемов работ по рабочим чертежам и изменениями проектных решений в рабочей документации, а также выявленными ошибками в проектной документации. Иных дополнительных работ, фактическое выполнение которых может быть подтверждено исполнительной документацией экспертами не установлено.

Общая стоимость качественно выполненных и подтвержденных исполнительной документацией ООО «ФИО2 Спец Строй» дополнительных работ по договору генерального подряда от 02.08.2022 № 5/2022/М с учетом дополнительного соглашения от 13.10.2023 № 5 и от 31.10.2023 № 6 составляет без учета НДС 5 038 253 руб. 69 коп., с учетом НДС 6 045 904 руб. 43 коп. При определении стоимости дополнительных работ не учитывалось вознаграждение генерального подрядчика в размере 2 879 158 руб. 16 коп. Выполнение дополнительных работ, отраженных в КС-2 № 8-10 от 15.10.2023 являлось необходимым и было оговорено сторонами по договору в связи уточнением объемов работ по рабочим чертежам и изменениями проектных решений в рабочей документации, а также выявленными ошибками в проектной документации. Иных дополнительных работ, фактическое выполнение которых может быть подтверждено исполнительной документацией экспертами не установлено. Дополнительные работы по договорам № 4/2022/М и № 5/2022/М от 02.08.2022 оплачены заказчиком. Исполнительная документация на заявленные в исковом заявлении дополнительные работы на сумму 11 282 527 руб. 35 коп. сторонами по гражданскому делу не предоставлена, в ходе осмотра эксперту стороны пояснили, что исполнительная документация оформленная в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» отсутствует. В ходе проведения осмотра стороны не указывали на физические места выполнения дополнительных работ. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 12 постановления от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» (далее – Постановление № 23) разъяснил, что согласно положениям частей 4 и 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами.

Заключение судебной экспертизы, выполненное АНО «Московский областной центр судебных экспертиз», оценено судом первой инстанции по правилам статьи 64, частей 1 – 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами, процедура назначения и проведения экспертизы соблюдена, заключение эксперта соответствует предъявляемым законом требованиям (статья 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Эксперт, являющийся квалифицированным специалистом в исследуемой области, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо неверного заключения, экспертом даны квалифицированные пояснения по вопросам, поставленным на разрешение. Нарушения экспертом основополагающих методических и нормативных требований при производстве исследования, сторонами не представлены.

При проведении экспертизы эксперт руководствовался соответствующими нормативными документами, методическими и специализированными источниками. В распоряжении эксперта находились материалы арбитражного дела, а также документы, необходимые для исследования.

Заключение эксперта содержит ответы на поставленные перед ним вопросы. Данные ответы понятны, не противоречивы, следуют из проведенного исследования, ответы носят четкий и утвердительный характер, подтверждены фактическими данными, в связи с чем, у суда отсутствовали основания сомневаться в полноте, обоснованности и объективности выводов судебной экспертизы.

Выводы эксперта сторонами надлежащим образом не опровергнуты. При таких обстоятельствах суд считает заключение судебной экспертизы надлежащими доказательством по делу. Ходатайство в порядке статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от сторон не поступало.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе результаты судебной экспертизы, суд первой инстанции приходит к выводу, что фактически выполненный подрядчиком объем работы полностью оплачен заказчиком, какие-либо дополнительные работы, не оплаченные ответчиком, истцом не выполнялись. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Доказательств выполнения работ по спорным договорам на заявленную сумму в материалы дела не представлено.

Суд первой инстанции также считает необходимым отметить, что согласно пунктам 4.2 спорных договоров стоимость работ включает все затраты подрядчика на производство работ из материалов подрядчика, расходы на работу техники, конструкции, коммуникации и оснастки, работы сторонних организаций, вовлекаемых в процесс выполнения работ, лабораторные и иные виды испытаний, командировочные и транспортные расходы, гарантийные обязательства, налоговые отчисления и иные затраты, касающиеся подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору, является твёрдой и изменению не подлежит.

В соответствии с пунктом 4.3 спорных договоров если в ходе выполнения работ по вине подрядчика, по независящим от заказчика причинам, потребовались дополнительные затраты материалов либо замена на более дорогостоящие материалы, механизмы, или потребовался больший объём работ, чем предусмотрено договором, то такие затраты и работы выполняются без увеличения стоимости договора.

Более того, согласно заключению эксперта исполнительная документация на заявленные в исковом заявлении дополнительные работы на сумму 11 282 527 руб. 35 коп. сторонами по гражданскому делу не предоставлена, в ходе осмотра эксперту стороны пояснили, что исполнительная документация оформленная в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» отсутствует. В ходе проведения осмотра стороны не указывали на физические места выполнения дополнительных работ.

С учетом изложенного суд первой инстанции приходит к выводу об отсутствии процессуальных оснований для удовлетворения исковых требований. В результате чего, суд отказывает в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Более того, поскольку в удовлетворении основного требования истцу отказано, также не подлежит удовлетворению требование истца о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя.

Расходы на проведение судебной экспертизы в общей сумме 250 000 руб. суд распределяет между сторонами следующим образом.

Материалами дела подтверждается, что истец полностью оплатил стоимость судебной экспертизы в сумме 250 000 руб., в подтверждение чего, в материалы дела представлено платежное поручение от 18.10.2024 № 321.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Исходя из содержания названных норм права, понесенные расходы в связи с оплатой экспертизы подлежат распределению между сторонами в зависимости от результатов рассмотрения первоначально заявленного требования. С изложенного, расходы по оплате судебной экспертизы относятся на ответчика в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению между сторонами с учетом положений части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 17, 65, 71, 101, 110, 112, 121, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в срок, не превышающий месяца с момента его вынесения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.В. Смагина