61/2022-179111(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-8198/2022

г. Ярославль

26 декабря 2022 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Шадриновой Л.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление регионального фонда содействия  капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "СК ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "СК ИНЖИНИРИНГ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение двух месяцев, начиная с 01.05.2023 года  

выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в период гарантийного срока и  

содержащихся в акте от 06.08.2021, 12.12.2022 в соответствии с локальным сметным  

расчетом № б/н, а именно выполнить: 

-отбивка штукатурки с поверхности балконных плит - 4,2 м2;  -очистка вручную поверхности балконных плит от краски - 335,6 м2;  

-высококачественная штукатурка балконных плит - 16,42 м2;  -шпаклевка плит балконных - 352,02 м2;  

-огрунтовка плит балконов - 352,02 м2; -покраска плит балконов - 352,02 м2; -ремонт штукатурки опорных столбов и колонн - 5,4 м2; 

-очистка поверхностей опорных столбов и колонн от краски - 84,24 м2;  -шпаклевка колонн с земли/лесов - 79,69 м2;  

-огрунтовка колонн/столбов - 79,69 м2; -покраска столбов/колонн - 79,69 м2; -очистка краски с поверхности крылец - 14,2 м2; -отбивка штукатурки, стяжка с поверхности ступеней - 2,75 м2; 

-устройство стяжки ступеней толщиной до 40 мм в опалубке;  -шпаклевка поверхностей крылец - 14,2 м2;  

-покраска поверхностей крылец - 14,2 м2; -установка лесов высотой до 16 м2 - 524 м2; 

-работа автовышки - 96 часов; -вывоз мусора. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СК ИНЖИНИРИНГ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу регионального фонда содействия капитальному  ремонту многоквартирных домов Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) неустойку в сумме 3 000 руб. за каждый день неисполнения решения  Арбитражного суда Ярославской области, начиная с тридцать первого календарного дня с  даты окончания срока исполнения обязательств по договору № 01смр/2019 от 08.05.2019 за  каждый день просрочки по день фактического исполнения судебного акта.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СК ИНЖИНИРИНГ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу регионального фонда содействия капитальному  ремонту многоквартирных домов Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 6 000 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской  области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного  документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Л.А. Шадринова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 04.02.2022 5:53:44

Кому выдана Шадринова Любовь Александровна