Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-650/2019

город Горно-Алтайск

07 ноября 2019 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Окуневой И. В., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Агентство  по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, ул. Алтайская, д. 22, пом. 2, г. Горно-Алтайск, 

<

...>) к казенному учреждению Республики Алтай "Управление капитального  строительства Республики Алтай" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чорос- ФИО2, д. 27, г. Горно-Алтайск, 

<

...>), при участии в деле в  качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора - акционерного общества "Горнолыжный комплекс "Манжерок" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Ленинская, д. 18, с. Манжерок, Майминский  район, Республика Алтай), с исковыми требованиями:  

1. Обязать Казенное учреждение Управление капитального строительства  Республики Алтай обеспечить объект строительства: «Строительство объекта  «Механическая система оснежения «Горнолыжного комплекса «Манжерок»  электроэнергией по постоянной схеме:  

- подать заявление в АО «Горнолыжный комплекс «Манжерок» о продлении  сроков технических условий № 22/02-18 до 01.04.2020,  

- подать заявку и получить акт о сдаче трансформаторной подстанции объекта в  Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору  (Сибирское Управление Ростехнадзор);  

- подать заявку в публичное акционерное общество «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Сибири» - «Горно-Алтайские электрические  сети» и получить Акт на подключение электроэнергии на объекте по постоянной схеме  

2. Обязать заказчика по государственному контракту № Ф.2017.327142 от 04  августа 2017 Казанное учреждение Управление капитального строительства  Республики Алтай заключить дополнительное соглашение о продлении сроков  окончания работ по контракту - сроком до 01.04.2020,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

частично удовлетворить исковые требования. 

Обязать казенное учреждение Республики Алтай "Управление капитального  строительства Республики Алтай" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чорос- ФИО2, д. 27, г. Горно-Алтайск, 

<

...>) обеспечить объект  строительства: «Строительство объекта «Механическая система оснежения  «Горнолыжного комплекса «Манжерок» электроэнергией по постоянной схеме:  

- подать заявление в АО «Горнолыжный комплекс «Манжерок» о продлении  сроков технических условий № 22/02-18 до 01.04.2020  

- подать заявку и получить акт о сдаче трансформаторной подстанции объекта в  Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору  (Сибирское Управление Ростехнадзор);  

подать заявку в публичное акционерное общество «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Сибири» - «Горно-Алтайские электрические  сети» и получить акт на подключение электроэнергии на объекте по постоянной схеме.  

Обязать заказчика по государственному контракту № Ф.2017.327142 от 04  августа 2017 Казанное учреждение Управление капитального строительства  Республики Алтай заключить дополнительное соглашение о продлении сроков  окончания работ по контракту - сроком до 01.04.2020 в следующей редакции:  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к контракту № Ф.2017.327142 на выполнение работ по строительству объекта:  «Строительство объекта "Механическая система оснежения "Горнолыжного комплекса  

"Манжерок"» от 04" августа 2017 ИКЗ 172041117522204110100100230014299414 

Казенное учреждение Республики Алтай «Управление капитального  строительства Республики Алтай», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной  стороны, и акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному  кредитованию Республики Алтай", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой  стороны, именуемые вместе «Стороны», заключают настоящее Соглашение о  нижеследующем:  

1.1. Внести изменения в п. 4.1 Раздела 4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  

РАБОТ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Государственного контракта № №  

Ф.2017.327142 на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство объекта  

"Механическая система оснежения "Горнолыжного комплекса "Манжерок"» от 04"  

августа 2017 и изложить его в следующей редакции: «4.1 Срок выполнения работ: 

Подрядчик обязуется начать работы немедленно с момента исполнения  

обязанности Заказчика по подключению электроэнергии по постоянной схеме насосной  

станции PS200 и выполнить работу по строительству объекта: «Строительство объекта  

"Механическая система оснежения " Горнолыжного комплекса "Манжерок"» до  

01.04.2020» 

1.4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Государственного  

контракта № Ф.2017.327142 от 04.08.2017. 2. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК: Казенное учреждение Республики Алтай «Управление  

капитального строительства Республики Алтай» Адрес: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-ФИО2, д. 27 ИНН 

<

***> КПП 041101001 ОКТМО 84701000001 ОГРН 

<

***> 

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному  

кредитованию Республики Алтай" ИНН: 

<

***> КПП: 041101001 Местоположение: 649006, Российская Федерация, 

<

...>, ОКАТО: 84401000000 Почтовый адрес: 649006, Российская Федерация, Респ. Алтай, г. Горно-Алтайск» Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований. 

Взыскать с казенного учреждения Республики Алтай "Управление капитального  

строительства Республики Алтай" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чорос- 

ФИО2, д. 27, г. Горно-Алтайск, 

<

...>) в доход федерального  

бюджета 12 000 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного  текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) с подачей  жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.  

Судья И.В. Окунева