Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-38335/2021

19 августа 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  09 августа 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  19 августа 2021 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Орловой Е.А.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Взморье" (адрес: 188800, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Пограничная, д. 4, пом. 1-Н, оф. 1, эт. 1, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" (адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, ОГРН:  

<

***>);

об обязании

 

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 01.07.2021;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 21.11.2019; 

 

установил:

Истец - общество с ограниченной ответственностью "Взморье", обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику - публичному акционерному обществу "Россети Ленэнерго" с требованием об обязании в течении 30 дней с момента вступления решения в силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя - ЭПУ стройплощадки для размещения лесозащитного оборудования, вместе с узлом учета потребленной электроэнергии, в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями согласно условиям договора № ОД-ВЭС-12244-19/19817-Э-19 от 07.06.2019 и Приложения № 1 к нему, а также о взыскании 30.266 руб. 26 коп. неустойки за период с 08.06.2020 по 28.04.2021, 7.000 руб. за каждую неделю неисполнения судебного акта по настоящему делу, начисляемые с момента истечения семи дней с даты вступления решения в законную силу и до момента фактического исполнения, 8.000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Истец поддержал заявленные исковые требования.

Ответчик против удовлетворения иска возражал, поддержал доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление, ходатайствовал о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, ответчика, арбитражный суд установил, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Арбитражный суд установил:

07.06.2019 года между ПАО «Россетти Ленэнерго» (далее - Ответчик) и ООО «Взморье» (далее-Истец) заключен договор № ОД-ВЭС-12244-19/19817-Э-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения объекта «ЭПУ стройплощадки для размещения лесозащитного оборудования», расположенного на лесном участке по адресу: Ленинградская область, выборгский район, Северо-Западное лесничество, Пограничное участковое лесничество, квартал 220, выделы 1, 2 (ч), 3 (ч.) 9,11(ч.), 15 (ч.), 16,18 (ч.), 28 (ч.), 34-36.

В соответствии с условиями данного договора, Ответчик принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя - ЭПУ стройплощадки для размещения лесозащитного оборудования, вместе с узлом учета потребленной электроэнергии, в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями, которые Заявитель создаст от точки присоединения, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств -150 кВт; 

категория надежности - 3;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств -отсутствует.

Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению не превышает 12 месяцев со дня заключения данного договора.

Указанный срок истек 07.06.2020 года , однако, Ответчик не исполняет принятых на себя обязательств по технологическому присоединению объекта    к электрическим сетям до настоящего времени. В свою очередь, истцом обязательства по договору исполнены, что подтверждается актом о выполнении технических условий от 13.08.2019 года.

В соответствии с положениями ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с п. 1 ст. 26 ФЗ от 26.03.2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 года утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно абз. 2 п. 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу п. 16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Материалами дела подтверждено, что обязательства по Договору в установленный срок ответчик не исполнил.

Однако, суд соглашается с позицией ответчика об объективной невозможностью завершить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя в течении 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

Суд полагает достаточным установить срок осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя в течении 60 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

 

Ввиду неисполнения ответчиком своих обязательств по Договору истцом заявлено требование о взыскании 30.266 руб. 46 коп. неустойки за период просрочки с 08.06.2020 по 28.04.2021.

Согласно пункту 17 раздела V Договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от общего размера платы за каждый день просрочки.

Кроме того истцом заявлено требование о взыскании с ответчика денежных средств в размере 7.000 руб. за каждую неделю неисполнения решения суда, начиная с момента истечения семи календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу и до даты его фактического исполнения, в порядке статьи 308.3 ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Ответчиком заявлено о снижении размера неустойки, так как считает его завышенным. 

Поскольку ответчик нарушил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению суд, учитывая принципы справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, полагает возможным удовлетворить требование истца о присуждении судебной неустойки в размере 5.000 руб. за каждую неделю неисполнения судебного акта по настоящему делу, начисляемые с момента истечения семи дней с даты вступления его в законную силу и до момента фактического исполнения. 

Сумма неустойки в размере 5.000 руб., по мнению суда, не нарушит баланс между применяемой к ответчику мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба истца, в достаточной мере компенсирует истцу неблагоприятные последствия.

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки суд отказывает. 

При принятии решения суд разрешает вопрос о распределении судебных расходов по делу.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Обязать публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" в течении 60 дней с момента вступления решения в силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью "Взморье" - ЭПУ стройплощадки для размещения лесозащитного оборудования, вместе с узлом учета потребленной электроэнергии, в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями согласно условиям договора № ОД-ВЭС-12244-19/19817-Э-19 от 07.06.2019 и Приложения № 1 к нему.

Взыскать с публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Взморье" 30.266 руб. 26 коп. неустойки за период с 08.06.2020 по 28.04.2021, 8.000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Взморье" 5.000 руб. за каждую неделю неисполнения судебного акта по настоящему делу, начисляемые с момента истечения семи дней с даты вступления решения в законную силу и до момента фактического исполнения.

В остальной части заявления о взыскании судебной неустойки отказать.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                                                    Орлова Е.А.