АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

20 октября 2025 года

Дело № А33-23104/2025

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 1 (одного) месяца со дня вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.12972.24 от «19» ноября 2024г., выполнив предусмотренные пунктом 10.1. Технических условий №8000641329 следующие организационные мероприятия:

- обеспечение возможности действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объектов Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами Заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке на Объекте: "Складское здание/помещение", расположен (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, городское поселение поселок Емельяново, 

<

...> земельный участок 177, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010106:297;

- осуществить мероприятия выполнения требований по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" для электроснабжения объекта Заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- осуществить строительство ЛЭП-10(6) кВ от точки, указанной в пункте №7 ТУ № 8000641329, до проектируемой ТП 10(6) кВ (п.10.2.3.), протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 10(6) кВ Тип и место установки разъединителя определить проектом;

- осуществить строительство ТП 10(6) кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов определить проектом;

- осуществить строительство ЛЭП 0,4 кВ от новой ТП до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами Заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стоворот" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск неустойку за неисполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.2400.12972.24 от «19» ноября 2024г. в сумме 28 618,14  руб. за период с 27.05.2025 по 20.10.2025 (77 872,49  руб. * 0,25 % * 147 дней)); с 21.10.2025 – неустойку по день фактического исполнения обязательств из расчета 0,25% общего размера платы (77 872,49 руб.) за каждый день просрочки, а также 60 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, несение которых подтверждается платежным поручением от 08.08.2025 №2360.

В случае неисполнения решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стоворот" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск 2 500 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

Во взыскании судебной неустойки в остальной сумме отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО1