АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А47-11081/2020

г. Оренбург

02 ноября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена       26 октября 2023 года

В полном объеме решение изготовлено        02 ноября 2023 года

 

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Лебедянцевой А.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Специализированный застройщик «Управление капитального строительства», г. Оренбург, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> 

к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Вектор», пос. Светлый, Сакмарский район, Оренбургская область, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> 

третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора:

 1. общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Союз справедливости и Социального Равенства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

 2. ФИО2, 

об обязании устранить недостатки работ

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии со ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе путем размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

 

Акционерное общество "Специализированный застройщик "Управление капитального строительства" обратилось в арбитражный суд с требованием об обязании общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Вектор" за свой счет устранить недостатки работ, выполненных по договору №137 от 30 августа 2013 г. в отношении многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, в объемах и сроках, согласно Дефектной ведомости от 24.08.2020 г. объемов работ ж/д №2/1 по ул. Высотной г. Оренбург (стр. №16 в 19 мкр. СВЖР г. Оренбурга), утвержденной Генеральным директором АО "СЗ "УКС".

Ко дню судебного заседания истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просит обязать ООО «ПСК Вектор» устранить дефекты и повреждения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> д 2/1, указанные в таблице № 1, № 3, № 4 на страницах 11-17 заключения эксперта № 037-АНО-2022 от 27.02.2023, выполненного АНО «Центр судебных экспертиз» в рамках гражданского дела по иску ФИО2 № 2-205/2021, рассматриваемое Ленинским районным судом города Оренбурга.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец  вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

В связи с изложенным, суд в порядке ст.ст. 49, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  удовлетворяет ходатайство истца об уточнении исковых требований.

Стороны не заявили ходатайства о необходимости представления дополнительных доказательств. При таких обстоятельствах суд рассматривает дело, исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом положений ст. 65 АПК РФ.

При рассмотрении дела судом установлены следующие обстоятельства.

Между Открытым акционерным обществом «Управление капитального строительства», с 12.12.2018г. переименованным в Акционерное общество «Специализированный застройщик «Управление капитального строительства», ИНН 

<

***> (далее - АО «СЗ УКС», Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие «Вектор», ИНН 

<

***>, заключен договор №137 от 30.08.2013г. (далее - Договор).

Согласно условиям договора №40 об уступке прав и переводе обязательств от 01.04.2014г., с согласия Истца, права и обязательства ООО «Строительное предприятие «Вектор» по договору №137 от 30.08.2013г. перешли к ООО «ПСК Вектор» ИНН 

<

***> (далее - Ответчик).

В соответствии с п. 1.1 заключенного Договора, Ответчик - Подрядчик по Договору обязуется по заданию Истца - Заказчика по Договору на свой риск, собственными средствами и материалами, с привлечением соисполнителей  (субподрядчиков) в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования и со сметой, определяющей цену работ, выполнить полный объем работ по строительству 14-ти этажный жилой дом с офисными помещениями на первом этаже в 19 микрорайоне СВЖР в г. Оренбурге (далее - Объект).

Согласно п. 3.1. Договора, окончание работ - 3 квартал 2015 года.

В соответствии с п. 8.1 договора, после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных договором, осуществляется приемка работ в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания акта приемки работ.

Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации г. Оренбурга 03.09.2015г. было выдано Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №56-301000-350-2015.

В соответствии с п. 9.1 Договора, гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и на выполненные работы, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав Объекта, устанавливается 5 (пять) лет, со дня подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав Объекта, устанавливается 3 (три) года со дня подписания сторонами акт приемки законченного строительством Объекта (п. 9.2 Договора).

Истце указал, что гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и на выполненные Ответчиком работы начал течь с 03.09.2015г., на следующий день после подписания Сторонами акт приемки готового Объекта.

На основании распоряжения Департамента градостроительства и земельных отношений администрации г. Оренбурга от 21.09.2015г. №5199-р «О присвоении адреса...» Объекту - многоквартирному жилому дому № 16 по генплану в 19 мкр. СВЖР г. Оренбурга присвоен адрес: РФ, 

<

...>.

Содержание указанного многоквартирного дома осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СССР» (далее - ООО УК «СССР») на основании заключенного договора с жильцами дома.

В ходе эксплуатации жилого дома ООО УК «СССР» были выявлены строительные недостатки, а именно:

- протечка грунтовых вод и дождевых осадков в помещение подвала;

- на фасаде жилого дома имеется разрушение, растрескивание и выдавливание облицовочного кирпича, создающие угрозу здоровью и жизни людей;

- образовалась трещина в лифтовом холле 1 подъезда.

О выявлении указанных недостатков ООО УК «СССР» проинформировала АО «СЗ УКС» письмом от 21.02.2020г. №76.

Указанные обращения были направлены АО «СЗ УКС» в адрес Подрядчика (ООО «ПСК Вектор») письмами от 16.09.2019г. №1150; повторно письмом от 21.10.2019г. №1342; повторно письмом от 03.03.2020г. №401.

27.03.2020г. с участием представителя Управляющей организации, Подрядчика, в лице инженера строительного контроля - ФИО3, Застройщика был проведен осмотр и обследования технического подвала указанного дома, о чем составлен и подписан сторонами соответствующий Акт от 27.03.2020. 

30.06.2020 от членов совета МДК, расположенного по адресу: 

<

...>, в адрес АО «Сз УКС» поступило Требование об устранении строительных недостатков, указанные в Акте от 27.03.2020г., а так же:

- произвести замену разрушенного бордюрного камня, облицовочного кирпича на уровне первого-третьего этажа и восстановить асфальтобетонное покрытие.

В соответствии с п. 6.2 Договора, Подрядчик обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

Согласно п. 9.6 договора, устранение дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации Объекта, осуществляется за счет средств Подрядчика и в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

В рамках досудебного урегулирования спора АО «СЗ УКС» направило в адрес Ответчика претензию (исх. №680 от 17.04.2020г.) с требованием, в рамках досудебного урегулирования спора, принять исчерпывающие меры по устранению строительных недостатков, выявленные при совместном осмотре с участием представителя Ответчика до 15.05.2020г.

Между тем по состоянию на 26 августа 2020г. ответ от Ответчика в адрес АО «СЗ УКС» не поступал. Результаты выполненных гарантийных обязательств по Договору не представлены.

Законные требование Истца Ответчик не выполнил.

Определением арбитражного суда от 28.04.2021 производство по настоящему дела приостанавливалось до рассмотрения Ленинским районным судом города Оренбурга дела № 2-205/2021. В рамках денного дела судом рассматривались требования ФИО2, жительницы МКД, об устранении тех же строительных недостатков, которые являются предметом настоящего спора. В рамках данного дела проводилась судебная строительная экспертиза в целях установления причин дефектов (строительные или эксплуатационные), способ их устранения.

Апелляционным определением Оренбургского областного суда от 13.04.2023 Решение Ленинского районного суда города Оренбурга от 12.11.2021 отменено, принято новое решение, исковые требования ФИО2 удовлетворены.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

Согласно дополнительному заключению экспертов АНО «Центр судебных экспертиз» Соболя А.Л., ФИО4 № 037-АНО-2022 от 27 февраля 2023 года, по результатам проведенного исследования были составлены ведомости видов и объемов работ.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

Отношения между истцом и ответчиком регулируются главой 37 ГК РФ.

Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с частью 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (часть 2 статьи 722 ГК РФ).

В соответствии со статьей 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Положения статьи 755 ГК РФ предусматривают, что подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Предельный срок обнаружения недостатков составляет пять лет (статья 756 ГК РФ). Действие указанного срока распространяется на случаи, когда гарантийный срок не установлен либо его продолжительность меньше предельного срока, установленного статьей 756 ГК РФ. Таким образом, подрядчик несет ответственность по устранению недостатков, обнаруженных после истечения гарантийного срока, но в пределах 5 лет со дня передачи результатов работ.

Статья 723 ГК РФ предусматривает ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. В силу указанной нормы права в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 ГК РФ).

Истец уточнил исковые требования с учетом выводов эксперта и судебного акта по результатам рассмотрения дела судом общей юрисдикции.

Ответчик возражений не заявил, доказательств устранения недостатков не представил. 

Требования АО "СЗ "УКС" с учетом уточнения изложены следующим образом:

обязание ООО «ПСК Вектор» устранить дефекты и повреждения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> д 2/1, указанные в таблицах № 1, № 3, № 4:

Таблица №1. Ведомость видов и объемов работ по устранению «строительных недостатков», выявленных на объектах исследования

№

пп 1

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Нумерация выявленных дефектов и повреждений согласно Таблице №6 Заключения эксперта № 059-АНО-2021

1

2

3

4

5

Внутренние работы (помещение №2 Подъезд №2)

8

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных

100 м2

0,39762

п.6

(в объеме 0,06 м2) 3

9

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2

0,3976

10

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен

100 м2

0,3976

11

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2

0,3976

Раздел 2. Помещения подъездов №1 и №2

12

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2

0,008

п.11-18, 20-22

13

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен

100 м2

0,008

14

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100 м2

0,008

15

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм - перекрытие

100 м2

0,003

16

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску

100 м2

0,003

Парапетная часть балконов (1) фасад в осях 1*-4*; подъезд №1- в осях 4-6 эт. 3,4,6-11,13,14; в осях 6-7 эт. 2.3, 8, 13; подъезд №2 - в осях 1-2 эт. 2,5,7,10-14; в осях 3-4 эт. 3,8-9,11-14; в осях 4-6 эт.3-14; в осях 6-7 эт.2,3,7.9,10,12-14; 2) фасад в осях 4*-1*:4 подъезд №1 — в осях 6-4 эт. 10-14; подъезд №2 - в осях 2-1 эт. 6.7.9.11.13: в осях 6-5 эт. 10,11,13; в осях 5-4 эт.1 1-13.

18

Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным  шнуром: горизонтальных швов

100 м

3,628

П.29

Раздел 4. Территория многоквартирного жилого дома и детской площадки

36

Ремонт тротуаров из литого асфальта

100 м2

0,73

П.43-45

38

Разборка бортовых камней на бетонном основании

100 м

2,112

п.49-51

39

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

100 м

2,112

Придомовая территория многоквартирного жилого дома (проходы и подъезды) 5

 

Проходы (тротуары)

 

40

Ремонт асфальтобетонного покрытия пор покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 (Ремонт участков просадки асфальтобетонного покрытия в осях 1*-2 и 3*-4*)

100 м2

0,042

П.52

41

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 (Ремонт участков просадки асфальтобетонного покрытия - тротуар вдоль восточной границы участка (вблизи ТП и со стороны фасада в осях Б-Г)

100 м2

0,102

42

Исправление профиля оснований: щебёночных с добавлением нового материала (Сопутствующая работа к п.41-42)

1000 м2

0,0144

43

Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением (в осях 1*-2*, Б-Г, 4*3*, 3*-4*, тротуар вдоль восточной границы участка)

100 м2

0,119

П.53

45

Заделка выбоин в асфальтовых полах, толщиной слоя 40 мм, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1м2 (Ремонт спуска пандуса подъезда №2)

100 мест

0,01

П.57

46

Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засылкой поверхности песком с уплотнением (Заделка трещины на поверхности отмостки трансформаторной подстанции)

100 м

0,003

П.58

47

Ремонт бордюров с внутренней обшивкой (Устранение недостатка - отклонение бордюра по вертикали в осях 3*-4*, 4*-3*)

100 м

0,03

П.61

51

Заделка выбоин в асфальтовых полах толщиной слоя 40 мм, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2 (в осях 2*-1*)

100 мест

0,01

П.54

52

Ремонт тротуаров из литого асфальта (Устранение недостатка — нарушение целостности покрытия, в осях 2*-1*, В-А, 1*-2*).

100 м2

0,016

Проезды

 

54

Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением

100 м

0,223

П.53

 

В таблице №3 представлена «Ведомость видов и объемов работ по устранению «эксплуатационных недостатков», выявленных на объектах исследования».

 

№

пп 1

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Нумерация выявленных дефектов и повреждений согласно Таблице №6 Заключения эксперта № 059-АНО-2021

1

2

3

4

5

Раздел 2 помещения подъездов №1 и №2

17

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2

0,0016

П.190

Раздел 3 Входные группы офисных. помещений, подъездов, подвалов

Входные группы подвалов (подъезды №1, №2).

24

Ремонт ступеней: бетонных

100 шт

0,02

П.33

25

Устройство бетонной подготовки

100м3

0,002

П.34

Стены цокольного этажа в осях Б-В; 2*-1*,4*-3*, ГВ, 3*-4*

26

Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов-очистка плитки от грязи и высолов

100м2

0,315

п.35-42

27

Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток-прим.плитки фасадные (Частичная замена фасадной плитки)

100м2

0,082

28

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню И бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест дэ 5 м2 толщиной слоя ло 20 мм (Ремонт бетонных конструкций)

100м2

0,043

29

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен-плитки б/у

100м2

0,028

30

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен

100м2

0,054

31

Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из известняка и мрамора вручную-прим.плитки фасадные

100м2

0,41

32

Разборка тротуаров и дорожек из плит © их отноской и укладкой в штабель (Яастичная замена тротуарной плитки)

100м2

0,367

33

Устройство покрытий из тротугрной плитки количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.

10м2

0,124

34

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Участки вспучивания покрытия)

100м2

0,0108

35

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на | м2: 40 шт.- плитки б/у

10м2

0,25

Раздел 4. Территория многоквартирного жилого дома и. детской площадки

Придомовая территория многоквартирного жилого дома (проходы и проезды} *

Проходы (тротуары)

44

Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0.25 м2 (Ремонт спуска пандуса подъезда №1)

100 мест

0,01

П.56

48

Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах (прим. Ремонт поверхности бордюрного камня)

м шва

52,2

П.62

49

Разборка бортовых камней: на бетонном основании

100 м

0,435

П.63

50

Установка бортовых камней бетонных: при других видах открытий

100 м

0,435

53

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (Ремонт бетонной поверхности подпорной стены - тротуар вдоль восточной границы участка)

100 м2

0,012

П. 56

Проезды

55

Заделка швов цементным растворов существующих бордюрах (прим. Ремонт поверхности бордюрного камня)

М шва

7,2

П.62

56

Разборка бортовых камней бетоном основании

100 м

0,23

П.63

57

Установка бортовых камней бетонных: при других видах открытий

100 м

0,23

Таблица №4. Ведомость видов и объемов работ по устранению «строительных» и «строительных и эксплуатационных» недостатков, выявленных на объектах исследования.

 

№

пп 1

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Нумерация выявленных дефектов и повреждений согласно Таблице №6 Заключения эксперта № 059-АНО-2021

1

2

3

4

5

Раздел 1. Помещение подвала многоквартирного жилого лома

Наружные работы (устройство и гидроизоляция)

1

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков  отбойных-отмостка

100м3

0,177

п.4,5.7,8.9.10.59.60

2

Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов

100м3

2,723

3

Ремонт обмазочной изоляции фундаментов

100м2

3,026

4

Устройство оснований толщиной 10 см под  тротуары из кирпичного или известнякового щебня

100м2

1,268

5

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см

100м2

1,268

6

Планировка площадей: механизированным способом

1000м2

0,0948

7

Очистка водоочистных каналов

100м

0,3

Внутренние работы (помещение №2 подъезд №2)

8

Отбивка штукатуркой с поверхностей стен и потолков кирпичных

100м2

0,3976

П.7

(в объеме 39.7 м2)

9

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен

100м2

0,3976

10

Штукатурка поверхностей внутри здания  (в объеме 39.7 м2)" цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен

100м2

0,3976

11

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску

100м2

0,3976

Раздел 4. Территория многоквартирного жилого дома и детской площадки

Детская площадка

37

Размостка плитных тротуаров и порожек с разборкой- (плитки 6/у-23,3м2) у- (В том числе включены работы по планировке территории, досыпки основания, укладки плиточного покрытия)

100м2

0,235

П.46,47,48

 

Материалами дела подтвержден факт наличия недостатков в выполненных работах. 

Поскольку в период гарантийного срока стороны выявили недостатки выполненных работ по договору, то подрядчик обязан устранить их. 

Доказательств обратного не представлено.

Оценив представленные доказательства по правилам статей 67, 68 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом указанных конкретных обстоятельств данного дела, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для обязания подрядчика устранить выявленные в период гарантийного срока недостатки выполненных работ по договору. 

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Государственная пошлина по делу в сумме 6 000 руб. 00 коп. в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся в полном объеме на ответчика и взыскивается в пользу истца.

Судом установлено, что при изготовлении резолютивной части решения допущена описка во вводной части, ошибочно указано на рассмотрение ходатайства о возобновлении производства по делу. При изготовлении решения в полном объеме в порядке ст. 179 АПК РФ суд считает необходимым устранить допущенную описку.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Вектор» устранить дефекты и повреждения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, указанные в таблице № 1, № 3, № 4 на страницах 11-17 заключения эксперта № 037-АНО-2022 от 27.02.2023, выполненного АНО "Центр судебных экспертиз".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Вектор» в пользу акционерного общества «Специализированный застройщик «Управление капитального строительства» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке ст.ст. 319, 320 АПК РФ.

 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

 

Судья                                                                        А.А. Лебедянцева