Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-9637/2018

г. Хабаровск

16 июля 2018 года

Резолютивная  часть  решения  объявлена  11 июля 2018  

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в заседании суда дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 304790221200010, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Гортранс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, местонахождения: 680054, 

<

...>)

о  взыскании 929 175 рублей 00 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО3, действующего по доверенности от финансового управляющего, решение от 22.09.2017 по делу № А16-1799/2016,

от ответчика –    ФИО4, действующего по доверенности от 10.07.2018 б/н.

 

Индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Гортранс» о  взыскании 929 175 руб., составляющих основной долг в размере 650 000 руб., неустойку в размере  279 175 руб.

Ответчик, как следует из отзыва на исковое заявление, объяснений представителя в судебном заседании, исковые требования не признал, указал на оплату основного долга в размере 650 000 руб.

На основании пункта 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с учетом пункта 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65, суд завершил предварительное заседание и перешел к судебному разбирательству дела.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд 

УСТАНОВИЛ:

15.06.2015 между обществом с ограниченной ответственностью ООО «Гортранс», Субподрядчик, и индивидуальным предпринимателем ФИО2, Субсубподрядчик, ИП ФИО2, заключен договор субподряда № ЛМ-67/2015, в соответствии с которым Субподрядчик поручает, а Субсубподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению собственными силами работ указанных в п. 1.3. настоящего договора в соответствии с рабочей проектной документацией (далее - проектная документация), разработанной ЗАО «Электросетьпроекг», в целях строительства и ввода в эксплуатацию «ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС - Архара».

Настоящий договор заключается на основании договора № 08/ПР/14-121331 от 25.12.2014  на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой МТРиО по титулу «ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС -Архара» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока, заключенный между ОАО «ТЭК Мосэнерго» (ОГРН: 

<

***>) и ООО СК «ЛЭП-монтаж», в интересах Заказчика (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Пунктом 1.3. договора субподряда предусмотрено, что Субподрядчик обязуется завершить работы и сдать выполненный объем работ в установленном порядке Субподрядчику и Заказчику (ОАО ФСК ЕЭС) и выполнить следующий перечень работ:

1.3.1. Вырубка просеки, включающая в себя: валку деревьев и кустарника, трелевку, раскряжевку, выкорчевывание пней, либо срез пней под уровень земли), складирование древесины.

1.3.2. Очистка просеки от порубочных остатков.

1.3.3. Утилизация порубочных остатков.

1.3.4. Создание противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 1,4 м.

В силу пункта 3.1. договора стоимость всех Работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, является твердой, ориентирована на подготовку просеки к сдаче рабочей комиссии (Субподрядчику, Генподрядчику, Заказчику) и составляет 67 796 руб. 60 коп., без НДС за 1 (один) га.

В соответствии с пунктом 3.4. договора Субподрядчик перечисляет Субсубподрядчику аванс в размере 100 000 рублей без НДС в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего договора.

Оплата выполненных работ по настоящему договору производится Субподрядчиком за фактически выполненные работы в размере 95 (девяносто пять) процентов от стоимости работ указанных в актах сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) за минусом уплаченного Субсубподрядчику аванса в размере, предусмотренном п. 3.4. настоящего Договора, в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с момента подписания Субподрядчиком Актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на основании счета с приложением счет-фактуры.

Субподрядчик формирует гарантийную сумму в размере 5 % (пяти процентов) от стоимости работ выполненных но настоящему договору путем ее удержания до момента сдачи просеки Генподрядчику и Заказчику (пункт 3.5. договора).

ИП ФИО2 выполнил работы на сумму в размере 650 000 руб., что подтверждается актом от 31.12.2015 № 1.

ООО «Гортранс»  оплатило ИП ФИО2 выполненные работы на сумму 650 000 руб., что подтверждается платежными поручениями от 02.07.2015 № 47, от 04.08.2015 № 81, от 14.08.2015 № 85, от 27.11.2015 № 176 и от 18.11.2015  № 167.

ИП ФИО2 направил ООО «Гортранс» претензию от 24.12.2017 б/н с требованием предоставить информацию об оплате основного долга  по договору субподряда от 15.06.2015 № ЛМ-67/2015.

Рассматриваемые отношения основаны на обязательствах подряда.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять ее результат и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что  если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Поскольку выполненные работы на сумму 650 000 руб. оплачены полностью, исковое требование о взыскании основного долга в размере 650 000 руб. не  подлежит удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 279 175 руб.  В исковом заявлении указано, что оплата основного долга должна была быть произведена до 05.02.2016.

В силу статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 5.1. договора за нарушение договорных обязательств субподрядчик уплачивает субсубподрядчику за задержку расчетов за выполненные работы неустойку в размере 0,05% стоимости подлежащих оплате работ, за каждый день просрочки оплаты.

Поскольку  общество с ограниченной ответственностью «Гортранс» оплатило основной долг в размере 650 000 руб., исковое требование о взыскании неустойки в размере 279 175 руб. не подлежит удовлетворению.

Судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 21 584 руб. подлежат отнесению на ответчика в доход федерального бюджета на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом того, что истцу была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  арбитражный суд 

Р Е Ш И Л

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 304790221200010, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 21 584 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

Судья                                                                                           Л.А. Збарацкая