113/2017-30912(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-10300/2016

г. Петрозаводск

01 июня 2017 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить. 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Карельская строительно- монтажная компания» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение  шестидесяти календарных дней с момента вступления решения в законную  силу устранить недостатки выполненных работ по контракту   № 0106300007712000033-0226240-01 от 04.12.2012 на выполнение работ по  строительству многоквартирного жилого дома № 26А по ул. Максима Горького  в г. Кондопоге», а именно:  

1). Восстановить работоспособность системы водоотведения с квартир № 1,2,3  и 4:  

- вскрыть канализационную трубу от прочистки около дверей квартиры № 3  до прочистки около лестницы;  

- демонтировать поврежденные участки канализационной трубы; 

- устроить канал для канализационной трубы с бетонным армированным  

основанием не менее 150 мм (утеплитель под трубой удалить) и шириной 300  мм;  

- восстановить трубу с обеспечением проектных уклонов и зафиксировать ее  положение подливкой под нее цементного раствора;  

- закрыть канал съемными плитами и восстановить плиточный пол. 

2). В соответствии с проектом устранить просадку железобетонной плиты и  пола, приведшую к образованию трещин (щелей) в сопряжениях перегородок с  потолком, другими перегородками и стенами.  

После устранения просадки произвести работы: 

2.1). в квартирах № 5,6,7 правой стороны 1 этажа дома щели над  перегородками заделать монтажной пеной, затереть отделочным  

составом. 

Последствия указанных работ устранить путем проведения отделочных работ в  соответствии с проектом.  

2.2).в квартирах № 1,2,3 и 4 левой стороны 1 этажа дома:  

- линолеум с пола снять;  

- произвести выравнивание основания пола равнителем;  - произвести ремонт дверей;  

- заделать горизонтальные щели над перегородками монтажной пеной,  оштукатурить цементным раствором толщиной 10 мм;  

- заделать вертикальные щели цементным раствором;  

- межквартирную перегородку между квартирами № 2 и № 3 дополнительно  обшить с двух сторон листом ГКЛ толщиной 12 мм;  

- произвести восстановление отделочных покрытий в соответствии с проектом.  3). Восстановить разрушенный участок облицовки цоколя и просевшей  отмостки дома в соответствии с проектом:  

- произвести бетонирование, просевших участков отмостки; 

- снять отслаивающиеся облицовочные плитки цоколя;  - усилить крепление утеплителя на цоколе;  

- установить новый сливной лист из оцинкованного железа с заводом его под  сайдинг;  

- облицовать цоколь листовыми материалами. 

4). В квартире № 15 устранить последствия залития путем восстановления  отделочных покрытий согласно проекту.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Карельская  строительно-монтажная компания» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6 000 руб.  

4. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  

полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  

(191015, 

<

...>); 

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  

в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  

предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  

срока подачи апелляционной жалобы. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  

апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  

Республики Карелия. 

Судья Дружинина С.И.