АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ruE-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-24931/2022

26 апреля  2023 года

город Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 19 апреля 2023 года.

Решение изготовлено в полном объеме  26 апреля  2023 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гаврилюк М.П. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании делу по исковому заявлению:

ООО СЗ «ПРОГРЕСС» (ОГРН 

<

***>) 

к ГУП РК «Крымэнерго»  (ОГРН 

<

***>)

о понуждении и взыскании, 

в отсутствие явки в судебное заседание уполномоченных представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания.

установил:

ООО СЗ «ПРОГРЕСС» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ГУП РК «Крымэнерго» об обязании ответчика осуществить технологическое присоединение  и о взыскании неустойки в размере 166 778,51 руб. 

Ответчик в отзыве на исковое заявление просил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме,  в связи с  невыполнением истцом  мероприятий, необходимых для  осуществления ответчиком технологического присоединения.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что в соответствии с Договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 460/021-903-21 от 23.04.2021  РУП РК «Крымэнерго» ( далее - Сетевая организация, ответчик)  принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО СЗ «ПРОГРЕСС» (далее – Заявитель, истец) , а именно электроустановки земельного участка (кадастровый № 90:24:030401:6775), расположенного по адресу: 

<

...> (далее – Договор). 

Истец  является  собственником земельного участка, с кадастровым  № 90:24:030401:6775, расположенном по адресу: 

<

...>.

Технические условия, выданные 31.03.2021 истцу,   являются неотъемлемой частью Договора. 

Срок действия Технических условий для присоединения  к электрическим сетям  составляет два года  со дня заключения Договора  (пункт 4 Договора).

В соответствии с п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет  шесть месяцев со дня заключения настоящего договора. 

Как указано в п.  6.2 Договора сетевая организация обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления Заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения Технических условий Заявителей, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя.

В соответствии с  п. 6.3 Договора Сетевая организация обязуется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в пункте 6.2, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего Договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и направить (передать) их Заявителю.

Размер платы за технологическое присоединение установлен пунктом 10 Договора и составляет  182 271,60 руб. 

В соответствии с п. 11 Договора, заявитель (Истец) вносит плату за технологическое присоединение в следующем порядке: 15% от стоимости услуги в течение 15 дней со дня заключения договора (исполнение данного условия подтверждается платежным поручением № 68 от 11.05.2021 г.); 30% от стоимости услуги в течение 60 дней со дня заключения договора,  но не позже даты фактического присоединения. (исполнение данного условия подтверждается платежным поручением № 90 от 22.06.2021 г.).

В связи с невыполнением  ответчиком  в установленный срок своих обязательств по Договору, истец направил  ответчику претензию от 01.07.2022 в которой просил исполнить  взятые на себя обязательства по договору.

В ответе от 01.08.2022 г. № 484/29301 ответчик сообщил, что предприятие планирует выполнить свои обязательства в 4 квартале 2022 в связи с объемом работ, сроков подготовки и проведения закупочных процедур, поставки товарно-материальных ценностей.

17.11.2022 (исх. № 484/47091) в ответе на письмо истца  ответчик указал, что  дата планируемого выполнения  своих обязательств -  до 30.06.2023 г. 

Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в названном Кодексе. 

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроснабжении» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила). 

Согласно пункту 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. 

Из пункта 7 Правил № 861 следует, что технологическое присоединение – это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения потребителем электрической энергии через электроустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением актов о технологическом присоединении и разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, одним из этапов которого является выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором (подпункт "в" пункта 7 Правил № 861). 

Согласно пункту 16 Правил № 861 существенными условиями договор о технологическом присоединении являются, в том числе, перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, а также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора. 

В соответствии с пунктом 16.3 Правил № 861 обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению распределяются следующим образом:    - заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; 

- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. 

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. 

Заявителями, имеющими право в соответствии с п. 12.1 Правил право на заключение договора присоединения и осуществление присоединения независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения, являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, обратившиеся с заявлением в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств). 

Материалами дела подтверждается  внесение истцом платы  за технологическое присоединение по Договору  в размере 82 022,22 руб. 

По смыслу пункта 1 статьи 328 ГК РФ, пункта 16.3 Правил № 861 и Технических условий обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению являются встречными.

Заключение Договора  породило обязательственные отношения между сторонами, что дает им право требовать друг от друга исполнения обязательств, а также защищать это право в порядке, способами и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

Требование  истца об обязании ответчика исполнить свои обязательства по договору и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям по техническим условиям, заявлено в соответствии с абзацем 7 статьи 12 ГК РФ, предусматривающим защиту гражданских прав путем присуждения к исполнению обязанности в натуре. 

Исполнение обязанности в натуре означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося гражданско-правового обязательства. 

Довод ответчика о том, что истцом не были выполнены необходимые мероприятия,  суд признает несостоятельным ввиду следующего.

Пункты 11.1-11.5 Технических условий предусматривают обязанность истца (заявителя) и включают в себя установку вводно-распределительного устройства (вводно-учетное устройство) (ВРУ) 0,4 кВ с учетом категорийности. Проектируемое ВРУ-0,4 кВ подключить по ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения через шкаф учета. Требования к ЛЭП-0,4 кВ определить проектом. Разработать проектную (рабочую) документацию внешнего электроснабжения объекта, определить необходимость установки ограничителей напряжения, устройства контура заземления, (проект был передан Ответчику еще при получении Технических условий). Ввиду того, что неподключенное к электрическому напряжению ВРУ не может находиться на открытом земельном участке, с целью предотвращения ее хищения,  оно не несет никакой функции без подключения к ЛЭП, а установка его занимает непродолжительное время.  В связи с отсутствием со стороны ответчика конкретных действий по исполнения Договора, истец не устанавливал ВРУ на заведомо неопределенный к его подключению срок

Частью 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться, в частности, неустойкой.

Согласно части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Кроме того, в соответствии с п. 17 Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом, совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем, не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от её уплаты.

Истцом произведен расчет неустойки  за период просрочки с 23.10.2021 по 23.10.2022, размер которой составил 166 778,51 руб. 

Судом, представленный истцом расчет, проверен и признан арифметически верным.

Таким образом,  требование  истца о взыскании пени  обоснованно и подлежит удовлетворению в  размере   166 778,51 руб..   

В отношении требования  о начислении процентов  за пользование чужими денежными средствами, начисляемые за общую взысканную сумму в размере ставки ЦБ РФ за каждый день, начиная со дня, следующего за последним днем истечения 10-дневного срока со дня вступления в законную силу решения суда до его фактического исполнения  суд отмечает следующее.

Указать в решении, что, в случае несвоевременного исполнения судебного акта Ответчик должен будет уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, 

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с пунктом 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - постановление Пленума ВС РФ № 7) проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).

Приведенная норма предусматривает последствия неисполнения или просрочки исполнения денежного обязательства, в силу которых на должника возлагается обязанность по уплате кредитору процентов за пользование денежными средствами. При этом по смыслу данной нормы ее положения подлежат применению к любому денежному обязательству независимо от того, в материальных или процессуальных правоотношениях оно возникло.

В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 4 ст. 395 ГК  РФ ).

Обязательство  ответчика по  осуществлению  технологического  присоединения  к электрическим сетям  является неденежным. За неисполнение  указанного обязательства  договором предусмотрена ответственность в виде уплаты  пени.  По Договору у ответчика  не возникло денежного обязательства. Уплата денежных средств в пользу истца возложена  на ответчика  судебным решением, при этом, истцом не заявлено  ходатайство об установлении судебной  неустойки  в порядке ст. 308.3 ГК РФ. 

С учетом изложенного, суд отказывает  в  удовлетворении требования  об уплате процентов за несвоевременное исполнение судебного решения. 

Руководствуясь  статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

                                                        решил:

исковые требования удовлетворить частично.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» исполнить свои обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 460/021-903-21 от 23.04.2021г., для чего осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям ООО СЗ «ПРОГРЕСС» (далее – Заявитель, истец) , а именно электроустановки земельного участка (кадастровый № 90:24:030401:6775), расположенного по адресу: 

<

...> в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" в пользу ООО СЗ «ПРОГРЕСС» пеню в размере  166 778,51 руб., а также расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 12 003,00 руб.

В остальной части  требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы, если он не отменено и не изменено,  со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.                                                                     

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                                       М.П. Гаврилюк