Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-12439/2016

28 июня 2018 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 21 июня 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 28 июня 2018 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Щепелина Ю.П., при ведении протокола заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СМУ-1" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 626170, 

<

...>) к муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 628508, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) о взыскании 64 379 472 рублей 45 копеек,

при участии представителей:

от истца - ФИО2 по доверенности от 02.05.2018, ФИО3 по доверенности от 06.06.2018, ФИО4 по доверенности от 06.06.2018,

от ответчика - начальник ФИО5 на основании приказа Департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района от 20.07.2017 № 50-л, ФИО6 по доверенности от 27.12.2017 № 73,

установил:

общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СМУ-1" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" (далее – ответчик) о взыскании основной задолженности в размере 64 379 472 рублей 45 копеек. В качестве основания для удовлетворения требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд от 02.10.2013 № 0187300008413000365-0466580-02 (далее - контракт).

Изучив материалы дела и доводы истца, суд установил нижеследующее.

02 октября 2013 года между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен контракт.

В соответствии с пунктом 1.1 контракта Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работы на строительство объекта: «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовых блоком в п.Горноправдинск Ханты-Мансийского района» (далее - работы) и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить.

В состав и содержание технической документации на выполнение работ по Контракту входит техническое задание Заказчика, прилагаемое к Контракту (приложение 1 к муниципальному контракту), определяющее объем, содержание работ по Контракту, требования к функционалыю-техническим характеристикам, безопасности, качеству, результату работ по Контракту.

Цена контракта, размеры и порядок финансирования и оплаты работ определены в разделе 2 контракта.

На основании пункта 3.1, 3.2 контракта работы по Контракту выполняются Подрядчиком до 480 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. Дата окончания работ, определяемая по истечении срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Контракта, является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по Контракту.

Сдача и приемка работ определена в разделе 3 контракта.

Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока выполнения работ по Контракту не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту и ответственности за его нарушение (пункты 13.1, 13.2 контракта).

Рассматриваемые отношения сторон регламентируются соответствующими нормами раздела III и параграфа 3, 5 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По Договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам Договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, если иное не установлено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этих видах Контрактов (статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по Договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный Договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в Договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Ответчик исковые требования не признал, представил отзыв на исковое заявление. 

Определением суда от 05.04.2017 по делу назначена судебная экспертиза, ее проведение поручено обществу с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СУДЕБНЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ "ИНДЕКС" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 119021, 

<

...>), с постановкой следующих вопросов:

- Каковы объем и стоимость фактически выполненных обществом с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СМУ-1" и переданных муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" дополнительных работ в рамках муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд от 02.10.2013 № 0187300008413000365-0466580-02 в редакции дополнительного соглашения к контракту от 28.03.2014 № 1 по актам о приемке выполненных работ от 09.03.2016 № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, акту на разницу стоимости песка от 09.03.2016, акту на перебазировку техники от 09.03.2016, актам о приемке выполненных работ без даты № 7, 8, акту на разницу бетона от 06.04.2016, акту на разницу стоимости щебня от 06.04.2016, отвечавших предъявлявшимся к ним действовавшим законодательством Российской Федерации и указанным контрактом качественным требованиям, которые могли быть использованы муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" по назначению для указанной в контракте цели и (или) недостатки в которых могли быть устранены муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" или обществом с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СМУ-1" (несущественные и устранимые недостатки), выполнение которых было согласовано муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" и необходимость выполнения которых была вызвана недостатками утвержденной проектно-сметной документации, неотложностью выполнения, способной повлечь разрушение объекта, и обязательных для последующего ввода объекта в эксплуатацию?

5. Предупредить эксперта об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения. Разъяснить, что если эксперт в ходе исследования обнаружит важные для дела обстоятельства, относительно которых судом вопросы не были поставлены, он вправе по своей инициативе сделать соответствующие выводы, снабдив их специальной оговоркой.

6. Представить в распоряжение экспертной организации следующие документы в электронном виде а материальном носителе:

1. Копия муниципального контракта

2. Копия письма № 43 от 06.04.2016 года 

3. копия письма № 27 от 09.03.2016 года

4. Копия акта  от 09.03.2016 года 

5. Акт  к ЛСР № 02-01-01 доп.2

6. ЛРС № 02-01-01 доп.2 – 4л.

7. Акт КС-2 №1.02-01-01 доп.2.

8. Дефектная  ведомость к ЛМС 02-01-01 доп.2 – 2л.

9. Копия ЛРС 02-01-01доп3 (согл. института б/п)

10. Копия ЛРС 02-01-01 л.1,л4,л14.( (проектная)

11. Копия подписанного выполнения  акта КС-2 №21от30.04.2014г-2л.

12. Копия подписанного выполнения  акта КС-2 №22 от30.04.2014г - 3л

13. Копия подписанного выполнения  акта КС-2 №97 от27.04.2015г - 3л

14. Копия МДС81-35.2004 обоснование применения  коэф.1.2

15. Копия рабочих чертежей  проекта 84-12-1.1-АР,Р л9,л7.

16. Копия письма УКСиР МКУ Ханты-Мансийского района №148 от30.06.2014 –  2л.

17. Копия акта освидетельствования скрытых работ №1 от03.06.2014г

18. Копия акта освидетельствования скрытых работ №2от04.06.2014г

19. Копия акта освидетельствования скрытых работ № 3 от11.06.2014г

20. Копия акта освидетельствования скрытых работ №4 от13.06.2014г

21. Копия акта освидетельствования скрытых работ №5 от21.06.2014г

22. Копия акта освидетельствования скрытых работ №6 от25.06.2014г

23. Фотофиксация архитектурные решении я АБК ( подвал , пол) – 6л.

24. Акт  -1л. Технологические решения АБК  Оборудование.                                                                     ЛРС 02-01-11 доп.1  на сумму  2 012 357.54руб.

25. КС-2 Акт приемке выполненных работ №2 на сумму 2 012 357.54руб.)  – 2л.

26. Ведомость объемов работ на сумму  2 012 357.54руб.) - 1л.

27. Локальный сметный расчет №ЛРС№ 02-01-11 доп.1- 2л.

28. Копия  Локальный сметный расчет №ЛРС№ 02-01-11 (проектный)- 4л.

29. Копия подписанного выполнения КС-2 №96 от27.04.2015

30. Копия реестра  цен на оборудования - 2л.

31. Копия письма №93 от 28.10.12 г. - 1л.

32. Копия письма №32 от 23.04.15 г.- 1л.

33. Копия письма № 54-02 от 20.04.15 г.- 2л.

34. Копия письма № 2267/15 от 27.04.15 г. - 1л.

35. Копия письма б/н от 30.04.15 г. - 1л.

36. Копия счет-фактуры и накладной на льдоубор. комбайн  - 2л.

37. Копия Договора  на поставку льдоуборочного комбайна – 2л. 

38. Копия счет-фактуры  № 15 от 02.-6.2015г. на машину для уборки травы - 2л. 

39. Копия Договора  поставки  № ЛИД 000005 от 09.04.2015г. - 5л.

40. Копия Перечня передачи оборудования заказчику - 3л.

41. Копия товарной накладной  № ЛИД 000005 от 02.06.2015г.

42. Фото оборудования – 2л.

43. Копия  Акта № 1 от декабря 2015 г.

44. Копия письма № 52-02 от 16.04.2015г. с приложением .

45. Копия  платежного поручения № 307 от 12.05.2015г.

46. опия платежного поручения № 212 от 17.04.2015г.

47. Копия платежного поручения № 300 от 12.05.2015г.

48. Акт к Сооружение хоккейного корта (дополнительные вес металлоконструкций ЛРС № 02-02-02 доп.3.1 

49. Локальный сметный расчет № 02-02-02 доп2 Сооружение хоккейного корта(металлоконструкции)

50. Акт выполненных работ КС-2 №3 (ЛСР № 02-02-02 доп2 Сооружение хоккейного корта (металлоконструкции);

51. Дефектная ведомость к (ЛСР № 02-02-02 доп2 Сооружение хоккейного корта (металлоконструкции);

52. Копия ЛРС 02-02-02 (проектная) Стр. № 1,5,6,7.

53. Копия подписанного выполнения КС-2 № 12 от19.03.2014

54. Копия подписанного выполнения КС-2 № 24 от30.04.2014

55. Копия подписанного выполнения КС-2 № 33 от20.06.2014

56. Копия подписанного выполнения КС-2 № 34 от31.07.2014

57. Копия подписанного выполнения КС-2 № 38 от29.08.2014

58. Копия счет-фактура №3 от 12 февраля 2016 года (20 538 544 руб)

59. Копия акт сверки взаимных расчетов за ноябрь - декабрь 2015 г

60. Копия объектная и локальные сметы (сооружение хоккейного корта) 11.4. ЛСМ № 02-02-02 – 9листов

61. Копия объектная  и локальные сметы (сооружение хоккейного корта) Доп. 1 к Тому 11.4. ЛСМ № 02-02-02 доп.1 – 6листов

62. Копия выкопировки из проекта шифр. 84-12-1.2-КР Раздел 4 Сооружение хоккейного корта Том 4.2 л.№1, л.№2 - 3листа 

63. Копия акт приемки ответственных конструкций № 2 от 24.09.2014г  – 4стр.

64. Копия акт освидетельствования скрытых работ № 2 от 06.09.2014г 2стр.

65. Копия акт освидетельствования скрытых работ № 3 от 15.09.2014г- 2стр.

66. Копия акт освидетельствования скрытых работ № 4 от 24.09.2014г – 2стр.

67. Копия Исполнительные схемы - 6шт

68. Копия Договор № 31/10 СМУ-1 на изготовление металлоконструкций от 31.10.13г. -5л.

69. Копия платежного поручения № 166296 от 29.07.2015г к договору№31/10 от 31.10.2013г

70. Копия платежного поручения № 233 от 07.04.2014г к договору№31/10 от 31.10.2013г

71. Копия платежного поручения № 441 от23.05.2014г к  договору№31/10 от 31.10.2013г

72. Копия платежного поручения №506  от 04.06.2014г к договору№31/10 от 31.10.2013г

73. Копия платежного поручения № 713 от 04.08.2014г к договору№31/10 от 31.10.2013г

74. Копия платежного поручения № 631 от 18.07.2014г к договору№31/10 от 31.10.2013г

75. .Копия платежного поручения № 633 от 18.07.2014г к  договору№31/10 от 31.10.2013г

76. Копия платежного поручения № 871 от 02.12.2013г к  договору№31/10 от 31.10.2013г

77. Копия платежного поручения № 1040 от26.12.2013г к договору№31/10 от 31.10.2013г

78. .Выкопировка  из Рабочих чертежей КМД. Конструкции металлические деталировка- 2л.

79. Копия исх. № 218 от 08.09.14г.- 1л.

80. Копия Исх. № 131 от 14.08.14г. ЗАО «Тюменский РМЗ»- 1л.

81. Копия Спецификация металла (Приложение 3)

82. Копия Общий подсчет массы (Приложение 4)- 1.л

83. Копия Разница подсчетов длины профилей (Приложение 5)- 1л.

84. Копия Сводная сравнительная спецификация (Приложение № 6)- 14л.

85. Копия Ведомость изменения веса металлоконструкций по пересогласованным сечениям – 1л.

86. Копия Исх. №2564 от 18.12.13г. 1л.

87. Копия Исх. № 2-18-06-10/43 от 16.12.13г.- 1л.

88. Копия Исх. № 2268 от 24.12.13г.- 1л.

89. Копия Исх. № 3266 от 18.12.13г.- 1л.

90. Копия Исх. № б/н от 18.12.13г. – 1л.

91. Копия Исх. № 434 от 24.12.13г.- 1л.

92. Копия Исх. № 439 от 27.12.13г.- 1л.

93. Копия Исх. № 04 от 20.01.14г. - 2л.

94. Копия Протокол от 17.01.2014г.п.1.1 – 2стр.

95. Копия Протокол от 05.02.2014г.п1,п1.1,п.1.2,п1.4 – 2стр.

96. Копия Протокол от 10.04..2014г. п1.5 – 2стр.

97. Копия Протокол от 03.10.2014г – 2стр.

98. Копия Исх. № 142-02 от  10.11.2015г- 1л

99. Копия Исх. № 130-02 от 23.10.2015г – 2л

100. Копия Перечень исполнительной док-ции  сооружения хоккейного корта - 8л

101. Копия Договор б/н от13.10.2014г, с ООО "Спецмонтаж" на окраску м/к.

102. Копия Акт освидетельствования скрытых работ №1

103. Копия Акт освидетельствования скрытых работ №2

104. Копия Акт освидетельствования скрытых работ №3

105. Копия Акт освидетельствования скрытых работ №4

106. Копия Справка КС-3

107. Фотофиксация  окраска м/конструкций -44шт

108. Копии товарно-транспортных накладных на перевозку м/к: № 36,37,41,44,53,57,67,79,86,96,101,133,138,144,151,155,162,169,173,183,185,187,193,194,196,199,218,220,225,234,250,258,273,277,367,362,354,350,346,339,337,323,317,308,304,238,243,269,369,373,274,422 - 54шт

109. Копия письма № 098 от 24.12.2013г.

110. Копия письма № 096 от 20.12.2013г.

111. Копия письма  3 2-18-06-10\43 от 16.12.2013г.

112. Акт – 2л. Наружные сети связи. ЛРС 05-01-01 доп.2 

113. ЛРС № 05-01-01 доп.2 – 7л

114. Акт о приемке выполненных работ № 4 – 4л

115. .Дефектная  ведомость – 2л.

116. Копия ЛРС 05-01-01 (проектная)

117. Копия подписанного выполнения КС-2 № 44 от 26.09.2014г

118. Копия подписанного выполнения КС-2 от апрель 2015 Кабель

119. Копия кадастрового паспорта № 86/201/15-331363 от20.11.2-15г

120. Копия межевого плана БТИ Ханты-Мансийска от13.11.2015г

121. Счет-фактура №8602/1512/000013 от16.12.2015г

122. Акт № 8602/1512/000013 от16.12.2015г

123. Копия рабочего проекта 84-12-00-НСС,том 5.5.1 часть1, Наружные сети связи. Спецификация оборудования, л.№2. 

124. План расположения сети связи – 3л. 

125. Исполнительная съемка сетей связи – 12л.

126. Копия письма МП Комплекс-Плюс № 1685 от25.08.2014г – 2л.

127. Копия протокола от 09.10.2014г -1л.

128. Копия письма ООО СК «СМУ-1» № 123-02 от 06.10.2014г. – 1л 

129. Копия письма МП Комплекс-Плюс №1988 от07.10.2014г – 1л. 

130. Копия письма ООО СК «СМУ-1»  №134-02 от16.10.2014г. - 2л. 

131. Копия письма Администрация СП Горноправдинск  №1212 от 17.10.2014г - 2л 

132. Копия письма УКСиР МКУ Ханты-Мансийского района №5089/14 от22.10.2014г. – 1л.

133. Копия письма ООО СК «СМУ-1»  №139-02  от24.10.2014г. 

134. Копия письма УКСиР МКУ Ханты-Мансийского района № 5425/14 от 10.11.2014г- 1л.

135. Копия письма №1844  от 28 07.2015г. МП Комплекс-Плюс

136. Копия дефектной ведомости от28.07.201

137. Фотофиксация  замены бетонного дорожного покрытия

138. Фотофиксация  устройство гильз Д300 методом «Прокола»

139. Фотофиксация  разборка бетонных оснований.

140. Фотофиксация устройства траншеи

141. Копия пояснительной записки стадия П лист 1-2

142. Копия схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

143. Копия схемы узлов  кабельной канализации

144. Копия письма № 148-02 от 19.11.2015г.

145. Акт- 1л Наружные сети канализации  №5 ЛРС 06-01-02 доп. 1. 

146. Локально-сметный расчет ЛРС 06-01-02 доп.1.

147. КС-2 Акт о приемке выполненных работ - 4 лист.

148. Ведомость объемов работ -2 лист.

149. Копия ЛРС 06-01-02 (  и ЖКХ за № 4374/13 от 25.11.13 г.- 2 лист.

150.  Копия ЛРС 06-01-02(проект.)

151. Копия письма исх.366 от11.10.2013г.ООО СК "СМУ-1"

152.  Копия письма №377от18.11.2013г

153.  Копия письма №4231/13от18.112013г

154. Копия письма №121-02 от26.11.2013г

155.  Копия письма №4374/13 от25.11.13

156.  Копия протокола от 29.11.2013г

157. .Копия подписанного выполнения КС-2 №10 от31.12.2013г

158. .Копия подписанного выполнения КС-2 №28 от30.12.2013г

159. Копия подписанного выполнения КС-2 №28 от30.12.2014г

160. КопияТехнический  паспорт инв.№71:129:002:100071370 от12.05.2015

161. Копия Счет-фактура №8602/1512/000012 от27.05.2015

162. Копия Акт №8602/1512/000013 от27.05.2015г

163. Копия Проекта Наружные сети канализации Том 5.3.1 пояснит.записка лист 1- 3 лист.

164. Копия  План трассы   -1 лист.

165. Копия Общий журнал работ – 8 стр.

166. Копия Протоколы бурения -16 стр

167. Копия  акта освидетельствования  скрытых работ горизонтального бурения № 4 от 23.09.2014г.

168. .Копия письма  № 073-02 от 22.05.2015г.

169. . Акт Перебазировка  Техники. "ООО СК СМУ-1"  Расчет №6  на сумму  4 133 870.0руб.

170. .Расчет перебазировки техники (4 133 870.0)- 9листов

171. Расчет средней скорости передвижения машин - 7листов

172. Копия планово-расчетные цены на эксплуатацию механизмов и автотранспорта -2листа

173.  Копии путевых листов  перебазировки техники  на объект  №170,№169,№163,№162,№150,№148,№172,№50,№164,№174,№175№180,№250,№0104,№097,№082,№085,№088,№075,№005,№177№172,№171 - 24шт

174.  Копии путевых листов перебазировки техники с объекта: №265,№267№270,№275,№281,№284,№287,№289,№292,№294,№305,№374,№545,№551,№554,№602,№608,№667,№555,№557,№559,№563,№564 - 23шт.

175. .Фотофиксация   -  7шт 

176. копия калькуляции планово-расчетных цен с 01.01.2013 по 31.12.2013г.

177. копия проекта организации строительствам раздел № 6 .том 6

178. копии товарно-транспортных накладных 12 шт.

179. .ЛРС № 07-01-03 доп.3.2 – 4л (доп. арматура, Фрагмент1) на сумму (738 398.94руб. общ.)

180. Акт- 1л. (Подпорная стенка арм. Д16 Ф/плита)-1л

181. ЛРС № 07-01-03 доп.3.2/7 (492 630.99руб) - 2л

182. Акт о приемке выполненных работ №7(492 630.99руб) – 3л

183. Дефектная  ведомость (к акту КС-2 №7)– 1л.

184. Акт- 1л (Подпорная стенка. Перенос ограждения. Фрагмент1)

185. ЛРС № 07-01-03 доп.3.2/7а (245 767.93руб)

186. Акт о приемке выполненных работ №7-а (245 767.93руб) – 3л

187. Дефектная  ведомость (к акту КС-2 №7-а) – 1л.

188. Копия проектного ЛРС № 07-01-03.(стр98 Раздел Подпорная стенка поз.1 - 9. - 4л 

189. Копия ЛРС 07-01-03.доп.3 (В ценах 2001г, без рыночных коэф.)

190. Копия выкопировки с Р/П  Шифр 84-12-00-ПЗУ том2 Схемы движения транспортных средств лист №8, Узла крепления Фрагмента №1 лист №15 - 3л.

191. Копии подписанных КС-2  №125  от 27.04.2015г (непредвиденные) Перенос ограждения Фрагмент1.

192. Копии подписанных КС-2  №18 от25.04.2014г (фундаментная плита арм. Д16)

193. Копии подписанных КС-2  №21 от 30.04.2014г (фундаментная плита арм. Д16)

194. Копии подписанных КС-2  №11 от19.03.2014г (фундаментная плита арм. Д16)

195. Копии подписанных КС-2  №7 от 19.12.2014г (фундаментная плита арм. Д16)

196. Копия письма  исх. №66  от 19.03.2014г

197. Копия письма исх. №773/14 от 26.02.2014г.

198. Копия письма исх. №1175/14 от 21.03.2014г

199. копия выкопировки  из ген.плана  84-12-00-ПЗУ лист4

200. Акт – 1л. к ЛСР № 4 Водоотводная траншея

201. ЛРС №4 Водоотводная траншея. Водоотлив – 4л

202. Акт о приемке выполненных работ -3л

203. Дефектная  ведомость -1л

204.  Исполнительная схема водоотводной траншеи -1л

205. Копия журнала работ- 20л

206. Фото водоотводная траншея - 3шт.

207. Фото водоотлив – 6шт.

208. копия платежного поручения №1216 от 29.12.2014

209. Копия счет-фактуры  № 540 от 29.12.2014г.

210. Копия реестра № 18  выполненных работ за апрель 2015г.

211. ЛРС №5 Временные дороги, площадки, ограждение, обустройство бытового городка 

212.  Акт КС-2 №5; Временные дороги, площадки, ограждение, обустройство бытового городка 

213. Дефектная ведомость к ЛРС№5

214. Копия договора  поставки №39/13 от 07.08.2013г. с спецификациями №1-3,6,9,14,15  ООО "Пилигрим" на щебень - 1 экз.;

215. Копия счет-фактура №251 от 27.11.2013г. на щебень - 1 экз.;

216. Копия товарная накладная №251 от 27.11.2013г. - 1экз.;

217. Копия платежное поручение №982 от 26.12.2013г. - 1экз.;

218. Копия договор поставки №22/13-Пс от 18.10.2013г. ЗАО  "ТТК-Спецсервис" с приложением №1 на песок - 1экз.;

219. Копия счет-фактура №216 от 27.11.2013г. - 1 экз.;

220. Копия товарная накладная № 18 от 27.11.2013г. - 1экз.;

221. Копия платежное поручение №981 от 24.12.2013г. - 1экз.;

222. Копия платежное поручение №905 от 19.09.2014г. - 1экз.. 

223. Копия Схема расстояния Батово Ханты-Мансийского района - Горноправдинск - 1 экз.;

224. Копия протокол испытания песка от 22.06.2012г. - 1 экз.;

225. Копия договор поставки №15-13/СК  от 19.08.2013г. на плиты дорожные - 1экз.;

226. Копия счет-фактура №1052 от 30.05.2014г. - 1 экз.;

227. Копия товарная накладная № 2797 от 30.05.2014г. - 1экз.;

228. Копия счет-фактура №1269 от 30.06.2014г. - 1 экз.;

229. Копия товарная накладная № 3629 от 30.06.2014г. - 1экз.;

230. Копия платежное поручение №554 от 08.07.2014г. - 1экз.;

231. Копия схема расстояния Тобольск - Горноправдинск - 1экз.;

232. Копия договор № 189-12 от 25.10.2012г. на фундаментные блоки - 1экз.;

233. Копия счет-фактура №156 от 14.03.2013г. - 1 экз.;

234. Копия товарная накладная № 74 от 14.03.2013г. - 1экз.;

235. Копия платежное поручение №1105 от 02.11.2012г. - 1экз.;

236. Копия платежное поручение №24 от 01.02.2013г. - 1экз.;

237. Копия платежное поручение №57 от 22.02.2013г. - 1экз.;

238. Копия  схемы расположения временных сооружений -1шт

239. Фотофиксация - Временное ограждение  - 5шт

240. Фотофиксация  -Временные проезды -7шт

241. Фотофиксация - Площадки для хранения материалов, бункер для загрузки сухих смесей, подпорная стенка из блоков ФБС - 7шт

242. Копия схемы расположения временного городка-1шт

243. Фотофиксация временного городка - 3шт

244. Акт к ЛРС №02-02-02 доп.3.1 Конструктивные  решения. Хок.корт  (перевозка материалов) : на сумму(1 559 882.0р)

245. ЛРС 02-02-02-доп3.1

246. Акт выполненных работ КС-2 

247. Ведомость объемов работ - 1 экз.;

248. Расчет веса по см. № 02-02-02 - 1экз.; 

249. Копия ЛРС 02-20-02, ЛРС 02-02-02 доп1. проектные

250. Копия Расчет веса по см. № 02-02-02 - 1экз.; 

251. Копия Договор на поставку №15-13/СК от 19.08.2014г. ООО "Стройком"  - 1экз.;

252. Копия счет-фактура № 2677  от 30.12.2014г. на электроды, арматуру  12,16,22 - 1экз.;

253. Копия платежное поручение №17 от 16.04.2015г. - 1экз.;

254. Копия договор № от 2014г. ООО "Авангард" - 1экз.;

255. Копия счет-фактура № 497  от 25.04.2014г. на арматуру 14, битумную мастику, электроды - 1экз.;

256. .Копия товарная накладная № 497 от 25.04.2014г. - 1экз.;

257. .Копия счет-фактура № 501  от 30.04.2014г. на щебень  - 1экз.;

258. .Копия товарная накладная № 501 от 30.04.2014г. - 1экз.;

259. .Копия договор №43-09/13  от 27.09.2013г. с спецификацией ООО "Титан-М" на сваи - 1экз.;

260. .Копия счет-фактура № 882  от 14.10.2013г. на сваи - 1экз.;

261. .Копия платежное поручение №693 от 24.10.2013г. - 1экз.;

262. .Копия платежное поручение №854 от 29.11.2013г. - 1экз.;

263. .Копия договор №4/13.8.12 от 13.08 2012г. ООО "Стенстрой" на арматуру 16,18,8  - 1экз.;

264. .Копия счет-фактура № 19003 от 22.12.2014г - 1экз.;

265. .Копия схема расстояния Тобольск - Горноправдинск - 1экз.;

266. .Копия схема расстояния Тюмень - Горноправдинск - 1экз.;

267. .Копия схема расстояния Ханты-Мансийск - Горноправдинск - 1экз. 

268. .Акт- Расчет разницы стоимости бетона  на сумму 6 453 989.36 руб

269. Расчет разницы стоимости бетона.

270. Копия договор поставки №27-11 от 27.10.2013г Завод  ООО "Орион"

271. Копия договор поставки №15/06-14-ХМ от 15.06.2014г.

272. Копия счет-фактура№00000012 от12.02.2014г

273. Копия счет-фактура№00000036 от26.04.2014г

274. Копия счет-фактура№00000020 от14.03.2014г

275. Копия счет-фактура№00000022 от31.03.2014г

276. Копия счет-фактура№00000093 от30.06.2014г

277. Копия счет-фактура№00000122 от 03.07.2014г

278. Копия счет-фактура№00000137 от 31.07.2014г

279. Копия счет-фактура№00000152 от 21.08.2014г

280. Копия счет-фактура№00000200 от 28.09.2014г

281. Копия счет-фактура№00000206 от 29.09.2014г

282. Копия счет-фактура№00000226 от 06.10.2014г

283. Копия счет-фактура№00000248 от 15.10.2014г

284. Копия счет-фактура№00000303 от 26.11.2014г

285. Копия счет-фактура№00000374 от 21.12.2014г

286. Копия платежное поручение№136 от 03.03.2014г

287. Копия платежное поручение№206 от 03.04.2014г

288. Копия платежное поручение№260 от 17.04.2014г

289. Копия платежное поручение№361 от 15.05.2014г

290. Копия платежное поручение№405 от 21.05.2014г

291. Копия платежное поручение№539 от 20.06.2014г

292. Копия платежное поручение№605 от 18.07.2014г

293. Копия платежное поручение№718 от 04.08.2014г

294. Копия платежное поручение№820 от 22.08.2014г

295. Копия платежное поручение№866 от 02.09.2014г

296. Копия платежное поручение№923 от 25.09.2014г

297. Копия платежное поручение№934 от 01.10.2014г

298. Копия платежное поручение№951 от 02.10.2014г

299. Копия платежное поручение№963 от 06.10.2014г

300. Копия платежное поручение№994 от 15.10.2014г

301. Копия платежное поручение№1064 от 06.11.2014г

302. Копия платежное поручение№1052 от 06.11.2014г

303. Акт - к  смете №02-01-01 доп.3 Архитектурные решения. АБК (перевозка материалов):1экз.;

304. Ведомость объемов работ - 1экз.;

305. Расчет веса к см. №02-01-01 - 1экз.;

306. Копия ЛРС  (проектный)

307. Копия договор поставки №39/13 от 07.08.2013г. с спецификациями №1-3,6,9,14,15  ООО "Пилигрим" на щебень - 1 экз.;

308. Копия счет-фактура №14 от 31.01.2014г. на щебень - 1 экз.;

309. Копия товарная накладная №14 от 31.01.2014г. - 1экз.;

310. Копия платежное поручение №198 от 03.04.2014г. - 1экз.;

311. Копия счет-фактура №302 от 14.05.2014г. на песок - 1 экз.;  товарная накладная №121 от 14.05.2014г. - 1 экз.;

312. Копия платежное поручение № 335 от 13.05.2014г. - 1экз.;

313. Копия договор № 15-13/СК от 19.08.2013г. ООО "Стройком" - 1экз.;

314. Копия счет-фактура № 1930 от 15.09.2014г. на техноэласт ЭПП - 1экз.;

315. Копия товарная накладная №5833 от 15.09.2014г. на техноэласт ЭПП  - 1 экз.;

316. Копия счет-фактура № 1261 от 27.06.2014г. на сетку кладочную - 1экз.;

317. Копия товарная накладная № 3584 от 27.06.2014г. - 1 экз.;

318. .Копия платежное поручение № 554 от 08.07.2014г. - 1экз.;

319. .Копия платежное поручение № 640 от 18.07.2014г. - 1экз.;

320. .Копия счет-фактура № 2647 от 29.12.2014г. на шпатлевку - 1экз.;

321. .Копия товарная накладная № 8009 от 29.12.2014г. - 1 экз.;

322. .Копия платежное поручение № 22 от 19.01.2015г. - 1экз.;

323. .Копия счет-фактура № 46 от 22.01.2015г. на клей, затирку - 1экз.;

324. .Копия товарная накладная № 149 от 22.01.2015г. - 1 экз.;

325. .Копия платежное поручение № 70 от 12.03.2015г. - 1экз.;

326. .Копия платежное поручение № 102 от 13.03.2015г. - 1экз.;

327. .Копия счет-фактура № 272 от 14.03.2015г. на плитку - 1экз.;

328. .Копия товарная накладная № 872 от 14.03.2015г. - 1 экз.;

329. .Копия платежное поручение № 134 от 30.03.2015г. - 1экз.;

330. .Копия счет-фактура № 44 от 22.01.2015г. на потолочную панель с комплектующими - 1экз.;

331. .Копия платежное поручение № 18 от 16.01.2015г.

332. .Копия счет-фактура № 1095 от 05.06.2014г. на кирпич - 1экз.; 

333. .Копия счет-фактура № 2677 от 30.12.2014г. на керамическую плитку, клей для плитки, блок стеновой "Поревит" - 1экз.;

334. .Копия счет-фактура № 31 от 23.07.2014г. на блок стеновой "Поревит" - 1экз.;

335. .Копия товарная накладная №5 от 23.07.2014г. на блок стеновой "Поревит"   - 1 экз.;

336. .Копия счет-фактура № 24 от 11.07.2014г. на блок стеновой "Поревит" - 1экз.;

337. .Копия товарная накладная №1 от 11.07.2014г. на блок стеновой "Поревит"   - 1 экз.;

338. .Копия счет-фактура № 25 от 15.07.2014г. на блок стеновой "Поревит" - 1экз.;

339. .Копия товарная накладная №2 от 15.07.2014г. на блок стеновой "Поревит"   - 1 экз.;

340. .Копия счет-фактура № 32 от 28.07.2014г. на блок стеновой "Поревит" - 1экз.;

341. .Копия товарная накладная №6 от 28.07.2014г. на блок стеновой "Поревит"   - 1 экз.;

342. .Копия счет-фактура № 30 от 21.07.2014г. на блок стеновой "Поревит" - 1экз.;

343. .Копия товарная накладная №4 от 21.07.2014г. на блок стеновой "Поревит"   - 1 экз.;

344. .Копия счет-фактура № 29 от 18.07.2014г. на блок стеновой "Поревит" - 1экз.;

345. .Копия товарная накладная №3 от 18.07.2014г. на блок стеновой "Поревит"   - 1 экз.;

346. .Копия платежное поручение №574 от 08.07.2014г. - 1экз.;

347. .Копия платежное поручение №635 от 18.07.2014г. - 1экз.;

348. .Копия договор поставки № СМ-0629 от 18.02.2014г. ОАО "Сухоложскцемент" на цемент - 1 экз.;

349. .Копия счет-фактура № 900383847 от 25.04.2014г. на цемент - 1экз.;

350. .Копия товарная накладная №800559008 от 28.04.2014г.;

351. .Копия платежное поручение № 228 от 04.04.2014г. - 1экз.;

352. .Копия счет-фактура № 2952 от 24.07.2014г. на керамзитовый гравий - 1экз.; 

353. .Копия товарная накладная №2952 от 24.07.2014г. - 1экз.;

354. .Копия платежное поручение № 667 от 23.07.2014г. - 1экз.;

355. .Копия Договор на поставку ГКЛ  ООО "МСТ" - 1экз;

356. .Копия счет-фактура № 93142 от 29.12.2014г. на ГКЛ - 1экз.;

357. .Копия товарная накладная № 93763 от 29.12.2014г. - 1экз.;

358. .Копия платежное поручение № 1219 от 29.12.2014г. - 1экз.;

359. .Копия схема расстояния Тобольск - Горноправдинск - 1экз.;

360. .Копия схема расстояния Тюмень - Горноправдинск - 1экз.;

361. Копия схема расстояния Сухой лог - Горноправдинск - 1экз.;

362. Акт-к Подпорная стенка (перевозка материалов) к ЛРС №07-01-03 доп.4 на сумму 2 002 152.02р

363. ЛРС № 07-01--03 ДОП.4 - 5л

364. Дефектная ведомость- 2л

365. Расчет веса-1л

366. Копия ЛРС 07-01-03 стр 98.раздел1 Подпорная стенка поз.1-15 (проектный)

367. Копия подписанного выполнения КС-2: №18 от 25.04.2014г, №25 от 30.04.2014г, №26.от 30.04.2014г, №11 от19.03.2014г.,№110 от31.12.2013г,№7 от 19.12.2013г,

368. Схема расстояния Горноправдинск- Батово -1л

369. Схема расстояния Горноправдинск- Тобольск-1л

370. Схема расстояния Горноправдинск- Тюмень-1л

371. Акт- Подпорная стенка (обратная засыпка,)   ЛРС №07-01-03 доп.4 на сумму 1 284 627.06р

372. Дефектная ведомость- 2л

373. Акт о приемке выполненных работ КС-2№12а  - 4л

374. Расчет веса-1л

375. Копия ЛРС 07-01-03 стр98.раздел1 поз.1-15 (проектный)

376. Копия  подписанного выполнения КС-2: №18 от 25.04.2014г, №25 от 30.04.2014г, №26.от 30.04.2014г, №11 от19.03.2014г.,№110 от31.12.2013г,№7 от 19.12.2013г,

377. Копия журнала работ- 8л.

378. Копия Исполнительная схема -3л

379. Копия Общей пояснительной записки ПЗ 84-12, 6-7л. -3шт

380. Фотофиксация-10шт

381. акт к смете №02-01-02 доп.2 Конструктивные решения. АБК (перевозка материалов):

382. расчет веса по смете №02-01-02 "Конструктивные решения. АБК." - 1экз.;

383. договор от 2014г. на поставку строительный материалов ООО "Авангард" на битумную мастику, электроды  на 2 листах - 1экз.;

384. счет-фактура №497 от 25.04.2014г. на битумную мастику, электроды - 1 экз.;

385. товарная накладная №497 от 25.04.2014г. на битумную мастику, электроды - 1 экз.;

386. платежное поручение № 742 от 04.08.2014г. - 1экз.;

387. договор поставки №43-09/13 от 27.09.2013г. с спецификацией №1,2,3 ООО "Титан-М" на сваи, металл - 1 экз.;

388. счет-фактура №882 от 14.10.2013г. на сваи - 1 экз.;

389. товарная накладная № 882 от 14.10.2013г. -- 1экз.;

390. платежное поручение № 693 от 24.10.2013г. - 1экз.;

391. платежное поручение № 854 от 29.11.2013г. - 1экз.;

392. счет-фактура №358 от 23.05.2013г. на арматуру д.10, 16, 12, швеллер 22 - 1 экз.;

393. товарная накладная № 358 от 23.05.2013г. - 1экз.;

394. платежное поручение  268 от 15.05.2013г. - 1экз.;

395. счет-фактура №766 от 06.09.2013г. на уголок 100х8 - 1 экз.;

396. товарная накладная № 766 от 06.09.2013г. - 1экз.;

397. платежное поручение № 693 от 24.10.2013г. - 1экз.;

398. счет-фактура №337 от 30.05.2012г. на лист 10 - 1 экз.;

399. товарная накладная № 337 от 30.05.2012г. - 1экз.;

400. платежное поручение № 486 от 05.06.2012г. - 1экз.;

401. счет-фактура №35 от 25.01.2012г. на уголок 125 - 1 экз.;

402. товарная накладная № 35 от 25.01.2012г. - 1экз.;

403. платежное поручение № 75 от 15.03.2012г. - 1экз.;

404. .договор поставки № 2 274 от 22.11.3010г. ООО "Тримет"- 1экз.;  доп.соглашение и спецификация

405. .счет-фактура №15031220086 от 12.03.2015г. на арматуру д.8,10,18, трубу 60х40, уголок 50х5- 1 экз.;

406. .товарная накладная № 3183 от 12.03.2015г. - 1экз.;

407. .платежное поручение №63 от 12.03.2015г. - 1экз.;

408. .договор поставки № 189-12 от 25.10.2012г. с спецификацией №4, №8 ООО "СибСтройИнвест" на сваи - 1экз.;

409. .счет-фактура №1663 от 27.11.2012г. - 1 экз.;

410. .товарная накладная № 922 от 27.11.2012г. - 1экз.;

411. .счет-фактура №1617 от 22.11.2012г. - 1 экз.;

412. .товарная накладная № 916 от 22.11.2012г. - 1экз.;

413. .платежное поручение № 1121 от 12.11.2012г.;

414. .договор поставки № 016/14 от 21.05.201г. с спецификацией №1-4  ООО "ЗСМК" на перемычки - 1 экз.;

415. .счет-фактура № 362 от 02.09.2014г. - 1 экз.;

416. .счет-фактура №210 от 17.07.2014г. - 1 экз.;

417. .платежное поручение № 580 от 10.07.2014г. - 1экз.;

418. .платежное поручение № 830 от 29.08.2014г. - 1экз.;

419. .платежное поручение № 413 от 22.05.2014г. - 1экз.;

420. .договор поставки №15-13/СК от 9.08.2013г. ООО "Стройком" на арматуру, электроды - 1экз.;

421. .счет-фактура №2677 от 30.12.2014г. на арматуру д.12,16,22- 1экз.;

422. .товарная накладная № 8090 от 30.12.2014г. - 1экз.;

423. .платежное поручение № 17 от 16.01.2015г. - 1экз.;

424. .договор поставки № 4/13.8.12 от 13.08.2012г. ООО "Стенстрой" на арматуру - 1экз.; 

425. .счет-фактура № 19003 от 22.12.2014г. на арматуру 16,18,8 - 1 экз.;

426. .товарная накладная № 18646 от 22.12.2014г. - 1экз.;

427. .договор поставки №  от 2014г. ООО "Авангард" на арматуру - 1 экз.;

428. .счет-фактура № 497 от 25.04.2014г. на арматуру д,14 - 1 экз.;

429. .товарная накладная № 497 от 25.04.2014г. - 1экз.;

430. .платежное поручение № 641 от 18.07.2014г. - 1экз.;

431. .договор поставки №18/06-2014 от 18.06.2014г. с приложением №1 ООО "Орион"  на бетон - 1экз.;

432. договор на оказание транспортных услуг № 15/06-14-ХМ от 15.06.2014г. с приложением №1 ООО "Орион" - 1экз.;

433. счет-фактура №226 от 06.10.2014г. на бетон - 1экз.;

434. товарная накладная № 163 от 06.10.2014г. - 1экз.;

435. платежное поручение №1064 от 06.11.2014г. - 1экз.;

436. платежное поручение №1192 от 25.12.2014г. - 1экз.;

437. договор поставки №СМ-0629 от 18.02.2014г.  ООО "Сухоложскцемент" на цемент - 1экз.

438. счет-фактура № 90038847 от 25.04.2014г. на цемент - 1 экз.;

439. товарная накладная №800559008  от 28. 04.2014г. - 1экз.;

440. платежное поручение № 228 от 04.04.2014г. - 1экз.;

441. счет-фактура № 302 от 14.05.2014г. - 1 экз.;

442. товарная накладная №121  от 14. 05.2014г. - 1экз.. 

443. платежное поручение № 335 от 13.05.2014г. - 1экз.;

444. схема расстояния Тобольск - Горноправдинск - 1экз.;

445. схема расстояния Тюмень - Горноправдинск - 1экз.;

446. схема расстояния Ханты-Мансийск - Горноправдинск - 1экз.

447. Акт к расчету разницы стоимости  щебня. 

448. Счет- фактура ООО "Авангард"№501 от30.04.2014г

449. Товарная накладная №501 от30.04.2014г ООО "Авангард".

450. Счет-фактура №00000917 от 16.07.14г ОАО "Тобольский речной порт" 

451. Товарная накладная №457 от16.07.14г ОАО "Тобольский речной порт"

452. Счет-фактура №194 от 30.09.2013г ООО "Пиллигрим"

453. Товарная накладная 194 от 30,09,2013г ООО "Пиллигрим"

454. Счет-фактура №226 от 29.10.2013г ООО "Пиллигрим"

455. Товарная накладная 226 от 29.10.2013г ООО "Пиллигрим"

456. Счет-фактура №105 от 29.06.2014г ООО "Пиллигрим")

457. Счет-фактура №146 от 22.09.2014г ООО "Пиллигрим"

458. Счет-фактура №200 от 18.10.2014г ООО "Пиллигрим2

459. Счет-фактура №14 от 31.01.2014г ООО "Пиллигрим"

460. Товарная накладная 14 от 31.01.2014г ООО "Пиллигрим"

461. Счет-фактура 00000284  от 30.09.2014г ООО "Трансспецстрой"

462. Товарная накладная 28 от 30.09.2014г ООО " Трансспецстрой "

463. Счет-фактура №00000315 от 31.10.2014г ООО " Трансспецстрой "

464. Товарная накладная 34 от 31.01.2014г ООО " Трансспецстрой "

465. Расчет №15 разница стоимости песка

466. Акт к расчету разницы стоимости песка. 836 847.71р

467. Счет- фактура ООО "Авангард"№501 от30.04.2014г

468. Договор ЗАО "ТТК-Спецсервис" 22/13-ПС от 18.10.2013г

469. Счет-фактура №00000302 от 14.05.14г ОАО "Тобольский речной порт" от 14.05.14г

470. Товарная накладная №121 от14.05.14г ОАО "Тобольский речной порт"

471. Копия  общей пояснительной записки раздел 1 , том 1 

472. Копия ПОС

473. Копия письма  № 2769 \16 от 20.05.2016.

Копии всех актов Кс-2 КС-3 по контракту.

В материалы дела поступило экспертное заключение от 29.06.2017 № 03-17-ССТЭ.

Согласно выводам которого, Объем и стоимость фактически выполненных обществом с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СМУ-1" и переданных муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" дополнительных работ в рамках муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд от 02.10.2013 № 0187300008413000365-0466580-02 в редакции дополнительного соглашения к контракту от 28.03.2014 № 1 по актам о приемке выполненных работ от 09.03.2016 № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, акту на разницу стоимости песка от 09.03.2016, акту на перебазировку техники от 09.03.2016, актам о приемке выполненных работ без даты № 7, 8, акту на разницу бетона от 06.04.2016, акту на разницу стоимости щебня от 06.04.2016 представлен в таблице 1 данного Заключения на общую сумму 64 379 473 рубля 78 копеек.

Дополнительным экспертным заключением от 22.12.2017 № 03-17-ССТЭ-Доп.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о назначении по делу № А75-12439/2016 строительной экспертизы: На разрешение эксперта поставить следующий вопрос:

Каковы объем и стоимость фактически выполненных обществом с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СМУ-1» и переданных муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА» дополнительных работ в рамках муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд от 02.10.2013 № 0187300008413000365¬0466580-02 в редакции дополнительного соглашения к контракту от 28.03.2014 №1 по актам о приемке выполненных работ от 09.03.2016 № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, акту на разницу стоимости песка от 09.03.2016, акту на перебазировку техники от 09.03.2016, актам о приемке выполненных работ без даты № 7, 8, акту на разницу бетона от 06.04.2016, акту на разницу стоимости щебня от 06.04,2016, отвечавших предъявлявшимся к ним действовавшим законодательством Российской Федерации и указанным контрактом качественным требованиям, которые могли быть использованы муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА» по назначению для указанной в контракте цели и (или) недостатки в которых могли быть устранены муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА» или обществом с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СМУ-1» (несущественные и устранимые недостатки), выполнение которых было согласовано муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА» и необходимость выполнения которых была вызвана недостатками утвержденной проектно-сметной документации, неотложностью выполнения, способной повлечь разрушение объекта, и обязательных для последующего ввода объекта в эксплуатацию?

Ответ. Дополнительные работы, представленные в актах дополнительных работ, выполненных обществом с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СМУ-1» и переданных муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА», выполненных в рамках муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд от 02.10.2013 № 0187300008413000365-0466580-02 в редакции дополнительного соглашения к контракту от 28.03.2014 №1, по актам о приемке выполненных работ от 09.03.2016 № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, акту на разницу стоимости песка от 09.03.2016, акту на перебазировку техники от 09.03.2016, актам о приемке выполненных работ без даты № 7, 8, акту на разницу бетона от 06.04.2016, акту на разницу стоимости щебня от 06.04.2016, представляют собой строительные работы, транспортные услуги, затраты на перебазировку строительной техники, разницу в стоимости материалов и оборудования.

В результате проведенных исследований (результаты сведены в Таблицу 1) экспертизой установлено наличие оснований для выполнения дополнительных работ:

1) во всех вышеперечисленных актах включены работы, которые:

- отвечают действовавшему законодательству РФ (требование1, Таблица 1);

- отвечают предъявлявшимся к ним указанным «Контрактом» качественным требованиям (требование 2, Таблица 1);

- работы могли быть использованы МКУ «УКСиР» по назначению для указанной в «Контракте» цели (требование 3, Таблица 1).

2) существенные и неустранимые недостатки, которые не могли быть устранены МКУ «УКСиР» (требование 4, Таблица 1), имеют дополнительные работы по следующим актам:

- Дополнительные работы по Акту № 1 от 09.03.2016 года на сумму 730 257 рублей, относятся к строительству здания административно-бытового корпуса (АБК), а именно дополнительные работы связанные с изменением состава полов в техподполье и оплату установки;

- Дополнительные работы, по Акту № 3 от 09.03.2016 года на сумму 21 086 351 рубль, относятся к «Сооружению хоккейного корта», а именно дополнительные работы, в связи с изменением (увеличением) веса металлоконструкций;

- Дополнительные работы по Акту №4 от 09.03.2016г. на сумму 950 449 рублей относятся к «Наружным сетям связи»;

- Дополнительные работы по Акту №5 от 09.03.2016 года на сумму 3 309 666 рублей относятся в работам по «Наружным сетям канализации»;

- Дополнительные работы по Акту № 7 от 06.04.2016 года, на сумму 492 631 рубль и по Акту № 7а от 06.04.2016 года на сумму 245 768 рублей относятся к строительству объекта «Арена»;

- Дополнительные работы по Акту № 8 от 09.03.2016 года, на сумму 3 387 222 рубля, относятся к строительству всего объекта «Арена» и предусматривают водопонижение и водоотведение;

- Дополнительные работы по Акту № 9а от 09.03.2016 года 1 559 882 рубля относятся к транспортировке-строительных материалов;

- Дополнительные работы по Акту № 11 от 09.03.2016 года на сумму 1 926 135 рубля относятся к транспортировке строительных материалов;

- Дополнительные работы по Акту № 12 от 09.03.2016 года на сумму 2 002 152 рубля относятся к транспортировке строительных материалов;

- Дополнительные работы по Акту №12а от 09.03.2016 года на сумму 1 284 627 рублей относятся к выполнению земляных работ при устройстве сооружений объекта «Арена»;

- Дополнительные работы по Акту №13 от 09,03.2016 года на сумму 490 190 рублей относятся к транспортировке строительных материалов.

3) Существенные и неустранимые недостатки, которые не могли быть устранены ООО СК «СМУ-1» (требование 5, Таблица 1), имеют дополнительные работы по следующим актам:

-  Дополнительные работы по Акту № 1 от 09.03.2016 года, на сумму 730 257 рублей, относятся к строительству здания административно-бытового корпуса (АБК);

- Дополнительные работы по Акту № 2 от 09.03.2016 года сумму 2 012 358 рублей, относятся к комплектации оборудования включены, раздел проекта - «Технологические решения»;

-Дополнительные работы, по Акту № 3 от 09.03.2016 года на сумму 21 086 351 рубль, относятся к «Сооружению хоккейного корта», а именно дополнительные работы, связанные и с изменением (увеличением) веса металлоконструкций:

-Дополнительные работы по Акту №4 от 09.03.2016г. на сумму 950 449 рублей относятся к «Наружным сетям связи»;

-Дополнительные работы по Акту №5 от 09.03.2016 года на сумму 3 309 666 рублей относятся в работам по «Наружным сетям канализации»;

-Дополнительные работы но Акту № 7 от 06.04.2016 года, на сумму 492 631 рубль и по Акту № 7а от 06.04.2016 года на сумму 245 768 рублей относятся к строительству объекта «Арена»;

-Дополнительные работы по Акту № 8 от 09.03.2016 года на сумму 3 387 222 рубля, относятся к строительству всего объекта «Арена» и предусматривают водопонижение и водоотведение;

-Дополнительные работы по Акту № 9а от 09.03.2016 года 1 559 882 рубля относятся к транспортировке строительных материалов;

-Дополнительные работы по Акту № 11 от 09.03.2016 года на сумму 1 926 135 рубля относятся к транспортировке строительных материалов;

-Дополнительные работы по Акту № 12 от 09.03.2016 года на сумму 2 002 152 рубля относятся к транспортировке строительных материалов;

-Дополнительные работы по Акту №12а от 09.03.2016 года на сумму 1 284 627 рублей относятся к выполнению земляных работ при устройстве сооружений объекта «Арена»;

-Дополнительные работы по Акту №13 от 09.03.2016 года на сумму 490 190 рублей относятся к транспортировке строительных материалов.

4) Выполнение работ было согласовано (требование 6» Таблица 1) МКУ «УКСиР»: 

- Дополнительные работы по Акту № 1 от 09.03.2016 года, на сумму 730 257 рублей, относятся к строительству здания административно-бытового корпуса (АБК);

-Дополнительные работы, по Акту № 2 от 09.03.2016 года на сумму 2 012 358 рублей, относятся к комплектации оборудования, в проект эти работы включены, раздел «Технологические решения»;

-Дополнительные работы, по Акту № 3 от 09.03.2016 года на сумму 21 086 351 рубль, относятся к «Сооружению хоккейного корта», а именно дополнительные работы, в связи с изменением (увеличением) веса металлоконструкций;

- Дополнительные работы по Акту №4 от 09.03.2016г. на сумму 950 449 рублей относятся к «Наружным сетям связи»;

-Дополнительные работы по Акту №5 от 09.03.2016 года на сумму 3 309 666 рублей относятся в работам по «Наружным сетям канализации».

-Дополнительные работы по Акту № 7 от 06.04.2016 года, на сумму 492 631 рубль и по Акту № 7а от 06.04.2016 года на сумму 245 768 рублей относятся к строительству объекта «Арена»;

-Дополнительные работы по Акту № 8 от 09.03.2016 года, на сумму 3 387 222 рубля, относятся к строительству всего объекта «Арена» и предусматривают водопонижение и водоотведение;

-Дополнительные работы по Акту № 9а от 09.03.2016 года 1 559 882 рубля относятся к транспортировке строительных материалов;

-Дополнительные работы по Акту № б/н от 06.04.2016 года на сумму 6 453 989 рублей относятся к разнице в стоимости бетонной смеси;

-Дополнительные работы по Акту № 11 от 09.03.2016 года на сумму 1 926 135 рубля относятся к транспортировке строительных материалов;

-Дополнительные работы по Акту № 12 от 09.03.2016 года на сумму 2 002 152 рубля относятся к транспортировке строительных материалов:

- Дополнительные работы по Акту №12а от 09.03.2016 года на сумму 1 284 627 рублей относятся к выполнению земляных работ при устройстве  сооружений объекта «Арена»;

- Дополнительные работы по Акту №13 от 09.03.2016 года на сумму 490 190 рублей относятся к транспортировке строительных материалов;

- Дополнительные работы по Акту № б/н от 06.04.2016 года на сумму 2 240 734 рубля относятся к разнице в стоимости щебня;

- Дополнительные работы по Акту № б н от 09.03.2016 года на сумму 836 848 рублей относятся к разнице в стоимости песка. 

5) выполнение работ (требование 7, Таблица 1) было вызвано недостатками проектно-сметной документации:

-Дополнительные работы по Акту № 1 от 09.03.2016 года на сумму 730 257 рублей, относятся к строительству здания административно-бытового корпуса (АБК);

-Дополнительные работы, по Акту № 3 от 09.03.2016 года на сумму 21 086 351 рубль, относятся к «Сооружению хоккейного корта», а именно дополнительные работы, в связи с изменением (увеличением) веса металлоконструкций;

- Дополнительные работы по Акту №4 от 09.03.2016г. на сумму 950 449 рублей относятся к «Наружным сетям связи»;

-Дополнительные работы по Акту №5 от 09.03.2016 года на сумму 3 309 666 рублей относятся в работам по «Наружным сетям канализации»;

-Дополнительные работы по Акту № 7 от 06.04.2016 года, на сумму 492 631 рубль и по Акту № 7а от 06,04.2016 года на сумму 245 768 рублей относятся к строительству объекта «Арена»;

-Дополнительные работы по Акту № 8 от 09.03.2016 года, на сумму 3 387 222 рубля, относятся к строительству всего объекта «Арена» и предусматривают водопонижение и водоотведение;

-Дополнительные работы по Акту № 9а от 09.03.2016 года 1 559 882 рубля относятся к транспортировке строительных материалов;

-Дополнительные работы по Акту № 11 от 09.03.2016 года на сумму 1 926 135 рубля относятся к транспортировке строительных материалов;

- Дополнительные работы по Акту № 12 от 09.03.2016 года на 2 002 152 рубля относятся к транспортировке строительных материалов;

-Дополнительные работы по Акту №12а от 09.03.2016 года на сумму 1 284 627 рублей относятся к выполнению земляных работ при устройстве сооружений объекта «Арена;

-Дополнительные работы по Акту №13 от 09.03.2016 года на сумму 490 190 рублей относятся к транспортировке строительных материалов.

6) Выполнение работ (требование 8, Таблица 1) было вызвано неотложностью выполнения:

-Дополнительные работы по Акту № 7 от 06.04.2016 года, на сумму 492 631 рубль и по Акту № 7а от 06.04.2016 года на сумму 245 768 рублей относятся к строительству объекта «Арена»;

-Дополнительные работы по Акту № 8 от 09.03.2016 года, на сумму 3 387 222 рубля, относятся к строительству всего объекта «Арена» и предусматривают водопонижение и водоотведение;

-Дополнительные работы по Акту №12а от 09.03.2016 года на сумму I 284 627 рублей относятся к выполнению земляных работ при устройстве сооружений объекта «Арена».

7) Выполнение работ (требование 9, Таблица 1) было вызвано способностью повлечь разрушение объекта:

- Дополнительные работы по Акту № 1 от 09.03.2016 года, на сумму 730 257 рублей, относятся к строительству здания административно-бытового корпуса (АБК);

- Дополнительные работы, по Акту № 3 от 09.03.2016 года на сумму 21 086 351 рубль, относятся к «Сооружению хоккейного корта», а именно дополнительные работы, в связи с изменением (увеличением) веса металлоконструкций;

- Дополнительные работы по Акту №4 от 09.03.2016г, на сумму 950 449 рублей относятся к «Наружным сетям связи»;

- Дополнительные работы по Акту №5 от 09.03.2016 года на сумму 3 309 666 рублей относятся в работам по «Наружным сетям канализации»;

- Дополнительные работы по Акту № 7 от 06.04.2016 года, на сумму 492 631 рубль и по Акту № 7а от 06.04.2016 года на сумму 245 768 рублей относятся к строительству объекта «Арена»;

- Дополнительные работы по Акту № 8 от 09.03.2016 года, на сумму 3 387 222 рубля, относятся к строительству всего объекта «Арена» и предусматривают водопонижение и водоотведение;

-Дополнительные работы по Акту №12а от 09.03.2016 года на сумму 1 284 627 рублей относятся к выполнению земляных работ при устройстве сооружений объекта «Арена».

8) Работы обязательные (требование 10, Таблица 1) для последующего ввода объекта в эксплуатацию:

-Дополнительные работы по Акту № 1 от 09.03.2016 года, на сумму 730 257 рублей, относятся к строительству здания административно-бытового корпуса (АБК);

-Дополнительные работы, по Акту № 2 от 09.03.2016 года на сумму 2 012 358 рублей, относятся к комплектации оборудования, в проект эти работы включены, раздел «Технологические решения»;

-Дополнительные работы, по Акту № 3 от 09.03.2016 года на сумму 21 086 351 рубль, относятся к «Сооружению хоккейного корта», а именно дополнительные работы, в связи с изменением (увеличением) веса металлоконструкций;

-Дополнительные работы по Акту №4 от 09.03.2016г. на сумму 950 449 рублей относятся к «Наружным сетям связи»;

-Дополнительные работы по Акту №5 от 09.03.2016 года на сумму 3 309 666 рублей относятся в работам по «Наружным сетям канализации»;

-Дополнительные работы по Акту № 7 от 06.04.2016 года, на сумму 492 631 рубль и по Акту № 7а от 06.04.2016 года на сумму 245 768 рублей относятся к строительству объекта «Арена»;

- Дополнительные работы по Акту № 8 от 09.03.2016 года, на сумму 3 387 222 рубля, относятся к строительству всего объекта «Арена» и предусматривают водопонижение и водоотведение;

- Дополнительные работы по Акту №12а от 09.03.2016 года на сумму 1 284 627 рублей относятся к выполнению земляных работ при устройстве сооружений объекта «Арена».

По совокупности соответствия требованиям к дополнительным работам, экспертиза считает, что работы выполненные по ниже перечисленным актам относятся к дополнительным и должны быть оплачены подрядчику с учетом проведенных исследований но технологии строительного производства, приведенных в разделе 9.1.3. данного Заключения:

- Дополнительные работы по Акту №1 от 09.03.2016 года;

-Дополнительные работы, по Акту №3 от 09.03.2016 года;

-Дополнительные работы по Акту №4 от 09.03.2016 года;

-Дополнительные работы по Акту №5 от 09.03.2016 года;

-Дополнительные работы по Акту №7 от 06.04.2016 года и по Акту № 7а от 06.04.2016 года;

-Дополнительные работы по Акту № 8 от 09.03.2016 года;

-Дополнительные работы по Акту №12а от 09.03.2016 года;

-Дополнительные работы по Акту № 9а от 09.03.2016 года;

-Дополнительные работы по Акту № 11 от 09.03.2016 года;

-Дополнительные работы по Акту № 12 от 09.03.2016 года;

-Дополнительные работы по Акту №12а от 09.03.2016 года;

-Дополнительные работы по Акту №13 от 09.03.2016 года.

Для ответа на вопрос суда экспертом по ценообразованию дополнительно проведен анализ Локально-сметных расчетов и расчетов разницы стоимости бетонной смеси, щебня и песка, на основании которых были составлены акты о приемке выполненных работ от 09.03.2016 № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9а, 11, 12. 12а. 13, акт на разницу стоимости песка от 09.03.2016, акт на перебазировку техники от 09.03,2016, акты о приемке выполненных работ без даты № 7, 8, акт на разницу бетона от 06.04.2016, акт на разницу стоимости щебня от 06.04.2016 с учетом проведенных исследований эксперта по технологии строительного производства.

По результатам анализа данных документов с учетом проведенных исследований эксперта по технологии строительного производства, составлена Таблица 2 «Объем и стоимость фактически выполненных ООО СК «СМУ-1» и переданных МКУ «УКСиР» дополнительных работ» в которой отражены дополнительные работыи материалы, их объем и стоимость.

Ответ эксперта ФИО7 на вопрос суда.

Объем и стоимость фактически выполненных обществом с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СМУ-1» и переданных муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА» дополнительных работ в рамках муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд от 02.10.2013 № 0187300008413000365-0466580-02 в редакции дополнительного соглашения к контракту от 28.03.2014 №1 по актам о приемке выполненных работ от 09.03.2016 № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, акту на разницу стоимости песка от 09.03.2016, акту на перебазировку техники от 09.03.2016, актам о приемке выполненных работ без даты № 7, 8, акту на разницу бетона от 06.04.2016, акта на разницу стоимости щебня от 06.04.2016, отвечавших предъявлявшимся к ним действовавшим законодательством Российской Федерации и указанным контрактом качественным требованиям, которые могли быть использованы муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА» по назначению для указанной в контракте цели и (или) недостатки в которых могли быть устранены муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА» или обществом с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СМУ-1» (несущественные и устранимые недостатки), выполнение которых было согласовано муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА» и необходимость выполнения которых была вызвана недостатками утвержденной проектно-сметной документации, неотложностью выполнения, способной повлечь разрушение объекта, и обязательных для последующего ввода объекта в эксплуатацию, представлен в таблице 2 данного Заключения на общую сумму 30 150 498 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (части 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценивая выводы эксперта и позицию сторон относительно данных выводов, суд приходит к выводу, что заключение экспертов соответствует требованиям статей 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в нем отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сведения, указанное заключение является ясным и полным, противоречия в выводах эксперта отсутствуют, в связи с чем, указанное заключение является надлежащим доказательством по делу.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что требование о взыскании основной задолженности в размере 4 855 624 рубля  по актам дополнительных работ от 06.04.2016 №№ 7, 7а, от 09.03.2016 № 8, от 09.03.2016 № 12а подлежит удовлетворению.

В материалы дела поступило заявление общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СУДЕБНЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ "ИНДЕКС" о взыскании судебных расходов в размере 22 880 рублей, связанных с участием эксперта в судебном заседании. 

В обоснование указанного требования общество представил в материалы дела копии документов, подтверждающих расходы эксперта ФИО8, связанные с командировкой для участия в судебном заседании, а именно автобусный билет от 25.11.2017 № 1790 (140 рублей), авиа билет от 20.11.2017 № 2986130625167 (6 270 рублей), авиа билет от 20.11.2017 № 2986130625259 (6 270 рублей), приказ о направлении в командировку от 23.11.2017 № 1, счет от 28.11.2017 № 325 и чек № 1 на оплату услуг проживания (6 000 рублей).

Материалами дела подтверждается участие представителя эксперта ФИО8 в судебном заседании, однако в материалы дела не представил локальный правовой акт общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СУДЕБНЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ "ИНДЕКС" о порядке и размерах компенсации командировочных расходов, следовательно в суточных расходах представителя истца отказано. 

Исходя из анализа совершенных процессуальных действий и представленных документов в материалы дела общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СУДЕБНЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ "ИНДЕКС" в качестве обоснования своей позиции, суд счел разумным пределом расходов общества в сумме 18 680 рублей. 

На основании статей 101, 110. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд отнес судебные расходы по оплате экспертизы в размере 1 408 рублей 88 копеек на ответчика, 17 271 рубль 12 копеек на истца.

Исходя из размера рассмотренных исковых требований, подлежащая уплате государственная пошлина в соответствии с пунктом 6 статьи 52, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составила 200 000 рублей.

В соответствии со статьями 101, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд относит судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 084 рубля 39 копеек на ответчика, 184 915 рублей 61 копейка на истца.

Определением суда от 05.04.2017 по делу была назначена судебная экспертизы, ее проведение было поручено обществу с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СУДЕБНЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ "ИНДЕКС" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 119021, 

<

...>), определен размер вознаграждения в сумме 150 000 рублей. 

Истец по чеку-ордеру от 22.03.2017 перечислил на депозитный счет Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры денежную сумму в размере 150 000 рублей. 

Экспертное заключение в материалы дела поступило и признано судом соответствующим требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 101, 110. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд отнес судебные расходы по оплате экспертизы в размере 11 313 рублей 29 копеек на ответчика, 138 686 рубелей 71 копейка на истца.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СМУ-1" удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" в пользу общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СМУ-1" 4 855 624 рубля - основную задолженность.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" в пользу общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СМУ-1" 11 313 рублей 29 копеек - судебные расходы по оплате экспертизы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СМУ-1" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СУДЕБНЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ "ИНДЕКС" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 119021, 

<

...>) 17 271 рубль 12 копеек - судебные расходы, связанные с явкой эксперта в судебное заседание.

Взыскать с муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СУДЕБНЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ "ИНДЕКС" (ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 119021, 

<

...>) 1 408 рублей 88 копеек - судебные расходы, связанные с явкой эксперта в судебное заседание.

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу.

Обязать общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СМУ-1" в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 184 915 рублей 61 копейки.

В случае неисполнения решения суда в указанной части выдать исполнительный лист.

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяЮ.П. Щепелин