Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-205/19-141-3

18 октября 2019г.

г.  Москва

Резолютивная часть решения объявлена                14 октября 2019г.

Мотивированное решение изготовлено                            18 октября 2019г.

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел дело по иску ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» (ИНН 

<

***>) 

к АО «Реставрационные Компании» (ИНН 

<

***>) 

об обязании исполнить гарантийные обязательства

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО2 по доверенности от 09.01.2019г., ФИО3 по доверенности от 09.01.2019г.,

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 11.04.2019г., ФИО5 по доверенности от 15.08.2019г., ФИО6 по доверенности от 15.08.2019г., 

 

УСТАНОВИЛ:

ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» обратилось с учетом уточнения предмета исковых требований к АО «Реставрационные Компании» об обязании в срок до 01.07.2020 года выполнить гарантийные обязательства по договору №Р151230-1 от 30.12.2015г.

В  процессе  рассмотрения дела проведена судебная экспертиза.

Истец поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

Оценив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу об  удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, между истцом и ответчиком заключен договор №Р151230-1 от 30.12.2015г.

В соответствии с вышеуказанным договором ответчик обязался выполнять работы, а истец принимать и оплачивать их.

В силу п. 8.3 договора подрядчик отвечает за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока и возникшие по его вине (или по вине субподрядчиков). Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего уполномоченного письменной доверенностью представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

03.11.2017г. сторонами оформлен акт сдачи-приемки выполненных работ и составлен перечень недостатков (дефектов) выявленных в выполненных ответчиком работах.

Истцом неоднократно в адрес ответчика направлялись претензии с требованием добровольного исполнения гарантийных обязательств по договору, которые последним оставлены без ответа и удовлетворения.

В соответствии с п. 8.4 договора после подписания сторонами акта, фиксирующего дефекты, возникшие в течение гарантийного срока по вине подрядчика (или субподрядчиков), подрядчик обязан исправить и устранить дефекты за свой счет в течение 15 рабочих дней с даты подписания указанного в настоящем пункте договора акта.

Несмотря на подписание ответчиком перечня недостатков в работах, выполненных им по договору, дефекты до настоящего времени не устранены.

В порядке ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В соответствии с п. 1 ст. 722 ГК РФ, в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (п. 1 ст. 721 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 721 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В силу п. 1 ст. 723 ГК РФ, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Так, в ходе судебного разбирательства судом назначена экспертиза, которая установила перечень дефектов, недоделок и некачественного выполненных работ по договору №Р151230-1 от 30.12.2015г., стоимость устранения которых составляет 1 931 585руб. 04коп., а именно:

№

Вид работ

Ед. изм.

Объем

Примечание

1

Демонтаж фасадных панелей декор. Элемент «Змейка»

кв.м.

97,5

Ряд А-А

5 этаж: 4   ось; 8 ось; 12 ось; 12-14 ось; 17-19 ось; 21-22 ось; 25-26 ось; 4 этаж: 1 ось; 3 этаж: 10 ось; 2 этаж: 6 ось;

2

Монтаж фасадных панелей декор. Элемент «Змейка»

кв.м.

97,5

3

Демонтаж фасадных свегопрозрачных конструкций

кв.м.

443,6

Цокольный этаж: - помещение №№2,4,6,17,32,36,38; 1 этаж: 

-помещение №33;

2 этаж: -помещение№№ 12,37,40;

3 этаж: - помещение №№12, 23;

5 этаж: - помещение №40.

Фасад в осях 1-28 ряд А

трещины в 3 стеклопакетах;

4

Монтаж фасадных светопрозрачных конструкций

кв.м.

443,6

5

Замена стеклопакетов оконных  в цокольном этаже

кв.м.

16,84

Цокольный этаж: - помещение №№2,4,6,17,32,36,38; 1 этаж:

-помещение №33;

2 этаж: -помещение№№ 12,37,40;

3 этаж: -помещение №№12, 23;

5 этаж: - помещение №40.

Фасад в осях 1-28 ряд А

трещины в 3 стеклопакетах;

6

Замена светопрозрачных фасадных конструкций

кв.м.

24,8

7

Устранение протечек фасадов

5 этаж.

- ряд Б, 26 ось;

-ряд Б- В, 28 ось помещение №43;

-ряд А, 15-16 ось помещение №29;

-ряд А, 13-15 ось, помещение №29;

-ряд А, 20-22 ось помещение №44;

4 этаж.

-ряд А, 3 ось;

-ряд А,22-23 ось.

3 этаж.

-ряд А, 6-7 ось. 2 этаж.

-ряд А, 7-8 ось, помещение №8;

-ряд А, 13-14 и 14-15 ось, помещение №20;

-ряд А, 21-22 ось, помещение №37;

-ряд А, 22-23 ось, помещение №38;

-произошло    намокание    и отслоение откосов. 1 этаж.

-ряд А, 12-13 ось, помещение №15;

-ряд А, 23-25 ось, помещение №38.5 этаж.

8

Ремонт кровли (устранить вздутие, сползание, отслоение        финишного покрытия на кровле)

кв.м.

448

9

Монтаж водоприемных воронок

шт

4

10

Демонтаж защиты парапета

м.п.

16

11

Монтаж защиты парапета

м.п.

16

12

Замена  потолочных  плит типа «Армстронг» всего

шт

144

Помещение №39

шт

28

Помещение №40

шт

22

Помещение №42

шт

24

Помещение №43

шт

52

Помещение №46

шт

18

13

Замена светильников потолочных систем «Армстронг»

HIT

18

Помещение №40

HIT

2

Помещение №42

шт

4

Помещение №43

шт

8

Помещение №46

шт

4

14

Замена откосов (гипсокартон)

кв.м.

152

Помещение №8

КВ.М.

24

Помещение №20

кв.м.

26

Помещение №29

кв.м.

12

Помещение №37

кв.м.

22

Помещение №38

кв.м.

24

Помещение №43

кв.м.

26

Помещение №44

кв.м.

18

15

Окраска откосов

кв.м.

152

Помещение №8

кв.м.

24

Помещение №20

кв.м.

26

Помещение №29

кв.м.

12

Помещение №37

кв.м.

22

Помещение №38

кв.м.

24

Помещение №43

кв.м.

26

Помещение №44

кв.м.

18

16

Ремонт штукатурки стен

кв.м.

64

Помещение №25

кв.м.

36

Помещение №26

кв.м.

28

17

Огрунтовка стен

кв.м.

64

18

Окраска стен

кв.м.

267

Помещение №25

кв.м.

147

Помещение №26

кв.м.

120

19

Ремонт простенков из гипсокартона

кв.м.

124

Помещение №8

кв.м.

16

Помещение №20

кв.м.

16

Помещение №29

кв.м.

22

Помещение №37

кв.м.

26

Помещение №38

кв.м.

20

Помещение №44

кв.м.

24

20

Шпатлевка простенков

кв.м.

124

21

Окраска простенков

кв.м.

124

Помещение №8

кв.м.

16

Помещение №20

кв.м.

16

Помещение №29

кв.м.

22

Помещение №37

кв.м.

26

Помещение №38

кв.м.

20

Помещение №44

кв.м.

24

22

Ремонт отделки стен из гипсокартона

кв.м.

72

Помещение № 43

23

Шпатлевка стен

кв.м.

72

Помещение № 43

24

Окраска стен

кв.м.

72

Помещение №43

кв.м.

72

25

Замена теплообменников

шт

4

26

Герметизация ввода электрокабелей в здание (произвести герметизацию кабель каналов на кровле)

место

1

27

Герметизация ввода трубопроводов отопления

место

1

28

Разборка отмостки

кв.м.

8,3

устранить грибковые образования в серверный цокольный этаж и лифтовой шахте в осях 18-19

29

Разработка грунта

куб.м.

1,8

30

Гидроизоляция фундамента с наружной стороны

4,5

31

Обратная засыпка

куб.м.

3,4

32

Уплотнение грунта

куб.м.

3,4

33

Восстановление отмостки

8,3

34

Демонтаж тротуарной плитки

кв.м.

12,5

35

Уплотнение основания под плитку тротуарную

куб.м.

3,75

36

Укладка тротуарной плитки

12,5

37

Устройство водоотвода в приямке пандуса

место

1

38

Устранение протечки фасада   на примыкании входа        маломобильных групп

ряд А, ось 19-21

39

Монтаж поручня на пандусе

м.п.

4,6

40

Ремонт входной группы

кв.м.

7,6

по ряду А, 14-15 ось.

Экспертом также установлена стоимость невыполненных ответчиком работ по договору на сумму 6 270 001руб. 48коп.

Учитывая, что ответчиком до настоящего времени вышеуказанные дефекты в нарушение условий договора не устранены, наличие недостатков в выполненных работ установлено судебной экспертизой, то в его действиях усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, что в соответствии со ст. 310 ГК РФ не допускается, а, следовательно, требование истца неимущественного характера является обоснованным, доказанным представленными доказательствами и подлежит удовлетворению в судебном порядке.

Распределяя расходы за проведенную судебную экспертизу, суд приходит к следующим выводам.

18.06.2019г. экспертным учреждением проведена судебная строительно-техническая экспертиза. Стоимость экспертизы составила 270 000руб. 00коп.

В соответствии с определением от 10.07.2019г. по настоящему делу бухгалтерией Арбитражного суда г. Москвы перечислено АНО «Многофункциональный центр экспертиз» в счет оплаты экспертизы 270 000руб. 00коп. на основании счета №99 от 02.07.2019г., поступившие от ФГУП «ТПО «Киностудия Союзмультфильм» по платежному поручению №909 от 12.03.2019г.

Поскольку решением суда исковые требования удовлетворены, расходы на проведение экспертизы подлежат отнесению на ответчика.

Кроме того, АНО «Многофункциональный центр экспертиз» выставлен счет №133 от 16.09.2019г. на сумму 15 000руб. 00коп. за выезд эксперта в судебное заседание.

По вызову суда, в судебном заседании 16.09.2019г. принимал участие эксперт АНО «Многофункциональный центр экспертиз» ФИО7 на основании определения суда от 19.08.2019г.

В силу ст. 55 АПК РФ лицо, которому поручено проведение экспертизы, обязано по вызову арбитражного суда явиться в суд и дать объективное заключение по поставленным вопросам.

Статьей 106 АПК РФ установлено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

﻿В соответствии с ч. 1 ст. 107 АПК РФ экспертам, свидетелям и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

Поскольку решением суда исковые требования удовлетворены, расходы на участие в судебном заседании эксперта ФИО7 также подлежат отнесению на ответчика.

На основании ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 720, 721, 722, 723 ГК РФ, ст. ст. 106, 107, 110, 167-170, 176  АПК РФ, суд   

РЕШИЛ:

Обязать Акционерное общество «Реставрационные Компании» (ИНН 

<

***>) в срок до 01.07.2020 года выполнить гарантийные обязательства по договору №Р151230-1 от 30.12.2015г., заключенного между Федеральным государственным унитарным предприятием «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» (ИНН 

<

***>) и Акционерным обществом «Реставрационные Компании» (ИНН 

<

***>), а именно:

№

Вид работ

Ед. изм.

Объем

Примечание

1

Демонтаж фасадных панелей декор. Элемент «Змейка»

кв.м.

97,5

Ряд А-А

5 этаж: 4   ось; 8 ось; 12 ось; 12-14 ось; 17-19 ось; 21-22 ось; 25-26 ось; 4 этаж: 1 ось; 3 этаж: 10 ось; 2 этаж: 6 ось;

2

Монтаж фасадных панелей декор. Элемент «Змейка»

кв.м.

97,5

3

Демонтаж фасадных свегопрозрачных конструкций

кв.м.

443,6

Цокольный этаж: - помещение №№2,4,6,17,32,36,38; 1 этаж: 

-помещение №33;

2 этаж: -помещение№№ 12,37,40;

3 этаж: - помещение №№12, 23;

5 этаж: - помещение №40.

Фасад в осях 1-28 ряд А

трещины в 3 стеклопакетах;

4

Монтаж фасадных светопрозрачных конструкций

кв.м.

443,6

5

Замена стеклопакетов оконных  в цокольном этаже

кв.м.

16,84

Цокольный этаж: - помещение №№2,4,6,17,32,36,38; 1 этаж:

-помещение №33;

2 этаж: -помещение№№ 12,37,40;

3 этаж: -помещение №№12, 23;

5 этаж: - помещение №40.

Фасад в осях 1-28 ряд А

трещины в 3 стеклопакетах;

6

Замена светопрозрачных фасадных конструкций

кв.м.

24,8

7

Устранение протечек фасадов

5 этаж.

- ряд Б, 26 ось;

-ряд Б- В, 28 ось помещение №43;

-ряд А, 15-16 ось помещение №29;

-ряд А, 13-15 ось, помещение №29;

-ряд А, 20-22 ось помещение №44;

4 этаж.

-ряд А, 3 ось;

-ряд А,22-23 ось.

3 этаж.

-ряд А, 6-7 ось. 2 этаж.

-ряд А, 7-8 ось, помещение №8;

-ряд А, 13-14 и 14-15 ось, помещение №20;

-ряд А, 21-22 ось, помещение №37;

-ряд А, 22-23 ось, помещение №38;

-произошло    намокание    и отслоение откосов. 1 этаж.

-ряд А, 12-13 ось, помещение №15;

-ряд А, 23-25 ось, помещение №38.5 этаж.

8

Ремонт кровли (устранить вздутие, сползание, отслоение        финишного покрытия на кровле)

кв.м.

448

9

Монтаж водоприемных воронок

шт

4

10

Демонтаж защиты парапета

м.п.

16

11

Монтаж защиты парапета

м.п.

16

12

Замена  потолочных  плит типа «Армстронг» всего

шт

144

Помещение №39

шт

28

Помещение №40

шт

22

Помещение №42

шт

24

Помещение №43

шт

52

Помещение №46

шт

18

13

Замена светильников потолочных систем «Армстронг»

HIT

18

Помещение №40

HIT

2

Помещение №42

шт

4

Помещение №43

шт

8

Помещение №46

шт

4

14

Замена откосов (гипсокартон)

кв.м.

152

Помещение №8

КВ.М.

24

Помещение №20

кв.м.

26

Помещение №29

кв.м.

12

Помещение №37

кв.м.

22

Помещение №38

кв.м.

24

Помещение №43

кв.м.

26

Помещение №44

кв.м.

18

15

Окраска откосов

кв.м.

152

Помещение №8

кв.м.

24

Помещение №20

кв.м.

26

Помещение №29

кв.м.

12

Помещение №37

кв.м.

22

Помещение №38

кв.м.

24

Помещение №43

кв.м.

26

Помещение №44

кв.м.

18

16

Ремонт штукатурки стен

кв.м.

64

Помещение №25

кв.м.

36

Помещение №26

кв.м.

28

17

Огрунтовка стен

кв.м.

64

18

Окраска стен

кв.м.

267

Помещение №25

кв.м.

147

Помещение №26

кв.м.

120

19

Ремонт простенков из гипсокартона

кв.м.

124

Помещение №8

кв.м.

16

Помещение №20

кв.м.

16

Помещение №29

кв.м.

22

Помещение №37

кв.м.

26

Помещение №38

кв.м.

20

Помещение №44

кв.м.

24

20

Шпатлевка простенков

кв.м.

124

21

Окраска простенков

кв.м.

124

Помещение №8

кв.м.

16

Помещение №20

кв.м.

16

Помещение №29

кв.м.

22

Помещение №37

кв.м.

26

Помещение №38

кв.м.

20

Помещение №44

кв.м.

24

22

Ремонт отделки стен из гипсокартона

кв.м.

72

Помещение № 43

23

Шпатлевка стен

кв.м.

72

Помещение № 43

24

Окраска стен

кв.м.

72

Помещение №43

кв.м.

72

25

Замена теплообменников

шт

4

26

Герметизация ввода электрокабелей в здание (произвести герметизацию кабель каналов на кровле)

место

1

27

Герметизация ввода трубопроводов отопления

место

1

28

Разборка отмостки

кв.м.

8,3

устранить грибковые образования в серверный цокольный этаж и лифтовой шахте в осях 18-19

29

Разработка грунта

куб.м.

1,8

30

Гидроизоляция фундамента с наружной стороны

4,5

31

Обратная засыпка

куб.м.

3,4

32

Уплотнение грунта

куб.м.

3,4

33

Восстановление отмостки

8,3

34

Демонтаж тротуарной плитки

кв.м.

12,5

35

Уплотнение основания под плитку тротуарную

куб.м.

3,75

36

Укладка тротуарной плитки

12,5

37

Устройство водоотвода в приямке пандуса

место

1

38

Устранение протечки фасада   на примыкании входа        маломобильных групп

ряд А, ось 19-21

39

Монтаж поручня на пандусе

м.п.

4,6

40

Ремонт входной группы

кв.м.

7,6

по ряду А, 14-15 ось.

Взыскать с Акционерного общества «Реставрационные Компании» (ИНН 

<

***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» (ИНН 

<

***>) 270 000руб. 00коп. расходов на проведение судебной экспертизы и 6 000(шесть тысяч)руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины.

Взыскать с Акционерного общества «Реставрационные Компании» (ИНН 

<

***>) в пользу Автономной некоммерческой организации «Многофункциональный центр экспертиз» (ИНН 

<

***>) 15 000руб. 00коп. расходов на оплату услуг эксперта.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный  суд в  течении месяца со дня  принятия. 

Судья                                                                                                   А.Г. Авагимян