РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-330144/19

116-2537 

13 ноября 2020 г.

Резолютивная часть решения суда объявлена 15.10.2020 года

Полный текст решения суда изготовлен 13.11.2020 года

Арбитражный суд в составе судьи Стародуб А. П., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению: ФГУП "РСУ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН: 

<

***>)

к ООО "А.Р.С. (ОГРН: 

<

***>)

о об уменьшении цены договора и взыскании 194 275, 27 руб.

при участии представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности от 02.06.2020 года, диплом.

от ответчика:  не явился, извещен. 

У С Т А Н О В И Л:

ФГУП "РСУ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "А.Р.С. об уменьшении цены договора № 17П-1 от 01.08.2016г. на сумму 157.009,61 рублей., взыскании суммы неосновательного обогащения в сумме 157 009 рублей 61 копеек, процентов на основании ст. 395 ГК РФ в сумме 37 265,66 рублей, за период с 28.12.2016 года по 16.12.2019 года, процентов на основании ст. 395 ГК РФ начисленные на сумму неосновательного обогащения в размере  157.009,61 рублей за период с 17.12.2019г. по день фактической уплаты указанный  суммы неосновательного обогащения.

Представитель ответчика надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения спора в суд не явился, отзыв не представил.

Дело рассмотрено в порядке ст.123, ч.1, 3 ст. 156 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца не возражал против рассмотрения спора в отсутствие представителя ответчика, иск поддержал.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителя истца, суд пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению в части, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации (далее - Истец, Генподрядчик) и ООО «А.Р.С.» (далее - Ответчик, Субподрядчик) заключен договор подряда №17П-1 от 01.08.2016 на выполнение работ по капитальному ремонту здания 

столовой с клубом на территории «Отличник» ФГБУ «Центр реабилитации», расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок санаторий имени А,ФИО3 (далее - Договор).

Указанный Договор заключен во исполнение контракта №42-16 от 15.06.2016 между ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации и ФГБУ «Центр реабилитаций» (далее - Заказчик).

Согласно п. 2.1. Договора стоимость работ определяется и утверждается сторонами на основании дефектных ведомостей и сметной документации. Цена договора составляет 5 500 000 руб. (п. 2.2. Договора).

Пунктом 1.3. Договора предусмотрено, что Субподрядчик обязуется полностью завершить и сдать все работы Генподрядчику не позднее чем это, определено сроками производства работ в календарных планах-графиках. Датой приемки работ считается дата подписания акта выполненных работ (форма КС-2 и форма КС-3), т. е. не позднее 20.11.2016 (согласно понедельному календарному графику, подписанному со стороны Заказчика, Генподрядчика и Субподрядчика).

В соответствии с п. 2.3. Генподрядчик производит оплату аванса в размере 30% от цены Договора.

Оплата выполненных работ производится Генподрядчиком на основании Актов о приемке выполненных работ представленных Субподрядчиком и подписанных уполномоченными представителями сторон, с учетом пропорционального погашения ранее выплаченного аванса. При этом акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 составляются на фактически выполненные объемы работ с подтверждением стоимости материалов.

Пунктом 2.7 Договора предусмотрена оплата генподрядных услуг на сумму, равную 5% от общей стоимости работ, выполненных по Договору.

Субподрядчиком к оплате представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 21.12.2016 на сумму 5 500 000 руб. и акт о приемки выполненных работ по форме КС-2 №1 от 21.12.2016 на сумму 5 500 000 руб.

Во исполнение вышеуказанных положений Договора, а также на основании представленных документов Генподрядчиком произведен авансовый платеж в размере 1 650 000 руб., оплата выполненных работ в размере 3 575 000 руб., а также произведен зачет стоимости генподрядных услуг на сумму 275 000 руб.

Таким образом, Генподрядчиком в полном объеме осуществлена оплата работ на общую сумму 5 500 000 руб.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (ст. 740 ГК РФ).

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете (ст. 743 ГК РФ).

Работы, предусмотренные сметной документацией к Договору, Субподрядчиком выполнены не в полном объеме, что подтверждается подписанным актом по форме КС-2 № 1от 21.12.2016 между Заказчиком и Генподрядчиком. В указанном акте КС-2 имеется отметка о выполнении работ в меньшем объеме с приложением перечня невыполненных работ.

Кроме того, 17.09.2019 на объекте здание столовой с клубом на территории «Отличник» ФГБУ «Центр реабилитации», расположенного по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, поселок санаторий имени А.ФИО3 при участии представители Истца и Заказчика (Ответчик извещен уведомлением исх. №РСУ-4006 от 09.09.2019, не явился) проведен контрольный обмер невыполненных Субподрядчиком объемов работ. По итогам контрольного обмера составлен Акт контрольного обмера от 17.09.2019, которым зафиксированы объемы невыполненных Субподрядчиком объемов работ.

Согласно произведенному Сметным управлением Генподрядчика расчету, стоимость невыполненных Субподрядчиком работ составляет 165 273,27 руб.

Согласно ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Таким образом, на стороне Ответчика возникло неосновательное обогащения в виде завышения объемов выполненных работ на сумму 157 009,61 руб. (165 273,27 руб. (стоимость невыполненных работ) - 5% (услуги генподряда в соответствии с п. 2.7. Договора)), которое подлежит взысканию с ответчика в судебном порядке.

При этом, стоимость договора № 17П-1 от 01.08.2016г. подлежит уменьшению на сумму 157.009,61 рублей.

В силу ст. 1107 ГК РФ, на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст.395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. 

Истцом за период с 28.12.2016 года по 16.12.2019 года произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 37 265,66 руб.

Вместе с тем, данный расчет суд находит ошибочным, поскольку проценты необходимо начислять с 08.10.2019 года, т.е. с даты получения ответчиком претензии истца на возврат суммы неосновательного обогащения, ввиду того, что акты о принятии работ в 2016 году были подписаны сторонами без замечаний, и на момент их подписания у ответчика отсутствовала обязанность по возврату суммы неосновательного обогащения.

Таким образом, требование о взыскании процентов на основании ст. 395 ГК РФ подлежит удовлетворению в части  начисления на  сумму неосновательного обогащения в размере  157.009,61 рублей процентов за период с 08.10.2019г. по день фактической уплаты указанный  суммы неосновательного обогащения.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению в части.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на сторон расходы по госпошлине.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 65, 110, 167- 171, 176, 180 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Уменьшить цену договора № 17П-1 от 01.08.2016г. на сумму 157.009,61 рублей.

Взыскать с ООО "А.Р.С. (ОГРН: 

<

***>) в пользу ФГУП "РСУ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН: 

<

***>) сумму неосновательного обогащения в размере 157.009,61 рублей, проценты  по ст. 395 ГК РФ начисленные  на  сумму неосновательного обогащения в размере  157.009,61 рублей за период с 08.10.2019г. по день фактической уплаты указанный  суммы неосновательного обогащения, расходы  по госпошлине в размере 10.367,3 рублей  в остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

А.П. Стародуб