АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 ПО ДЕЛУ, РАССМОТРЕННОМУ В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дело №А60-61723/2019

18 декабря 2019 года

г. Екатеринбург

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.С. Зыряновой рассмотрел дело по исковому заявлению 

государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «ТехноСтройПроект»(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании штрафных санкций в размере 143776руб. 24коп. 

отзыв ответчика приобщен к материалам дела. 

Расчет штрафных санкций судом проверен и признан не соответствующим условиям договора, а именно 

Расчет нестойки произведен истцом по каждому этапу отдельно, однако истец за базовую стоимость просроченного обязательства по первому этапу в размере 799200руб. 90коп. берет общую цену всего контракта – 1864802руб. 10коп., что суд полагает противоречащим принципу юридического равенства, предусмотренному пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, срок исполнения которых еще не наступил. 

Далее, истец указывает срок исполнения обязательства  - 751день, то есть весь срок исполнения контракта, однако срок выполнения 1 этапа с 30.06.2016г. по 20.06.2017г., то есть 356дней, что суд также полагает противоречащим пункту 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Далее, истец применяет ставку рефинансирования 7%. Судом учтено, что на дату фактического исполнения обязательства ответчиком по 1 этапу 01.08.2017г. действовала ставка рефинансирования – 9%, однако поскольку суд рассматривает исковые требования в заявленных пределах, расчет судом производится, исходя из волеизъявления истца с применением ставки 7%.

Период просрочки истцом определен верно, ответчиком не оспорен. 

Соответственно, по расчету суда правомерным размером штрафных санкций по первому этапу является 22937руб. 07коп.: К = ДП÷ДК × 100%= 41÷356 × 100%= 11,52% (К* = 0.01); Cцб = К* × Ставка ЦБ = 0.01 × 7% = 0.07%; C = Cцб × ДП = 0.07% × 41= 0.0287; П = (Ц - В) × C= (799 200,90 - 0,00) × 0.0287= 22 937,07 р.

В отношении требований по второму этапу судом частично принимаются доводы ответчика, а именно суд полагает, что из периода просрочки подлежит исключению период с 22.01.2018г. (дата направления ответчиком  и получения истцом уведомления о недостаточности исходных данных, необходимых для выполнения работ по второму этапу) по 07.06.2018г. включительно (дата представления истцом письмом от 07.06.2018г. № 07-4581 недостающих исходных данных), то есть 137 календарных дней. Истцом доводы ответчика не оспорены (ст. 65 АПК РФ), возможность завершения работ по контракту без указанных ответчиком документов не доказана. Учитывая, что истцом по второму этапу определен период просрочки в 121 календарный день, оснований для начисления неустойки за просрочку исполнения обязательств по второму этапу не имеется.  

на основании ст. 708, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтройПроект»(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 22937руб. 07коп., а также в возмещение расходов по государственной пошлине 847руб. 60коп.

В остальной части иска отказать. 

2. По заявлению лица, участвующего в данном деле, может быть составлено мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет».

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

3. Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. Исполнительный лист выдается взыскателю только по его ходатайству независимо от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения или подачи апелляционной жалобы (абзац 2 пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»).

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел». 

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

СудьяТ.С. Зырянова