РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-54015/23-110-443

г. Москва

26 июля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 17 июля 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 26 июля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  "ДСК-ПРОИЗВОДСТВО" (123007, ГОРОД МОСКВА, 3-Й ХОРОШЁВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 3, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 4, ОГРН: 1187746980926) к обществу с ограниченной ответственностью   "СОДРУЖЕСТВО" (194100, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ХАРЧЕНКО УЛИЦА, 10, 2, ЛИТ. А, ОГРН: 1137847204681) о взыскании 63 871 443,37 руб.,

 

при участии:

от истца – Сухова  А.А. по дов.  от 20.10.2022,

от ответчика- не явился, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью  "ДСК-ПРОИЗВОДСТВО" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью   "СОДРУЖЕСТВО" о взыскании 47 314 426,65 руб. задолженности по соглашению от 31.05.2022, 16 547 016,72 руб. неосновательного обогащения.

Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, ООО «ДСК-Производство» (Подрядчик) и ООО «СОДРУЖЕСТВО» (Субподрядчик) «28» декабря 2020 года заключили Договор № ДСК-СП/641-20 на выполнение полного комплекса работ по устройству систем вентиляции и дымоудаления, отопления, ГВС, ХВС, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на объекте капитального строительства, расположенном по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, в районе деревни Ватутинки, уч. 2, корпус 1 (далее по тексту «Договор-1»).

Стоимость работ по Договору-1, порученных Субподрядчику, составила 97 337 043 (Девяносто семь миллионов триста тридцать семь тысяч сорок три) рубля 80 копеек, в том числе НДС 20% - 16 222 840 рублей 63 копейки.

В соответствии с условиями Договора-1, изложенными в п.3.1. и согласно Графику производства Работ Субподрядчик взял на себя обязательства по выполнению порученного ему объема работ в срок до «30» июля 2021 г.

Согласно условиям Договора Истцом было произведено авансирование работ на общую сумму 45 372 350 руб. 34 коп., что подтверждается платежными поручениями:

П-п 1833 от 17.02.2021 года на сумму 26 800 000 руб.;

П-п 1458 от 15.04.2021 года на сумму 10500000 руб.;

П-п 2840 от 21.06.2021 года на сумму 3 000 000 руб.;

П-п 4139 от 29.06.2021 года на сумму 5 672 350 руб. 34 коп.;

В период действия Договора Ответчиком произведена частичная сдача выполненный работ на сумму 12 332 816 руб. 00 коп., что подтверждается актом по форме КС-2 и КС-3 №1 от 31.07.2021 года.

31.07.2021 года между Сторонами было заключено соглашение о зачете встречных однородных требований №719 от 31.07.2022 года на сумму 616 640 руб. 80 коп.

Итого общая сумма неотработанного аванса составляет: 34 256 175 руб. 14 коп.

В связи с ненадлежащим выполнением работ на Объекте на Объекте строительства произошло залитие, которое было освидетельствовано с участием ООО «ДСК-Производство», ООО СК «ПРОГРЕСС», ООО «Первый ДСК» и ООО «СОДРУЖЕСТВО».

В связи с чем Истец предлагал Ответчику устранить выявленные повреждения собственными силами в срок до 30.12.2021 года и предъявить их Истцу.

30.12.2021 года комиссией в составе представителей ООО АР ГРУПП, АО «МСУ-1» и ООО «ДСК-Производство» производилось освидетельствование качества устранения недостатков.

Однако Ответчик не предпринял попыток устранить выявленные недостатки, в связи с чем Истец принял решение об устранении недостатков третьим лицом – ООО «АР ГРУПП», ООО СК Прогресс, ООО «ОСК», ООО СП «АЛЬЯНС» что подтверждается дополнительными соглашениями и актами о выполненным работам на общую сумму 6 107 752,68 руб.

В связи с существенным нарушением сроков выполнения работ по Договору Истцом было принято решение об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора, в результате чего в адрес Ответчика было направлено соответствующее уведомление, зарегистрированное за исх. №01-02-17 от 11.01.2022 года, содержавшее в том числе требование о выплате неотработанного аванса.

Также, ООО «ДСК-Производство» (Подрядчик) и ООО «СОДРУЖЕСТВО» (Субподрядчик) «28» декабря 2020 года заключили Договор № ДСК-СП/642-20 на выполнение полного комплекса работ по устройству систем вентиляции и дымоудаления, ГВС, ХВС, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации на объекте капитального строительства, расположенном по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, в районе деревни Ватутинки, уч. 2, корпус 6 (далее по тексту «Договор-1»).

Стоимость работ по Договору-2, порученных Субподрядчику, составила 40 501 048 рубля 76 копейки, в т.ч. НДС   20% -   6 750 174,79 рублей.

В соответствии с условиями Договора-2, изложенными в п. 3.1. Субподрядчик взял на себя обязательства по выполнению порученного ему объема работ в срок до 30.07.2021 г.

Согласно условиям Договора Истцом было произведено авансирование работ на общую сумму 20 203 060 руб. 00 коп., что подтверждается платежными поручениями:

П-п 1834 от 17.02.2021 года на сумму 6 000 000 руб.;

П-п 2156 от 30.04.2021 года на сумму 6793107,37руб.;

П-п 4995 от 08.07.2021 года на сумму 7000000 руб.;

П-п 5673 от 22.07.2021 года на сумму 409 952,63 руб.;

В период действия Договора Ответчиком произведена частичная сдача выполненный работ на сумму 5 744 818 руб. 39 коп., что подтверждается актом по форме КС-2 и КС-3 №1 от 31.07.2021 года.

31.07.2021 года между Сторонами было заключено соглашение о зачете встречных однородных требований №719 от 31.07.2022 года на сумму 287 240 руб. 92 коп.

Итого общая сумма неотработанного аванса составляет: 14 745 482 руб. 53 коп.

В связи с существенным нарушением сроков выполнения работ по Договору Истцом было принято решение об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора, в результате чего в адрес Ответчика было направлено соответствующее уведомление, зарегистрированное за исх. №01-02-19 от 11.01.2022 года, содержавшее в том числе требование о выплате неотработанного аванса.

В связи с неисполнением своих обязательств по своевременному выполнению работ и качеством их выполнения между Сторонами 31.05.2022 года  было заключено Соглашение об урегулировании задолженности по Договору на выполнение субподрядных работ №ДСК-СП/641-21 и №ДСК-СП/642-21 от 28.12.2020 года.

Согласно п. 1 вышеуказанного соглашения Ответчик признал наличие перед Истцом задолженность, которая составляет 47 324 426 руб. 65 коп. и состоит из следующих денежных средств:

Сумму неотработанного аванса по договору субподряда № ДСК-СП/641-20 от 28.12.2020 в размере 25 916 389,34 руб.;

Сумму неотработанного аванса по договору субподряда № ДСК-СП/642-20 от 28.12.2020 в размере 12 693 022,63 руб.;

Сумму убытков, возникших в следствие протечки из-за некачественных строительных материалов при выполнении работ по договору субподряда № ДСК-СП/641-20 от 28.12.2020 в размере 6 107 752,68 руб.;

Сумму компенсации за утраченное оборудование по договору субподряда № ДСК-СП/641-20 от 28.12.2020 и по договору субподряда № ДСК-СП/642-20 от 28.12.2020 в размере 2 607 262 руб.

Согласно условиям вышеуказанного соглашения ООО «СОДРУЖЕСТВО», оплачивает задолженность в общей сумме 47 324 426 руб. 65 коп. и предоставить банковскую гарантию в срок до 30.09.2022 года.

П.2 вышеуказанного соглашения установлено, что задолженность погашается равными суммами в срок до 31.12.2024 года, при этом интервал вышеуказанной выплаты не может быть реже одного раза в три месяца.

Исходя из вышеизложенного следует, что за период действия соглашения Ответчиком должно было быть произведено 10 платежей каждый из которых должен был составлять 4 732 422 руб. 66 коп.

Следовательно, за период с 01.06.2022 года по 31.01.2023 года Ответчиком должно было быть осуществлено 2 платежа на сумму 9 464 885 руб. 33 коп. (по 4 732 422 руб. 66 коп).

Однако в свою очередь Ответчиком взятые на себя обязательства не выполнены, за период с 01.06.2022 года ООО «СОДРУЖЕСТВО» произвело выплату 12.12.2022 года в сумму 10 000 руб., что не соответствует сумме, определенной сторонами при подписании соответствующего соглашения, банковская гарантия до настоящего момента в адрес Истца не предоставлена, что говорит о нарушении Должником взятых на себя обязательств.

На основании вышеизложенного Ответчиком подлежит возврату денежные средства в размере 47 314 426 руб. 65 коп.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допустим.

Как указано в Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.08.2022 N Ф05-19098/2022 по делу N А40-224705/2021 что Соглашение сторон от «…» не является дополнительным соглашением к основному договору, а представляет собой возмездную сделку, по условиям которой кредитор прощает должнику часть долга при надлежащем и своевременном исполнении должником обязательств по оплате остальной части долга в согласованные сроки. Соответственно, после пропуска должником срока для добровольного исполнения, указанное соглашение утрачивает силу и не влечет прекращения обязательства, во исполнение которого было заключено. Стороны находились в процессе достижения соглашения по урегулированию задолженности, однако цели указанного соглашения фактически так и не были достигнуты по вине ответчика.

В связи с неисполнением взятых на себя обязательств 12.12.2022 года в адрес Субподрядчика было направлено претензионное требование, зарегистрированное за исх. №01-02-3152 от 09.12.2022 года, в котором Истец требует вернуть денежные средства в полном объеме, определенном в соглашении от 31.05.2022 года.

В ходе оформления Соглашения Ответчик также заявил о выполненных, но не учтенных работ, которые он также желал предъявить к учету, в связи с вышеизложенным в соглашении Сторонами заложена признанная Субподрядчиком сумма неотработанного авансового платежа.

Следовательно, истец корректирует сумму исковых требований и также считает необходимым взыскать разницу между признанным Ответчиком авансового платежа и фактически неотработанным авансом

Договор ДСК-СП/641-20 от 28.12.2020 года:

34 256 175,14-25 916 389,34 = 8 339 785 руб. 80 коп.

Договор ДСК-СП/642-20 от 28.12.2020 года:

20 900 253,55-12693022,63 = 8 207 230 руб. 92 коп.

Итого, сумма неотработанного аванса, не учтенного в соглашении составляет 16 547 016 руб. 72 коп.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 137-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью   "СОДРУЖЕСТВО" (ОГРН: 1137847204681)  в пользу  общества с ограниченной ответственностью  "ДСК-ПРОИЗВОДСТВО" (ОГРН: 1187746980926) 55 156 428 руб. 69  коп. аванса, 8 715 014 руб. 68  коп. в возмещение убытков,200 000 руб.  в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

 

Судья:

А.В. Мищенко