АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная ул., д.  8,  Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

тел./факс (384-2) 58-37-05

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-3428/2018

город Кемерово

28 апреля 2018 года

Резолютивная часть решения оглашена 25 апреля  2018 года.

Полный текст решения изготовлен 28 апреля 2018 года.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Переваловой О.И. при ведении протокола   и аудиозаписи судебного заседания  помощником судьи Балабойко В.С., 

рассмотрев в  открытом   судебном  заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  «Альянс – К», г. Кемерово, ОГРН 

<

***>

к Комитету по управлению муниципальным имуществом Ленинск – Кузнецкого городского округа, Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, ОГРН 

<

***>

о взыскании 7 796 402,55 руб. долга, 85534,41 руб. пени, с учетом принятого судом ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), 

при участии: от истца – ФИО1, представитель, доверенность от 01.02.2018, паспорт, ФИО2, представитель, доверенность от 01.02.2018, паспорт;

от ответчика – ФИО3, представитель, доверенность № 548 от 09.01.2018, паспорт,  

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью  «Альянс – К» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к Комитету по управлению муниципальным имуществом Ленинск – Кузнецкого городского округа (далее – ответчик) о взыскании 796 402,55 руб. долга, 85534,41 руб. пени, с учетом принятого судом ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).     

Определением суда от 01.03.2018 исковое заявление принято к производству, начата подготовка к судебному разбирательству, предварительное судебное заседание назначено на 21.03.2018, в котором суд завершил подготовку дела и назначит дату судебного заседания на 25.04.2018. 

Представитель ответчика не оспаривает сумму долга, возражает против расчета пени за просрочку оплаты долга, представлен контррасчет.

В настоящем судебном заседании истцом заявлено ходатайство об уменьшении размера исковых требований в части взыскания пени, согласно представленному контррасчету ответчика.

Ответчиком поддержана ранее изложенная позиция.

Между обществом с ограниченной ответственностью  «Альянс – К» (истец, «подрядчик») Комитету по управлению муниципальным имуществом Ленинск – Кузнецкого городского округа (ответчик, «заказчик») заключены муниципальные контракты № 2015.147034  от 05.05.2015, № 0139300018015000044-0066498-01 от 22.05.2015, № 0139300018015000046-0066498-01 от 27.05.2015 на выполнение работ по устройству проездов, тротуаров у жилых домов. 

Согласно муниципальному контракту от 05.05.2015г. № 2015.147034, Заказчик - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа поручает, а Подрядчик - ООО «Альянс-К» принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству проездов, тротуаров, установке малых архитектурных форм у строящегося жилого дома № 11 а по ул. Абрамцева.

Срок выполнения работ по данному муниципальному контракту с момента его подписания по 10.07.2015г.

Согласно пункту 2.1. контракта стоимость всех подлежащих выполнению работ составляет 2 274 838 рублей.

Работы согласно предмету муниципального контракта от 05.05.2015г. № 2015.147034 выполнены истцом в полном объеме, между ООО «Альянс - К» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ленинск – Кузнецкого городского округа подписаны акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 21.07.2015г. №1 и справка о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3) от 21.07.2015г.  №1 на общую сумму 2 274 838 рублей.

На основании подписанных ответчиком актов КС-2, КС-3 истцом выставлена ответчику счет-фактура № 172 от 21.07.2015г. на оплату 2 274 838 рублей.

Согласно пункту 2.6. муниципального контракта от 05.05.2015г. № 2015.147034 оплата производится Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований до 31 декабря 2017г. в пределах стоимости (цены) выполненных подрядчиком работ, предусмотренных муниципальным контрактом, при условии подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту, по установленной заказчиком форме и выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Платежными поручениями от 31.08.2015 № 829 на сумму 75 804 руб., от 30.10.2015г. № 28611 на сумму 900 000 руб., от 26.02.2016г. № 877421 на сумму 100 000 руб., от 26.04.2016г. № 48426 на сумму 150 000 руб., от 05.05.2016г. № 179001 на сумму 100 000 руб., от 24.01.2018г. № 419160 на сумму 100 000руб., от 08.02.2018г. № 662960 на сумму 193636,45 рублей ответчиком частично оплачены выполненные истцом работы на общую сумму 1 6119 440,45 руб.

Задолженность ответчика перед истцом по муниципальному контракту от 05.05.2015г. № 2015.147034 по состоянию на 20.02.2018г. составляет 655 397,55 рублей.

Истцом в адрес ответчика направлялась претензия от 15.01.2018г. №  03-01/15, которая была получена ответчиком 30.01.2018г., что подтверждается почтовой квитанцией о вручении письма-претензии.

Согласного муниципальному контракту от 22.05.2015г. № 0139300018015000044-0066498-01, Заказчик – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа поручает, а Подрядчик - ООО «Альянс-К» принимает на себя обязательство выполнить работы по благоустройству территории у жилого дома № 148/1 по ул. Топкинская.

Срок выполнения работ по данному муниципальному контракту с момента его подписания по 01.07.2015г.

Согласно пункту 2.1. контракта стоимость всех подлежащих выполнению работ составляет 2 563 285 рублей.

Работы согласно предмету муниципального контракта от 22.05.2015г.                                               № 0139300018015000044-0066498-01 выполнены истцом в полном объеме.

Между ООО «Альянс-К» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа подписаны акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 05.08.2015г. №1 и справка о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3) от 05.08.2015г. №1 на общую сумму 2 563 285 рублей.

На основании подписанных ответчиком актов КС-2, КС-3 истцом выставлена ответчику счет-фактура № 196 от 05.08.2015г. на оплату 2 563 285 рублей.

Согласно пункту 2.6. муниципального контракта от 22.05.2015г. № 0139300018015000044-0066498-01 оплата производится Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований до 31 декабря 2017г. в пределах стоимости (цены) выполненных подрядчиком работ, предусмотренных муниципальным контрактом, при условии подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту, по установленной заказчиком форме и выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Задолженность ответчика перед истцом по муниципальному контракту от 22.05.2015г.                   № 0139300018015000044-0066498-01 составляет 2 563 285 рублей, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов.

Истцом в адрес ответчика направлялась претензия от 15.01.2018г. № 02-01/15, которая была получена ответчиком 30.01.2018г., что подтверждается почтовой квитанцией о вручении письма-претензии.

                  Согласно муниципальному контракту от 27.05.2015г. № 0139300018015000046- 0066498-01, Заказчик - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа поручает, а Подрядчик - ООО «Альянс-К» принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству проездов, тротуаров у жилого дома № 148/1 по ул. Тонкинская.

Срок выполнения работ по данному муниципальному контракту с момента его подписания по 25.06.2015г.

Согласно пункту 2.1. контракта стоимость всех подлежащих выполнению работ составляет 4 997 720 рублей.

Работы согласно предмету муниципального контракта от 27.05.2015г. № 0139300018015000046-0066498-01 выполнены истцом в полном объеме, между ООО «Альянс-К» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа подписаны акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 03.07.2015г. №1 и справка о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3) от 03.07.2015г. №1 на общую сумму 4 997 720 рублей.

На основании подписанных ответчиком актов КС-2, КС-3 истцом выставлена ответчику счет-фактура № 155 от 06.07.2015г. на оплату 4 997 720 рублей.

Согласно пункту 2.6. муниципального контракта от 27.05.2015г. № 0139300018015000046-0066498-01 оплата производится Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований до 31 декабря 2017г. в пределах стоимости (цены) выполненных подрядчиком работ, предусмотренных муниципальным контрактом, при условии подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту, по установленной заказчиком форме и выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Платежным поручением от 24.07.2015г. № 30 ответчиком частично оплачены выполненные истцом работы на общую сумму 420 000 руб.

Задолженность ответчика перед истцом по муниципальному контракту от 27.05.2015г. № 0139300018015000046-0066498-01 составляет 4 577 720 рублей, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов.

Истцом в адрес ответчика направлялась претензия от 15.01.2018г. №  01-01/15, которая была получена ответчиком 30.01.2018г., что подтверждается почтовой квитанцией о вручении письма-претензии.

В соответствии со ст. 309 и ст. 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, то есть, в рассматриваемом случае, оплатить выполненные работы в установленные сроки, а кредитор имеет право требовать от должника надлежащего исполнения его обязанности (ст.307 ГК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п.1 ст.711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

            В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

            Вместе с тем, материалы дела не располагают доказательствами оплаты, наличие задолженности в размере 7 796 402,55 руб.  ответчиком не оспаривается.

            Кроме того, истцом заявлено о взыскании пени за просрочку сроков оплаты выполненных работ по муниципальным контрактам в размере 85 534,41 руб.: 

            - 8590,09 руб. пени за период с 10.01.2018 по 20.02.2018 по муниципальному контракту                       № 2015.147034  от 05.05.2015;

            - 27 619,39 руб. пени за период с 10.01.2018 по 20.02.2018 по муниципальному контракту                   № 0139300018015000044-0066498-01 от 22.05.2015;

            - 49 324,93 руб. пени за период с 10.01.2018 по 20.02.2018 по муниципальному контракту                 № 0139300018015000046-0066498-01 от 27.05.2015.

Согласно пункту 7.2. каждого из муниципальных контрактов в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 7.3 контракта).

   Отклоняя довод ответчика о недостаточном финансировании и отсутствием целевых средств, суд указывает, что в соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, например, обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

А также, учитывая положения пункта 8 вышеуказанного Постановления, не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.

            При таких обстоятельствах, требование о взыскании 7 796 402,55 руб. долга признано судом обоснованным и  подлежавшим удовлетворению.  

            Расчет истцом произведен с учетом возражений ответчика, судом проверен, признан арифметически верным, обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Судебные издержки, связанные с рассмотрением иска, включая  расходы от уплаты  государственной  пошлины  по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на ответчика в полном объеме.

            Руководствуясь  статьями    110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                                                   решил:                                                  

Иск удовлетворить.

Взыскать с Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск – Кузнецкого городского округа в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Альянс – К» 7 796 402,55 руб. долга, 85534,41 руб. пени, 62410 руб. расходов от уплаты государственной пошлины по иску, всего 7944346,96руб. 

Обществу с ограниченной ответственностью  «Альянс – К» возвратить из федерального бюджета 96руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 90 от 22.02.2018.

            Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                 О.И. Перевалова