100146/2023-131380(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

город Новосибирск Дело № А45-36919/2022  

Резолютивная часть решения объявлена 10 мая 2023 года  Решение в полном объеме изготовлено 12 мая 2023 года  

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску государственного казенного учреждения  Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск,  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Модуль 54» (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск,  

о взыскании неустойки по государственному контракту № Ф.2017.377943 в размере  1324,27 рублей,  

при участии в судебном заседании представителей 

истца: ФИО2, доверенность № 9 от 26.01.2023, паспорт, диплом,  ответчика: не вился, извещен надлежащим образом,  

установил:

государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление  капитального строительства» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд  Новосибирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью «Модуль 54» (далее - ответчик) о взыскании неустойки по  государственному контракту № Ф.2017.377943 в размере 1324,27 рублей.  

Представитель истца явился в судебное заседание, поддержал требования иска в  полном объеме.  

Ответчик, извещенный о дате, времени и месте рассмотрения спора по  последнему известному месту нахождения, явку своего представителя в судебное  заседание не обеспечил, мотивированный отзыв, документальное обоснование  возражений на иск не представил.  

В соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации (далее - АПК РФ) лица, участвующие в деле, считаются  извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое  извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной  арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи  уведомила арбитражный суд.  

Арбитражный суд Новосибирской области направлял определения по  настоящему делу по адресу, указанному в выписке из Единого государственного  реестра юридических лиц в отношении ответчика. Организация почтовой связи  вернула конверт в суд без отметок о причинах его возврата.  

Письмом от 31.03.2023 исх. № МР54-18/23057 орган почтовой связи на запрос  суда о вручении заказного письма ответчику пояснил, что заказное письмо было  передано почтальону в доставку 28.12.2022, однако, вручить письмо не представилось  возможным. Поскольку адресат за получением отправления не обратился, 11.01.2023  был осуществлён его возврат отправителю по истечению срока хранения. Отметка  «досыл» в системе отслеживания был проставлен некорректно.  

Таким образом, принимая во внимание соблюдение порядка вручения почтовых  отправлений, предусмотренного Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234  «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи», в редакции Приказа  Минкомсвязи России от 13.02.2018 № 61 следует прийти к выводу о том, что ответчик  извещен надлежащим образом.  

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых  сообщений (статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК  РФ)), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре  юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или  представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином  государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим  лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного  Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых  положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»,  юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых  сообщений, доставленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре  юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), либо по адресу, указанному самим юридическим  

лицом (например, в тексте договора), а также риск отсутствия по указанным адресам  своего представителя; сообщения, доставленные по названным адресам, считаются  полученными, даже если соответствующее лицо фактически не находится по  указанному адресу (пункт 63); юридически значимое сообщение считается  доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено,  но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не  ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ); например, сообщение считается  доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении  связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения (пункт 67).  

То, что ответчик не обеспечил получение поступающей в его адрес  корреспонденции, в том числе судебных извещений, арбитражный суд оценивает  исходя из положений части 2 статьи 9 АПК РФ, согласно которой ответчик несет риск  последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его  адресу, указанному в ЕГРЮЛ.  

Кроме того, арбитражный суд публиковал определение о назначении судебного  заседания на интернет-сайте «Мой Арбитр» в Картотеке арбитражных дел.  

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 123, 156 АПК РФ, суд считает  возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика, а также его  отзыва, по имеющимся в деле доказательствам.  

При рассмотрении спора, суд исходит из того, что в соответствии со статьей 65  АПК РФ, каждое лицо участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Проанализировав исковые требования, исследовав и оценив все представленные  доказательства в совокупности, заслушав представителя истца в судебных заседаниях  (часть 2 статьи 64, статьи 71, 81 АПК РФ), суд установил следующее.  

Исковые требования обоснованы статьями 309, 310, 395, 1102 ГК РФ и  мотивированы тем, что 05.09.2017 между истцом (заказчик) и ответчиком  (подрядчик) был заключен государственный контракт № Ф.2017.377943 (далее –  контракт) на выполнение подрядных работ по строительству объекта«Фельдшерско-акушерский пункт в с. Новочановское Государственного бюджетного  учреждения здравоохранения Новосибирской области «Барабинская центральная  районная больница» (далее - объект), в соответствии с описанием объекта закупки  (приложение № 1 к контракту) и на условиях, предусмотренных контрактом (пункт  

1.1. контракта).  

Цена контракта составила 2627176,98 рублей, в том числе НДС 18% - 400755,81  рублей (пункт 2.1.).  

Пунктом 3.3. контракта установлено, что начало выполнения работ по контракту  - не позднее семи дней с момента заключения контракта.  

Работы осуществляются поэтапно. 

Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан  результат работ - в течение трех месяцев со дня заключения контракта.  

Сроки выполнения работ по этапам отражены в графике выполнения работ  (пункт 3.4. контракта).  

По информации, размещенной в единой информационной системе в сфере  закупок в разделе «Исполнение (расторжение) контракта, за выполнение работ по  контракту, заказчиком фактически оплачена сумма, равная цене контракта  (2627176,98 рублей)  

По результатам проверки, проведенной контрольным управлением  Новосибирской области, установлено, что ответчик ненадлежащее исполнил  принятые обязательства по контракту (допустил просрочку выполнения работ), что  нашло отражение в акте проверки от 09.09.2020 № 07-06-05ПО/2019.  

20.11.2020 заказчиком было выставлено требование № 4383-Ю об уплате  неустоек (пеней) за просрочку исполнения обязательств в размере 1324,27 рублей.  

В связи с выявленными нарушениями, допущенными при выполнении работ  заказчиком, было также выставлено требование № 4485-Ю от 26.11.2020 об оплате  пени в размере 108,87 рублей.  

Вышеуказанные требования подрядчик оставил без удовлетворения. 

В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее  исполнение своих обязательств, установленных контрактом, стороны несут  ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и  контрактом.  

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение  подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки  исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных контрактом (пункт 7.1. контракта).  

Исходя из вышеизложенного, размер неустойки за ненадлежащее выполнение  

подрядчиком обязательств по контракту составляет 1324,27 рублей.  

В связи с неисполнением ответчиком в добровольном порядке требований об  оплате пени, истец был вынужден обратиться в Арбитражный суд Новосибирской  области с исковым заявлением.  

В силу части 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из  оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из  действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или  такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства  порождают гражданские права и обязанности.  

В соответствии со статьёй 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определённую работу и сдать её результат заказчику.  

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между  сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных  этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными  правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет  ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных  сроков выполнения работы.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются  актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).  

Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных  нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок  товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких  закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких  закупок, регулирует Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).  

В статьях 309, 310 ГК РФ закреплено, что обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

В соответствии с частью 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой.  

Согласно части 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признаётся  определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 34 Закона о контрактной системе в случае  просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а  также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель)  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Штрафы начисляются за  ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за  исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.  Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации.  

Так, как указывает истец, работы были фактически переданы ему с просрочкой,  то есть, за пределами установленного контрактом срока, в связи с чем, истцом была  начислена неустойка.  

Вместе с тем, мотивированного отказа заказчика от приемки работ либо  информации о выявленных отклонениях от условий контракта с указанием сроков  устранения и (или) некачественно выполненных работ от заказчика не поступало.  

Указанные факты, а также отсутствие возражений подрядчика относительно  просрочки выполнения работ свидетельствуют о предусмотренном законом праве  заказчика на начисление неустойки.  

При этом, у заказчика имелась обязанность по списанию начисленной  неустойки, поскольку, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от  04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю),  но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных  контрактом» (далее - Правила № 783).  

В силу пункта 42.1. статьи 112 Закона № 44-ФЗ начисленные поставщику  (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов,  пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020,  

2021, 2022 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в  случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.  Такой порядок установлен Правилами № 783, в редакции от 23.03.2022.  

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил № 783 списание неустойки  осуществляется заказчиком в случае, если сумма начисленных пеней не превышает  5% от цены контракта.  

С учетом цены контракта, пени в размере 1324,27 рублей не превысили 5%. 

Основанием для принятия решения о списании неустойки в случае, приведенном  выше, является исполнение подрядчиком обязательств (за исключением гарантийных  обязательств) по контрактам в полном объеме, подтвержденное актами приемки или  иными документами (подпункт «а» пункта 5 Правил № 783).  

Акты сдачи-приемки выполненных работ по контракту стороны подписали в  2022 году.  

Таким образом, у истца имелись все основания для списания спорной сумы  неустойки. При этом, не имеет правового значения обращение подрядчика с  требование о списании неустойки. Каких-либо дополнительных соглашений к  контракту о предоставлении подрядчику дополнительного времени для проведения  работ или увеличении цены контракта за тот же объем работ, в материалы дела не  представлено.  

Подпункт «а» пункта 2 Правил № 783 устанавливает исключение и  предусматривает, что списание неустоек не осуществляется по тем контрактам, в  которых по соглашению сторон были изменены условия о сроке исполнения  контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и  (или) количестве товаров, объеме работ, услуг.  

По смыслу данной нормы изменение условий контракта является  самостоятельной мерой поддержки поставщика, исключающей необходимость  списания неустойки, начисленной уже за нарушение новых условий контракта  (например, нового срока исполнения), измененных специально для облегчения  возможности исполнения поставщиком обязательств в условиях экономического  кризиса. При таких условиях дополнительное списание неустойки являлось бы  второй и избыточной мерой поддержки, что ставило бы неисправного поставщика,  которому уже оказана помощь путем изменения условий контракта, в  преимущественное положение перед теми неисправными поставщиками, которым  

оказана только одна мера поддержки в виде списания неустойки, исчисленных от  первоначальных условий контракта.  

И напротив, если изменение контракта состоялось по иным причинам и не  привело к облегчению его исполнения поставщиком (продление сроков) либо не  сделало такое исполнение более выгодным (увеличение цены контракта) или менее  затруднительным (изменение количества товара), и уж тем более, если на момент  изменения контракта поставщик являлся исправным, то такое изменение нельзя  рассматривать в качестве состоявшейся меры его поддержки, и списание неустойки  по подпункту «а» пункта 3 Правил № 783 не исключается.  

В рассматриваемом случае дополнительных соглашений, которые являлись бы  самостоятельными мерами поддержки подрядчика, заключено не было.  

Постановление Правительства от 04.07.2018 № 783 направленно на обеспечение  устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015, 2016, 2020, 2021  и 2022 годах путем финансовой поддержки поставщиков (подрядчиков,  исполнителей). Предоставление отсрочки уплаты неустоек и (или) осуществления  списания начисленных сумм неустоек является одной из мер поддержки поставщиков  (подрядчиков, исполнителей).  

При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по  государственному (муниципальному) контракту суд вправе самостоятельно  устанавливать наличие оснований для применения мер государственной поддержки  (Определение Верховного Суда РФ от 24.04.2018 № 305-ЭС17-23242).  

Как разъяснено в пункте 40 Обзора судебной практики применения  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, списание, рассрочка  начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов,  пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального)  контракта при определенных условиях является именно обязанностью  государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия призваны  быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным)  контрактам.  

Таким образом, суд не связывает обязанность списания неустоек, не  превышающих 5% от цены контракта с необходимостью доказывания влияния на  

действия подрядчика непреодолимой силы, коронавирусной инфекции или введения  санкций.  

Иное толкование подпункта «а» пункта 2 Правил № »783 влечет нарушение  целей, преследуемых при принятии Правил № 783 по финансовой поддержке  поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

Таким образом, к спорным правоотношениям должны были быть применены  положения подпункта «а» пункта 3 Постановления Правительства РФ от 04.07.2018   № 783, в связи с чем, в удовлетворении исковых требований следует отказать.  

Распределение судебных расходов производится по правилам статьи 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации РФ, статьи 333.40  Налогового кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

в удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 29.03.2023 0:33:00

Кому выдана Серёдкина Екатерина Леонидовна