АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

г. Москва                                                                                                 Дело № А40-288683/23-43-2266

20.02.2024 г.                                                                

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

ООО "СВЯЗЬИНЖСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>)

к ООО "ГИЛЬДИЯ ИНЖЕНЕРОВ" (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 243 133 руб. 46 коп. – суммы неосновательного обогащения, процентов за период с 18.10.2023 г. по 30.11.2023 г., проценты по день фактической оплаты суммы долга по Договору №103/20 от 25.06.2020 г.,

без вызова лиц, участвующих в деле,

Изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд

у  с  т  а  н  о  в  и  л  :

Иск заявлен о взыскании 238 969 руб. 50 коп. – суммы неосновательного обогащения, 4 163 руб. 96 коп.- процентов, проценты по день фактической оплаты суммы неосновательного обогащения.

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13.12.2023 г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 АПК РФ.

29.12.2023 г. ответчик представил отзыв на исковое заявление.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

12.02.2024 г. принята резолютивная часть решения в порядке, предусмотренном ст. 229 АПК РФ.

16.02.2024 г. в суд поступило, в установленный ст. 229 АПК РФ срок, заявление истца о составлении мотивированного решения.

Суд, с учётом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела  документами, суд приходит к следующему.

25 июня 2020 года между ООО «СвязьИнжСтрой» (Заказчик) и ООО «Гильдия инженеров» (Исполнитель) был заключен Договор № 103/20 (далее по тексту -«Договор 1»).

Предметом указанного Договора является выполнение Исполнителем собственными силами комплекс инженерно-геодезических работ по выносу в натуру проведению исполнительной геодезической съемки и созданию исполнительных чертежей завершенных строительством трасс телефонной (кабельной) канализации с подачей необходимой документации в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (далее -«Москомархитектура») для получения государственной услуги «Приемка исполнительной документации для Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений (далее -«Работы») на Объекте «Жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: 

<

...>. Этапы 1,2,3,4. Жилой комплекс с подземными стоянками автомобилей и встроенно-пристроенными ДОО.» (далее - «Объект 1»).

25 июня 2020 года между ООО "СвязьИнжСтрой" (Заказчик) и ООО "Гильдия инженеров" (Исполнитель) был заключен Договор № 172/20 (далее по тексту - «Договор 2»).

Предметом указанного Договора является выполнение Исполнителем собственными силами комплекс инженерно-геодезических работ по выносу в натуру проведению исполнительной геодезической съемки и созданию исполнительных чертежей завершенных строительством трасс телефонной (кабельной) канализации с подачей необходимой документации в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (далее -"Москомархитектура") для получения государственной услуги «Приемка исполнительной документации для Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений (далее -«Работы») на объекте «Жилой комплекс с подземными гаражами-стоянками и встроенно-пристроенными помещениями по адресу: 

<

...>.» (далее - «Объект 2»).

В договорах указано, что состав и объемы работ утверждаются Заказчиком в Техническом задании на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1) являющегося неотъемлемой частью Договора.

Во исполнение обязательств по Договорам, Заказчик перечислил Исполнителю авансы по договорам: 156 997,50 руб. аванса по Договору 1 (п/п №1400 от 22.09.2020 г., п/п №1711 от 21.10.2020 г.); 81 972 руб. аванса по Договору 2 (п/п №1335 от 12.07.2021 г.).

Договорами предусмотрены следующие сроки выполнения работ: датой начала выполнения Работ считается дата наступления последнего из перечисленных обстоятельств:

-          подписание Договора; -      перечисление на счет Исполнителя предоплаты; -         предоставление Заказчиком необходимых исходных данных.

Срок выполнения работ - 10 (десять) рабочих дней после получения письменного уведомления от Заказчика о завершении строительно-монтажных работ по устройству трасс телефонной (кабельной) канализации.

Как указывает истец, в связи с тем, что по состоянию на 18.09.2023 г. ответчик не приступал к выполнению работ, в соответствии с п. 10.10.2 Договоров и ст. 715 ГК РФ, Заказчик отказался от исполнения договоров и потребовал возврата перечисленных авансовых платежей.

Письмом №597/А от 18.09.2023 г. истцом расторгнут договор № 103/20 в одностороннем порядке.

Письмом №596/А от 18.09.2023 г. истцом расторгнут договор № 172/20 в одностороннем порядке.

Ответчик не исполнил требования о возврате суммы неосновательного обогащения.

Истец  полагает, что при описанных обстоятельствах сумма в размере 238 969 руб. 50 коп. является неосновательным обогащением и ООО "Гильдия инженеров" и подлежит взысканию в пользу истца.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Иск о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны: факт получения (сбережения) имущества ответчиком, отсутствие для этого должного основания, а также то, что неосновательное обогащение произошло за счет истца.

Между тем, суд находит доводы истца необоснованными, а исковые требования не подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно п. 1.2. Договора, состав и объемы Работ утверждаются Заказчиком в Техническом задании на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1 к Договору №103), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

Согласно п.4 Технического задания на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1 к Договору №103) установлен следующий объем работ:

4.1.      Вынос в натуру трасс телефонной (кабельной) канализации протяженностью

661,00 п.м. (предварительная протяженность согласно проекту).

4.2.      Исполнительные чертежи трасс телефонной (кабельной) канализации

протяженностью 661,00 п.м. (предварительная протяженность согласно проекту).

Согласно п.5 Технического задания на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1 к Договору №103) установлен следующий состав работ:

5.1.      Сгущение местной геодезической сети в районе работ с созданием пунктов

съемочного обоснования - не менее 3 (Трех) пунктов.

5.2.      Вынос в натуру трасс телефонной (кабельной) канализации согласно проекту.

5.3.      Проведение исполнительной геодезической съемки трасс телефонной

(кабельной) канализации согласно фактическому положению.

5.4.      Камеральная обработка результатов полевых геодезических измерений.

5.5.      Создание исполнительных чертежей трасс телефонной (кабельной) канализации  (ситуационный план масштаба 1:2000, план масштаба 1:500, продольный профиль, развертка колодцев) в соответствии с «Требованиями, предъявляемыми к исполнительным съемкам, составлению, приемке и хранению исполнительных чертежей на подземные инженерные сети города Москвы и лесопаркового защитного пояса», утвержденными Постановлением №33 Правительства города Москвы от 19.01.1993 года, в электронном виде.

5.6.      Передача Заказчику 1 (Одного) бумажного экземпляра исполнительных чертежей трасс телефонной (кабельной) канализации (далее - комплект исполнительных чертежей) для проштамповки их службой эксплуатации.

5.7.      Получение от Заказчика комплекта исполнительных чертежей,

проштампованных службой эксплуатации и Заказчиком.

5.8.      Сканирование комплекта исполнительных чертежей для перевода его в электронный вид (формат PDF), подписание комплекта исполнительных чертежей представителем Исполнителя с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), составление каталогов координат характерных точек трасс телефонной (кабельной) канализации (далее - каталог координат).

5.9.      Подача заявки в Москомархитектуру через официальный сайт Мэра Москвы (www.mos.ru) на получение государственной услуги «Приемка исполнительной документации для Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений». Комплект исполнительных чертежей в электронном виде, подписанный ЭЦП, а также каталоги координат прикрепляются к заявке. Из Москомархитектуры комплект исполнительных чертежей с каталогами координат перенаправляется в ГБУ «Мосгоргеотрест» на проверку соответствия контрольно-геодезической съемке.

5.10.    Получение согласованного комплекта исполнительных чертежей из Москомархитектуры в случае положительного результата предоставления государственной услуги «Приемка исполнительной документации для Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений». Согласованный комплект исполнительных чертежей и Решение о приемке исполнительной документации для Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений приходят в электронном виде, подписанные ЭЦП представителями Москомархитектуры и ГБУ «Мосгоргеотрест».

5.11.    Передача Заказчику согласованного комплекта исполнительных чертежей и Решения о приемке исполнительной документации для Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений по электронной почте.

5.12.    В случае отрицательного результата предоставления государственной услуги «Приемка исполнительной документации для Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений» Исполнитель устраняет зависящие от него замечания, выданные ГБУ «Мосгоргеотрест».

Далее действуют п.5.6 - п.5.11 настоящего Технического задания.

Замечания, не зависящие от Исполнителя, устраняются Заказчиком.

Согласно п.2.2. Договора, п 6. Технического задания на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1 к Договору №103), срок выполнения Работ по настоящему Договору в объеме, указанном в Техническом задании на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1), составляет 10 (Десять) рабочих дней после получения письменного уведомления от Заказчика о завершении строительно-монтажных работ по устройству трасс телефонной (кабельной) канализации.

Однако, до настоящего времени уведомления от Заказчика о завершении строительно-монтажных работ по устройству трасс телефонной (кабельной) канализации в рамках Договора №103 до настоящего времени не поступало.

В свою очередь, Исполнителем добросовестно, своевременно и надлежащим образом выполнены работы, предусмотренные пп.5.1-5.5. Состава работ, изложенного в Техническом задании на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1 к Договору №103).

Так, с 26.06.2020 по 09.11.2020 осуществлялись выезды на объект в целях реализации работ, предусмотренных Техническим заданием.

23.09.2020 была осуществлена передача в электронном виде промежуточных исполнительных чертежей трасс телефонной (кабельной) канализации (ситуационный план масштаба 1:2000, план масштаба 1:500, продольный профиль, развертка колодцев) в соответствии с «Требованиями, предъявляемыми к исполнительным съемкам, составлению, приемке и хранению исполнительных чертежей на подземные инженерные сети города Москвы и лесопаркового защитного пояса», утвержденными Постановлением №33 Правительства города Москвы от 19.01.1993 года, на электронную почту.

Замечаний по промежуточным исполнительным чертежам трасс телефонной (кабельной) канализации от Заказчика не поступало.

Согласно 3.1. Договора №103, общая стоимость Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 109 065 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 18 177 руб. 50 коп.

Как указано в п.3.2. Договора №103, общая стоимость Работ, указанная в п.3.1 настоящего Договора, является ориентировочной. Окончательная сумма, подлежащая уплате за все выполненные Работы по настоящему Договору, определяется общей длиной трасс телефонной (кабельной) канализации, указанной в итоговых исполнительных чертежах, из расчета 165 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% -27  руб. 50 коп. за 1 (Один) погонный метр телефонной (кабельной) канализации.

В соответствии с п.3.3.1. Договора, Заказчиком произведена оплата аванса в размере 50% от общей стоимости Работ - 54 532 руб. 50 коп., в том числе НДС 20% - 9 088 руб. 75 коп., что подтверждается платежным поручением №1400 от 22.09.2020.

Согласно п.3.8. Договора, в случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты прекращения действия настоящего Договора произвести взаиморасчеты.

Согласно ст.717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Учитывая, что ответчиком (Исполнителем) выполнен объем работ с пп.5.1. по пп. 5.5. Состава работ, изложенного в Техническом задании на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1 к Договору №103), а также учитывая, что фактически отснятая трасса, указанная в промежуточных исполнительных чертежах трасс телефонной (кабельной) канализации составляет 452.25 м.п., считаем (исходя из расчета 165  руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 27 руб. 50 коп. за 1 (Один) погонный метр телефонной (кабельной) канализации, что составляет 74 621.25 руб., что сумма аванса в размере 54 532 руб. 50 коп., в том числе НДС 20% - 9 088 руб. 75 коп., на момент расторжения Договора отработана Исполнителем в полном объеме.

Согласно п. 1.2. Договора №172, состав и объемы Работ утверждаются ЗАКАЗЧИКОМ в Техническом задании на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1 к Договору №103), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

Согласно п.4 Технического задания на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1 к Договору №172) установлен следующий объем работ:

4.1.      Вынос в натуру трасс телефонной (кабельной) канализации протяженностью 1242,00 п.м. (предварительная протяженность согласно проекту).

4.2.      Исполнительные чертежи трасс телефонной (кабельной) канализации протяженностью 1242,00 п.м. (предварительная протяженность согласно проекту).

Согласно п.5 Технического задания на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1 к Договору №172) установлен следующий состав работ:

5.1.      Сгущение местной геодезической сети в районе работ с созданием пунктов съемочного обоснования - не менее 3 (Трех) пунктов.

5.2.      Вынос в натуру трасс телефонной (кабельной) канализации согласно проекту.

5.3.      Проведение исполнительной геодезической съемки трасс телефонной

(кабельной) канализации согласно фактическому положению.

5.4.      Камеральная обработка результатов полевых геодезических измерений.

5.5.      Создание исполнительных чертежей трасс телефонной (кабельной) канализации (ситуационный план масштаба 1:2000, план масштаба 1:500, продольный профиль, развертка колодцев) в соответствии с «Требованиями, предъявляемыми к исполнительным съемкам, составлению, приемке и хранению исполнительных чертежей на подземные инженерные сети города Москвы и лесопаркового защитного пояса», утвержденными.

Постановлением №33 Правительства города Москвы от 19.01.1993 года, в электронном виде.

5.6.      Передача Заказчику 1 (Одного) бумажного экземпляра исполнительных чертежей трасс телефонной (кабельной) канализации (далее - комплект исполнительных чертежей) для проштамповки их службой эксплуатации.

5.7.      Получение от Заказчика комплекта исполнительных чертежей, проштампованных службой эксплуатации и Заказчиком.

5.8.      Сканирование комплекта исполнительных чертежей для перевода его в электронный вид (формат PDF), подписание комплекта исполнительных чертежей представителем Исполнителя с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), составление каталогов координат характерных точек трасс телефонной (кабельной) канализации (далее - каталог координат).

5.9.      Подача заявки в Москомархитектуру через официальный сайт Мэра Москвы (www.mos.ru) на получение государственной услуги «Приемка исполнительной документации для Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений». Комплект исполнительных чертежей в электронном виде, подписанный ЭЦП, а также каталоги координат прикрепляются к заявке. Из Москомархитектуры комплект исполнительных

чертежей с каталогами координат перенаправляется в ГБУ «Мосгоргеотрест» на проверку соответствия контрольно-геодезической съемке.

5.10.    Получение согласованного комплекта исполнительных чертежей из Москомархитектуры в случае положительного результата предоставления государственной услуги «Приемка исполнительной документации для Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений». Согласованный комплект исполнительных чертежей и Решение о приемке исполнительной документации для Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений приходят в электронном виде, подписанные ЭЦП представителями Москомархитектуры и ГБУ «Мосгоргеотрест».

5.11.    Передача ЗАКАЗЧИКУ согласованного комплекта исполнительных чертежей и Решения о приемке исполнительной документации для Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений по электронной почте.

5.12.    В случае отрицательного результата предоставления государственной услуги «Приемка исполнительной документации для Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений» ИСПОЛНИТЕЛЬ устраняет зависящие от него замечания, выданные ГБУ «Мосгоргеотрест».

Далее действуют п.5.6 - п.5.11 настоящего Технического задания.

Замечания, не зависящие от Исполнителя, устраняются Заказчиком.

Согласно п.2.2. Договора, п 6. Технического задания на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1 к Договору №172), срок выполнения Работ по настоящему Договору в объеме, указанном в Техническом задании на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1), составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней после получения письменного уведомления от Заказчика о завершении строительно-монтажных работ по устройству трасс телефонной (кабельной) канализации.

22.06.2021 г. поступило уведомление от Заказчика о завершении строительно-монтажных работ по устройству трасс телефонной (кабельной) канализации в рамках Договора №172.

При этом, Исполнителем добросовестно, своевременно и надлежащим образом выполнены работы, предусмотренные пп.5.1-5.6. Состава работ, изложенного в Техническом задании на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1 к Договору №172).

Так, с 26.06.2020 по 25.06.2021 осуществлялись выезды на объект в целях реализации работ, предусмотренных Техническим заданием.

13.07.2021 была осуществлена передача в электронном виде исполнительных чертежей трасс телефонной (кабельной) канализации (ситуационный план масштаба 1:2000. план масштаба 1:500, продольный профиль, развертка колодцев) в соответствии с «Требованиями, предъявляемыми к исполнительным съемкам, составлению, приемке и хранению исполнительных чертежей на подземные инженерные сети города Москвы и лесопаркового защитного пояса», утвержденными Постановлением№33 Правительства города Москвы от 19.01.1993 года, на электронную почту.

Согласно п.5.7. Технического задания на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1 к Договору №172), следующим этапом состава работ по Договору №172 идет получение от Заказчика комплекта исполнительных чертежей, проштампованных службой эксплуатации и Заказчиком.

Согласно п. 4.1.6. Договора, Заказчик (Истец) обязан согласовать итоговые исполнительные чертежи трасс телефонной (кабельной) канализации со службой эксплуатации.

Однако, до настоящего времени от Заказчика (Истца) не поступил комплект исполнительных чертежей, проштампованных службой эксплуатации и Заказчиком.

Согласно п.4.1.8. Договора, Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

Согласно п.2.3. Договора, предусмотренные настоящим Договором сроки продлеваются по независящим от Исполнителя причинам, в том числе при отсутствии заранее согласованного Сторонами доступа Исполнителя на Объект, иных обстоятельств, влекущих невозможность выполнения Работ Исполнителем, в том числе вследствие неисполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Договору, включая обязанность по оплате Работ по настоящему Договору, предоставление неверных и/или неполных сведений или результатов. С момента, когда Заказчик узнал или должен был узнать о соответствующих обстоятельствах, влияющих на срок выполнения Работ, течение предусмотренных настоящим Договором сроков автоматически приостанавливается.

Учитывая изложенное, встречное неисполнение обязательств Заказчика повлекло невозможность для Исполнителя продолжения работ по Договору №172 по независящим от Исполнителя причинам, а также автоматическое приостановление сроков в порядке п.2.3. Договора.

Согласно 3.1. Договора № 172, общая стоимость Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 204 930 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 34 155 руб. 00 коп.

Как указано в п. 3.2. Договора №172, общая стоимость Работ, указанная в п.3.1 настоящего Договора, является ориентировочной. Окончательная сумма, подлежащая уплате за все выполненные Работы по настоящему Договору, определяется общей длиной трасс телефонной (кабельной) канализации, указанной в итоговых исполнительных чертежах, из расчета 165 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% -27 руб. 50 коп. за 1 (Один) погонный метр телефонной (кабельной) канализации.

В соответствии с п.3.3.1. Договора, Заказчиком произведена оплата аванса в размере 50% от общей стоимости Работ - 102 465 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 17 077 руб. 50 коп., что подтверждается платежным поручением №1711 от 21.10.2020.

Следует также отметить, что в назначении платежа содержится опечатка, поскольку указано, что данная сумма является авансом по Договору №103/20 от 25.06.2020 г., однако фактически указанная сумма уплачена как аванс по Договору №172/20 от 25.06.2020 г.

Также на основании п.3.3.2. Договора. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня передачи Исполнителем итоговых исполнительных чертежей трасс телефонной (кабельной) канализации Заказчику для согласования со службой эксплуатации оплачивает по счету, предоставленному Исполнителем, аванс в размере 40% от общей стоимости Работ - 81 972 руб. 00 коп, в том числе НДС 20% - 13 руб. 00 копеек.

Сумма, указанная в п.3.3.2. Договора оплачена Заказчиком платежным поручением №1335 от 12.07.2021 г. что также подтверждает факт передачи Исполнителем итоговых исполнительных чертежей трасс телефонной (кабельной) канализации Заказчику.

Замечаний по переданному результату работ от Заказчика не поступало.

Учитывая, что Исполнителем выполнен объем работ с пп.5.1. по пп. 5.6. Состава работ, изложенного в Техническом задании на производство инженерно-геодезических работ (Приложение №1 к Договору №103), а также учитывая, что фактически отснятая трасса, указанная в исполнительном чертеже трасс телефонной (кабельной) канализации составляет 1107,20 м.п., считаем (исходя из расчета 165  руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 27   руб. 50 коп. за 1 (Один) погонный метр телефонной (кабельной) канализации), что уплаченные Заказчиком по Договору №172 суммы в размере - 102 465 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 17 077 руб. 50 коп. и - 81 972 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 13 662  руб. 00 коп., на момент расторжения Договора отработаны Исполнителем в полном объеме.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Из содержания ст. 9 АПК РФ следует, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, доказательств неосновательного обогащения ответчика истцом не представлено.

Поскольку материалами дела обоснованность исковых требований не подтверждена, суд находит заявленные требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Государственная пошлина относится на истца в силу ст.110 АПК РФ.

На основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 316, 328, 395, 401, 420-425, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720, 1102, 1103, 1107 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Иск ООО "СВЯЗЬИНЖСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>) к ООО "ГИЛЬДИЯ ИНЖЕНЕРОВ" (ОГРН 

<

***>) о взыскании 243 133 руб. 46 коп. – суммы неосновательного обогащения, процентов за период с 18.10.2023 г. по 30.11.2023 г., проценты по день фактической оплаты суммы долга оставить без удовлетворения.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки отнести на истца.

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия,  а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья                                                                                           Романов О. В.