Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-126181/2024

14 декабря 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Бутова Р.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Л.Г.

рассмотрев 13.11.2025 в судебном заседании дело по иску:

санкт-петербургского государственного казенного учреждения "Дирекция транспортного строительства" (адрес: Россия 194044, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР НЕЙШЛОТСКИЙ, Д.8, ОГРН: 

<

***>);

к обществу с ограниченной ответственностью "СМК" (адрес: Россия 199004, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ЛИНИЯ 5-Я В.О., Д. 42, ЛИТЕРА А,ОФИС 212-2,ПОМЕЩ. 81, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании

при участии: от истца – ФИО1, доверенность от 25.12.2024, от ответчика – ФИО2, доверенность от 10.02.2025

установил:

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (далее – Дирекция, Истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ООО «СМК» (далее – Ответчик) о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ в размере 16 496 601, 39 руб. по государственному контракту от 27.09.2022 № ОСТ-74.

Определением арбитражного суда от 28.12.2024 исковое заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

Представитель истца в заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме, относительно удовлетворения встречного иска возражал. Ответчик направил в материалы судебного дела отзыв от 26.03.2025 №б/н.

В судебное заседание явился представитель ответчика, относительно удовлетворения заявления возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ходатайствовал о снижении неустойки с учетом ст. 404 и 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле и представленные ими доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Между СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (Заказчик) и ООО «СМК» (Подрядчик) заключен государственный контракт от 27.09.2022 № ОСТ-74 (далее - Контракт) на выполнение работ по объекту «Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта в Красносельском районе (Лот № 3) с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга (далее - Объект).

В соответствии с п. 1.1. Контракта, Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами и средствами выполнить работы по Объекту с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга, в соответствии с передаваемой Заказчиком проектной документацией. Графиком выполнения работ, предоставленной в соответствии с формой и сдать объект Заказчику по форме Акта приемки законченного объекта приемочной комиссией в установленный контрактом срок.

В соответствии с п. 3.1 Контракта цена контракта является твердой и составляет 46 994 884 руб.

Согласно п. 2.1. Контракта, сроки начала и окончания работ по Объекту устанавливаются Графиком выполнения работ.

Согласно дополнительному соглашению от 25.10.2022 № 1-ОСТ-76 стороны по Контракту согласовали и утвердили График выполнения работ по Объекту.

По состоянию на 14.10.2024 Подрядчиком допущена просрочка исполнения обязательств, а именно нарушены сроки завершения работ, предусмотренные Графиком выполнения работ (приложение № 1 к дополнительному соглашению от 25.10.2022 № 1-ОСТ-76) по следующим этапам:

Остановочный пункт по адресу: Дорога в дер. Куттузи (от конечного пункта Геологическая ул. д. 75) (ул. Геологической ул. и дороги в дер. Куттузи).

- Этап 1.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 1.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 1.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 1.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 1.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 1.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 1.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: Дорога в дер. Куттузи (от ул. Спирина) (ул. Геологической ул. и дороги в дер. Куттузи).

- Этап 2.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 2.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 2.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 2.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 2.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 2.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 2.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: ул. Первого мая, д. 2 (к пр. Ленина)

- Этап 3.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 3.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 3.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 3.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 3.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 3.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 3.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: ул. Первого мая, д. 2 (к Пушкинскому шоссе) (ул. Первого Мая).

- Этап 4.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 4.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 4.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 4.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 4.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 4.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 4.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: ул. Голубко (от ул. Свободы

к пр. Ленина) (ул. Юных Пионеров).

- Этап 5.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 5.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 5.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 5.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 5.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 5.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 5.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 18

(от пр. Героев к ул. Доблести) (ул. Маршала Захарова).

- Этап 6.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 6.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 6.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 6.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 6.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 6.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 6.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: Больница № 15 (от Партизана Германа

к пр. Ветеранов) (Авангардная ул.)

- Этап 7.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 7.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 7.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 7.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 7.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 7.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 7.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: Андреевский пер. (от ул. Партизана Германа к пр. Ветеранов) (Андреевский пер.).

- Этап 8.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 8.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 8.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 8.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 8.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 8.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 8.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: Петергофское шоссе (от ул. Доблести) (Петергофское угол ул. Доблести).

- Этап 9.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 9.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 9.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 9.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 9.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 9.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 9.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: пр. Кузнецова (от Петергофского шоссе) (пр. Кузнецова угол Петергофского шоссе).

- Этап 10.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 10.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 10.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 10.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 10.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 10.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 10.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: ул. Рихарда Зорге (от Петергофского шоссе) (пр. Кузнецова у ул. Рихарда Зорге).

- Этап 11.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 11.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 11.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 11.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 11.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 11.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 11.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: ул. Маршала Захарова (от Петергофского шоссе) (пр. Кузнецова угол ул. Маршала Захарова).

- Этап 12.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 12.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 12.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 12.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 12.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 12.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 12.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: Ленинский пр. (от ул. Маршала Казакова) (пр. Кузнецова у Ленинского пр.).

- Этап 13.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 13.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 13.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 13.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 13.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 13.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 13.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: ул. Маршала Захарова (от ул. Маршала Казакова) (пр. Кузнецова ул. Маршала Захарова).

- Этап 14.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 14.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 14.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 14.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 14.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 14.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 14.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: ул. Рихарда Зорге (пр. Кузнецова угол Петергофского шоссе) (пр. Кузнецова у ул. Рихарде Зорге).

- Этап 15.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 15.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 15.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 15.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 15.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 15.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 15.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Остановочный пункт по адресу: Петергофское шоссе (пр. Кузнецова угол Петергофского шоссе).

- Этап 16.1. Проектные работы (РД). Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 16.2. Подготовительные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 16.3. Дорожные работы. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 16.4. ТСОДД. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 16.5. Инженерные сети. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 16.6. Установка павильона. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап 16.7. Благоустройство. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Утилизация грунта и строительного мусора. Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Негативное воздействие на окружающую среду.

Срок окончания работ – 07.11.2022;

- Этап б/н. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Срок окончания работ – 07.11.2022.

Таким образом, Ответчик нарушил срок завершения работ, предусмотренный Графиком выполнения работ, утвержденный

самим же Ответчиком.

В соответствии с ч. 2 ст. 763 ГК РФ, по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

В силу ч. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает

или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день

или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

По смыслу ст. 330 ГК РФ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.

Согласно п. 7.1. Контракта, Подрядчик и Заказчик несут полную ответственность за свою деятельность по Контракту, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

В соответствии с п. 7.3. Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно п. 7.3.1. Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Пеня начисляется за просрочку Подрядчиком исполнения Графика выполнения работ, в том числе за просрочку окончания работ по Объекту, за просрочку Подрядчиком исполнения Перечня этапов исполнения Контракта.

По состоянию на 14.10.2024 просрочка исполнения обязательств по завершению работ составила по этапам: № 1.1. - 49, № 1.2. – 706, № 1.3. – 706, № 1.4. – 706, № 1.5. – 706, № 1.6. – 706, № 1.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 2.1. – 49, № 2.2. – 706, № 2.3. – 706, № 2.4. – 706, № 2.5. – 706, № 2.6. – 706, № 2.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 3.1. – 49, № 3.2. – 706, № 3.3. – 706, № 3.4. – 706, № 3.5. – 706, № 3.6. – 706, № 3.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 4.1. – 49, № 4.2. – 706, № 4.3. – 706, № 4.4. – 706, № 4.5. – 706, № 4.6. – 706, № 4.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н – 706, № б/н – 706, № 5.1. – 49, № 5.2. – 706, № 5.3. – 706, № 5.4. – 706, № 5.5. – 706, № 5.6. -706, № 5.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 6.1. – 49, № 6.2. – 706, № 6.3. – 706, № 6.4. – 706, № 6.5. – 706, № 6.6. – 706, № 6.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 7.1. – 49, № 7.2. – 705, № 7.3. – 705, № 7.4. – 698,

№ 7.5. – 706, № 7.6. – 706, № 7.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 8.1. – 49, № 8.2. – 706, № 8.3. – 706, № 8.4. – 706, № 8.5. – 706, № 8.6. – 706, № 8.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 9.1. – 49, № 9.2. – 706, № 9.3. – 706, № 9.4. – 706, № 9.5. – 706, № 9.6. – 706, № 9.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 10.1. – 49, № 10.2 – 330, № 10.3. – 705, № 10.4. – 706, № 10.5. – 706, № 10.6. – 330, № 10.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 11.1. – 49, № 11.2 – 705, № 11.3. – 705, № 11.4 – 705, № 11.5 – 706, № 11.6. – 330, № 11.7. – 330, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 12.1. – 49, № 12.2. – 330, № 12.3. – 705, № 12.4. – 705, № 12.5. – 706, № 12.6. – 330, № 12.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 13.1. – 49, № 13.2. – 651, № 13.3. – 705, № 13.4. – 705, № 13.5. – 706, № 13.6. – 664, № 13.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 14.1. – 49, № 14.2. – 705, № 14.3. – 705, № 14.4. – 705, № 14.5. – 706, № 14.6. – 330, № 14.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 15.1. – 49, № 15.2. – 705, № 15.3. – 705, № 15.4. – 705, № 15.5. – 706, № 15.6. – 330, № 15.7. – 705, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № 16.1. – 49, № 16.2. – 706, № 16.3. – 706, № 16.4. – 706, № 16.5. – 706, № 16.6. – 706, № 16.7. – 706, № б/н. – 706, № б/н. – 706, № б/н. - 706 календарных дней.

Размер неустойки за просрочку исполнения Графика выполнения работ, рассчитанной в соответствии с п. 7.3.1. Контракта по состоянию на 14.10.2024 составляет 16 496 601 руб. 39 коп.

Расчет неустойки приложен к исковому заявлению как приложение к претензии.

17.10.2024 Истцом в адрес Ответчика направлена досудебная претензия № 09-7850/24-0-0 с требованием в добровольном порядке перечислить неустойку в размере 16 496 601 руб. 39 коп.

Письмо с расчетом претензии было направлено в адрес Ответчика Почтой России и получено Ответчиком 11.11.2024 о чем свидетельствует отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80081402818277.

Требования истца оставлены без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с исковым заявлением.

Суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

Согласно пункту 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 766 ГК РФ государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

Отношения, связанные с размещением государственного заказа и заключением государственных контрактов, регулируются Законом о контрактной системе.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно статье 329 ГК РФ обязательства сторон могут обеспечиваться в частности неустойкой.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Частью 6 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Срок исполнения обязательства установлен в соответствии с Графиком выполнения работ (дополнительное соглашение № 1-ОСТ-76 от 25.10.2022). Таким образом, неустойка рассчитана верно. Ответчик в своем отзыве ссылается на недостатки проектной документации. Согласно позиции ответчика, ответственным за недостатки в проектной документации является заказчик, работы по корректировке проектной документации в обязанности подрядчика не входят.

Учитывая невозможность проведения работ по указанным объектам ввиду недостатков проектной документации, подрядчик направил в адрес заказчика письмо исх. № 81 от 01.10.2024, в котором приостановил производство работ и потребовал до 11.10.2024 устранить указанные недостатки проектной документации.

Не получив ответа в указанный срок, подрядчик направил заказчику письмо исх. № 83 от 14.10.2024, в котором отказался от исполнения Контракта.

Согласно п. 8.5.2 Контракта, решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Согласно п. 8.5.1 Контракта, датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик. Учитывая, что решение об одностороннем отказе было размещено в единой информационной системе 14.10.2024 в 10:44.

Контракт считается расторгнутым с 24.10.2024.

Все указанные обстоятельства, а также правомерность одностороннего отказа подрядчика подтверждаются, в том числе, решением Комиссии УФАС России по контролю закупок № РНП-7801753/2024 от 01.11.2024.

Таким образом, оставшаяся часть работ не могла быть выполнена подрядчиком ввиду недостатков проектной документации, за которую отвечает заказчик, и, как следствие, срок погашения аванса (07.11.2022), который погашается в первую очередь выполнением работ, нельзя считать наступившим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Согласно пункту 2 статьи 716 ГК РФ подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельств.

Исходя из пункта 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Однако, в соответствии с п. 11.5 Технического задания (раздел 11 Требования о порядке проведения согласований, оформлению рабочей документации и прочие требования) к Контракту при необходимости, по указанию Заказчика, в счет контрактной цены выполнить дополнительные инженерные изыскания, сбор исходных данных, а также дополнительное проектирование и согласование разделов рабочей документации, не учтённых в составе проектной документации, но необходимое для полной реализации объекта в установленные сроки.

Также судом отмечено, что о наличии замечаний к проектной документации Подрядчик заявил только 01.10.2024, после окончания сроков выполнения работ по Контракту (07.11.2022).

В силу ст. 404 ГК РФ если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

В соответствии с п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока его обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно п. 1 ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Доводы ответчика о том, что заказчик несвоевременно получил порубочные билеты, необходимые для уничтожения зеленых насаждений, которые препятствовали выполнению дорожных работ и работ по монтажу остановочных пунктов, а также разрешений Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга учтены судом.

Оценив доводы истца и ответчика, суд считает необходимым при оценке обоснованности заявленных требований принять во внимание доводы ответчика, признать обоснованным его ходатайство о снижении неустойки применительно к статье 404 ГК РФ и снизить сумму неустойки до 8 248 300, 64 рублей.

Как следует из статьи 404 ГК РФ и разъяснений, данных в абзаце первом пункта 81 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон либо кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера неустойки либо действовал недобросовестно, размер ответственности должника может быть уменьшен судом по этим основаниям в соответствии с положениями статьи 404 ГК РФ, что в дальнейшем не исключает применение статьи 333 ГК РФ.

Доводы ответчика о снижении неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ подлежат отклонению в связи со следующим.

В соответствии со статьей 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Как разъяснено в пункте 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" снижение неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России на основании соответствующего заявления ответчика допускается лишь в экстраординарных случаях, когда убытки кредитора компенсируются за счет того, что размер платы за пользование денежными средствами, предусмотренный условиями обязательства (заем, кредит, коммерческий кредит), значительно превышает обычно взимаемые в подобных обстоятельствах проценты.

Между тем, ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств экстраординарности настоящего случая не представлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 177 АПК РФ (в редакции, вступившей в законную силу с 01.01.2017) решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку истец от уплаты государственной пошлины освобожден, в соответствии со статьями 333.17, 333.18, 333.19 НК РФ, последняя подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СМК" (ИНН 

<

***>) в пользу санкт-петербургского государственного казенного учреждения "Дирекция транспортного строительства" (ИНН 

<

***>) 8 248 300 руб. 64 коп. неустойки.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СМК" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 194 983 руб. государственной пошлины за рассмотрение иска.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Бутова Р.А.