АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 650000, г. Кемерово, ул. Красная, 8 www.kemerovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 (резолютивная часть)

Дело № А27-28500/2017

г. Кемерово

05 сентября 2019 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Серафимовича Е.П.,  при ведении аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем Шубиной И.С.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «СтройСервисПлюс», г.Кемерово к ООО «АЙС-АКВА», г.Кемерово 

третьи лица: 1. МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 31», г.Прокопьевск   2. ГП КО «ГлавУКС», г.Кемерово  

 3. ООО «Техноресурс», г.Кемерово об обязании устранить недостатки выполненных работ руководствуясьст.ст.167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

р е ш и л :

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «АЙС-АКВА» в течение одного  месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки  

выполненных работ по договору субподряда № 5 от 19.06.2015г., заключенному между ООО  «СтройСервисПлюс» и ООО «АЙС-АКВА» на выполнение общестроительных работ по  

устройству кровли на объекте: «Реконструкция здания под детский сад по адресу: г.Прокопьевск, ул.Пионерская,68А», в том числе: 1. Повреждения ограждения кровли; 2. Прогиб угла кровли; 

3. Повреждения фасонных элементов кровли в местах прогиба угла кровли;  4. Повреждения стропил кровли;  

5. Прогиб несущих деревянных балок кровли (лежни); 

6. Повреждения водосточной системы кровли, вызывающие подтеки  

воды на фасаде здания; 7. Протечки кровли в местах прогиба угла кровли. Судебные расходы по делу отнести на ответчика. 

Взыскать в доход Федерального бюджета с общества с ограниченной ответственностью  «АЙС-АКВА» 9 000 руб. госпошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Прекратить исполнение по исполнительному листу Арбитражного суда Кемеровской  области серия ФС № 026897744 от 29.01.2019г. о взыскании в доход Федерального  

бюджета с общества с ограниченной ответственностью «СтройСервисПлюс» 29 753 руб.  госпошлины  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца  

после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск). 

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  

вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) при  

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции  

или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  

апелляционной жалобы. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской  

области. Судья Е.П. Серафимович