Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-23468/2023

12 октября 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬГЕОЗЕМ" (ИНН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" (ИНН: 

<

***>)

третье лицо  публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"

при участии

- от истца: ФИО2 

- от ответчика: ФИО3

- от третьего лица: не яв. 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬГЕОЗЕМ" (далее – ООО "ДАЛЬГЕОЗЕМ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" (далее – ООО СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ") о взыскании 3611174 руб. задолженности по договору от 29.07.2019 № 15/СЗ-37/19 (далее – Договор). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" в лице филиала «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля бывшего главного инженера - ФИО4. Суд отклонил ходатайство.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между  ООО "ДАЛЬГЕОЗЕМ" (субподрядчиком)  и ООО "СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" (подрядчиком) заключен Договор на выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовых отношений и исходно-разрешительной документации на Объект; инженерным изысканиям на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), согласно ТЗ; принятию участия во взаимодействии с заинтересованными организациями, уполномоченными на проведение согласований и обеспечению сопровождения результатов инженерных изысканий для получения положительного заключения государственной экспертизы; сдача результатов инженерно-геологических и геодезических изысканий (местоположение скважин и ГРО (геодезическая разбивочная основа)) Заказчику; разработке и утверждению лесоустроительной документации на лесные участки с шириной полосы отвода не менее 63,2 м, в том числе, получение разрешительной документации и осуществление рубки на землях лесного фонда на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

ООО "СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" являлось подрядчиком по основному договору с ПАО "ФСК ЕЭС" Филиал АО "ЦИУС ЕЭС" - ЦИУС Востока, которое, в свою очередь, являлось заказчиком по основному договору.

Согласно п. 4.1. Договора в редакции дополнительного соглашения от 15.01.2020 № 1 (далее – ДС), цена Договора в размере 5 705 290 руб. 

По п. 5.1. Договора авансовый платеж выплачивается при условии получения подрядчиком счета субподрядчика в размере 50% от стоимости работ, указанной в п. 4.1. Договора, в течение 30 календарных дней с даты подписания Договора.

В силу п. 5.2. Договора оплата текущих авансовых платежей производится на основании подписанной сторонами накладной о переданных работах и надлежаще оформленного счета, выставленного субподрядчиком, в течение 15 рабочих дней со дня подписания накладной о переданных работах. Текущие авансовые платежи выплачиваются в размере 20% от стоимости переданных подрядчику работ, указанных в календарном графике выполнения работ и стоимости.

В соответствии с п. 5.4. Договора окончательный расчет в размере 30% от стоимости работ, указанной в п. 5.1. Договора, производится на основании подписанного сторонами акта о приемки выполненных работ и передаче прав в течение 15 рабочих дней с даты предоставления счета подрядчиком.

Стороны по Договору пописали:

- акт о выполненных работах от 28.01.2021 на сумму 5 885 301,40 руб., следует к оплате 1 177 060,28 руб.; 

- акт о приемке выполненных работ  и передаче прав от 28.01.2021 на сумму 5 885 301,40 руб., следует к перечислению 1 765 590,42 руб.; 

- акт о приемке выполненных работ  и передаче прав от 02.08.2021 на сумму 961 046,60 руб., следует к перечислению 668 523,30 руб.; 

- акт сверки взаимных расчетов, согласно которому по состоянию на 02.12.2021 задолженность в пользу ООО "ДАЛЬГЕОЗЕМ" составляет 3 611 174 руб.  

ООО "ДАЛЬГЕОЗЕМ" в рамках дела № А56-88942/2020 о несостоятельности (банкротстве) ООО "СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" обратилось в суд с заявлением о включении требований по Договору в реестр требований кредиторов.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.12.2022 по делу № А56-88942/2020/тр.15 производство по заявлению ООО "ДАЛЬГЕОЗЕМ" прекращено, поскольку требование относится к текущим. 

ООО "СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" задолженность не оплатило, в связи с чем ООО "ДАЛЬГЕОЗЕМ" обратилось в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Факты сдачи-приемки работ по Договору подтверждаются подписанными сторонами актом о выполненных работах от 28.01.2021 на сумму 5 885 301,40 руб., актом о приемке выполненных работ и передаче прав от 28.01.2021 на сумму 5 885 301,40 руб., актом о приемке выполненных работ  и передаче прав от 02.08.2021 на сумму 961 046,60 руб.

По мнению ответчика, с учетом факта возбуждения в отношении ответчика дела о банкротстве и повышенного стандарта доказывания наличия задолженности, акты не могут служить единственным и безусловным доказательством выполнения работ и наличия заявленной ко взысканию задолженности. 

Истец представил:

- договор от 01.07.2020 № 06-1/20 на оказание услуг по оформлению лесного участка площадью 56,4982 га для строительства объекта «Строительство «ВЛ 220 кВ Томмот – НПС 19», входящий в состав титула «Строительство третьей ВЛ 220 кВ ФИО5 со строительством заходов на ПС 220 кВ НПС-19 ориентировочной протяженностью 337 км, заключенный между ООО "ДАЛЬГЕОЗЕМ" (заказчиком) и ИП ФИО6 на сумму 300 000 руб., 

- проект освоения лесов на лесном участке общей площадью 56,4982 га, расположенном в Республике Саха (Якутия), в муниципальном районе «Нерюнгринский район», земли лесного фонда Нерюнгринского лесничества Нерюнгринское участковое лесничество, предоставленном в аренду ПАО «ФСК ЕЭС» для строительства объекта «Строительство "ВЛ 220 кВ Томмот - НПС 19" входящей в состав титула "Строительство третьей ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах со строительством заходов на ПС 220 кВ НПС-19 ориентировочной протяженностью 337 км»;

- копию акта освидетельствования геодезической разбивочной основы по объекту: Строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах (Томмот) с заходами на ПС 220 кВ НПС-19 и реконструкцией прилегающей сети (участок № 1: ПК84+64,37-ПК167+66,15);

- копию акта сдачи закрепления инженерно-геологических выработок объекта капитального строительства.

- копию договора аренды лесного участка от 17.12.2020 № 1372, заключенного между Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) и ПАО "ФСК ЕЭС" Филиал АО "ЦИУС ЕЭС" - ЦИУС Востока;

-  копию приказа Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) от 30.04.2021 № 509-э "Об утверждении заключения экспертной комиссии", которым было утверждено положительное заключение экспертной комиссии на материалы проекта освоения лесов;

- Разрешение на строительство № 14-000-4-2021 от 27.05.2021. выданное Управлением архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия).

Определением от 30.06.2023 суд истребовал у МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) (далее – МИНИСТЕРСТВО) проект освоения лесов, составленный индивидуальным предпринимателем ФИО6 на лесной участок площадью 56,4982 га, с кадастровыми номерами лесного участка 14:19:206002:1458, 14:19:206002:1467 и номером учетной записи в государственном лесном реестре 10971-2020-07, предоставленного Публичному акционерному обществу «ФСК ЕЭС»; приказ от 30.04.2021 № 509-Э. 

МИНИСТЕРСТВО представило в материалы дела приказ от 30.04.2021 № 509-э об утверждении положительного заключения экспертной комиссии на материалы проекта освоения лесов, составленного ИП ФИО6 на лесной участок площадью 56,4982 га с кадастровым №  14:19:206002:1458, 14:19:206002:1467 и номером учетной записи в государственном лесном реестре 10971-2020-07, предоставленного Публичному акционерному обществу «ФСК ЕЭС», а также заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов от 28.04.2021 № 521. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводам, что факты выполнения, сдачи-приемки работ подтверждены, иск подлежит удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ДАЛЬГЕОЗЕМ" (ИНН: 

<

***>) 3611174 руб. задолженности, 41056 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

 

Судья                                                                                                    Косенко Т.А.