АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-32059/22

г. Уфа

20 февраля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 13.02.2023

Полный текст решения изготовлен 20.02.2023

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи Хазиахметовой З.Р. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Щукиной Ю.О., рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний СУ-10» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 17 037 669 руб. 67 коп. долга по договору об осуществлении технологического присоединения от 17.09.2014 №14-10-10-008591-02-01

Судебное заседание начато 08.02.2023, . при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2 представитель по доверенности 01.01.2023;

от ответчика – ФИО3 представитель по доверенности 14.01.2022.

Суд объявляет перерыв в судебном заседании до 13.02.2023 до 16:05. После перерыва судебное заседание продолжено 13.02.2023 до 16:33 в том же составе суда, при ведении протокола помощником судьи Щукиной Ю.О., при участии тех же представителей сторон.

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан  с иском  к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний СУ-10» о взыскании 17 037 669 руб. 67 коп. долга по договору об осуществлении технологического присоединения от 17.09.2014 №14-10-10-008591-02-01.

Определением от 21.10.2022 исковое заявление принято к производству суда.

От ответчика поступил отзыв, с исковыми требованиями не согласен по доводам, изложенным в отзыве.

От представителя истца в материалы дела поступило уточненное исковое заявление, просит взыскать с ответчика 16 437 669 руб. 67 коп. долга. Судом уточнение иска принято в порядке ст. 49 АПК РФ.

По ходатайству истца к материалам  дела приобщены возражения на отзыв.

Иных заявлений и ходатайств не поступило.

Представитель истца требования поддержал, представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, заслушав представителей сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между истцом (сетевая организация) и ответчиком (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.09.2014 № 14-10-10-008591-02-01, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) ТП- 10/0,4 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 3 600 кВт;

- категория надежности 2;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт., а заявитель принял обязательство по оплате расходов на технологическое присоединение. 

Согласно пункту 2 договора технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения объекта: ЖИЛОЙ КВАРТАЛ, ограниченный ул. Чкалова, Шмидта, Союзной в микрорайоне Затон ГО г. Уфа РБ.

В силу пункта 10 договора Размер платы за технологическое присоединение установлен Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 29.12.2012г. №805 (в редакции, действующей на момент заключения договора), с учетом подписанного сторонами протокола разногласий от 17.09.2014 к договору и составляет 33 850 005,65 руб. (Тридцать три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч пять рублей и шестьдесят пять копеек), включая НДС 18% - 5 163 560,18 руб. (Пять миллионов сто шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят рублей и восемнадцать копеек).

В соответствии с пунктом 11 договора Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

В течении 15 дней с момента подписания сторонами настоящего договора Заявитель обязан перечислить первый платеж по графику оплаты (Приложение 2) в размере 3 727 340,29 рублей (Три миллиона семьсот двадцать семь тысяч триста сорок рублей 29 копеек), в том числе НДС 18% - 568 577,33 рублей (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят семь рублей 33 копейки) на расчетный счет Сетевой Организации ежеквартально. Заявитель оплачивает предоставляемую услугу в соответствии с графиком оплаты (Приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 5 договора Выполнение мероприятий по технологическому присоединению осуществляется поэтапно: I этап (1300 кВт) - 4 кв. 2014 г.; II этап (650 кВт) - 2 кв. 2015 г.; III этап (650 кВт) - 4 кв. 2015 г.; IV этап (1000 кВт) - 4 кв.2016г., при условии выполнения Заявителем обязательств, предусмотренных Разделом III настоящего договора и ТУ.

В пункте 8 договора определены обязанности заявителя, среди которых выполнение мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а также уведомление сетевой организации о выполнении технических условий. 

05.09.2017 в адрес общества «Башкирэнерго» поступило обращение от общества «Группа компаний СУ-10» (исх. №0-87) с просьбой выдать продленные технические условия для возможности завершения процедуры технологического присоединения заявленных жилых домов, ввиду сдвига срока ввода их в эксплуатацию.

01.12.2017 между сторонами заключено дополнительное соглашение №17-10-10- 008591-03-05 к вышеуказанному договору, в котором сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 30.05.2019.

25.06.2019 в адрес общества «Группа компаний СУ-10» было направлено уведомление (исх. №УГЭС/10.3-3813) в котором сообщалось, что в соответствии с п.8 заключенного Договора заявитель после выполнения им мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ своего участка должен уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ для осуществления проверки Сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств, опломбировки и осуществления фактического присоединения объекта заявителя. Также заявителю было предложено либо представить намерение о выполнении ТУ, либо подтвердить свое намерение продолжить договорные отношения путем представления в ООО «Башкирэнерго» заявления о продлении сроков выполнения мероприятий по Договору, либо направить в адрес Сетевой организации заявление о расторжении договора.

Ответа на вышеуказанное Уведомление в адрес общества «Башкирэнерго» не поступало.

05.09.2022 от общества «ГК СУ-10» в адрес общества «Башкирэнерго» поступило обращение с просьбой о продлении срока действия договора №14-10-10-008591-02-01 от 17.09.2014 на срок до 01.11.2023 и технических условий №17-10-10-008591-04-03- Падеевка от 04.05.2017, кроме того внести изменения в ТУ по срокам ввода жилых домов:

жилой дом Литер 9 - II этап, мощность 450 кВт (декабрь 2022);

жилой дом Литер 12/2, 12/5 - III этап, мощность 470,27 кВт (сентябрь 2023);

жилой дом Литер 13/1, 12/2, 13/2 - IV этап, мощность 1450 кВт (ноябрь 2023).

23.09.2022 общество «Башкирэнерго» рассмотрев поступившее обращение общества «ГК СУ-10», подготовило и направило в адрес заявителя соответствующее дополнительное соглашение №22-10-10-008591-03-07. Подписав настоящее дополнительное соглашение, стороны пришли к соглашению, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета по Республике Башкортостан по тарифам от 29.12.2012г. №805 и составляет: 34 227 669,67 руб., включая НДС - 5 541 224,20 руб. Кроме того, технические условия на технологическое присоединение № 22-10-10- 008591-04-03-Падеев от 12.09.2022, направленные Заявителю одновременно с настоящим соглашением, являются неотъемлемой частью договора (Приложение № 1), а ранее выданные ТУ №17-10-10-0085591-04-03-Падеев от 04.05.2017 к договору утрачивают силу. Также сторонами договора достигнуто соглашение, что выполнение мероприятий по технологическому присоединению осуществляется Сетевой организацией в срок до 01.11.2023, при условии выполнения Заявителем обязательств, предусмотренных договором и ТУ.

06.10.2022 направленное обществу «Башкирэнерго» дополнительное соглашение №22-10-10-008591-03-07 было подписано обществом «ГК СУ-10» без замечаний и возражений (срок действия договора был продлен до 01.11.2023).

По данным истца, задолженность составляет 16 437 669 руб. 67 коп. (с учетом уточнений).

Как указывает истец, с его стороны в рамках заключенного договора и в установленные сроки мероприятия капитального характера, предусмотренные техническими условиями выполнены в полном объеме, что подтверждается подписанными Актами об осуществлении технологического присоединения - АТП (копии прилагаются):

АТП от 24.08.2015 №15-10-10-008591-16-01 (на сумму 3 499 997,84 руб., в т.ч. НДС 18% 533 897,97 руб.);

АТП от 24.05.2017 №17-10-10-008591-16-03 (на сумму 3 481 182,08 руб., в т.ч. НДС 18% 531 027,77 руб.);

АТП от 29.09.2017 №17-10-10-008591-16-04 (на сумму 4 516 128,19 руб., в т.ч. НДС 18% -688 900,91 руб.);

АТП от 04.12.2017 №17-10-10-008591-16-02 (на сумму 70 520,84 руб., в т.ч. НДС 18% - 10 757,42 руб.).

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец направил в адрес ответчика претензии с требованием уплаты долга, а впоследствии обратился в суд с рассматриваемым иском. 

Проанализировав условия договора от 17.09.2014 N 14-10-10-008591-02-01, суд приходит к выводу, что он является договором об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств, и регулируется нормами главы 39 ГК РФ, общими положениями об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ), а также специальными нормативными актами, закрепляющими правила подключения к системам энергоснабжения. 

Такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ) и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861). 

В соответствии с абзацем 15 статьи 26 Закона N 35-ФЗ по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). 

В силу пункта 2 статьи 23.2 Закона N 35-ФЗ плата за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок. Размер платы за технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных тарифных ставок определяются, исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства. 

В пункте 7 Правил N 861 предусмотрено, что технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта об осуществлении технологического присоединения. 

Исходя из положений пункта 16 Правил N 861, технические условия представляют собой перечень мероприятий, которые стороны договора должны выполнить в целях создания фактической возможности для присоединения энергоустановок и подачи электроэнергии потребителю. 

Согласно пункту 18 Правил N 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя в том числе: 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; 

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Поскольку в нарушение ст. 65 АПК РФ доказательств оплаты либо наличия обстоятельств, служащих основанием для уменьшения размера задолженности, ответчиком не представлено, доводы истца ответчиком документально не опровергнуты, требование истца о взыскании суммы затрат по исполнению обязательств в размере 16 437 669 руб. 67 коп. подлежит удовлетворению. 

Довод ответчика о том, что в удовлетворении иска следует отказать, поскольку на момент обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд срок исполнения обязанности по оплате не наступил, судом отклоняется. При этом суд исходит из следующего. 

На момент вынесения судом данного решения между сторонами продолжает иметь место спор относительно долга ответчика перед истцом по договору об осуществлении технологического присоединения, срок исполнения обязанности по оплате авансовых платежей наступил и указанная обязанность не исполнена ответчиком по настоящее время в добровольном порядке. 

При таких обстоятельствах, отказ в иске по причине преждевременного обращения истца в арбитражный суд противоречит задачам судопроизводства в арбитражных судах, а именно обеспечению доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, справедливому публичному разбирательству в разумный срок независимым и беспристрастным судом, а равно принципу правовой определенности (ст. 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Государственная пошлина в сумме 105 188 руб. на основании статьи 110 АПК РФ подлежит возмещению истцу за счет ответчика, поскольку исковые требования удовлетворены полностью. 

С учетом уменьшения исковых требований государственная пошлина в сумме 18 612 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний СУ-10» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 16 437 669 руб. 67 коп. долга по договору об осуществлении технологического присоединения от 17.09.2014 №14-10-10-008591-02-01, а также 105 188 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 18 612 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 27.09.2022 № 882088.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья З.Р. Хазиахметова