Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-21299/2023

г. Хабаровск

19 марта 2024 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 06.03.2024.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого,               при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания                    ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Амурский гидрометаллический комбинат» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Универсал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 51 384 702 руб. 06 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 18.01.2022            № 78АВ1479676;

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Амурский гидрометаллический комбинат» (далее – ООО «АГМК») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Универсал» (далее –                          ООО «СК «Универсал») о взыскании неосновательного обогащения в размере 43 181 552 руб. 39 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 13.03.2023 по день фактичекской оплаты неосновательного обогащения в размере 43 181 552 руб. 39 коп., неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 29.06.2021 № АГМК 17(01-1-1216) в размере 4 364 873 руб. 66 коп., стоимости невозвращенных давальческих материалов в размере 3 728 276 руб. 01 коп., штрафов за нарушения охраны труда и промышленной безопасности в размере                             110 000 руб.

До вынесения итогового судебного акта по настоящему спору истцом заявлено ходатайство об уточнении исковых требований (в устной форме в судебном заседании 06.03.2024), согласно которому указано, что верной датой для начала начисления процентов за пользование чужими денежными средствами является 19.12.2023.

Уточнения заявленных требований по иску судом приняты с учетом положений статьи 49 АПК РФ.

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, извещен о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с правилами статей 121-123 АПК РФ, в том числе путем опубликования сведений на официальном сайте Арбитражного суда Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отзыв на иск не направил.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном заседании в отсутствие ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО «АГМК» (заказчик) и ООО «Спецстройпроект» заключен договор строительного подряда от 29.06.2021 № АГМК 17(01-1-1216), права и обязанности со стороны подрядчика по которому в полном объеме перешли к ООО «СК «Универсал» (подрядчик) на основании дополнительного соглашения от 05.04.2022 к указанному договору.

В соответствии с пунктом 1.1 представленного договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить комплексное строительство объекта «под ключ». Наименование объекта – «Многоквартирный дом» (АГ0001009) (далее – объект). Конкретные виды и объемы работ указаны в рабочей документации, расчете договорной цены (сметном расчете) (приложение № 1), детализированном расчете договорной цены (приложение № 1.1) и техническом задании на выполнение строительно-монтажных работ (приложение № 9). Подрядчик обязуется выполнить весь объем работ: предусмотренный рабочей документацией, детализированном расчете договорной цены и техническом задании на выполнение строительно-монтажных работ, даже если работы прямо не поименованы в расчете договорной цены (сметном расчете), подлежащий выполнению в соответствии с технологией и организацией строительства, даже если такие работы прямо не поименованы в рабочей документации.

Согласно пункту 2.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы с соблюдением сроков, указанных в графике выполнения работ (приложение № 2) и детализированном графике выполнения этапов работ (приложение             № 2.1).

Графиком выполнения работ установлены объемы и сроки выполнения работ по договору, в том числе по отдельным этапам выполнения работ, в частности срок окончания выполнения работ установлен до 14.11.2023                    (в редакции дополнительного соглашения от 30.11.2022). 

Общая стоимость работ определена на основании расчета договорной цены (сметного расчета) (приложение № 1) и детализированного расчета договорной цены (приложение № 1.1) (пункт 3.1 договора).

На основании расчета договорной цены (приложение № 1) стоимость работ, предусмотренных договором, составляет 606 517 829 руб. 17 коп.

Пунктом 3.2 договора предусмотрено авансирование работ подрядчика и порядок внесения заказчиком платежей в период выполнения работ по договору, в частности  заказчик обязуется произвести оплату по договору в следующем порядке: уплатить аванс в размере 181 955 346 руб. 34 коп., в том числе НДС по ставке 20% в размере 30 325 891 руб. 06 коп. при условии получения заказчиком счета на оплату в следующем порядке: аванс в размере 20 000 000 руб., в том числе НДС по ставке 20% в размере 3 333 333 руб.             33 коп. в течение 10 рабочих дней с даты наступления наиболее поздней из дат предоставления подрядчиком заказчику счета на оплату; аванс в размере 41 927 895 руб., в том числе НДС по ставке 20% в размере 6 987 982 руб.              50 коп. в течение 15 рабочих дней с даты наступления наиболее поздней из дат предоставления подрядчиком заказчику безотзывной безусловной банковской гарантии на сумму аванса, счета на оплату; аванс в размере                   65 000 000 руб., в том числе НДС по ставке 20% в размере 10 833 333 руб.              33 коп. в срок до 01.11.2021 при условии предоставления подрядчиком заказчику безотзывной безусловной банковской гарантии на сумму аванса, счета на оплату; аванс в размере 55 027 451 руб. 34 коп., в том числе НДС по ставке 20% в размере 9 171 241 руб. 89 коп. в срок до 01.03.2022 при условии предоставления подрядчиком заказчику безотзывной безусловной банковской гарантии на сумму аванса, счета на оплату; уплачивать подрядчику денежные средства в размере 90% от стоимости фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ в отчетном месяце (далее – оплачиваемая доля) за вычетом суммы аванса (пункт 3.2.1 договора), подлежащего зачету в порядке, предусмотренном вторым абзацем настоящего пункта договора, в течение 15 рабочих дней с даты приемки заказчиком выполненных подрядчиком работ за отчетный месяц (с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ за отчетный месяц, в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 приложения № 5). Зачет аванса, уплаченного заказчиком в соответствии с пунктом 3.2.1 договора, в счет стоимости фактически выполненных подрядчиком за отчетный месяц работ производится в размере 30% от оплачиваемой доли, до момента полного погашения суммы аванса; уплатить подрядчику денежные средства в размере разницы между окончательной стоимостью работ и суммой денежных средств, уплаченных заказчиком в соответствии с пунктами 3.2.1, 3.2.2 договора, в течение 15 рабочих дней с даты сдачи-приемки работ по договору в целом (с даты подписания сторонами акта о полном исполнении обязательств подрядчиком (пункт 1.10 приложения № 5).

Права и обязанности сторон, порядок взаимодействия сторон в ходе исполнения договора, определены в приложениях №№ 1-5 (пункт 4.1 договора), а условия и порядок расторжения договора согласованы сторонами в приложении № 5 (пункт 6.2 договора).

Согласно пункту 1.1 приложения № 5 сдача-приемка фактически выполненных подрядчиком объемов работ производится сторонами поэтапно в соответствии с детализированным расчетом договорной цены (приложение № 1.1 к договору) и детализированным графиком выполнения этапов работ (приложение № 2.1). Каждый этап работ подрядчик обязан сдавать после выполнения работ в полном объеме. В случае, если детализированным графиком выполнения этапов работ предусмотрено выполнения этапа работ по частям, каждая из этих частей работ сдается подрядчиком отдельно и в полном объеме.

Одновременно со сдачей объемов выполненных работ подрядчик не позднее одного дня с даты окончания соответствующего отчётного месяца, обязуется передавать заказчику: акт о приемке выполненных работ                         (с указанием в нём объёмов, видов и стоимости выполненных работ) за отчётный месяц, составленный в двух экземплярах, подписанный подрядчиком со своей стороны, оформленный по форме, предоставленной заказчиком (пункт 1.1.1); справку о стоимости выполненных работ и затрат, в двух экземплярах, подписанную подрядчиком со своей стороны, оформленную по форме, предоставленной заказчиком (пункт 1.1.2);                     по дополнительному запросу заказчика справку о стоимости использованных материалов и оборудования, использованных при выполнении работ, в двух экземплярах, подписанную подрядчиком со своей стороны, оформленную по форме, предоставленной подрядчиком (пункт 1.1.3); отчет об использовании материалов заказчика, оформленный по форме, предусмотренной пунктом 1.1.7 приложения № 3 (пункт 1.1.4); исполнительную и исполнительно-техническую документацию (пункт 1.1.5).

При этом, заказчик обязуется осуществить приемку объемов работ, выполненных подрядчиком по этапу, в течение пяти календарный дней с даты окончания соответствующего этапа работ и передать подрядчику подписанные со своей стороны акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, или в такой же срок отказаться от приемки указанных объемов работ и направить подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием перечня недостатков выполненных работ и сроков их устранения (далее – уведомление об отказе от приемки) (пункт 1.2 приложения № 5).

В соответствии с пунктом 1.3 приложения № 5 в случае получения от заказчика уведомления об отказе от приемки работ, подрядчик обязуется устранить недостатки выполненных работ в течение 10 рабочих дней с даты получения подрядчиком от заказчика уведомления об отказе от приемки, если иной срок не будет установлен заказчиком в уведомлении об отказе от приемки.

Факт сдачи подрядчиком и приемки заказчиком объемов работ, выполненных в соответствующем этапе работ, подтверждается актом о приемке выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями обеих сторон (пункт 1.4 приложения № 5).

В силу пункта 1.5 приложения № 5 после завершения подрядчиком работ по договору в целом, стороны осуществляют сдачу-приемку результатов выполненных работ по договору (далее – окончательная приемка), в порядке, предусмотрен пунктами 1.6-1.10 настоящего приложения.

Факт окончания выполнения работ в целом, факт сдачи подрядчиком результатов выполненных работ по договору в целом заказчику, факт приемки результатов выполненных работ заказчиком, факт исполнения подрядчиком обязательств по договору в полном объеме, подтверждается соответствующим актом, составленным по форме, приведенной в приложении № 6 к договору. Акт о полном исполнении обязательств подписывается на основании полученного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (пункт 1.10 приложения № 5).

Стороны по настоящему договору согласовали, что подрядчик настоящим подтверждает, что ознакомлен со стандартом заказчика СТП СУОТ и ПБ 008 (Система управления охраной труда и промышленной безопасностью. Взаимодействие с подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности), и получил копию данного документа. Подрядчик обязуется соблюдать условия и нести ответственность в соответствии СТП СУOT и ПБ 008. Заказчик обязуется обеспечивать проведение вводного инструктажей по ОТ и ПБ работников подрядчика, выполняющих работы на объекте(ах). Факт проведения инструктажей подтверждается подписями работников подрядчика в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» и «Журнале вводного инструктажа», соответственно. Подрядчик обязуется обеспечить проведение необходимых видов инструктажей (первичного, повторного, внепланового, целевого) на рабочем месте с регистрацией в «Журнале регистрации проведения инструктажа на рабочем месте» (пункт 5.2 приложения № 5).

Пунктом 1.7 договора предусмотрено, что подрядчик обязуется выполнить работы из своих материалов (за исключением материалов заказчика, предоставляемых согласно приложения № 3), включая работы по поставке и монтажу необходимого оборудования, расходные материалы, применяя строительное оборудование, необходимое в ходе производства работ.

Факт передачи заказчиком и приемки подрядчиком материалов, в зависимости от характера материалов, подтверждается либо накладной на отпуск ТМЦ на сторону по форме, утвержденной заказчиком, подписанной уполномоченными представителями сторон либо актом о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15 (утверждена Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7), подписанным уполномоченными представителями сторон (пункт 1.1.5 приложения № 3).

В случае просрочки подрядчиком на срок свыше 5 календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным графиком выполнения работ (приложение № 2), подрядчик обязуется уплатить заказчику, по требованию заказчика, пеню в размере 0,1% от приблизительной стоимости работ (пункт 3 приложения № 1), за каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% от приблизительной стоимости работ (пункт 6.1 приложения № 5).

Согласно пункту 6.7 приложения № 5 в случае нарушения подрядчиком требований ОТ и ПБ, в том числе требований, указанных в пунктах 5.2, 5.6 настоящего приложения, а также в случае не выполнения подрядчиком соответствующего предписания заказчика об устранении нарушений требований ОТ и ПБ в сроки, установленные соответствующим предписанием, подрядчик обязуется уплатить заказчику, по требованию заказчика, штраф в размере 10 000 руб. за каждое нарушение, при условии предъявления заказчиком счета на оплату штрафа и обоснованной претензии, соответствующей действующим нормам и правилам охраны труда, охраны окружающей среды и промышленной безопасности РФ. Оплата штрафа не освобождает подрядчика от ответственности за соблюдение требований ОТ и ПБ и СП 01-014. В случае повторного нарушения подрядчиком требований, указанных в первом абзаце пункта настоящего приложения, подрядчик обязуется уплачивать заказчику по требованию заказчика штраф в размере 100 000 руб., за каждый выявленный факт.

В соответствии с пунктом 7.1 приложения № 5 заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в том числе по любому из нижеуказанных оснований (являющихся существенными нарушениями подрядчиком условий договора): в случае нарушения подрядчиком более чем на 20 календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от заказчика, сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным графиком выполнения работ (приложение № 2). В случае нарушения подрядчиком при выполнении работ требований действующих в Российской Федерации норм и правил на соответствующие виды работ или отступления подрядчика от условий договора, и не устранения подрядчиком данных нарушений, либо не возврата к соблюдению условий договора в течение 5 календарных дней со дня выявления заказчиком либо соответствующим уполномоченным государственным органом указанных фактов. В случае нарушения подрядчиком два (и более) раза сроков выполнения работ (в том числе промежуточных сроков выполнения работ), установленных графиком выполнения работ (приложение № 2). В случае если заверения подрядчика, указанные в пункте 1.6 договора, не соответствуют действительности, и/или подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее, и/или подрядчик лишается допусков (лицензий) на выполнение работ (происходит аннулирование и/или окончание их срока действия).

Об отказе от исполнения договора заказчик, в срок не позднее 10 календарных дней до даты расторжения договора, обязуется письменно уведомить подрядчика, с указанием в уведомлении даты окончания выполнения подрядчиком работ по договору и даты расторжения договора (пункт 7.2 приложения № 5). 

Пунктом 7.3 приложения № 5 определено, что в случае отказа заказчика от исполнения договора, обязательства сторон по договору прекращаются, за исключением нижеследующих обязательств: подрядчик обязуется сдать заказчику результаты работ, фактически выполненных подрядчиком по договору до даты окончания выполнения подрядчиком работ по договору, указанной заказчиком в уведомлении (пункт 7.2 настоящего приложения), в порядке, аналогичном предусмотренному разделом 1 настоящего приложения. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты фактически выполненных подрядчиком работ на дату расторжения договора. Окончательная общая стоимость фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ определяется в порядке, предусмотренном пунктом 4 приложения № 1. Сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику, определяется как разница между окончательной общей стоимостью фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ, и: суммой денежных средств, уплаченных заказчиком в соответствии с условиями договора, суммами платежей, подлежащих уплате подрядчиком заказчику, в соответствии с условиями договора, в том числе, включая, но не ограничиваясь, суммы штрафов и пеней, предусмотренных настоящим приложением, требования об уплате которых направлены заказчиком подрядчику, но не уплачены подрядчиком, суммами денежных средств, подлежащих уплате подрядчиком заказчику в соответствии с условиями приложения № 4. В случае нарушения подрядчиком, более чем на 15 рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приемке объемов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего приложения (полностью или частично), заказчик вправе в одностороннем порядке определить окончательную общую стоимость фактически выполненных подрядчиком работ. 

Во исполнение условий названной сделки заказчик перечислил подрядчику (с учетом перечислений в пользу третьих лиц по поручениям ответчика) аванс на общую сумму 173 359 099 руб. 22 коп., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

ООО «СК «Универсал», в рамках, взятых на себя обязательств, выполнило работы по договору частично – на общую сумму 130 177 546 руб. 83 коп., что подтверждается представленными в материалы дела подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ формы             КС-2, а также составленным заказчиком в одностороннем порядке актом о приемке выполненных работ формы КС-2 от 31.07.2023 № 14, уведомлением о приемке выполненных работ в оставшейся части от 24.08.2023 № АГМК-8/06-1359 (ввиду того, что ответчик уклонился от сдачи работ в оставшейся части).

На протяжении всего периода исполнения своих обязательств, подрядчиком систематически нарушались согласованные сторонами сроки выполнения определенных работ, к согласованному сторонами конечному сроку выполнения работ обязательства в полном объеме выполнены не были.

В связи с тем, что подрядчик прекратил выполнение работ по договору с начала мая 2023 года, заказчик в одностороннем порядке определил окончательный общий объем фактически выполненных подрядчиком работ, и направил в адрес последнего следующие документы: письмо от 26.05.2023 № АГМК-8/06-831, подтверждающее направление справки о стоимости выполненных работ и затрат от 31.05.2023 № 13 и акта о приемке выполненных работ от 31.05.2023 № 13; уведомление об односторонней приемке фактически выполненных работ от 24.08.2023 № АГМК-8/06-1359, подтверждающее направление справки о стоимости выполненных работ и затрат от 31.07.2023 № 14 и акта о приемке выполненных работ от 31.07.2023 № 14.

В процессе исполнения взятых на себя обязательств в рамках заключенного договора, заказчиком переданы подрядчику материалы для выполнения работ на общую сумму 11 890 994 руб. 04 коп., что подтверждается представленными в материалы дела накладными на отпуск товарно-материальных ценностей на сторону.

Подрядчик за все время исполнения своих обязательств предоставил заказчику отчеты об использовании давальческого материала на сумму 8 162 718 руб. 03 коп., в оставшиеся части материалы использованы не были, заказчику не возвращены, в связи с чем заказчик односторонним уведомлением от 26.09.2023 № АГМК-8/06-1562 произвел фактические списание и расчет стоимости оставшихся у подрядчика материалов с учетом принятых им в одностороннем порядке работ надлежащего качества.

Далее заказчик 07.12.2023 на адрес электронной почты подрядчика, а также почтовым отправлением 08.12.2023, направил уведомление                        от 07.12.2023 № АГМК-8/06-1976 об одностороннем отказе от дальнейшего действия представленного договора. 

  В уведомлении заказчик указал, что по состоянию на 07.12.2023 работы по спорному договору подрядчиком в полном объеме не выполнены, выполнение подрядчиком работ фактически прекращено. С учетом изложенного заказчик в одностороннем порядке отказался от его дальнейшего исполнения, уведомил подрядчика о его расторжении                          с 18.12.2023, а также предложил подрядчику возвратить сумму неосновательного обогащения в размере фактически превышающем сумму выполненных работ, оплатить неустойку за просрочку выполнения работ, стоимость неиспользованных в работе давальческих материалов, штрафы, начисленные подрядчику за нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности.

Кроме того в течение действия договора, подрядчиком также нарушались требования организации охраны труда и промышленной безопасности, в связи с чем в адрес подрядчика направлялись претензии с требованием об оплате штрафов за выявленные нарушения: от 22.07.2022             № АГМК-8/09-1094 на сумму 70 000 руб.; от 15.12.2022 № АГМК-8/09-1878 на сумму 10 000 руб.; от 15.12.2022 № АГМК-8/09-1880 на сумму 10 000 руб.; от 15.12.2022 № АГМК-8/09-1881 на сумму 10 000 руб.; от 15.12.2022                    № АГМК-8/09-1882 на сумму 10 000 руб.

Указанные требования ответчиком добровольно не удовлетворены, произведенные заказчиком расчеты по существу не оспорены.

Невозможность разрешить возникшие между сторонами спора разногласия явилась причиной обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные сторонами доказательства с учетом пояснений представителей сторон, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ предусмотрено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720 ГК РФ), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат (статья 729 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.                        По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (пункт 3 статьи 708 ГК РФ).

Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

В пункте 1 статьи 450 ГК РФ установлено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ).

Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 4 статьи 450.1 ГК РФ).

В силу положений статьи 450.1 ГК РФ, с учетом разъяснений, приведенных в пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ             от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», только правомерный односторонний отказ от исполнения договорного обязательства полностью или частично влечет расторжение или изменение договора соответственно. 

Согласно пункту 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (абзац второй пункта 4 статьи 453 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 этого кодекса.

Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех условий: если имело место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение произведено за счет другого лица (за чужой счет); отсутствие правовых оснований, а именно приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть происходит неосновательно. 

Недоказанность хотя бы одного из названных условий влечет за собой отказ в удовлетворении исковых требований.

Исходя из системного толкования указанных норм, при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась, в частности, в случае истребования в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода (пункт 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

Поскольку в случае допустимого законом или договором одностороннего отказа стороны договора от его исполнения договор считается расторгнутым (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ), то по смыслу пункта 4 статьи 1, статьи 10, пункта 3 статьи 307, пункта 4 статьи 450, статьи 1102, подпункта 3 статьи 1103 ГК РФ, пункта 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» сторона, получившая предоставление в ходе исполнения договора, и не предоставившая эквивалентное встречное исполнение, обязана возвратить излишне полученное в натуре или компенсировать его стоимость.

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле,обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как наоснование своих требований и возражений, а часть 2 статьи 9 АПК РФпредусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступленияпоследствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В данном случае материалами дела подтверждается, что подрядчиком работы по договору выполнены частично, с нарушением сроков, согласованных сторонами.

Указанные обстоятельства ответчик по существу не отрицал, о фальсификации представленных истцом доказательств в установленном законом порядке не заявил, иным образом их содержание, а равно факт выполнения работ объеме, указанном в исковом заявлении, соответствующих условиям договора не оспорил.

В рассматриваемом случае заказчик по истечении значительного периода времени после окончания срока для выполнения работ, фактически утратив интерес к дальнейшему продолжению соответствующих правоотношений, правомерно в одностороннем порядке отказался от исполнения заключенного с подрядчиком договора в соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, следовательно, с момента получения ответчиком указанного уведомления ранее заключенный между сторонами договор прекратил свое действие 18.12.2023.

При этом суд отмечает, что односторонний отказ заказчика от дальнейшего действия названной сделки ООО «СК «Универсал» в установленном законом порядке не оспорило, о фальсификации представленных в материалы дела доказательств не заявило.

В данном случае материалами дела подтверждается, что                            ООО «СК «Универсал» получило аванс на сумму 173 359 099 руб. 22 коп., при этом, работы им выполнены на сумму 130 177 546 руб. 83 коп. Вследствие чего, на стороне ответчика возникло неосновательное обогащение в размере 43 181 552 руб. 39 коп.

Доказательств какого-либо встречного предоставления в пользу                ООО «АГМК» на указанную сумму подрядчиком в материалы настоящего дела представлено не было, а равно не подтверждено добровольное возвращение заказчику указанных денежных средств, в связи с чем, соответствующее требование последнего признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 19.12.2023                  по день фактичекской оплаты неосновательного обогащения в размере                    43 181 552 руб. 39 коп.

Согласно пункту 1 статьи 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств (пункт 2 статьи 1107 ГК РФ).

Так, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (пункт 1 статьи 395 ГК РФ).

При этом, проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

Поскольку до настоящего момента ответчиком не представлены возвращения возникшего на его стороне неосновательного обогащения, требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами до даты фактичекской его оплаты также подлежит удовлетворению.

Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору, суд пришел к следующим выводам.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Учитывая установленный судом выше факт просрочки исполнения ответчиком обязательства по выполнению работ в согласованные сторонами сроки, суд полагает, что в данном случае имеются достаточные правовые основания для привлечения ООО «СК «Универсал» к договорной ответственности (пункт 6.1 приложения № 5 к договору) в размере 0,1%                от приблизительной стоимости работ.

Проверив расчет пени, произведенный истцом, суд признает его верным, соответствующим условиям заключенного между сторонами договора, в связи с чем, констатирует правомерность соответствующих требований о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору в размере определенном истцом. 

Также ООО «АГМК» заявило требование о взыскании с                              ООО «СК «Универсал» стоимости невозвращенных давальческих материалов в размере 3 728 276 руб. 01 коп.

В соответствии с пунктом 1 статьи 713 ГК РФ подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

Статьей 714 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

В соответствии со статьей 728 ГК РФ в случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

В данном случае представленными в материалы настоящего дела доказательствами подтверждается факт неосновательного обогащения подрядчика в размере 3 728 276 руб. 01 коп., составляющих стоимость невозвращенных заказчику и неиспользованных по назначению материалов. 

Доказательств иного материалы настоящего дела не содержат.

При изложенных обстоятельствах соответствующее требование истца о взыскании стоимости материалов также подлежит удовлетворению в указанном размере.

Рассмотрев требования истца о взыскании с ответчика штрафов за нарушения охраны труда и промышленной безопасности в размере                 110 000 руб., суд признает их также обоснованными с учетом положений статей 329, 330 ГК РФ, а также представленных в материалы дела доказательств (предписаний, подписанных представителем ответчика без возражений, фиксирующих выявленные нарушения), которыми с достаточной степенью достоверности подтверждаются факты допущенных подрядчиком нарушений.

Указанные обстоятельства ответчик по существу не отрицал,                         о фальсификации представленных истцом доказательств в установленном законом порядке не заявил, иным образом их содержание, а равно факты допущенных нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности не оспорил.

Принимая во внимание изложенное, суд констатирует в данном случае наличие достаточных правовых оснований для привлечения подрядчика к договорной ответственности предусмотренной пунктом 6.7 приложения № 5.

Расчет начисленных истцом штрафов произведенных истцом в соответствии с условиями ранее действовавшего между сторонами договора, судом проверен и признан арифметически верным.

При изложенных обстоятельствах требования истца о взыскании с ответчика штрафов за нарушение охраны труда и промышленной безопасности в размере 110 000 руб. также подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на ответчика с учетом итогового результата рассмотрения настоящего дела и положений статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Универсал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Амурский гидрометаллический комбинат» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неосновательное обогащение в размере 43 181 552 руб. 39 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 19.12.2023 по день фактичекской оплаты неосновательного обогащения в размере 43 181 552 руб. 39 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору от 29.06.2021 № АГМК 17(01-1-1216) в размере 4 364 873 руб. 66 коп., стоимость невозвращённых давальческих материалов в размере 3 728 276 руб. 01 коп., штрафы за нарушения охраны труда и промышленной безопасности в размере 110 000 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в сумме 200 000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                            К.А. Полегкий