Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №  А50-28788/2017

27 ноября  2017 года

г. Пермь

Резолютивная часть решения оглашена 20 ноября  2017 года.

Решение в полном объеме изготовлено 27 ноября  2017 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лоренц М.Х.

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ИнтеллектСтрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 614010, 

<

...>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Профи-Строй" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 614010, 

<

...>)

о взыскании задолженности в размере 1 683 156 руб. 72 коп.

при участии:

от истца: ФИО1, доверенность от 03.11.2017 (сроком по 31.12.2017), паспорт;

от ответчика: не явился, извещен;

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтеллектСтрой" (Истец)  обратилось с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Стройлайн" (Ответчик) 1 683 156 руб. 72 коп. задолженности по договору строительного подряда №68/К179/Б8 от 01.02.2017г. 

Определением от 05.10.2017 произведена смена наименования ответчика в порядке ст. 48 АПК РФ с ООО «Стройлайн» на ООО «Профи-Строй».

Ответчик  отзыва на иск не представил, о времени и месте судебного разбирательства по делу уведомлен надлежащим образом, в силу ст. 123, п.п.1,3 ст. 156 АПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело по существу в  отсутствие ответчика и его отзыва на иск.

Исследовав материалы дела, пояснения истца,  суд полагает исковые требования   обоснованными и   подлежащими удовлетворению.

01.02.2017 года между ООО «Стройлайн» (Генподрядчик) и ООО «ИнтеллектСтрой» (Подрядчик) заключен договор подряда №68/К179/Б8, согласно которому Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу и пусконаладке внутренних инженерных систем на объекте: «Застройка квартала №179 по адресу: 

<

...>. Блок 8», согласно проектной документации, Локальными сметными расчетами №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Расчета договорной цены, а Генподрядчик принимает надлежащим образом выполненные работы и оплачивает их на условиях, предусмотренным Договором (п.1.1. договора).

Начало выполнения работ по договору – 01.04.2017, окончание работ – 30.08.2017 определены в п.5.1. договора.

Сроки выполнения этапов работ предусматриваются сторонами, в Графике производства работ (Приложение №3 к договору).

В течение пятнадцати дней со дня заключения настоящего договора Подрядчик представляет Генподрядчику для согласования и подписания детальный График производства работ на полный объем с учетом сроков начала и окончания работ, установленных договором (приложение № 3 к договору), сроков выполнения видов/этапов работ, а также (по необходимости) сроков выполнения совмещенных работ (п.5.2. договора).

Стоимость и перечень работ определены в разделе 2 договора и  устанавливаются согласно расчету договорной цены (приложение №1 к договору) и составляет 15 918 771 руб. 49 коп., в том числе НДС 18%.

Договорная цена включает полный комплекс работ и затрат, необходимый для выполнения работ по настоящему договору, а также стоимость материалов и инструментов, необходимых для выполнения работ (п. 2.3.).

Объемы выполненных работ ежемесячно оформляются актами формы КС-2 и КС-3 (п.2.4. договора).

Согласно п.3.1.1. договора, подрядчик два раза в месяц не позднее 13 и 23 числа расчетного месяца передает Генподрядчику формы КС-2, КС-3 и Исполнительную документацию (в 5-ти экземплярах в печатном виде и в одном экземпляре на стандартном электронном носителе в виде электронного документа в редактируемом (*.doc, *.dwg) и нередактируем ом формате (*,pdf, *.tif или проч.)), которые отражают объем и стоимость фактически выполненных Подрядчиком Подрядных работ. В передаваемой Генподрядчику для рассмотрения и подписания форме КС-3 Подрядчик отражает суммы Удержаний, как это определено в п. 3.3 Договора.

Одновременно с формами КС-2 и КС-3 Подрядчик представляет Генподрядчику соответствующие счета и счета-фактуры на оплату выполненных работ, оформленные в установленномЗаконодательством РФ порядке (п.3.1.5. договора).

В соответствии с пунктом 3.2. договора, генподрядчик оплачивает выполненные работы в течение двадцати пяти рабочих дней с момента наступления последнего из событий:подписания Генподрядчиком форм КС-2 и КС-3,предоставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры,предоставления Подрядчиком Исполнительной документации. 

Платежи по Договору производятся на расчетный счет Подрядчика.

Оплата счетов производится в безналичной форме в рублях РФ. Платеж

считается совершенным в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Генподрядчика.

Генподрядчик вправе возложить исполнение своих обязательств по оплате работ по Договору на третье лицо при условии письменного уведомления об этом Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан принять такое исполнение в полном объёме и без возражений (п.3.5. договора).

Гарантийный срок выполненных работ (результата работ) устанавливается в пять лет с момента ввода объекта в эксплуатацию, гарантийный срок используемых при выполнении работ материалов не может превышать гарантийного срока завода-изготовителя таких материалов с момента ввода объекта в эксплуатацию. Если в период гарантийного срока на выполненные работы (результат работ) по настоящему договору обнаружатся дефекты и недостатки работ подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, указанные генподрядчиком либо, по выбору генподрядчика, компенсировать расходы генподрядчика по устранению дефектов (п.6.1. договора).

В случае, когда генподрядчик в ходе выполнения подрядчиком работ не удовлетворён их ходом и/или качеством, в том числе используемыми материалами, он излагает свои претензии и замечания в журнале производства работ и даёт предписание к устранению допущенных подрядчиком нарушений с указанием сроков для их устранения. Предписание генподрядчика обязательно для исполнения подрядчиком (п.7.1. договора).

Подрядчик не менее чем за 24 часа должен уведомить Генподрядчика о сдаче-приемке скрытых работ, испытаний и выполненных работ.По отдельным видам ответственных конструкций и систем составляются акты промежуточной приёмки и/или испытаний (п.п. 7.2.,7.3. договора).

Для осуществления сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан представить Генподрядчику: акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 (ежемесячно два раза в месяц); справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (ежемесячно два раза в месяц);  полный комплект исполнительной документации на выполненный объем работ; счет-фактуру (ежемесячно на сумму по КС-3, два раза в месяц) (п.7.6. договора).

Генподрядчик производит приемку выполненных работ в течение двенадцати  рабочих дней с момента передачи Подрядчиком документации в соответствие с п. 7.6. настоящего договора (п.7.7. договора).

Приемка работ, выполненных Подрядчиком в соответствующем месяце или периоде, предусмотренном графиком производства работ, оформляется двусторонними документами (КС-2, КС-3), подписываемыми Подрядчиком и Генподрядчиком.

Приемка-передача полного комплекса работ оформляется сторонами в виде Окончательного акта выполненных работ. До подписания сторонами окончательного акта выполненных работ Подрядчик несет риск возможного разрушения или повреждения материалов или работ, в том числе, принятых Генподрядчиком в соответствующем месяце/периоде по актам КС-2 и КС-3 (п.7.8. договора).

Сложившиеся между сторонами в рамках договора отношения регулируются положениями Гражданского кодекса РФ о подряде.

Статья 702 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 2 ст. 720 Гражданского кодекса РФ доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ.

Согласно п.1 ст.711 Гражданского кодекса РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Факт выполнения работ по договору Истцом подтверждается  справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.03.2017, №2 от 15.04.2017, №3 от 30.04.2017, №4 от 15.05.2017, №5 от 31.05.2017, №6 от 15.06.2017, №7 от 30.06.2017; актами о приемке выполненных работ №6-1 от 31.03.2017; №4-1, №6-2, №7-1, №9-1, №10-1 от 15.04.2017; №6-3, №3-1, №4-2, №7-2, №9-2, №10-2 от 30.04.2017;  №1-1, №3-2, №5-1, №6-4, №7-3, от 15.05.2017; №4-3, №6-5, №7-4, №8-1, №9-3, 12-1 от 31.05.2017; №6-6, №7-5, №8-2 от 15.06.2017; №7-6, №6-7 от 30.06.2017 подписанных сторонами.

Согласно указанным  документам  Истец выполнил, а Ответчик принял выполненные Истцом по договору работы без каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам исполнения. 

В этой связи в соответствии со ст.ст. 309, 310,  702, 711 ГК РФ, условиями договора на Заказчика возлагается обязанность по оплате принятых работ.

Выполненные истцом работы были частично оплачены ответчиком (платежные поручения № 1111 от 05.05.2017 г. на сумму 148571,73, № 1193 от 23.05.2017 г. на сумму 463 215,70, № 1329 от 13.06.2017 г. на сумму 500000 руб., № 1353 от 19.06.2017 г. на сумму 486 591,91, № 14223 от 04.07.2017 (от ООО «Рекон Строй») на сумму 759213,60, № 1647 от 26.07.2017 г. на сумму 14 325,59, № 1642 от 26.07.2017 г. на сумму 926 489,58, всего на сумму 3 298 408,11 руб.

Как следует из искового заявления, задолженность Ответчика за выполненные Истцом подрядные работы, с учетом частичной оплаты, составляет 1 683 56 руб.72 коп.

Истец 08.08.2017 направил в адрес ответчика претензию №08/08-1п  с требованием об оплате задолженности, которая оставлена без внимания.

В силу ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Поскольку доказательств оплаты принятых работ Ответчиком суду, в нарушение ст. 65 АПК РФ, не представлено, требования истца подлежат удовлетворению на основании ст.ст.  309, 310, 702, 711  ГК РФ, условий договора.

Следует отметить, что в силу пункта 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований и возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования  удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Профи-Строй" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ИнтеллектСтрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 683 156  руб. 72 коп. основного долга, 29 832 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Выдать ООО «ИнтеллектСтрой» справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной государственной пошлины в размере 2 399 руб. 00 коп. по платежному поручению № 1157 от 23.08.2017г.,  оригинал платежного поручения оставить в деле.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

     СудьяО.ФИО2