АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-9121/2024 

Р Е Ш Е Н И Е  именем Российской Федерации (резолютивная часть) 

02 октября 2024 г. г. Кемерово  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Тимохина В.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шубиной И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании с участием 

представителя истца по доверенности от 12.07.2024 г. – ФИО1,  представителя ответчика по доверенности от 24.01.2024 г. ФИО2 (онлайн),  

представителя третьего лица (Администрации Беловского городского округа) по  

доверенности от 07.08.2024 г. – ФИО1, дело по исковому заявлению 

муниципального казенного учреждения "Служба заказчика ЖКХ", г. Белово  

Кемеровской области – Кузбасса, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> 

к закрытому акционерному обществу Проектно-изыскательский институт  

"Алтайводпроект", г. Барнаул Алтайского края, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> 

о взыскании 1 163 674,47 руб. пени по муниципальному контракту № 994-ЮР от  

06.03.2023 г. за период 02.07.2023 г. – 03.05.2024 г. (с учетом изменения исковых  

требований в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации) 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  

спора: 

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса,  

ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>; 

Государственное автономное учреждение «Управление государственной  

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Кузбасса»,  

ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>; 

Администрация Беловского городского округа, ОГРН: 

<

***>,  

ИНН: 

<

***> 

Руководствуясь статьями 330, 405, 406, 708, 759 Гражданского кодекса Российской  Федерации, статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-Ф3 "О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд", статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с закрытого акционерного общества Проектно-изыскательский институт  "Алтайводпроект" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу муниципального  казенного учреждения "Служба заказчика ЖКХ" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) 548 070,85 руб. пени по Муниципальному контракту № 994-ЮР от  06.03.2023 г. за период 08.11.2023 г. - 03.05.2024 г.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с закрытого акционерного общества Проектно-изыскательский институт  "Алтайводпроект" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального  бюджета 13 961 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный  суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья В.В. Тимохин