АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

17 июня 2022 года

Дело № А33-31827/2021

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 09 июня 2022 года.

В полном объёме решение изготовлено 17 июня 2022 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мозольковой Л.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального унитарного предприятия города Абакана "Водоканал" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) Республика Хакасия, г. Абакан

к Федеральному государственному унитарному предприятию "Главное военно-строительное управление № 9" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) г. Железногорск

о взыскании задолженности,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика: Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Москва), 

при участии в судебном заседании:

от истца посредством сервиса «Онлайн-заседания» информационной системы  «Картотека арбитражных дел»: ФИО1, представителя по доверенности от 17.11.2021 № 52, 

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 23.05.2022 № 5/1-90, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3, 

установил:

муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал" (далее – истец, МУП города Абакана «Водоканал») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к Федеральному государственному унитарному предприятию "Главное военно-строительное управление № 9" (далее – ответчик, ФГУП «ГВСУ № 9) о взыскании задолженности по договорам от 17.10.2017 № 303К о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, № 303В о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения в общем размере 2 363 333,62 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 15.12.2021 возбуждено производство по делу.

Определением арбитражного суда от 31.03.2022 к участию в деле привлечено третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (далее - ФКП «УЗКС МО РФ»), судебное разбирательство по делу отложено на 06.06.2022 в 15 час. 40 мин.

Третье лицо, извещённое надлежащим образом, в судебное заседание не явилось. В соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителя третьего лица.

Представители истца поддержал иск в полном объеме.

  Представитель ответчика пояснил, что исковые требования не оспаривает.

В судебном заседании в соответствии со статьёй 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 12 час. 00 мин. 09.06.2022.  Сведения о перерыве размещены в разделе "Картотека арбитражных дел" официального сайта Арбитражные суды Российской Федерации Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

Представитель ответчика представил в материалы дела ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью ознакомления с материалами дела. 

Рассмотрев ходатайство ответчика об отложении судебного заседания, арбитражный суд пришел к выводу об отсутствие оснований для его удовлетворения, учитывая следующее.

Согласно статье 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства.

Пунктом 1 названной процессуальной нормы предусмотрено безусловное отложение судебного процесса только в двух случаях: когда это прямо предусмотрено настоящим Кодексом и в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о месте и времени судебного разбирательства.

Из изложенных правовых норм следует, что суд по своему усмотрению с учетом характера и сложности дела, представленных стороной доказательств решает вопрос о возможности рассмотрения дела по существу либо отложении судебного разбирательства, то есть отложение дела является правом суда, а не обязанностью. 

Суд не находит оснований для отложения судебного заседания и считает возможным рассмотреть дело по имеющимся в нем доказательствам, поскольку причины, указанные в ходатайстве об отложении судебного заседания являются неуважительными.

В силу части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Ответчик имел возможность ознакомиться с материалами дела заранее, так как исковое заявление принято к производству суда определением от 15.12.2021, копия определения от 15.12.2021 получена ответчиком, определениями от 03.02.2022, от 31.03.2022 судебное разбирательство по делу откладывалось, отзыв ответчиком не представлен.

Учитывая изложенное, отложение судебного разбирательства приведет к необоснованному затягиванию процесса, что, с одной стороны, не соответствует принципу процессуальной экономии, а с другой, повлечет увеличение периода правовой неопределенности по спорному вопросу и может нарушить права и законные интересы истца на получение и исполнение судебного акта в разумный срок.

На основании изложенного, а также принимая во внимание установленные статьями  134, 152 и 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сроки рассмотрения дела по существу, наличие у ответчика возможности заблаговременно подготовиться к судебному заседанию, суд вынес протокольное определение об отказе удовлетворении заявленного ходатайства ответчика об отложении судебного разбирательства. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

17.10.2017 между истцом (организация водопроводно-канализационного хозяйства),  ФКП «УЗКС МО РФ» (заказчик) и ответчиком (плательщик) заключены договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения № 303В, к централизованной системе водоотведения № 303К в редакции дополнительных соглашений  от 18.12.2018.

В соответствии с пунктами 1 договоров №№ 303В, 303К от 17.10.2017 организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения, холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и, в соответствии с условиями на подключение (технологическое присоединение) (далее - условия подключения) объекта, согласно приложению №1, подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, холодного водоснабжения, плательщик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение), заказчик выполнить технические условияподключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодноговодоснабжения, к централизованной системе водоотведения.

Предметом договоров №№ 303В, 303К от 17.10.2017 являлось подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта – «Дополнительные объекты на территории военного городка№20» в том числе: казарма на 400 человек со штабом, комплексное здание штабов без хранения с помещениями для размещения личного состава, объединенный медицинский пункт на 55 коек, учебный корпус на 68 классов, УСТК «СТАРТ», контрольно-пропускной пункт (ПМЖДБР), комплексное здание (штаб, казарма) на 300 человек, пункт обогрева, храм, командный пункт, контрольно-пропускной пункт (ЗРП), ПТОР на 8 м/м, пожарное депо» с целевым назначением: для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

23.03.2020 между истцом (организация водопроводно-канализационного хозяйства),  ФКП «УЗКС МО РФ» (заказчик) и ответчиком (плательщик) подписаны акты о подключении (технологическом присоединении) объекта, согласно которым организация водопроводно-канализационного хозяйства, выполнила мероприятия, предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», договором о подключении, включая осуществление фактического подключения объекта к централизованной системе водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Согласно дополнительному соглашению от 18.12.2018 к договору № 303В от 17.10.2017 заказчик обязан внести плату в размере 7 215 428 руб. в следующем порядке: 2 483 309,80 руб. (35% полной платы за подключение (технологическое присоединение) на дату заключения договора) вносится в течение 15 дней с даты заключения договора; 3 547 585,44 руб. (50% полной платы за подключение (технологическое присоединение) на дату заключения договора) вносится в течение 90 дней с даты заключения договора, но не позднее даты фактического подключения; 1 184 532,76 руб. вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении).

Согласно дополнительному соглашению от 18.12.2018 к договору № 303К от 17.10.2017 заказчик обязан внести плату в размере 7 180 512 руб. в следующем порядке: 2 471 293,18 руб. (35% полной платы за подключение (технологическое присоединение) на дату заключения договора) вносится в течение 15 дней с даты заключения договора; 3 530 418,82 руб. (50% полной платы за подключение (технологическое присоединение) на дату заключения договора) вносится в течение 90 дней с даты заключения договора, но не позднее даты фактического подключения; 1 178 800,86 руб. вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении).

Из материалов дела следует, что ответчик платежным поручением  от 26.06.2019 № 3460 на сумму 6 030 895,24 руб. произвел перечисление истцу платы по договору № 303В от 17.10.2017, платежным поручением  от 25.06.2019 № 3459 на сумму 6 001 712 руб. произвел перечисление истцу платы по договору № 303К от 17.10.2017.

Таким образом, общий размер задолженности ответчика составил 2 363 333,62 руб., в том числе: по договору № 303В – 1 184 532,76 руб., по договору № 303К – 1 178 800,86 руб.

Поскольку ответчик не произвел перечисление истцу платы за подключение к сетям водоотведения и водоснабжения в полном объеме, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Ответчик отзыв на исковое заявление с возражениями в порядке, предусмотренном статьёй 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не представил, в связи с чем, дело рассматривается по имеющимся доказательствам.  

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как следует из материалов дела, между истцом (организация водопроводно-канализационного хозяйства) и ответчиком (заказчик) заключены договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения от 17.10.2017 №№ 303В, 303К, в соответствии с условиями которых организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения, холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и, в соответствии с условиями на подключение (технологическое присоединение) (далее - условия подключения) объекта, согласно приложению №1, подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, холодного водоснабжения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить условия подключения.

 Правоотношения, возникающие в связи с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении).

В силу части 1 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Частью 3 статьи 18 Закона о водоснабжении установлено, что договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения является публичным для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Частью 13 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении предусмотрено, что плата за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В силу части 15 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении договоры о подключении к централизованным системам водоснабжения, договоры о подключении к централизованным системам водоотведения заключаются в соответствии с типовым договором о подключении к централизованной системе водоснабжения, типовым договором о подключении к централизованной системе водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок заключения и исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения детально конкретизирован в пунктах 86 - 106 Правил № 644.

В соответствии с пунктом 18 Правил № 644 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, составленного в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) типовым договором о подключении к централизованной системе водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Типовые договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645.

В пункт 13 статьи 18 Закона о водоснабжении плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. В случае, если объем запрашиваемой заявителем нагрузки в целях обеспечения водоснабжения и (или) водоотведения объекта капитального строительства заявителя превышает устанавливаемый в порядке, утвержденным Правительством Российской Федерации, предельный уровень нагрузки, определенный в виде числового значения или в виде доли от общей мощности централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включает в себя затраты на создание водопроводных и (или) канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения (объектов такой системы) до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, за исключением расходов заявителя на создание этих сетей и объектов и расходов, предусмотренных на создание этих сетей и объектов за счет других источников финансирования инвестиционной программы, либо средств, полученных на создание этих сетей и объектов обеспечения за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Точка подключения (технологического присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на границе земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства заявителя.

Согласно пункту 98 Правил № 644 внесение заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении осуществляется в следующем порядке:

а) 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

б) 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения);

в) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.

В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя и организацией водопроводно-канализационного хозяйства выполнены все необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения мероприятия, оставшаяся доля платы вносится заявителем не позднее срока подключения (технологического присоединения) по договору о подключении.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на лиц, участвующих в деле возлагается обязанность доказывания обстоятельств, являющихся основанием их требований и возражений и имеющих значение для рассмотрения дела.

Факт исполнения истцом обязательств по договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения от 17.10.2017 №№ 303В, 303К подтверждается материалами дела (актами о подключении (технологическом присоединении) объекта от 23.03.2020, согласно которым истец, выполнил мероприятия, предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», договором о подключении, включая осуществление фактического подключения объекта к централизованной системе водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Согласно дополнительному соглашению от 18.12.2018 к договору № 303В от 17.10.2017 заказчик обязан внести плату в размере 7 215 428 руб. в следующем порядке: 2 483 309,80 руб. (35% полной платы за подключение (технологическое присоединение) на дату заключения договора) вносится в течение 15 дней с даты заключения договора; 3 547 585,44 руб. (50% полной платы за подключение (технологическое присоединение) на дату заключения договора) вносится в течение 90 дней с даты заключения договора, но не позднее даты фактического подключения; 1 184 532,76 руб. вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении).

Согласно дополнительному соглашению от 18.12.2018 к договору № 303К от 17.10.2017 заказчик обязан внести плату в размере 7 180 512 руб. в следующем порядке: 2 471 293,18 руб. (35% полной платы за подключение (технологическое присоединение) на дату заключения договора) вносится в течение 15 дней с даты заключения договора; 3 530 418,82 руб. (50% полной платы за подключение (технологическое присоединение) на дату заключения договора) вносится в течение 90 дней с даты заключения договора, но не позднее даты фактического подключения; 1 178 800,86 руб. вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении).

Из материалов дела следует, что ответчик платежным поручением  от 26.06.2019 № 3460 на сумму 6 030 895,24 руб. произвел перечисление истцу платы по договору № 303В от 17.10.2017, платежным поручением  от 25.06.2019 № 3459 на сумму 6 001 712 руб. произвел перечисление истцу платы по договору № 303К от 17.10.2017.

Таким образом, общий размер задолженности ответчика составил 2 363 333,62 руб., в том числе: по договору № 303В – 1 184 532,76 руб., по договору № 303К – 1 178 800,86 руб.

Доказательств, подтверждающих надлежащее исполнение ответчиком возникших у него из договоров обязательств в части внесения платы за подключение к сетям водоотведения, водоснабжения объекта - «Дополнительные объекты на территории военного городка№20» в том числе: казарма на 400 человек со штабом, комплексное здание штабов без хранения с помещениями для размещения личного состава, объединенный медицинский пункт на 55 коек, учебный корпус на 68 классов, УСТК «СТАРТ», контрольно-пропускной пункт (ПМЖДБР), комплексное здание (штаб, казарма) на 300 человек, пункт обогрева, храм, командный пункт, контрольно-пропускной пункт (ЗРП), ПТОР на 8 м/м, пожарное депо» с целевым назначением: для нужд Министерства обороны Российской Федерации по договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения от 17.10.2017 №№ 303В, 303К в общем размере  2 363 333,62 руб., в материалы дела не представлено.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

На основании изложенного, учитывая, что факт исполнения истцом обязательств по договорам подтвержден, доказательства оплаты указанной суммы долга ответчиком не представлены, требование истца о взыскании задолженности в заявленном размере является обоснованным.

При указанных обстоятельствах  требование  истца  о  взыскании 2 363 333,62 руб. долга является обоснованным. 

Судом установлено, что определением суда от 10.06.2016 возбуждено дело № А33-13756/2016 о банкротстве Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9». 

Решением от 04.06.2020 должник признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. 16.09.2020 вынесена резолютивная часть определения об утверждении конкурсным управляющим ФГУП «ГВСУ № 9» ФИО4.

В соответствии со статьей 5 Федерального  закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ в целях указанного Федерального закона определено понятие текущих платежей, под которыми понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом. Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.

Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов. Удовлетворение требований кредиторов по текущим платежам в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, производится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Как разъяснено в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 60 новая редакция Закона, определившая права текущих кредиторов, не отменяет общего правила, в соответствии с которым кредиторы по текущим платежам не являются лицами, участвующими в деле о банкротстве, и их требования подлежат предъявлению в суд в общем порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, вне рамок дела о банкротстве (пункты 2 и 3 статьи 5 Закона).

Поскольку задолженность возникла после возбуждения дела о банкротстве ответчика, задолженность в размере 2 363 333,62 руб. является текущей и подлежит взысканию вне рамок дела о банкротстве.

С учетом изложенного, оценки имеющихся в материалах дела доказательств в их совокупности, арбитражный суд считает, что требования  МУП города Абакана «Водоканал» о  взыскании с ответчика задолженности в размере 2 363 333,62 руб. подлежат удовлетворению.

Статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При подаче искового заявления истцом уплачена госпошлина в сумме 34 817 руб. на основании платёжного поручения от 03.12.2021 № 6161.

Учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 34 817 руб.  подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление № 9" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального унитарного предприятия города Абакана "Водоканал" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 363 333.62 руб. долга, 34 817 руб. расходов по оплате госпошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Мозолькова Л.В.